96/2019-6953(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края  г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-17862/2018

г. Хабаровск

21 января 2019 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:  

судьи Дюковой С.И. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Товарищества  собственников жилья «Гайд Парк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  место нахождения: 680000, 

<

...>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Базис ДВ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680000, 

<

...>)  

об обязании устранить недостатки работ 

 Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Иск Товарищества собственников жилья «Гайд Парк» удовлетворить.  

 Обязать ООО «Базис ДВ» безвозмездно устранить строительные  недостатки работ в МКД, расположенном по адресу: 

<

...>, в следующие сроки:  

- в срок с 01.06.2019 г. по 01.07.2019 г.: произвести укладку 

асфальтобетонного покрытия возле трансформаторной подстанции;  

- в срок с 01.05.2019 г. по 01.07.2019 г.: произвести укладку брусчатки  вокруг дома;  

- в срок с 01.06.2019 г. по 01.08.2019 г.: 

1. произвести восстановление декоративной штукатурки со стороны ул.  

Гайдара и двора дома; 

2. произвести гидроизоляцию автопарковки на отметке -6100;  

3. произвести работы по устройству ливневой канализации (в штатном  

режиме отвода сточных вод от МКД) в соответствии с требованиями СП  

32.13330.2012. 

- в срок с 01.05.2019 г. по 01.06.2019 г.: произвести замену мягкого  покрытия, брусчатки на детской площадке.  

- в срок с 01.05.2019 г. по 01.08.2019 г.:  

1. установить сливные трапы над входами в нежилые помещения; 2. установить сегмент алюкобонда декоративной арки 1-го подъезда; 

3. установить ливневую трубу над 1 и 4 подъездами с 12-ти этажной  

пристройки; 

4. установить сегмент алюкобонда декоративной арки 3-го подъезда на  

кровле; 5. устранить течь кровли на техническом этаже над 2-3 подъездами; 

6. установить обшивку парапетов на кровле в соответствии с СП  

17.13330.2017 «Кровля. Актуализированная редакция СНиП П-26-76»; 

7. устранить протекание алюминиевых конструкций балконов  

(квартиры №№ 27,81,94,70,1,32,42,35,73,71,102,63,24,53,92,72,53,24); 

8. устранить протекание балконов подъездов № 2, № 3 путем  

направления уклонов покрытия балконов подъездов № 2, № 3 от стен МКД; 

9. восстановить в тамбурах переходов с лифтового холла на  

лестничные марши подъездов № 2, № 3 штукатурный слой откосов;  

10. произвести замену разрушенной керамической плитки на пандусах  

и крыльцах в подъезды. 

- в срок с 01.02.2019 г. по 01.04.2019 г.:  

1. устранить засор вентиляции в квартирах; 

2. установить фановые стояки канализации на технических этажах 3-го  

и 4-го подъездов в соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод  

и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»; 

3. произвести монтаж канализационных лежаков с контруклонами;  

4. произвести заземление электрощитовых 2-го и 3-го подъездов в  

соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок  

потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №  

6; 

5. произвести работы по проведению вентиляции в нежилых  

помещениях; 

6. произвести работы по проведению вентиляции в санузлах комнат  

консьержа в 3-м и 4-м подъездах; 

7. восстановить работу вентиляции в квартирах №№ 70,  

71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Базис ДВ» в  пользу Товарищества собственников жилья «Гайд Парк» расходы по оплате  госпошлины в сумме 6 000 руб. 00 коп.  

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

 Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

 Судья С.И. Дюкова