АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А57-32687/2023

16 августа 2024 года

город Саратов

 

Резолютивная часть решения оглашена 05 августа 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 16 августа 2024 года.

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Безрукова П.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Закержаевой А.А. (до перерыва), помощником судьи Жерновой Н.Н. (после перерыва), рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального казенного учреждения «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов, 

к обществу с ограниченной ответственностью «МостСервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), с.Новая Усмань, Новоусманский р-н, Воронежская область, 

третье лицо: 

ООО Фирма «Зоринка», г. Саратов 

об обязании,

при участии до перерыва:

от истца – ФИО1, представитель  по доверенности от 20.12.2023, 

от ответчика – представитель не явился, извещен надлежащим образом;         

от третьего лица – представитель не явился, извещен надлежащим образом;   

при участии после перерыва:

от истца – представитель не явился, извещен надлежащим образом;   

от ответчика – представитель не явился, извещен надлежащим образом;   

от третьего лица – представитель не явился, извещен надлежащим образом;        

 

У С Т А Н О В И Л:

В Арбитражный суд Саратовской области обратилось Федеральное казенное учреждение «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» » (далее - ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское», истец) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «МостСервис» (далее - ООО «МостСервис, ответчик) об обязании в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить гарантийные обязательства по следующим государственным контрактам, согласно актам выявленных дефектов:

- № 70 от 18.06.2016, согласно акту №34/22/Р22 от 09.08.2022: выщелачивание бетона по ступеням лестничных сходов, разрушение защитного слоя бетона площадки лестничного схода; трещины по насадке ОК 1, по балкам пролетного строения, трещины в подферменниках ОК 1, шкафных стенках OKI,4; обводнение шкафной стенки протечки через ДШ OKI,4; коррозия опорных металлических листов; выщелачивание бетона верхней грани ригеля; по зубу упора, пролетному строению №3; фасадным блокам, скол по низу ребра ригеля ОП 2, карбонизация бетона по шкафной стенке ОК4; оголение арматуры в местах опирания балок пролетного строения OK 4. Разрушение монолитного укрепления конусов; деградационное разрушение бетона по подферменникам OK1,4; шкафной стенке OK1,4; насадкам OK1,4; открылкам шкафных стенок OKI,4 (искусственные сооружения); разрушение бетона входного телескопического лотка; Размывы в подмостовой зоне у выходной трубы системы водоотвода. Размывы грунта под гасителем водоотводного лотка (регуляционные сооружения).

- № 88 от 22.07.2015, согласно акту №48/22/Р22 от 09.08.2022: коррозия закладных деталей ДШ; водоотводов с проезжей части; разрушение защитного слоя бетона фасадной части балок ПС, открылков шкафных стенок ОК1,4; бетона плит укрепления конуса, выкрашивание бетона на лестничных сходах; выщелачивание бетона по насадкам пролетным строениям; шелушение ЛКП на парапетных блоках, карнизных блоках, пролетных строениях; трещины в плитах пролетных строений, насадкам ОК, ригелям промежуточных опор; отслоение защитного слоя на промежуточных опорах; карбонизация бетона по пролетным строениям и опорам. Разрушение монолитного укрепления конуса ОК1,4; многочисленные трещины на ригеле опоры №2,3; трещины по балкам пролетного строения, насадкам OK1,4. (искусственные сооружения).

- № 104 от 25.08.2015, согласно акту №29/22/Р22 от 09.08.2022: разрушение бетонного покрытия с оголением арматуры околошовной зоны ДШ ОК 1, 3; разрушение бетона парапета перильного ограждения; коррозия металлических закладных деталей ДШ; разрушение штукатурного слоя и отслоение ЛКП по фасадной части балок; разрушение бетона и отслоение ЛКП парапетов; разрушение защитного слоя с оголением арматуры, отслоение ЛКП по низу плит ПС 1, 2; коррозия металлических сливных лотков с проезжей части и водоотводного подвесного лотка; разрушение штукатурного слоя на сливной призме конуса OK1 сеть трещин по насадке ОК 1, 3; отслоение ЛКП и разрушение штукатурного слоя стоек ОП 2 в уровне уреза воды; металлический сливной лоток с проезжей части недостаточной длины на ПС 2; трещина на ригеле ОП 2; разрушение защитного слоя бетона на открылках ОК 1,3; зазор в сопряжении бетонной площадки и телескопических лотков; разрушение бетона с оголением арматуры площадки лестничного схода; коррозия перильного ограждения лестничных сходов.

- № 89 от 22.07.2015, согласно акту №42/22/Р22 от 09.08.2022: разрушение бетонного покрытия с оголением арматуры околошовной зоны ДШ ОК 1,3; разрушение бетона парапета перильного ограждения; коррозия металлических закладных деталей ДШ; разрушение штукатурного слоя и отслоение ЛКП по фасадной части балок; разрушение бетона и отслоение ЛКП парапетов; разрушение защитного слоя с оголением арматуры, отслоение ЛКП по низу плит ПС 1, 2; коррозия металлических сливных лотков с проезжей части и водоотводного подвесного лотка; разрушение штукатурного слоя на сливной призме конуса OKI; сеть трещин по насадке ОК 1, 3; отслоение ЛКП и разрушение штукатурного слоя стоек ОП 2 в уровне уреза воды; металлический сливной лоток с проезжей части недостаточной длины на ПС 2; трещина на ригеле ОП 2; разрушение защитного слоя бетона на открылках ОК 1,3; зазор в сопряжении бетонной площадки и телескопических лотков; разрушение бетона с оголением арматуры площадки лестничного схода; коррозия перильного ограждения лестничных сходов.

-№ 123 от 21.09.2016, согласно акту №32/22/Р22 от 09.08.2022: выкрашивание бетона парапета под перильное ограждение; коррозия закладных деталей ДШ; трещина в подферменниках ОК 1, шкафной стенке, насадке ОК 1,6, протечки через конструкцию ДШ обводнение шкафной стенки OKI,6; карбонизация бетона по балкам пролетных строений, шкафным стенкам; шелушение ЛКП по консолям крайних балок, фасадным блокам, ростверку опоры №4,5; разрушение защитного слоя ростверк опоры №2, недостаточный защитный слой арматуры шкафная стенка ОК6, разрушение защитного слоя бетона по шкафной стенке ОК 1,6; интенсивное выщелачивание бетона с отложением солей на поверхности в зоне УМС (искусственные сооружения); разрушение бетона телескопических лотков, трещина укрепления в зоне телескопических лотков (регуляционные сооружения).

-№128 от 26.09.2016, согласно акту №45/22/Р22 от 09.08.2022: выкрашивание бетона лестничных сходов, разрушение бетона насадки ОК 1,5, шелушение ЛКП шкафной стенки ОК 1,5, фасадных блоков, оголение арматуры коррозия арматуры на швах омоноличивания, обводнение консоли пролетных строений выщелачивание бетона, разрушение защитного покрытия опор, коррозия подвесного лотка и закладных деталей, водоотводных трубок, поперечного водоотводного лотка на конусе, выкрашивание бетона укрепления конусов, трещина в насадке ОК 5, зазор между шкафной стенкой и конусом ОК 1,5, износ покрытия в околошовной зоне ДШ (искусственные сооружения); Разрушение бетона телескопических лотков, подмыв и разрушение гасителей (регуляционные сооружения).

            В ходе рассмотрения спора суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО Фирма «Зоринка».

Дело рассматривается в порядке статей 153-166 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Отводов суду не заявлено.

Представитель истца в судебном заседании поддержала исковые требования в полном объеме по основаниям, указанным в исковом заявлении.

Ответчик, третье лицо  в судебное заседание не явились. В материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения ответчика, третьих лиц о времени и месте судебного заседания.

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если: несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд, (пункт 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Кроме того, информация о принятых по делу судебных актах была размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда. 

В материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения ответчика и третьего лица о времени и месте судебного разбирательства. 

В соответствии с п. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

В соответствии с п. 5 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.

В судебном заседании 29.07.2024 в порядке ст.163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 14 час. 00 мин. 02.08.2024, 02.08.2024 был объявлен перерыв до 15 час. 20 мин. 05.08.2024, вынесены протокольные определения. После перерыва судебное заседание продолжено.  

В соответствии со статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

           Исследовав материалы дела, проверив доводы, изложенные в исковом заявлении, выслушав лиц, участвующих в деле, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела между Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Черноземье» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Черноземуправтодор) (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «МостСервис» (далее - Подрядчик) заключены следующие государственные контракты:

- от 18.06.2016 № 70 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Гусевка на км 584+211 (Правый) автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (Подъезд к г. Саратов), Саратовская область.

- от 22.07.2015 № 88 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через балку Гайка на км 645+965 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань Саратовская область.

- от 25.08.2015№ 104 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Тростянка на км 528+142 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная   дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград - Астрахань (Подъезд к г. Саратов), Саратовская область.

- от 22.07.2015 № 89 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Сухая Лебедка на км 618+024 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань Саратовская область.

- от 21.09.2016 № 123 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Путепровод через железную дорогу на км 534+200 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (Подъезд к г. Саратов), Саратовская область.

- от 26.09.2016 № 128 по капитальному ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Баланда (левый) на км 638+753 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (подъезд к г. Саратов) Саратовская область.

На основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 16.12.2019 № 3901-р «О прекращении права оперативного управления ФКУ «Поволжуправтодор» на объекты федерального имущества и закреплении их в оперативное управление ФКУ «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань, Саратовская область, Калининский район закреплен на праве оперативного управления за ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское».

Проанализировав условия представленных государственных контрактов суд считает, что по своей правовой природе указанные контракты являются договорами строительного подряда.

Следовательно, правоотношения сторон в рассматриваемом случае регулируются положениями параграфов 1 и 3 главы 37 ГК РФ.

В статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии со статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Работы по указанным государственным контрактам ООО «МостСервис» завершены и оплачены Заказчиком в следующие сроки:

- по государственному контракту от 18.06.2016 № 70 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Гусевка на км 584+211 (Правый) автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (Подъезд к г. Саратов), Саратовская область - 18.12.2015;

- по государственному контракту от 22.07.2015 № 88 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через балку Гайка на км 645+965 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань Саратовская область - 18.12.2015;

- по государственному контракту от 25.08.2015 № 104 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Тростянка на км 528+142 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная   дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград - Астрахань (Подъезд к г. Саратов), Саратовская область - 25.12.2015;

- по государственному контракту от 22.07.2015 № 89 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Сухая Лебедка на км 618+024 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань Саратовская область - 18.12.2015;

- по государственному контракту от 21.09.2016 № 123 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Путепровод через железную дорогу на км 534+200 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (Подъезд к г. Саратов), Саратовская область - 15.11.2016;

- по государственному контракту от 26.09.2016 № 128 по капитальному ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Баланда (левый) на км 638+753 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (подъезд к г. Саратов) Саратовская область - 18.07.2017.

Гарантийным паспортом: «Ремонт моста через реку Гусевка на км 584+211 (Правый) автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (Подъезд к г. Саратов), Саратовская область» установлены следующие гарантийные сроки на качество выполненных Подрядчиком работ: земляное полотно – 8 лет; основание дорожной одежды – 8 лет; нижний слой покрытия – 5 лет; верхний слой покрытия- 4 года; искусственные сооружения – 8 лет; разметка дорожная – 1 год; дорожные знаки – 5 лет, барьерное ограждение – 5 лет; судовая сигнализация – 8 лет.

Гарантийным паспортом законченного объекта: Ремонт моста через балку Гайка на км 645+965 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань Саратовская область» установлены следующие гарантийные сроки на качество выполненных Подрядчиком работ: земляное полотно – 8 лет; нижний слой покрытия – 5 лет; верхний слой покрытия- 4 года; искусственные сооружения – 8 лет; разметка дорожная – 1 год; дорожные знаки – 5 лет, барьерное ограждение – 5 лет.

Гарантийным паспортом на объект: «Ремонт моста через реку Тростянка на км 528+142 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань» установлены следующие гарантийные сроки на качество выполненных Подрядчиком работ: земляное полотно – 8 лет; основание дорожной одежды – 8 лет; нижний слой покрытия – 5 лет; верхний слой покрытия- 4 года; искусственные сооружения – 8 лет; разметка дорожная – 1 год; дорожные знаки – 5 лет.

Гарантийным паспортом на законченного объекта: «Ремонт моста через реку Сухая Лебедка на км 618+024 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань Саратовская область» установлены следующие гарантийные сроки на качество выполненных Подрядчиком работ: земляное полотно – 8 лет; основание дорожной одежды – 8 лет; нижний слой покрытия – 5 лет; верхний слой покрытия- 4 года; искусственные сооружения – 8 лет; разметка дорожная – 1 год; дорожные знаки – 5 лет.

Гарантийным паспортом на законченный ремонтом объект: Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Путепровод через железную дорогу на км 534+200 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (Подъезд к г. Саратов), Саратовская область установлены следующие гарантийные сроки на качество выполненных Подрядчиком работ: земляное полотно – 8 лет; нижний слой покрытия – 5 лет; верхний слой покрытия- 4 года; искусственные сооружения – 8 лет; разметка дорожная (термоплатик) – 1 год; дорожные знаки – 5 лет, барьерное ограждение – 5 лет.

Гарантийным паспортом объекта капитального ремонта: «моста через реку Баланда (левый) на км 638+753 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (подъезд к г. Саратов) Саратовская область» установлены следующие гарантийные сроки на качество выполненных Подрядчиком работ: земляное полотно – 8 лет; основание дорожной одежды – 8 лет; нижний слой покрытия – 5 лет; верхний слой покрытия- 4 года; искусственные сооружения – 8 лет; разметка дорожная (термоплатик) – 1 год; дорожные знаки – 5 лет; барьерное ограждение.

На основании пунктов 8.7. Контрактов Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, исправлять дефекты за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Пунктом 10.4. Контрактов установлено, что если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

В ходе эксплуатации объектов были выявлены недостатки, произведенных работ, в связи с чем 04.08.2022 Подрядчику направлено извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, а также о необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика на 09.08.2022 для участия в комиссии по обследованию гарантийных участков.

В установленное в извещении время Подрядчик не явился в результате чего Заказчиком совместно с эксплуатирующей организацией составлены акты от 09.08.2022 №34/22/Р22, №48/22/Р22, №29//22/Р22, №42/22/Р/22, №32/22/Р22, № 45/22/Р22 о выявленных в течении гарантийного срока дефектах объекта основных средств со сроком устранения до 31.08.2022.

Согласно актам, составленным Заказчиком совместно с эксплуатирующей организацией, выявлены следующие дефекты выполненных работ:

- по акту №34/22/Р22 от 09.08.2022 по объекту: ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Гусевка на км 584+211 (Правый) автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (Подъезд к г. Саратов), Саратовская область (государственный контракт от 18.06.2016 № 70):выщелачивание бетона по ступеням лестничных сходов, разрушение защитного слоя бетона площадки лестничного схода, трещины по насадке ОК1, по балкам пролетного строения, трещины на подфеменниках ОК1, Шкафных стенках ОК1, обводнение шкафной стенки протечки через ДШ ОК1, коррозия опорных металлических листов, выщелачивание бетона верхней грани ригеля, по зубу упора, пролетному строению №3, фасадным блокам, скол по низу ребра ригеля ОП2, карбонизация бетона по шкафной стенке ОК4, оголение арматуры в местах опирания балок пролетного строения ОК4, разрушение монолитного укрепления конусов, деградационное разрушение бетона по подферменникам ОК1,4, шкафной стенке ОК1,4, насадкам ОК1,4, открылкам шкафных стенок ОК1,4,разрушение бетона входного телескопического лотка, размывы в подмостовой зоне у входной трубы системы водоотвода, размывы грунта под гасителем водоотводного лотка.

- по акту №48/22/Р22 от 09.08.2022 по объекту: ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через балку Гайка на км 645+965 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань Саратовская область (государственный контракт от 22.07.2015 № 88): коррозия закладных деталей ДШ; водоотводов с проезжей части; разрушение защитного слоя бетона фасадной части балок ПС, открылков шкафных стенокОК1,4; бетона плит укрепления конуса, выкрашивание бетона на лестничных сходах; выщелачивание бетона по насадкам пролетным строениям; шелушение ЛКП на парапетных блоках, карнизных блоках, пролетных строениях; трещины в плитах пролетных строений, насадкам ОК, ригелям промежуточных опор; отслоение защитного слоя на промежуточных опорах; карбонизация бетона по пролетным строениям и опорам. Разрушение монолитного укрепления конуса ОК 1,4; многочисленные трещины на ригеле опоры №2,3; трещины по балкам пролетного строения, насадкам ОК1,4. (искусственные сооружения).

- по акту №29/22/Р22 от 09.08.2022 по объекту: ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Тростянка на км 528+142 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная   дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград - Астрахань (Подъезд к г. Саратов), Саратовская область (государственный контракт от 25.08.2015 № 104): разрушение бетонного покрытия с оголением арматуры околошовной зоны ДШ ОК 1, 3; разрушение бетона парапета перильного ограждения; коррозия металлических закладных деталей ДШ; разрушение штукатурного слоя и отслоение ЛКП по фасадной части  балок; разрушение бетона и отслоение ЛКП парапетов; разрушение защитного слоя с оголением арматуры, отслоение ЛКП по низу плит ПС 1, 2; коррозия металлических сливных лотков с проезжей части и водоотводного подвесного лотка; разрушение штукатурного слоя на сливной призме конуса ОК1; сеть трещин по насадке ОК 1, 3; отслоение ЛКП и разрушение штукатурного слоя стоек ОП 2 в уровне уреза воды; металлический сливной лоток с проезжей части недостаточной длины на ПС 2; трещина на ригеле ОП 2; разрушение защитного слоя бетона на открылках ОК 1, 3; зазор в сопряжении бетонной площадки и телескопических лотков; разрушение бетона с оголением арматуры площадки лестничного схода; коррозия перильного ограждения лестничных сходов.

- по акту №42/22/Р22 от 09.08.2022 по объекту: ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Сухая Лебедка на км 618+024 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань Саратовская область (государственному контракту от 22.07.2015 № 89): разрушение бетонного покрытия с оголением арматуры околошовной зоны ДШ ОК 1, 3; разрушение бетона парапета перильного ограждения; коррозия металлических закладных деталей ДШ; разрушение штукатурного слоя и отслоение ЛКП по фасадной части  балок; разрушение бетона и отслоение ЛКП парапетов; разрушение защитного слоя с оголением арматуры, отслоение ЛКП по низу плит ПС 1, 2; коррозия металлических сливных лотков с проезжей части и водоотводного подвесного лотка; разрушение штукатурного слоя на сливной призме конуса ОК1; сеть трещин по насадке ОК 1, 3; отслоение ЛКП и разрушение штукатурного слоя стоек ОП 2 в уровне уреза воды; металлический сливной лоток с проезжей части недостаточной длины на ПС 2; трещина на ригеле ОП 2; разрушение защитного слоя бетона на открылках ОК 1, 3; зазор в сопряжении бетонной площадки и телескопических лотков; разрушение бетона с оголением арматуры площадки лестничного схода; коррозия перильного ограждения лестничных сходов.

- по акту №32/22/Р22 от 09.08.2022 по объекту: ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Путепровод через железную дорогу на км 534+200 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (Подъезд к г. Саратов), Саратовская область (государственный контракт от 21.09.2016 № 123): выкрашивание бетона парапета под перильное ограждение; коррозия закладных деталей ДШ; трещина в подферменниках ОК 1, шкафной стенке, насадке ОК 1,6, протечки через конструкцию ДШ обводнение шкафной стенки ОК1,6; карбонизация бетона по балкам пролетных строений, шкафным стенкам; шелушение ЛКП по консолям крайних балок, фасадным блокам, ростверку опоры №4,5; разрушение защитного слоя ростверк опоры №2, недостаточный защитный слой арматуры шкафная стенка ОК6, разрушение защитного слоя бетона по шкафной стенке ОК 1,6; интенсивное выщелачивание бетона с отложением солей на поверхности в зоне УМС (искусственные сооружения); разрушение бетона телескопических лотков, трещина укрепления в зоне телескопических лотков (регуляционные сооружения).

- по акту №45/22/Р22 от 09.08.2022 по объекту: капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Баланда (левый) на км 638+753 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (подъезд к г. Саратов) Саратовская область (государственный контракт от 26.09.2016 № 128): выкрашивание бетона лестничных сходов, разрушение бетона насадки ОК 1,5, шелушение ЛКП шкафной стенки ОК 1,5, фасадных блоков, оголение арматуры коррозия арматуры на швах омоноличивания, обводнение консоли пролетных строений выщелачивание бетона, разрушение защитного покрытия опор, коррозия подвесного лотка и закладных деталей, водоотводных трубок, поперечного водоотводного лотка на конусе, выкрашивание бетона укрепления конусов, трещина в насадке ОК 5, зазор между шкафной стенкой и конусом  ОК 1,5, износ покрытия в околошовной зоне ДШ (искусственные сооружения); Разрушение бетона телескопических лотков, подмыв и разрушение гасителей (регуляционные сооружения).

В материалы дела представлены сметные расчеты стоимости работ по устранению выявленных дефектов мостового сооружения.

Поскольку в добровольном порядке указанные недостатки не были устранены ответчиком, ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» обратилось в суд с иском об обязании исполнения гарантийных обязательств.

Согласно пункту 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполняемой подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

В соответствии со статьей 722 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В силу статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из смысла статей 720, 722 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что в случае предоставления подрядчиком гарантии качества на выполненные работы, в его обязанность входит доказывание того обстоятельства, что выявленные в пределах гарантийного срока недостатки работ произошли не по его вине. 

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что работы по государственным контрактам №70 от 18.06.2016, №88 от 22.07.2015, №104 от 25.08.2015, №89 от 22.07.2015, №123 от 21.09.2016, №128 от 26.09.2016 выполнены с нарушением требований, предъявляемых к качеству работ. 

Судом установлено, что истец обнаружил недостатки в выполненных работах в пределах гарантийного срока. 

Согласно правовой позиции, изложенной в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 25.08.2016 № 305-ЭС16-4838 и № 305-ЭС16-4427, при разрешении споров, связанных с применением последствий нарушения требований о качестве выполненных работ в гарантийный срок, заказчик обязан доказать возникновение недостатка в работе подрядчика в пределах этого срока и размер понесенных расходов, а последний в свою очередь обязан возместить эти расходы, если не докажет, что недостатки произошли вследствие неправильной эксплуатации либо нормального износа объекта или его частей, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В связи с тем, что недостатки выполненных работ были обнаружены в пределах установленных Гарантийными паспортами объекта капитального ремонта гарантийного срока, на подрядчике в силу пункта 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации лежит бремя доказывания того, что недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, произошли не по его вине.

Таким образом, в пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ.

На основании Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", суд неоднократно разъяснял сторонам право на заявление ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы, предусмотренное ст. 82 АПК РФ. 

Ответчик в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств того, что выявленные недостатки возникли не по его вине, ходатайство о назначении экспертизы не заявил. 

В соответствии с частью 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Между тем принцип разумного процессуального поведения предполагает представление стороной доказательств, подтверждающих ее доводы (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.03.2013 N 8711/12).

Поскольку добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается, лицо, опровергающее данный факт, должно привести убедительные доводы и соответствующие доказательства (пункт 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

В соответствии с положениями статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на представление доказательств, участие в их исследовании, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, оказывает содействие в реализации лицами, участвующими в деле, их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

В силу закрепленного в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, собрать и представить в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции, арбитражный суд не является самостоятельным субъектом собирания доказательств.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд не может обязать сторону спора представлять доказательства, как в обоснование своей позиции, так и в обоснование правовой позиции другой стороны, поскольку в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, самостоятельно доказывает обстоятельства, на которых основывает свои требования и возражения.

В ходе рассмотрения спора арбитражный суд предоставил ответчику достаточно времени для подготовки своей позиции по делу, представлении доказательств в обоснование своих требований и возражений.

Процессуальные права лиц, участвующих в деле, определены в части 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами (часть 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку на основании части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности, то непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно, как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент, участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 марта 2012 года N 12505/11).

Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения фактов, на наличие которых аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Таким образом, суд приходит к выводу, что истцом доказано нарушение ответчиком принятых по государственным контрактам №70 от 18.06.2016, №88 от 22.07.2015, №104 от 25.08.2015, №89 от 22.07.2015, №123 от 21.09.2016, №128 от 26.09.2016 обязательств. 

На момент рассмотрения спора ответчик выявленные недостатки не устранил.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с частью 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Каких-либо иных достоверных и допустимых доказательств, подтверждающих иную причину повреждения имущества истца, ответчиком не добыто и суду не представлено. 

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению. 

На основании части 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

При рассмотрении требования о понуждении к исполнению обязанности в натуре суд обязан дать оценку наличия спорной обязанности у ответчика, права истца требовать понуждения к ее исполнению, а также субъективной и объективной возможности исполнения.

Принимая во внимание условия, характер работ, место выполнения работ по устранению недостатков, арбитражный суд счел, что выполнение работ, необходимых для устранения рассматриваемых недостатков, в соответствии с обязательными строительными нормами и правилами будет объективно возможно в месячный  срок.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопрос о распределении судебных расходов.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Истец освобожден от уплаты государственной пошлины на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

При подаче иска по требованию неимущественного характера подлежало оплате 6 000 руб. государственной пошлины.

Государственная пошлина в размере 6 000 руб. подлежит взысканию с ООО «МостСервис» в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «МостСервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), с.Новая Усмань, Новоусманский р-н, Воронежская область, в течение 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки выполненных работ по следующим договорам, а именно:

- по государственному контракту от 18.06.2016 № 70 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Гусевка на км 584+211 (Правый) автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (Подъезд к г. Саратов), Саратовская область:

№ п/п

Обоснование

Наименование работы

Едизм

Стоимость единицы работы, руб (без накладных расходов и плановых накоплений)

Объем работ

Всего,                   рублей

 

Дефект: Выщелачивание бетона по ступеням лестничных сходов

 

 

1

ЭСНиЕРс-01-03-005                         (применительно)

Восстановление поверхности лестничных сходов бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

0,90

5831,00

 

Дефект: Разрушение защитного слоя бетона площадки лестничного схода

 

 

2

ЭСНиЕРс-01-03-005                         (применительно)

Восстановление поверхности лестничных сходов бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

0,20

1295,78

 

Дефект: Трещины по насадке ОК1, по балкам пролетного строения

 

 

3

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,10

15787,50

4

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,10

3379,41

5

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,10

15787,50

 

Дефект: Трещины на подфеменниках ОК1, Шкафных стенках ОК1,4

 

 

6

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,07

11051,25

7

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,40

13517,64

 

Дефект: Обводнение шкафной стенки протечки через ДШ ОК1,4

 

 

8

ЭСНиЕРс-01-02-008-3    (применительно)

Устранение повреждений деформационных швов (выправка или замена отдельных элементов, восстановление положения элементов)

100 м

3 138,64

0,28

878,82

 

Дефект: Коррозия опорных металлических листов

 

 

9

ЭСНиЕРс-01-08-025-2

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных:  с автогидроподъемника

100 м2

16 436,38

0,08

1314,91

 

Дефект: Выщелачивание бетона верхней грани ригеля, по зубу упора, пролетному строению №3, фасадным блокам

 

 

10

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53

0,34

98004,16

11

ЭСНиЕРс-01-08-019-2

Гидрофобизация фасадных поверхностей пролетных строений с автогидроподъемника

100 м2

15 221,17

0,34

5175,20

12

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений полимерцементными красками с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

0,34

15080,71

 

Дефект: Скол по низу ребра ригеля ОП2

 

 

13

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,06

9472,50

14

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,15

5069,12

 

Дефект: Карбонизация бетона по шкафной стенке ОК4

 

 

15

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,20

31575,00

16

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,20

6758,82

 

Дефект: Оголение арматуры в местах опирания балок пролетного строения ОК4

 

 

17

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,03

4736,25

 

Дефект: Разрушение монолитного укрепления конусов

 

 

18

ЭСНиЕРс-01-03-005                               ( применительно)

Восстановление укрепления откосов насыпи подходов и конусов бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

0,20

1295,78

 

Дефект: Деградационное разрушение бетона по подферменникам ОК1,4, шкафной стенке ОК1,4, насадкам ОК1,4, открылкам шкафных стенок ОК1,4

 

 

19

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,23

36311,25

20

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,23

7772,65

 

Дефект: Разрушение бетона входного телескопического лотка

 

 

21

ЭСНиЕРс-01-03-005                               ( применительно)

Восстановление железобетонных лотков бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

0,70

4535,22

 

Дефект: Размывы в подмостовой зоне у входной трубы системы водоотвода

 

 

22

ЭСНиЕРс-01-01-009-1

Засыпка промоин откосов насыпи подходов и конусов с уплотнением и трамбовкой

10 м3

5 900,74

0,80

4720,59

 

Дефект: Размывы грунта под гасителем водоотводного лотка

 

 

23

ЭСНиЕРс-01-01-009-1

Засыпка промоин откосов насыпи подходов и конусов с уплотнением и трамбовкой

10 м3

5 900,74

1,00

5900,74

 

ИТОГО

 

 

305251,80

 

ВСЕГО в ценах 2012 года

 

 

305251,80

 

ВСЕГО в ценах 2022 года

(1,068; 1,078; 1,155; 1,071; 1,037; 1,029; 1,045; 1,034; 1,067; 1,139)

 

609170,42

 

Накладные расходы  (Распоряжение Минтранса России от 28.03.2014 №МС-25-р п. 46)

20%

 

121834,08

 

Итого

 

 

731004,50

 

Плановые накопления  (Распоряжение Минтранса России от 28.03.2014 №МС-25-р п. 49)

15%

 

109650,68

 

Итого

 

 

840655,18

 

НДС

20%

 

168131,04

 

ВСЕГО с НДС

 

 

1008786,22

 

 

 

 

- по государственному контракту № 88 от 22.07.2015 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через балку Гайка на км 645+965 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань Саратовская область:

№ п/п

Обоснование

Наименование работы

Едизм

Стоимость единицы работы, руб (без накладных расходов и плановых накоплений)

Объем работ

Всего,                   рублей

 

Дефект: Коррозия закладных деталей ДШ,

 

 

1

ЭСНиЕРс-01-08-025-1

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных:  с земли или подмостей

100 м2

7 096,85

0,06

425,81

 

Дефект: Коррозия водоотводов с проезжей части

 

 

2

ЭСНиЕРс-01-08-025-2

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных:  с автогидроподъемника

100 м2

16 436,38

0,10

1643,64

 

Дефект: Разрушение защитного слоя бетона фасадной части балок ПС, открылков шкафных стенок ОК1,4

 

 

3

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53

0,40

115299,01

4

ЭСНиЕРс-01-08-019-2

Гидрофобизация фасадных поверхностей пролетных строений с автогидроподъемника

100 м2

15 221,17

0,80

12176,94

5

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений полимерцементными красками с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

0,80

35484,02

6

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,18

28417,50

7

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,25

8448,53

 

Дефект: Разрушение защитного слоя бетона плит укрепления конуса

 

 

8

ЭСНиЕРс-01-03-005                               (применительно)

Восстановление укрепления откосов насыпи подходов и конусов бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

0,30

1943,67

 

Дефект: Выкрашивание бетона на лестничных сходах

 

 

9

ЭСНиЕРс-01-03-005                         (применительно)

Восстановление поверхности лестничных сходов бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

1,30

8422,56

 

Дефект: Выщелачивание бетона по насадкам, пролетным строениям

 

 

10

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,15

23681,25

11

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,15

5069,12

 

Дефект: Шелушение ЛКП на парапетных блоках, карнизных блоках, пролетных строениях, насадкам ОК, ригелям промежуточных опор

 

 

12

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений полимерцементными красками с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

0,48

21290,41

13

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,25

8448,53

 

Дефект: Отслоение защитного слоя на промежуточных опорах

 

 

14

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53

0,17

49002,08

15

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска железобетонных опор с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

0,30

13306,51

 

Дефект: Карбонизация бетона по пролетным строениям и опорам

 

 

16

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,10

15787,50

17

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,10

3379,41

18

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,10

15787,50

 

Дефект: Разрушение монолитного укрепления конуса ОК 1,4

 

 

19

ЭСНиЕРс-01-03-005                               (применительно)

Восстановление укрепления откосов насыпи подходов и конусов бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

0,25

1619,72

 

Дефект: Многочисленные трещины на ригеле опоры №2,3

 

 

20

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53

0,07

20177,33

21

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска железобетонных опор с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

0,15

6653,25

 

Дефект: Трещины по балкам пролетного строения, насадкам ОК1,4

 

 

22

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53

0,25

72061,88

23

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,10

15787,50

24

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,10

3379,41

 

Дефект: Разрушение бетона телескопических лотков

 

 

25

ЭСНиЕРс-01-03-005                               (применительно)

Восстановление железобетонных лотков бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

0,50

3239,45

 

Дефект: Зазор между верхним быстротоком и телескопическими лотками

 

 

26

ЭСНиЕРс-01-03-005                               (применительно)

Восстановление железобетонных лотков бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

0,30

1943,67

 

ИТОГО

 

 

492876,20

 

ВСЕГО в ценах 2012 года

 

 

492876,20

 

ВСЕГО в ценах 2022 года

(1,068; 1,078; 1,155; 1,071; 1,037; 1,029; 1,045; 1,034; 1,067; 1,139)

 

983599,77

 

Накладные расходы  (Распоряжение Минтранса России от 28.03.2014 №МС-25-р п. 46)

20%

 

196719,95

 

Итого

 

 

1180319,72

 

Плановые накопления  (Распоряжение Минтранса России от 28.03.2014 №МС-25-р п. 49)

15%

 

177047,96

 

Итого

 

 

1357367,68

 

НДС

20%

 

271473,54

 

ВСЕГО с НДС

 

 

1628841,22

 

- по государственному контракту № 104 от 25.08.2015 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Тростянка на км 528+142 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная   дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград - Астрахань (Подъезд к г. Саратов), Саратовская область:

№ п/п

Обоснование

Наименование работы

Едизм

 Стоимость единицы работы, руб (без накладных расходов и плановых накоплений) 

Объем работ 

Всего,                   рублей

 

Дефект: Выкрашивание бетона по ступеням лестничных сходов

 

 

1

ЭСНиЕРс-01-03-005                         (применительно)

Восстановление поверхности лестничных сходов бетоном B20 F?300 W6 

10 м2

           6478,89   

1,80

11662,00

 

Дефект: Выщелачивание бетона на открылках

 

 

2

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00   

0,10

15787,50

3

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

  33 794,11   

0,10

3379,41

 

Дефект: Коррозия металлических деталей диафрагм балок, закладных деталей под крепление продольного водоотводного лотка, водоотводных трубок, опорных металлических листов под балками

 

 

4

ЭСНиЕРс-01-08-025-2

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных: с автогидроподъемника

100 м2

  16 436,38   

0,46

7560,73

 

Дефект: Отсутствие герметичности в местах соединения продольного лотка (протечка воды на ригель ОП2)

 

 

5

ЭСНиЕРс-01-08-022-1

Замена водоотводных трубок

1шт. 

  12 721,56   

2,00

25443,12

 

Дефект: Сеть трещин с выщелачиванием цементного камня по телу ОП2

 

 

6

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53   

0,32

92239,21

7

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00   

0,32

50520,00

8

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

 33 794,11   

0,32

10814,12

9

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска железобетонных опор с автогидроподъемника

100 м2

 44 355,03   

0,32

14193,61

 

Дефект: Выщелачивание цементного камня ОК5

 

 

10

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00   

0,40

63150,00

11

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

 33 794,11   

0,40

13517,64

 

Дефект: Разрушение штукатурного слоя ОП 2,3 в уровне уреза воды

 

 

12

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53   

0,30

86474,26

13

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска железобетонных опор с автогидроподъемника

100 м2

  44 355,03   

1,20

53226,04

 

Дефект: Выкрашивание бетона на площадке между конусом и шкафной стенкой

 

 

14

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00   

0,05

7893,75

15

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

  33 794,11   

0,10

3379,41

 

Дефект: Трещины в насадках

 

 

16

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00   

0,22

34732,50

17

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

 33 794,11   

0,40

13517,64

 

Дефект: Протечки через ДШ ОК1,5

 

 

18

ЭСНиЕРс-01-02-008-3    (применительно)

Устранение повреждений деформационных швов (выправка или замена отдельных элементов, восстановление положения элементов)

100 м

   3 138,64   

0,28

878,82

 

Дефект: Оголение арматуры в балках пролетного строения №2

 

 

19

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53   

0,30

86474,26

20

ЭСНиЕРс-01-08-019-2

Гидрофобизация фасадных поверхностей пролетных строений с автогидроподъемника

100 м2

 15 221,17   

0,30

4566,35

21

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений полимерцементными красками с автогидроподъемника

100 м2

 44 355,03   

0,30

13306,51

 

Дефект: Износ покрытия в околошовной зоне ДШ

 

 

22

ЭСНиЕРс-01-02-005-9 

Устранение деформаций и повреждений в зоне деформационного шва 

100 м2 

  61 800,80   

0,28

17304,22

23

ЭСНиЕРс-01-08-023-1

Локальное восстановление гидроизоляции (у деформационных швов и ограждений, вдоль тротуаров)

1м2

  6 131,62   

8,00

49052,96

 

Дефект: Просадки, разрушение бетона монолитного укрепления конуса

 

 

24

ЭСНиЕРс-01-01-009-1

Засыпка промоин откосов насыпи подходов и конусов с уплотнением и трамбовкой

10 м3

  5 900,74   

0,15

885,11

25

ЭСНиЕРс-01-03-005                               ( применительно)

Восстановление укрепления откосов насыпи подходов и конусов бетоном B20 F?300 W6

10  м2

   6 478,89   

0,20

1295,78

 

Дефект: Разрушение защитного слоя бетона по ригелю русловой опоры

 

 

26

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53   

0,10

28824,75

27

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска железобетонных опор с автогидроподъемника

100 м2

   4 355,03   

0,40

17742,01

 

Дефект: Вымывание цементного камня на телескопических лотках

 

 

28

ЭСНиЕРс-01-03-005                               ( применительно)

Восстановление железобетонных лотков бетоном B20 F?300 W6

10  м2

    6 478,89   

1,50

9718,34

 

ИТОГО

 

 

737540,05

 

ВСЕГО в ценах 2012 года 

 

 

737540,05

 

ВСЕГО в ценах 2022 года 

(1,068; 1,078; 1,155; 1,071; 1,037; 1,029; 1,045; 1,034; 1,067; 1,139)

 

1 471 858,91

 

Накладные расходы  (Распоряжение Минтранса России от 28.03.2014 №МС-25-р п. 46)

20%

 

294 371,78

 

Итого

 

 

1 766 230,69

 

Плановые накопления  (Распоряжение Минтранса России от 28.03.2014 №МС-25-р п. 49)

15%

 

264 934,60

 

Итого 

 

 

2 031 165,29

 

НДС

20%

 

406 233,06

 

ВСЕГО с НДС

 

 

2 437 398,35

 

- по государственному контракту № 89 от 22.07.2015 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Сухая Лебедка на км 618+024 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань Саратовская область:

№ п/п

Обоснование

Наименование работы

Едизм

Стоимость единицы работы, руб (без накладных расходов и плановых накоплений)

Объем работ

Всего,                   рублей

 

Дефект: Разрушение бетонного покрытия с оголением арматуры околошовной зоны ДШ ОК1,3

 

 

1

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,19

29996,25

2

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,19

6420,88

 

Дефект: Разрушение бетона парапета перильного ограждения

 

 

3

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,12

18945,00

 

Дефект: Коррозия металлических закладных деталей ДШ

 

 

4

ЭСНиЕРс-01-08-025-2

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных:  с автогидроподъемника

100 м2

16 436,38

0,08

1314,91

 

Дефект: Разрушение штукатурного слоя и отслоение ЛКП по фасадной части балок

 

 

5

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53

0,11

31707,23

6

ЭСНиЕРс-01-08-019-2

Гидрофобизация фасадных поверхностей пролетных строений с автогидроподъемника

100 м2

15 221,17

0,54

8219,43

7

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений полимерцементными красками с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

0,54

23951,72

 

Дефект: Разрушение бетона и отслоение ЛКП парапетов

 

 

8

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53

0,05

14412,38

9

ЭСНиЕРс-01-08-019-2

Гидрофобизация фасадных поверхностей пролетных строений с автогидроподъемника

100 м2

15 221,17

0,15

2283,18

10

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений полимерцементными красками с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

0,15

6653,25

 

Дефект: Разрушение защитного слоя с оголением арматуры

 

 

11

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,10

15787,50

 

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,10

3379,41

 

Дефект: Отслоение ЛКП по низу плит ПС1, 2

 

 

12

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53

0,08

23059,80

13

ЭСНиЕРс-01-08-019-2

Гидрофобизация фасадных поверхностей пролетных строений с автогидроподъемника

100 м2

15 221,17

0,25

3805,29

14

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений полимерцементными красками с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

0,25

11088,76

 

Дефект: Коррозию металлических сливных лотков с проезжей части и водоотводного подвесного лотка

 

 

15

ЭСНиЕРс-01-08-025-2

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных:  с автогидроподъемника

100 м2

16 436,38

0,14

2301,09

 

Дефект: Разрушение штукатурного слоя на сливной призме конуса ОК1

 

 

16

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,10

15787,50

 

Дефект: Сеть трещин по насадке ОК1,3

 

 

17

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,07

11051,25

18

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,15

5069,12

 

Дефект: Отслоение ЛКП и разрушение штукатурного слоя стоек ОП2 в уровне уреза воды

 

 

19

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,06

9472,50

20

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,30

10138,23

 

Дефект: Металлический сливной лоток с проезжей части недостаточной длины на ПС2

 

 

21

ЭСНиЕРс-01-04-012-1 (применительно)

Установка металлического сливного лотка

100 м

160 802,28

0,03

4824,07

 

Дефект: Тещина на ригеле ОП2

 

 

22

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,05

7893,75

23

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,15

5069,12

 

Дефект: Разрушение защитного слоя бетона на открылках ОК1,3

 

 

24

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,08

12630,00

24

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,10

3379,41

 

Дефект: Зазор в сопряжении бетонной площадки и телескопических лотков

 

 

26

ЭСНиЕРс-01-03-005                               (применительно)

Восстановление железобетонных лотков бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

0,50

3239,45

 

Дефект: Разрушение бетона с оголением арматуры площадки лестничного схода

 

 

27

ЭСНиЕРс-01-03-005                         (применительно)

Восстановление поверхности лестничных сходов бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

0,20

1295,78

 

Дефект: Коррозия перильного ограждения лестничных сходов

 

 

28

ЭСНиЕРс-01-03-011-1

Окраска неоцинкованного металлического перильного ограждения и ступеней лестничных сходов

100 м

6 140,02

0,10

614,00

 

Дефект: Размыв грунта под гасителем лотка

 

 

29

ЭСНиЕРс-01-01-009-1

Засыпка промоин откосов насыпи подходов и конусов с уплотнением и трамбовкой

10 м3

5 900,74

0,70

4130,52

 

Дефект: Поверхностное разрушение бетона телескопических лотков

 

 

30

ЭСНиЕРс-01-03-005                               (применительно)

Восстановление железобетонных лотков бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

0,50

3239,45

 

ИТОГО

 

 

301160,23

 

ВСЕГО в ценах 2012 года

 

 

301160,23

 

ВСЕГО в ценах 2022 года

(1,068; 1,078; 1,155; 1,071; 1,037; 1,029; 1,045; 1,034; 1,067; 1,139)

 

601005,15

 

Накладные расходы  (Распоряжение Минтранса России от 28.03.2014 №МС-25-р п. 46)

20%

 

120201,03

 

Итого

 

 

721206,18

 

Плановые накопления  (Распоряжение Минтранса России от 28.03.2014 №МС-25-р п. 49)

15%

 

108180,93

 

Итого

 

 

829387,11

 

НДС

20%

 

165877,42

 

ВСЕГО с НДС

 

 

995264,53

 

- по государственному контракту № 123 от 21.09.2016 по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Путепровод через железную дорогу на км 534+200 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (Подъезд к г. Саратов), Саратовская область:

№ п/п

Обоснование

Наименование работы

Едизм

Стоимость единицы работы, руб (без накладных расходов и плановых накоплений)

Объем работ

Всего,                   рублей

 

Дефект: Выкрашивание бетона парапета под перильное ограждение

 

 

1

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение локальных дефектов продольных швов омоноличивания с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,45

71043,75

 

Дефект: Коррозия закладных деталей ДШ

 

 

2

ЭСНиЕРс-01-08-025-2

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных:  с автогидроподъемника

100 м2

16 436,38

0,10

1643,64

 

Дефект: Трещины в подферменниках ОК1, шкафной стенке, насадке ОК 1,6

 

 

3

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,20

31575,00

4

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,32

10814,12

 

Дефект: Протечки через конструкцию ДШ Обводнение шкафной стенки ОК 1,6

 

 

5

ЭСНиЕРс-01-02-008-3    (применительно)

Устранение повреждений деформационных швов (выправка или замена отдельных элементов, восстановление положения элементов)

100 м

3 138,64

0,56

1757,64

6

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,40

13517,64

 

Дефект: Карбонизация бетона по балкам пролетных строений, шкафным стенкам

 

 

7

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53

0,30

86474,26

8

ЭСНиЕРс-01-08-019-2

Гидрофобизация фасадных поверхностей пролетных строений с автогидроподъемника

100 м2

15 221,17

0,30

4566,35

9

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений полимерцементными красками с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

0,30

13306,51

 

Дефект: Шелушение ЛКП по консолям крайних балок, фасадным блокам, ростверку опоры №4,5

 

 

10

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений полимерцементными красками с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

3,50

155242,61

 

Дефект: Разрушение защитного слоя ростверк опоры №2

 

 

11

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53

0,23

66296,93

12

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска железобетонных опор с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

1,08

47903,43

 

Дефект: Недостаточный защитный слой арматуры шкафная стенка ОК6

 

 

13

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,22

34732,50

14

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,22

7434,70

 

Дефект: Разрушение защитного слоя бетона по шкафной стенке ОК1,6

 

 

15

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,15

23681,25

16

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,23

7772,65

 

Дефект: Интенсивное выщелачивание бетона с отложением солей на поверхности в зоне УМС

 

 

17

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53

0,10

28824,75

18

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений полимерцементными красками с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

0,20

8871,01

 

Дефект: Коррозия закладных деталей и болтовых соединений перильного ограждения

 

 

19

ЭСНиЕРс-01-08-025-1

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных:  с земли или подмостей

100м2

7 096,85

0,18

1277,43

 

Дефект: Разрушение бетона телескопических лотков

 

 

20

ЭСНиЕРс-01-03-005                               (применительно)

Восстановление железобетонных лотков бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

1,60

10366,22

 

Дефект: ФИО2 укрепления в зоне телескопических лотков

 

 

21

ЭСНиЕРс-01-03-005                               (применительно)

Восстановление железобетонных лотков бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

0,50

3239,45

 

ИТОГО

 

 

630341,84

 

ВСЕГО в ценах 2012 года

 

 

630341,84

 

ВСЕГО в ценах 2022 года

(1,068; 1,078; 1,155; 1,071; 1,037; 1,029; 1,045; 1,034; 1,067; 1,139)

 

1257930,67

 

Накладные расходы  (Распоряжение Минтранса России от 28.03.2014 №МС-25-р п. 46)

20%

 

251586,13

 

Итого

 

 

1509516,80

 

Плановые накопления  (Распоряжение Минтранса России от 28.03.2014 №МС-25-р п. 49)

15%

 

226427,52

 

Итого

 

 

1735944,32

 

НДС

20%

 

347188,86

 

ВСЕГО с НДС

 

 

2083133,18

 

- по государственному контракту № 128 от 26.09.2016 по капитальному ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Мост через реку Баланда (левый) на км 638+753 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань (подъезд к г. Саратов) Саратовская область:

№ п/п

Обоснование

Наименование работы

Едизм

Стоимость единицы работы, руб (без накладных расходов и плановых накоплений)

Объем работ

Всего,            рублей

 

Дефект: выкрашивание бетона по ступеням лестничных сходов

 

 

1

ЭСНиЕРс-01-03-005                         (применительно)

Восстановление поверхности лестничных сходов бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

1,70

11014,11

 

Дефект: разрушение бетона насадки ОК1,5

 

 

2

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,10

15787,50

3

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,16

5407,06

 

Дефект: шелушение ЛКП шкафной стенки ОК1,5, фасадных блоков

 

 

4

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,20

6758,82

5

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений полимерцементными красками с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

0,34

15080,71

6

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,10

15787,50

 

Дефект: оголение арматуры, коррозию арматуры на швах омоноличивания

 

 

7

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53

0,50

144123,77

8

ЭСНиЕРс-01-08-019-2

Гидрофобизация  поверхностей пролетных строений с автогидроподъемника

100 м2

15 221,17

0,95

14460,11

 

Дефект: обводнение консоли пролетных строений выщелачивание бетона

 

 

9

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций пролетных строений (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53

0,62

178713,47

10

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений полимерцементными красками с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

2,80

124194,08

 

Дефект: разрушение защитного покрытия опор

 

 

11

ЭСНиЕРс-01-08-024-2

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с автогидроподъемника

100 м2

288 247,53

0,27

77826,83

12

ЭСНиЕРс-01-08-020-2

Окраска железобетонных опор с автогидроподъемника

100 м2

44 355,03

0,35

15524,26

 

Дефект: коррозию подвесного лотка и закладных деталей, водоотводных трубок, поперечного водоотводного лотка на конусе

 

 

13

ЭСНиЕРс-01-08-025-2

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных:  с автогидроподъемника

100 м2

16 436,38

0,25

4109,10

 

Дефект: выкрашивание бетона укрепления конусов

 

 

14

ЭСНиЕРс-01-03-005                               (применительно)

Восстановление укрепления откосов насыпи подходов и конусов бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

2,00

12957,78

 

Дефект: трещина в насадке ОК5

 

 

15

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,04

6315,00

16

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,15

5069,12

 

Дефект: зазор между шкафной стенкой и конусом ОК1,5

 

 

17

ЭСНиЕРс-01-08-024-1

Устранение дефектов железобетонных конструкций опор (включая заделку трещин, раковин и сколов) с земли или подмостей

100 м2

157 875,00

0,02

3157,50

18

ЭСНиЕРс-01-08-020-1

Окраска железобетонных опор с земли или подмостей

100 м2

33 794,11

0,05

1689,71

 

Дефект: износ покрытия в околошовной зоне ДШ

 

 

19

ЭСНиЕРс-01-02-005-9

Устранение деформаций и повреждений в зоне деформационного шва

100 м2

61 800,80

0,28

17304,22

 

Дефект: разрушение бетона телескопических лотков

 

 

20

ЭСНиЕРс-01-03-005                               (применительно)

Восстановление железобетонных лотков бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

0,90

5831,00

 

Дефект: подмыв и разрушение гасителей

 

 

21

ЭСНиЕРс-01-03-005                               (применительно)

Восстановление железобетонных гасителей бетоном B20 F?300 W6

10  м2

6 478,89

0,80

5183,11

 

Дефект: коррозию болтовых соединений барьерного и перильного ограждения

 

 

22

ЭСНиЕРс-01-08-025-1

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных:  с земли или подмостей

100 м2

7 096,85

0,07

496,78

 

Дефект: коррозию закладных деталей под барьерное ограждение

 

 

23

ЭСНиЕРс-01-08-025-1

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных:  с земли или подмостей

100 м2

7 096,85

0,10

709,69

 

ИТОГО

 

 

687501,23

 

ВСЕГО в ценах 2012 года

 

 

687501,23

 

ВСЕГО в ценах 2022 года

(1,068; 1,078; 1,155; 1,071; 1,037; 1,029; 1,045; 1,034; 1,067; 1,139)

 

1371999,81

 

Накладные расходы  (Распоряжение Минтранса России от 28.03.2014 №МС-25-р п. 46)

20%

 

274399,96

 

Итого

 

 

1646399,77

 

Плановые накопления  (Распоряжение Минтранса России от 28.03.2014 №МС-25-р п. 49)

15%

 

246959,97

 

Итого

 

 

1893359,74

 

НДС

20%

 

378671,95

 

ВСЕГО с НДС

 

 

2272031,69

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МостСервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), с.Новая Усмань, Новоусманский р-н, Воронежская область в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.

Направить копии судебного акта лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Судья арбитражного суда

Саратовской области                                                                                            П.М. Безруков