Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-70151/23

10 апреля 2025 года

г.Москва

 

Судья Арбитражного суда Московской области Р.С. Солдатов , при ведении протокола секретарем А.И. Руш  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-70151/23 

по исковому заявлению АО ПРОЕКТНОИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ЛЕНАЭРОПРОЕКТ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ФГУП АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности за выполненные работы до расторжения контракта  

по встречному иску: ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА к АО ПРОЕКТНОИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ЛЕНАЭРОПРОЕКТ к АО ПРОЕКТНОИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ЛЕНАЭРОПРОЕКТ неустойку в размере 1 582 214,42 руб.  

третье лицо: Министерство финансов Российской Федерации, 

При участии в судебном заседании: от истца: ФИО1 по доверенности № 82 от 16.12.2024г., диплом, паспорт; 

от ответчиков: ФГУП АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ) – ФИО2 по доверенности № 203-д от 21.08.2024г, диплом, паспорт ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА – ФИО2 по доверенности № Д-14.3/116 от 28.12.2024г, диплом, паспорт  

от третьего лица: не явился, извещен 

Руководствуясь статьями 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Признать недействительным Решение № Исх-1884 от 10.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 22.03.2021 № 0373100090921000002 в части указания оснований расторжения пунктов 7.3.1, 7.3.7, 7.3.9 Контракта, ч. 1 ст. 708, ч. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Признать государственный контракт от 22.03.2021 № 0373100090921000002 расторгнутым на основании пунктов 7.1, 7.2, 7.3.4., 7.4 Контракта, ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Взыскать с ФГУП «АГА (А)» в пользу АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» задолженность за выполненные работы в размере 34 679 389,41 (Тридцать четыре миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 41 копейка.  

Взыскать с ФГУП «АГА (А)» в пользу АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» сумму пени за просрочку выполнения обязательств по оплате работ за период с 25.05.2023 по 04.08.2023 в размере 1 747 841,23 (Один миллион семьсот сорок семь тысяч восемьсот сорок один) рубль 23 копейки.  

Взыскать с ФГУП «АГА (А)» в пользу АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» сумму пени за просрочку выполнения обязательств по оплате работ, исходя из расчета 1/300 действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, за период с 05.08.2023 по дату исполнения обязательства.  

Взыскать с ФГУП «АГА (А)» в пользу АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» расходы по уплате государственной пошлины в размере 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей.  

В удовлетворении встречных исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Р.С. Солдатов