АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 19 тел. (4922) 32-29-10, факс (4922) 47-23-98 

е-mail: vladimir.info@arbitr.ru, Интернет-сайт: http://vladimir.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________  

 РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А11-14448/2021

г. Владимир

25 января 2023 года

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Смагиной Е.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседебного  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело   № № А11-14448/2021 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  Управляющая компания «Порядок» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу  с ограниченной ответственностью «Монтажное управление 33» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) об устранении недостатков выполненных работ (с учетом уточнения),  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  спора, индивидуальный предприниматель ФИО2  (ОГРНИП 317332800041488, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной  ответственностью «Пожарное ремесло» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  общество с ограниченной ответственностью «Девелопмент и технологии»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП 318332800010011, ИНН 

<

***>), общество с  ограниченной ответственностью «ПрофМонтаж» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>).  

Руководствуясь статьями 17, 49, 65, 71, 101, 110, 121, 123, 156, 167-170, 174, 176,  180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Монтажное управление 33» в  течение 60 календарных дней с момента вступления в законную силу судебного акта  устранить недостатки выполненных работ в период гарантийного срока в  многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>, а именно:  

- выполнить установку стояков отопления с приборами отопления в подъездах 1,2;  - устранить неисправности пожарной сигнализации корп. 1;  

- подключить оборудование насосной станции системы внутреннего пожаротушения  и провести пуско-наладочных работ корп. 1;  

- устранить неисправности системы пожарной сигнализации корп. 2;  

- устранить многочисленные трещины на стенах лестничных клеток и поэтажных  коридоров в подъезде 2 корп. 2.  

- провести иные работы внутри помещений, с учетом заключения эксперта от  07.12.2022 № 55/22.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Монтажное управление 33» в  период с 01.05.2023 по 01.09.2023 устранить недостатки выполненных работ в период  гарантийного срока в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>, а именно:  

- устранить недостатки кровли корп. 2, в т.ч. недостатки кровли дошкольного  учреждения;  

- устранить многочисленные трещины главного и тыльного фасада корп. 1;  

- благоустройство придомовой территории с высадкой насаждений, согласно  проекта;  

- устранить недостатки асфальтобетонного покрытия тротуаров и отмостки;  

- провести иные работы вне помещений, с учетом заключения эксперта от 07.12.2022   № 55/22.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Монтажное управление 33»  в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Порядок»  расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Выдача исполнительных листов производится в соответствии со статьей 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Владимирской области в срок, не превышающий месяца с момента его  вынесения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную  силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.В. Смагина