47/2018-83177(1) 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-37976/2017

г. Новосибирск

07 мая 2018 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Цыбиной А.В., при веде- нии протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании дело по иску муниципального казённого учреждения города Новосибирска  «Управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на стороне истца муниципаль- ное казённое дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский  сад № 10 общеразвивающего вида», г. Новосибирск,  

к обществу с ограниченной ответственностью «СМРстрой» (ОГРН 

<

***>), г.  Новосибирск,  

об устранении недостатков работ, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Рос- сийской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «СМРстрой» (ОГРН 

<

***>)  в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу своими силами и из  своих материалов в строгом соответствии с действующими строительными нормами и  правилами, проектной документацией (шифр проекта 1935/2012) устранить недостатки  работ, выполненных по муниципальному контракту от 02.05.2012 № 19 на выполнение  комплекса работ (генерального подряда) по строительству детского сада по ул. Сухарной,  76, в Заельцовском районе, а именно: восстановить внутреннюю отделку стен помещений   №№ 19, 23 (грибок, шелушение краски) в подвале здания (площадь дефекта 11 м2);  восстановить внутреннюю отделку потолков (трещины в местах стыков потолочных плит  перекрытий) в помещениях №№ 27, 73, 74, 75, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 94, 95, 98,  99, 100, 101, 104 на первом этаже здания (площадь дефекта 173,44 м2); восстановить  внутреннюю отделку стен и потолка, нарушенную вследствие протекания кровли, в  помещениях №№ 30, 37, 40, 54 на втором этаже здания; проклеить стыки линолеума на  полах помещений групп детского сада (стыки линолеума разошлись) в помещениях №№  12, 13, 15, 36, 38, 72, 106 на первом этаже, №№ 16, 18, 40, 42 на втором этаже; установить  

малые формы на детских площадках, прилегающих к зданию детского сада, в  количестве четырёх штук (скамья - 1 шт., лиана малая 6728 – 1 шт., стенка для метания  6725 – 2 шт.); устранить деформацию досок полов теневых навесов групп «Непоседа»,  «Муравейник», «Акварелька», «Сорванцы», «Калейдоскоп» на детских площадках,  прилегающих к зданию детского сада (площадь дефекта 4,5 м2); установить  отсутствующие листы кровли навеса группы «Непоседы»; устранить трещины на  асфальтированном дорожном полотне по периметру здания детского сада (ширина  трещин около 1 см); восстановить облицовку фасада цоколя по периметру здания детского  сада (площадь дефекта 180 м2); устранить протекание кровельного пирога в местах выхода  лестниц на кровлю (в осях 7-10/Г-Ж) и над группами (в осях И-Ж/1-6, Г-А/4-6) здания  детского сада.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СМРстрой» (ОГРН  

<

***>) в пользу муниципального казённого учреждения города Новосибирска  «Управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>) 6 000 рублей 00 копеек  судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апел- ляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный  апелляционный суд (г. Томск).