РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 

27.04.2018 года                                                           Дело № А40-207524/17-110-1896

Резолютивная часть решения объявлена 24.04.2018 года 

Решение в полном объеме изготовлено 27.04.2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Арктический Вектор» (ОГРН 

<

***>, 163015, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Лидер» (ОГРН 

<

***>, 

<

...>, комн. 1) о взыскании 2  114 478 руб. задолженности,

при участии:

по протоколу,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Арктический Вектор» обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Лидер» о взыскании (с учетом изменений в порядке ст.49 АПК РФ) 2 114 478,15 руб. задолженности по Договорам №3ВО-СФ 011 от 01.08.2016, №СФ 097 от 01.08.2016, №СФ 005 от 15.09.2016.

Истец, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Ответчик иск не признал по основаниям,  изложенным в отзыве. 

Заслушав представителя ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между ООО «СК Лидер» (Далее Заказчик) и ООО «СК Арктический Вектор» (Далее Подрядчик) были заключены Договоры подряда:

От 01 августа 2016 года № ЗВО-СФ 011 (Далее Договор 1) по условиям которого Подрядчик обязался в срок до 25.09.2019 выполнить текущий ремонт на объекте: здание столовой ив. №7, расположенном по адресу 

<

...>, в/г №8, в/ч 56529 ВМФ. В соответствии с актами выполненных работ ЕС-2 №1от 14.10.2016 и №2 от 30.11.2016 работы выполнены Подрядчиком в Предусмотренный Договором 1 срок и приняты Заказчиком.

От 01 августа 2016 года № СФ 097 (Далее Договор 2), по условиям которого Подрядчик обязался в срок 25.09.2016 выполнить текущий ремонт на объекте: хранилище (инженерное сооружение) №13, расположенном по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, в/г №21, в/ч 77360-И СФ. В соответствии актами выполненных работ КС-2 №1 от 15.11.2016 и №2 от 30.11.2016 работы выполнены Подрядчиком в Предусмотренный Договором 2 срок и приняты Заказчиком.

От 15 сентября 2016 № СФ 005 (Далее Договор 3) по условиям которого Подрядчик обязался в срок до 31.10.2016 выполнить текущий ремонт на объекте: административное Здание инв. №79, расположенном по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, в/г №19, в/ч 95005. В соответствии актом выполненных работ КС-2 №1 от 30.09.2017 и работы выполнены Подрядчиком в Предусмотренный Договором 3 срок и приняты Заказчиком.

Таким образом, Подрядчик полностью выполнил взятые на себя обязательства по Договорам.

В соответствии с пунктом 3.1 Договора 1 стоимость работ по Договору составляет 1 390 360 (Один миллион триста девяносто тысяч триста шестьдесят) рублей. Пунктом 3.2. Договора 1 предусмотрено, что оплата за выполнение работ производится в течение 45 (Сорока пяти) дней на основании Актов сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 14.10.2016 и №2 от 30.11.2016 Подрядчик выполнил работы общей стоимостью 1 390 360 (Один миллион триста девяносто тысяч триста шестьдесят) рублей за вычетом предоставленных Заказчиком материалов на сумму 139 038 (Сто тридцать девять тысяч тридцать восемь) рублей 64 коп. согласно акту зачета взаимных требований.

На сегодняшний день Заказчик не выполнил свои обязательства по Договору 1 перед Подрядчиком по оплате выполненных работ на сумму 1 251 321 (Один миллион двести пятьдесят одна тысяча триста двадцать один) рубль 08 коп.

В соответствии с п. 3.1 Договора 2 Стоимость работ по Договору 2 составляет 807 769 (Восемьсот семь тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 50 коп. Пунктом 3.2. Договора 1 предусмотрено, что оплата за выполнение работ производится в течение 45 (Сорока пяти) дней на основании Актов сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 15.11.2016 и №2 от 30.11.2016 Подрядчик выполнил работы общей стоимостью 807 769 (Восемьсот семь тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 50 коп. за вычетом поставленных Заказчиком материалов на сумму 396 785 (Триста девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 26 коп. согласно акту зачета взаимных требований от 30.12.2016 года.

На сегодняшний день Заказчик не выполнил свои обязательства по Договору 2 перед Подрядчиком по оплате выполненных работ на сумму 410 984 (Четыреста десять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 24 коп.

В соответствии с п. 3.1. Договора 3 стоимость работ по Договору 3 составляет 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч). Пунктом 3.2. Договора 3 предусмотрено, что оплата за выполнение работ производится в течение 45 (Сорока пяти) дней на основании Актов сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 30.09.2016 Подрядчик выполнил работы на 581 259 (Пятьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять) рублей 33 коп. за вычетом поставленных Заказчиком материалов на сумму 129 122 (Сто двадцать девять тысяч сто двадцать два) рубля 78 коп. согласно акту зачета взаимных требований от ЗОЛ 1.2017.

На сегодняшний день Заказчик не выполнил свои обязательства по Договору 3 перед Подрядчиком по оплате выполненных работ на сумму 452 172 (Четыреста пятьдесят две тысячи сто семьдесят два) рубля 24 коп.

Таким образом, задолженность Заказчика пред Подрядчиком по Договорам 1,2,3 составляет 2 114 478 (Два миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 15 коп.

15 мая 2017 года в адрес Заказчика была направлена претензия с требованием причислить денежные средства в размере 2 114 478 (Два миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 15 коп на расчетный счет подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения данной претензии. Соответственно, претензионный порядок Истцом соблюден полностью.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

При  указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

При  этом суд считает доводы ответчика несостоятельными,  поскольку  заявление о зачете  направлено в адрес истца после направления искового заявления в суд, при  этом, согласно распечатке с Сайта Почта России ,  им получено не было, конверт направлен обратно , то есть истцом не получен,   в связи с чем с чем не имеет правового значения для признания зачета совершившимся.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Лидер»  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Арктический Вектор» 2 114 478 руб. 15 коп. задолженности, 2 000 руб.в  возмещение расходов по госпошлине.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Лидер»  в  федеральный бюджет госпошлину в размере 31 572 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко