АРБИТРАЖНЫЙ СУД   ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

2 октября 2019г. Дело № А49-8062/2019  

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи  А.П.Телегина, руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 174 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления капитального строительства города  Кузнецка удовлетворить, судебные расходы отнести на ответчика.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью  

«Тамбовэлитстрой» в течение 40 дней с момента вступлении решения в  

законную силу устранить следующие недостатки работ, выполненных  

ответчиком по контракту № 22 от 20.11.2016г., заключенному с  

Управлением капитального строительства города Кузнецка, приведя  

результат работ в соответствие с требованиями контракта, в т.ч.  восстановить работу кабеля уличного освещения; 

 устранить провал асфальтовой отмостки здания;   восстановить облицовку цоколя здания;  

 восстановить целостность ступеней крылец здания;   восстановить плиточное покрытие центральной лестницы здания;  

 устранить протекание кровли здания в осях 5* -6*/А-Б; 

 устранить причины намокания стены в центральном тамбуре  

(помещение № 1.1 в осях 6-6*/ А-Б), устранив грибок и восстановив  

целостность красочного покрытия; 

 устранить причины намокания наружных и внутренних стен в осях  

Г-2*, Г-3, Г-9, Г-9*, устранив грибок и восстановив целостность  

окрасочного покрытия; 

 восстановить крепление водосточных труб по периметру здания;  

 устранить провисание подвесного потолка «Армстронг» в  

помещениях № 3.2; 

 устранить в помещениях 1.41, 1.11, 1.12 (помещения с деревянным  

покрытием) трещины в полах, скрип половых досок;   восстановить крепление решеток на слуховых окнах;   восстановить целостность стеклопакета в помещении № 2.10.;  

 привести в работоспособное состояние пластиковые двери в  

санузлах; 

 восстановить работу механизмов пластиковых окон;  

 восстановить работу и функции противопожарных металлических  

дверей; 

 восстановить работу замка пожарного люка лестничного марша  

(помещение № 1.46); 

 восстановить работу электропривода BLF 230F заводской номер  

1612DS0698 противопожарного клапана К015 

 отремонтировать автоматическую систему в индивидуальном  

тепловом пункте (ИТП); 

 восстановить работу электрической тепловой завесы на входе в  

здание школы;  восстановить работу розеток медицинского блока. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Тамбовэлитстрой» в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 6000 руб.  

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной  жалобы в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня его  изготовления в полном объеме.  

 Судья А.П.Телегин