АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 167236/23-67-1384

г. Москва

13 октября 2023 г.

Резолютивная часть решения в порядке ч.1 ст. 229 АПК РФ вынесена 05 октября 2023 г.  Полный текст решения изготовлен 13 октября 2023 г.  

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судья В.Г. Джиоев (единолично), 

рассмотрев в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 АПК РФ, дело  по иску ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ"  (127051, 

<

...>, ЭТАЖ 5,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.02.2007, ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТАНДАРТ  СЕРВИС" (129090, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  МЕЩАНСКИЙ, ГИЛЯРОВСКОГО УЛ., Д. 4, СТР. 5, ЭТАЖ/ОФИС 3/301, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.07.2007, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 28 406,72 руб. без вызова лиц, участвующих в деле, 

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 01 августа 2023 г. принято к  рассмотрению в порядке упрощенного производства исковое заявление  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ" к  ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТАНДАРТ  СЕРВИС" о взыскании 28 406,72 руб.  

Ко дню принятия решения суд располагал сведениями о надлежащем извещении  лиц участвующих в деле о принятии искового заявления к производству и  рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.  

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в порядке главы 29  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции,  действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных  в течение установленного судом срока.  

Решение в порядке ст. 229 АПК РФ принято 05 октября 2023 г. 

В срок, установленный ст. 229 АПК РФ, в суд поступило ходатайство истца о  составлении мотивированного решения суда.  

В силу ч. 2 ст. 229 АПК РФ, по заявлению лица, участвующего в деле,  рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет  мотивированное решение.  

Ответчик представил отзыв, в котором возражал против удовлетворения  заявленных требований.  

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые  требования не подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.  

Как усматривается из материалов дела, между Государственным казенным  учреждением "Технический центр Департамента культуры города Москвы" (далее- Заказчик, Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью "Стройстандарт  сервис" (далее-Подрядчик, Ответчик) был заключен государственный контракт от 15  мая 2020 № 40/20 на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный ремонт системы водоснабжения в здании ГБУДО г. Москвы "ДМШ им.  А.С.Аренского" по адресу: 

<

...>, корп. 2  (далее-Контракт).  

Срок выполнения работ-11 января 2021. Работы проводятся в 2 этапа. Срок  действия договора-по 1 октября 2021 года включительно.  

Согласно ч. 4 ст. 425 ГК РФ окончание срока действия договора не освобождает  стороны от ответственности за его нарушение.  

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом.  

Согласно ч. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться  неустойкой. Согласно ч.1 ст. 330 ГК РФ Неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Определенный Контрактом срок выполнения 1 этапа работ – 1 декабря 2020 г.  

Работы 1 этапа в полном объеме выполнены 13 июля 2021 г. Просрочка  составляет 224 календарных дня.  

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Контракта пеня начисляется за каждый  день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей  на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от  цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за  исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен  иной порядок начисления пени.  

Размер пени за период с 1 декабря 2020 г. по 21 декабря 2020 г. составляет: 

(1 087 644,81 – 0) x 1/300 x 6,5% x 20 = 4 713 (Четыре тысячи семьсот  тринадцать) рублей 13 коп.  

Размер пени за период с 21 декабря 2020 г. по 13 июля 2021 г. составляет: 

(1 087 644,81 – 899 098,95) x 1/300 x 6,5% x 204 = 8 333 (Восемь тысяч триста  тридцать три) рубля 73 коп.  

Общий размер пени за просрочку исполнения обязательств 1 этапа Контракта  составляет 13 046 (Тринадцать тысяч сорок шесть) рублей 86 коп.  

Учитывая, что 2 февраля 2021 г. ООО "Стройстандарт сервис" произведена  оплата пени по требованию от 25 января 2021 г. № ТЦ-08-157/21 в размере 1 388 (Одна  тысяча триста восемьдесят восемь) рублей 96 коп., итоговый размер пени за просрочку  исполнения обязательств 1 этапа Контракта составляет 11 657 (Одиннадцать тысяч  шестьсот пятьдесят семь) рублей 90 коп.  

Определенный Контрактом срок выполнения 2 этапа работ – 11 января 2021 г.  

Работы 2 этапа в полном объеме выполнены 26 июля 2021 г. Просрочка  составляет 196 календарных дней.  

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Контракта пеня начисляется за каждый  день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей  

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от  цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за  исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен  иной порядок начисления пени.  

Размер пени за просрочку исполнения обязательств 2 этапа Контракта  составляет:  

(409 423,19 – 0,00) x 1/300 x 6,5% x 196 = 17 386 (Семнадцать тысяч триста  восемьдесят шесть) рублей 84 коп.  

Учитывая, что 2 февраля 2021 г. ООО "Стройстандарт сервис" произведена  оплата пени по требованию от 25 января 2021 г. № ТЦ-08-158/21 в размере 638  (Шестьсот тридцать восемь) рублей 02 коп., итоговый размер пени за просрочку  исполнения обязательств 2 этапа Контракта составляет 16 748 (Шестнадцать тысяч  семьсот сорок восемь) рублей 82 коп.  

Таким образом, общая сумма задолженности Подрядчика по Контракту  составляет:  

11 657,90 + 16 748,82=28 406 (Двадцать восемь тысяч четыреста шесть) рублей  72 коп.  

Вместе с тем, судом установлено, что размер неустойки составляет менее  5%, что в силу норм постановления Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 подлежит  списанию.  

В соответствии с п. 2.1. Цена Контракта составляет 1 497 068 (Один миллион  четыреста девяносто семь тысяч шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе  НДС 20%  

В соответствии с ч. 9.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, вступившей в силу 8 марта 2022  года, Правительство РФ вправе установить случаи и порядок списания начисленных  контрагенту, но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных  контрактом.  

В силу ч. 42.1 ст. 112 Закона N 44-ФЗ начисленные контрагенту, но не  списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или  ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2019, 2020 и 2021 годах обязательств,  предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые  установлены Правительством РФ.  

На основании данных норм постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 N  783 утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных  поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных  контрактом (далее - Правила).  

Заказчик при расчете неустойки и обращению в суд с настоящим исковым  заявлением, не учел положения подпункта «а» пункта 3 Правил, согласно которым  списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)  осуществляется заказчиком в случае, если общая сумма начисленных и неуплаченных  неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 % цены контракта.  

Согласно п. 2 Правил Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек  (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены  в полном объеме.  

С учетом того, что общая сумма неустойки составляет менее 5% от общей Цены  Контракта, то в силу норм действующего Законодательства, Заказчик обязан был  списать начисленную сумму неустойки.  

Пункт 5 Правил предусматривает, что основанием для принятия решения  Заказчиком о списании неустоек, в случае, предусмотренным подпунктом «а» п.3  Правил, является акт приемки выполненных работ в полном объеме.  

Правила, также предусматривают порядок списания Заказчик неустойки,  согласно которому, списание осуществляется на основании учетных данных заказчика,  имеющих документальное подтверждение, для чего заказчик должен обеспечить сверку  расчетов с контрагентом по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (п. 4  Правил).  

Как следует из пп. 8, 9 Правил, вопрос о списании рассматривается комиссией  по поступлению и выбытию активов, созданной заказчиком в целях подготовки таких  решений, которая при наличии вышеуказанных оснований и документов принимает  решение о списании в течение 10 дней со дня осуществления сверки расчетов с  контрагентом по начисленной и неуплаченной сумме неустоек. Решение оформляется  внутренним распорядительным документом заказчика (приказом, распоряжением),  содержащим информацию, предусмотренную п. 9 Правил. Непосредственно списание  осуществляется заказчиком на основании указанного решения в течение 5 рабочих  дней со дня его принятия (п. 11 Правил).  

В течение 20 дней со дня принятия решения о списании заказчик направляет  контрагенту письменное уведомление о списании с указанием размера суммы  списанных неустоек по форме, являющейся приложением к Правилам (п. 13 Правил).  

Тот факт, что Заказчик не исполнил обязанности по проведению сверки  задолженности с Подрядчиком не может служить основанием для неприменения  правил о списании, что в частности подтверждается позицией Президиума Верховного  Суда Российской Федерации 28.06.2017.  

Так, согласно п. 40 Обзора судебной практики применения законодательства  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, списание  начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов,  пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного(муниципального)  контракта является обязанностью государственного (муниципального) заказчика,  поскольку данные действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по  государственным (муниципальным) контрактам.  

Статья 401 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что  лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом,  несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности).  

Из приведенных норм можно сделать вывод, что списание при наличии всех  перечисленных в Правилах обстоятельств для заказчика фактически обязательно.  

Исходя из изложенного, имеются основания для освобождения Подрядчика от  ответственности в виде взыскания неустойки.  

Таким образом, основания для взыскания неустойки отсутствуют.  

Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для  принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными  органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий  (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.  

Согласно п. 3 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно  раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного  заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено  настоящим Кодексом.  

Согласно п. 1 ст. 71 АПК РФ, Арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном  и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь ст.ст. 4, 27, 67, 68, 110, 112, 123, 167-171, 227, 229  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления  мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном  объеме.  

Судья: В.Г.Джиоев