АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А15-11182/2023

20 мая 2024 года

г.Махачкала

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Оруджева Х.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мустафаевой А.К.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  ООО "Альянс-2005" (ИНН 

<

***>)  

к ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" (ИНН 

<

***>)  

о признании действий (бездействия) ГКУ РД «Дирекция единого государственного  заказчика-застройщика» выраженные в письмах от 16.10.2023 № 11-10/09-3010/23 и от  30.10.2023 № 11-10/09-3136/23 незаконными в виде отказа провести экспертизу по объекту:  "Дошкольная образовательная организация на 80 мест в с. Юрковка Тарумовского района  Республики Дагестан" в пределах тридцати процентов цены контракта в связи с ростом цен  на строительные ресурсы на основании заключенного государственного контракта   № 0103200008422003238 от 17 января 2023 года на выполнение строительно-монтажных  работ,  

об обязании ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»  рассмотреть повторно заявку ООО «Альянс-2005» (с учетом уточнений),  

руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

исковое заявление удовлетворить.  

 Признать незаконным отказ ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика- застройщика" (ИНН 

<

***>), выраженный в письмах от 16.10.2023 № 11-10/09-3010/23 и  от 30.10.2023 № 11-10/09-3136/23, в заключении дополнительного соглашения к  государственному контракту № 0103200008422003238 от 17.01.2023.  

 Обязать ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" (ИНН  

<

***>) в течение 10 (десяти) дней с момента вступления решения суда в законную силу  повторно рассмотреть заявление ООО "Альянс-2005" (ИНН 

<

***>) от 30.10.2023 о  заключении дополнительного соглашения к государственному контракту   № 0103200008422003238 от 17.01.2023.  

 Взыскать с ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика"  (ИНН 

<

***>) в пользу ООО "Альянс-2005" (ИНН 

<

***>) судебные расходы по  

уплате государственной пошлины по иску в размере 6000 руб.  

 Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

 Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный  суд (г. Ессентуки Ставропольского края) в течение месяца со дня его принятия (изготовления  в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Дагестан.  

Судья Х.В. Оруджев