Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-17035/2017

03 октября 2017 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  28 сентября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  03 октября 2017 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коршуновой А.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (адрес:  Россия 190000, 

<

...>/ЛИТЕРА А, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СмолГазСпецСтрой" (адрес:  Россия 238345, Светлый, п. Взморье, Калининградская, Заливная 2А, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 49 814 руб. 76 коп. 

 

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 15.02.2017

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 01.08.2017

установил:

Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" после уточнения исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ просит взыскать с ООО "СмолГазСпецСтрой" 1 842 773 руб. 00 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору № 23/ТС-15 от 23.03.2015 и 30 000 руб. 00 коп. штрафа за нарушение п.8.4. договора. 

Ответчик иск отклонил и заявил ходатайство о снижении неустойки на основании ст.333 ГК РФ. 

Определением от 15.05.2017 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. 

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор № 23/ТС-15 от 23.03.2015 на выполнение работы по капитальному ремонту тепловых сетей по адресу: станция метро «Черная речка», ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-1; от ТК-6 до ул.Савушкина, д.2, лит.А (станция метро «Черная речка»). 

Согласно п.4.1.3 подрядчик-ответчик обязан разработать сметную документацию и представить ее на утверждение заказчику в срок не позднее 1 месяца с даты подписания договора. 

При выполнении работ ответчик установил, что в зону траншеи тепловой сети попадает опора контактной сети с питающим шкафом троллейбуса, необходим перенос остановочного пункта троллейбуса. 

Письмом от 14.09.2015 исх. № 241 ответчик уведомил истца о приостановке работ. Письмо направлено после истечения месячного срока, установленного п.4.1.3 договора. 

Согласно п.8.4 договора в случае нарушения подрядчиком требований, установленных п.4.1 договора, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 30 000 руб. 00 коп. за каждое нарушение. 

Истец помимо взыскания указанного штрафа требует с ответчика уплаты неустойки по п.8.2 договора за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных календарным планом, в размере 1 842 773 руб. 00 коп. 

Расчет неустойки произведен истцом от предельной стоимости работ, указанной в п.2.1 – 17 550 219 руб. 00 коп. исходя из 0,1% за каждый день просрочки до получения письма о приостановлении работ. 

Суд считает, что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям рушения обязательства и с учетом ходатайство ответчика уменьшает ее до 20 000 руб. 00 коп. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 309, 310, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СмолГазСпецСтрой" в пользу Государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" 50 000 руб. 00 коп., из них: 20 000 руб. 00 коп. неустойки и 30 000 руб. 00 коп. штрафа, а также 2 000 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.