9_1838702  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А74-5164/2019

город Абакан

24 июля 2019 года

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.А, Федулкиной, при  ведении протокола секретарем ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ДСУ-7» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Управлению коммунального хозяйства и транспорта администрации города Абакана (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 2 624 759 руб. 59 коп. долга при участи в судебном заседании представителей: 

от истца - ФИО2, по доверенности от 10.01.2019 № 1,  от ответчика – Гасан О.А., по доверенности от 29.12.2018 № 3520.  

Общество с ограниченной ответственностью «ДСУ-7» (далее – истец, ООО «ДСУ-7»)  обратилось в суд с иском к «Управлению коммунального хозяйства и транспорта  администрации города Абакана» (далее – ответчик, Управление) о взыскании 2 668 136 руб.  28 коп. долга по муниципальному контракту от 03.07.2018 № 45/ЭА на выполнение работ по  ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Абакана.  

Определением суда от 13.05.2019 дело назначено к рассмотрению в порядке  упрощённого производства без вызова сторон в соответствии со статьёй 228 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Определением от 10.06.2019 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам  искового производства  

В судебном заседании 24.07.2019 истец заявил об уменьшении размера исковых  требований до суммы 2 624 759 руб. 59 коп. в связи с принятием к зачету предъявленной  заказчиком по претензии от 17.12.2018 неустойки в размере 43 376 руб. 69 коп. В  соответствии со статьей 149 Арбитражного процессуального кодекса РФ уменьшение  размера исковых требований принято арбитражным судом.  

Ответчик не оспорил предъявленные требования, объяснил задержку в оплате работ  отсутствием финансирования.  

При рассмотрении дела арбитражным судом установлены следующие обстоятельства.  

Между обществом с ограниченной ответственностью «ДСУ-7» (Подрядчик) и  Управлением коммунального хозяйства и транспорта администрации г.Абакана (Заказчик)  заключен муниципальный контракт № 45/ЭА от 03.07.2018 на выполнение ямочного ремонта  асфальтобетонного покрытия улично- дорожной сети г. Абакана.  

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составила 7 005 805 руб. 46 коп. Срок  действия контракта установлен в пункте 9.1 - до 31.10.2019.  

В соответствии с пунктом 2.6 муниципального контракта оплата фактически  выполненных работ производится Заказчиком в рублях путем безналичного перечисления  денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней с момента  подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.  

Свои обязательства истец исполнил частично, что подтверждает справка о стоимости  выполненных работ и затрат № 1 от 30.10.2018 и акт о приемке выполненных работ за  октябрь 2018 г. № 1 от 30.10.2018.  

10.12.2018 сторонами заключено соглашение о расторжении муниципального  контракта № 45/ЭА от 03.07.2018, в котором определена стоимость выполненных работ  Подрядчиком на момент расторжения контракта, которая составила 2 668 136 (два миллиона  шестьсот шестьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть) руб. 28 коп.  

В силу пункта 4 соглашения о расторжении контракта Заказчик оплачивает  выполненные работы в срок до 28 декабря 2018 года. Однако Заказчиком обязательства по  оплате выполненных работ не исполнены, денежные средства на расчетный счет подрядчика  не перечислены.  

В целях досудебного урегулирования спора истцом 05.02.2019. была направлена  претензия о погашении задолженности в добровольном порядке.  

Ответчик письмом от 11.02.2019. № 271 признал наличие задолженности по  муниципальному контракту и сообщил о том, что в связи с недофинансированием из  городского бюджета не может гарантировать одномоментное покрытие всей суммы.  

Правоотношения сторон по муниципальному контракту регулируются положениями  главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре подряда и Федеральным  Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

В силу статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные  строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для  удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе  государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для  государственных или муниципальных нужд. В соответствии с частью 2 указанной статьи по  государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для  государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные,  проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и  непроизводственного характера работы и передать их государственному или  муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется  принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.  

В соответствии с ч. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или  отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после  окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим  образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.10.2018 и актом о  приемке выполненных работ за октябрь 2018 г. № 1 от 30.10.2018. подтверждается принятие  заказчиком выполненных работ на сумму 2 668 136 руб. 28 коп.  

Учитывая вышеизложенное, а также отсутствие у ответчика возражений относительно  предъявленной суммы, исковые требования подлежат удовлетворению полностью.  

Государственная пошлина по иску относится на ответчика и не подлежит в него  взысканию согласно п/п 1.1. пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса РФ.  

Руководствуясь статьями 169-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить: взыскать с Управления коммунального хозяйства и транспорта  администрации города Абакана в пользу общества с ограниченной ответственностью «ДСУ- 7» 2 624 759 (два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) руб.  59 коп. долга.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.  

Судья Федулкина А. А.