16_5311626  

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-13742/2022

г. Белгород

14 декабря 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Танделовой З. М. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио и  видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ООО  "СТРОЙХОЛДИНГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к МКУ УКС  администрации г.Белгорода (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании  1 871 916,34 руб., по встречному иску о взыскании 147 283,50 руб.,  

 при участии в судебном заседании:  

от истца/ответчика: представитель ФИО2, доверенность от 03.07.2023,  диплом;  

от ответчика/истца: представитель ФИО3, доверенность от 29.05.2023,  диплом.  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить полностью.  

 Взыскать с МКУ УКС администрации г.Белгорода (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "СТРОЙХОЛДИНГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

1163123054863) задолженность по оплате стоимости выполненных работ по  муниципальному контракту № Т.2022.139 от 04 мая 2022 года в размере  1 848 137,69 руб., неустойку за просрочку оплаты работ за период с 08.12.2022 по  14.12.2023 в размере 218 141,86 руб., дальнейшее взыскание неустойки  производить, начиная с 15.12.2023 по день фактического исполнения  обязательства, исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на  дату уплаты пени от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки,  штраф в размере 15 000 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по  контракту, а всего 2 081 279,55 руб.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО "СТРОЙХОЛДИНГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу МКУ УКС администрации г.Белгорода (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств по  муниципальному контракту № Т.2022.139 от 04 мая 2022 года за период с  02.10.2022 по 23.11.2022 в размере 22 536,43 руб.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Взыскать с ООО "СТРОЙХОЛДИНГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) госпошлину в доход федерального бюджета в размере 795 руб.  

Произвести зачет взаимных требований, в результате которого взыскать с  МКУ УКС администрации г. Белгорода (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу МКУ УКС администрации г. Белгорода (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 2 058 743. 12.руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Танделова З. М.