АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

25 июня 2020 года

Дело № А33-9150/2020

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 18 июня 2020 года.

В полном объёме решение изготовлено 25 июня 2020 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Смольниковой Е.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Инсайт-проект» (ИНН 2463253796, ОГРН 1142468013126, дата регистрации - 03.03.2014, адрес: 660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, стр. 28, каб. 143)

к обществу с ограниченной ответственностью «СибЛесПроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации - 10.06.2016, адрес: 660004, г. красноярск, ул. 26 бакинских комиссаров, д. 28, кв. 167)

о взыскании задолженности, процентов,

в присутствии в судебном заседании до перерыва:

от истца: директора ФИО1 на основании решения от 25.05.2017,

от ответчика: ФИО2 на основании доверенности от 01.02.2020,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО3,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Инсайт-проект» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «СибЛесПроект» (далее – ответчик) о взыскании 141 600 руб. задолженности по договору от 20.02.2018, 16 708,80 руб. неустойки за период с 22.01.2020 по 18.05.2020.

Определением от 10.03.2020 исковое заявление принято для рассмотрения в порядке упрощенного производства. Определением от 06.05.2020 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенным в иске. Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 18.06.2019. После окончания перерыва лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного  разбирательства, в судебное заседание не явились. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие сторон.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между истцом (исполнителем) и ответчиком (заказчиком) заключен 20.02.2018 договор, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению проектной документации на лесной участок, находящийся на территории Балахтинского лесничества, а том числе: Балахтинское участковое лесничество, квартал № 43; Балахтинское сельское, с/з Еловский, кварталы №№ 1-5, 9, 13, 17; Балахтинское сельское, с/з Большесырский, кварталы №№ 1-6, - согласно техническому заданию (пункт 1.1).

В техническом задании к договору (приложение № 2) установлено, что лесные участки предназначены для заготовки древесины; на первом этапе работ исполнитель обязан совместно с заказчиком определить перечень кварталов, провести анализ кварталов на отсутствие обременений третьих лиц, пересечений с кварталами третьих лиц, разработать проекты лесных участков, согласовать их с Министерством лесного хозяйства Красноярского края, поставить лесные участки на государственный кадастровый учет; на втором этапе исполнитель обязан разработать проект освоения лесов на лесной участок, осуществить прохождение государственной экспертизы в Министерстве лесного хозяйства; результатом работ на первом этапе являются проект лесного участка и кадастровый паспорт лесного участка, на втором этапе – проект освоения лесов.

Согласно пункту 3.1 договора и протоколу соглашения о договорной цене (приложение № 1) стоимость работ по договору составляет 389 400 руб., в том числе стоимость первого этапа 283 200 руб., стоимость второго этапа – 106 200 руб.

В силу пункта 3.2 договора оплата производится заказчиком в следующем порядке: 

после подписания договора в течение 5 банковских дней заказчик перечисляет предоплату в размере 50 % по первому этапу, что составляет 141 600 руб.; 

в течение 5 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ заказчик перечисляет оставшиеся 50 % стоимости работ по первому этапу - 141 600 руб.

Согласно пункту 4.1 договора исполнитель приступает к выполнению работ после подписания договора и предоставления необходимой исходной информации в соответствии с пунктом 3 технического задания. 

Пунктом 4.2 договора установлено, что сроки выполнения работ указаны в календарном плане (приложение № 3), согласно которому работы должны быть выполнены в течение 160 календарных дней, в том числе: разработка проектной документации на лесной участок - в течение 20 календарных дней с момента представления необходимых технических и исходных данных и аванса; согласование проекта в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края – 20 календарных дней; простановка лесного участка на кадастровый учет – 60 календарных дней; разработка проекта освоения лесов – 30 календарных дней; прохождение государственной экспертизы проект освоения лесов – 30 календарных дней.

В соответствии с пунктом 5.3 договора в случае, если заказчик просрочит исполнение принятых на себя обязательств по оплате работ подрядчик вправе потребовать выплаты неустойки (пени) в размере 0,1% в день от стоимости неисполненного обязательства, но не более 10 % от цены договора.

Пунктом 6.1 договора предусмотрено, что договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

Платежным поручением № 19 от 21.02.2018 заказчик оплатил 141 600 руб. аванса.

Согласно представленному в материалы дела приказу Министерства лесного хозяйства Красноярского края от 13.09.2018 № 1776-ГЛР/Р министерством утверждена проектная документация лесного участка, проектируемого для заготовки древесины, общей площадью 3 893 га, расположенного по адресу: Балахтинский район, Балахтинское лесничество, Балахтинское сельское участковое лесничество, совхоз «Еловский

<

...>, 9, 13, 17, совхоз Большесырский, кварталы №№ 1-6, - из состава земель лесного фонда; срок действия решения об утверждении проектной документации лесного участка составляет два года.

28 сентября 2018 года сторонами подписан акт сдачи-приемки работ по первому этапу по разработке проектов лесных участков и их согласованию с Министерством лесного хозяйства Красноярского края.

Проектная документация лесного участка и копия приказа от 13.09.2018 № 1776-ГЛР/Р переданы заказчику на основании накладной № 01 от 28.09.2018.

Согласно представленным истцом выпискам из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении лесные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации, поставлены на кадастровый учет 07.12.2018 с видом разрешенного использования - для заготовки древесины. 

В подтверждение факта выполнения работ по первому этапу на общую сумму 283 200 руб., в том числе по постановке лесного участка на кадастровый учет, истец представил в материалы дела подписанный в одностороннем порядке акт сдачи-приемки работ от 01.04.2019 с отметкой исполнителя об отказе заказчика от подписания акта.

В обоснование своих возражений об отказе в подписании акта ответчик представил в материалы дела письмо КГБУ «Балахтинское лесничество» № 119 от 10.04.2019, согласно которому заявка заказчика на предоставление в аренду лесных участков, находящихся в Балахтинском сельском лесничестве совхоз «Еловский» кварталя №№ -5, 9, 13-17, совхоз «Большесырский» кварталы №№ 1-6, - лесничеством отклонена на основании материалов ежегодной инвентаризации лесосечного фонда, поступлением от других лесопользователей района ходатайств об отклонении заявки, в связи с нехваткой лесосечного фонда для выполнения государственного задания, обеспечения нужд местного населения и малого и среднего бизнеса.

Письмом от 19.11.2019 № 19-64А подрядчик направил заказчику акт сдачи-приемки работ № 01-1 от 01.042019, накладную № 02 от 01.04.2019, счет-фактуру № 38 от 01.04.2019 и счет-на оплату № 47 от 01.04.2019 и выписки из ЕГРЮЛ в связи с отказом заказчика в апреле 2019 года от приемки выполненных по первому этапу работ. Согласно отчету об отслеживании почтового отправления письмо заказчиком не получено, возвращено исполнителю за истечением срока хранения.

В связи с неоплатой стоимости выполненных работ по первому этапу истец обратился к ответчику с претензией от 09.01.2020 № 20-01А об оплате 141 600 руб. задолженности и 7 649,69 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ, истец обратился в арбитражный суд с уточненным иском о взыскании 141 600 руб. задолженности, 16 708,80 руб. неустойки за период с 22.01.2020 по 18.05.2020.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик ссылался на нарушение истцом срока выполнения работ и невозможность принять участие в аукционе.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Заключенный между сторонами договор по разработке проектной документации на лесной участок, является договором подряда, отношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Факт выполнения истцом работ по первому этапу по разработке проекта лесных участков, согласованию проекта с Министерством лесного хозяйства Красноярского края, постановке лесных участков на кадастровый учет на сумму 283 200 руб. подтверждается представленной истцом выпиской из проекта лесного участка, приказом Министерства лесного хозяйства Красноярского края от 13.09.2018 № 1776 об утверждении проекта, выписками из единого государственного реестра недвижимости с указанием сведений о постановке земельных участков на кадастровый учет.

Выполненные истцом работы по разработке проекта лесных участков и согласованию проекта с Министерством лесного хозяйства Красноярского края приняты заказчиком на основании акта сдачи-приемки работ от 28.09.2018, результат работ в виде проекта и приказа министерства в электронном виде получен заказчиком по накладной № 01 от 28.09.2018. 

От приемки выполненных работ по постановке земельных участков на кадастровый учет заказчик отказался, о чем свидетельствует соответствующая отметка в подписанном в одностороннем порядке акте сдачи-приемки выполненных работ от 01.04.2019.

Указанные ответчиком мотивы отказа от приемки выполненных работ в связи с нарушением истцом срока выполнения работ и невозможностью принять участие в аукционе суд признает необоснованными с учетом положений статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3.2 договора, из содержания которых следует обязанность заказчика уплатить обусловленную цену после окончательной сдачи результата работ; установленных обстоятельств сдачи результатов работ заказчику, в том числе путем передачи документации представителю ответчика в судебном заседании (в связи с неполучением заказчиком почтового отправления с результатом работ по кадастровому учету).

Учитывая непредставление ответчиком доказательств оплаты выполненных работ по первому этапу в установленном договором размере, суд считает требования истца о взыскании 141 600 руб. задолженности по договору от 20.02.2018 обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Наравне с суммой основного долга, истцом заявлено требование о взыскании 16 708,80 руб. неустойки за период с 22.01.2020 по 18.05.2020, начисленной на сумму долга – 141 600 руб., - исходя из установленной пунктом 5.3 договора неустойки в виде 0,1 % за каждый день просрочки оплаты выполненных работ. Ответчик контррасчет неустойки в материалы дела не представил. Расчет суммы неустойки проверен судом и признан арифметически верным. Обязанность ответчика уплатить неустойку в случае нарушения обязательств по оплате установлена статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 5.3 договора. Учитывая изложенное, требования о взыскании 16 708,80 руб. неустойки подлежат удовлетворению.

Таким образом, исковые требования о взыскании долга и неустойки подлежат удовлетворению в полном объеме.

Государственная пошлина за рассмотрение иска на сумму 158 308,80 руб. составляет               5 749 рублей. При обращении в суд с иском истцом по чеку-ордеру от 04.03.2020 уплачено 5 506 руб. государственной пошлины. Учитывая указанные обстоятельства, а также результат рассмотрения настоящего спора, с учетом положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 5 506 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, 243 руб. государственной пошлины подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СибЛесПроект» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инсайт-проект» 141 600 руб. задолженности по договору от 20.02.2018, 16 708,80 руб. неустойки за период с 22.01.2020 по 18.05.2020, 5 506 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по чеку-ордеру от 04.03.2020.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СибЛесПроект» в доход федерального бюджета 243 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья                                                                          Е.Р. Смольникова