82_7786302 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-59920/18

19 ноября 2018 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ю.С.Петропавловской,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО  "ФОРТ" к Министерству строительного комплекса Московской области,  Администрации городского округа Фрязино МО об обязании внести изменения  в договор развития застроенной территории  

При участии в судебном заседании- согласно протоколу с/з от 19.11.2018 

Руководствуясь статьями ст. 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать Министерство строительного комплекса Московской области и  Администрацию городского округа Фрязино заключить с ООО  «Специализированный застройщик «Форт» дополнительное соглашение к  договору «О развитии части застроенной территории в границах части квартала   № 9 в городе Фрязино Московской области», зарегистрированному  Министерством строительного комплекса Московской области в реестре ДоРЗТ   № 30го/001 от 17.02.2016 года, со следующими условиями:  

 в пункте 4.1.3 второй абзац изменить, изложить в редакции «Срок  исполнения обязательства: начало - 2 квартал 2018 года, максимальный срок  исполнения обязательства – 30.09.2020»;  

 в пункте 4.1.4 во втором абзаце слова «площадью 69,9 кв. м.» заменить  словами «площадью 73,7 кв. м.» и далее по тексту всего договора; третий абзац  изменить, изложить в следующей редакции: «Срок исполнения обязательства:  начало - 2 квартал 2018 года, максимальный срок исполнения обязательства –  

 в пункте 4.1.7 в первом абзаце цифры «31.12.2020» заменить цифрами  «31.12.2021»;  

 Указать в тексте дополнительного соглашения следующее положение:  «дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу. Подписанные тексты настоящего  Дополнительного соглашения по одному экземпляру хранятся у  Администрации, Инвестора, и один предназначен для предоставления в  Министерство строительного комплекса Московской области».  

 В удовлетворении остальной части требований отказать.  

Взыскать с Администрации городского округа Фрязино Московской  области в пользу ООО «Форт» судебные расходы на уплату государственной  пошлины в размере 2000 руб.  

Взыскать с Министерства строительного комплекса Московской области  в пользу ООО «Форт» судебные расходы на уплату государственной пошлины  в размере 2000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со  дня принятия решения.  

Судья Ю.С. Петропавловская