Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-271986/19-27-2167

06 марта 2020 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена              28 февраля 2020 года

Полный текст решения изготовлен                              06 марта 2020 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВИНДМАСТЕР» (107497, 

<

...>, ЭТАЖ 3, ПОМ. IV, КОМН. 13, ОФИС 55, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации: 07.04.2011) 

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» (107031, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации: 29.07.2002)

о взыскании 4 210 192 руб. 92 коп.

при участии: согласно протоколу;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВИНДМАСТЕР» обратилось в арбитражный суд города Москвы с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» о взыскании задолженность в размере 4 210 192 руб. 92 коп.

Истец в заседание суда не явился, надлежащим образом извещен, о дате, времени и месте рассмотрения дела. Дело рассматривается в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ, в отсутствие не явившихся представителей истца.

Ответчик исковые требования не признает, по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителя ответчика, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в части, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.08.2018 г. по делу №А40-99963/18-71-135Б ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВИНДМАСТЕР» (далее - Истец) признано банкротом, в отношении него открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВИНДМАСТЕР» утвержден ФИО2.

В соответствии с п. 1 ст. 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ, с даты утверждения конкурсного управляющего, конкурсный управляющий осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника.

В ходе анализа дебиторской задолженности Истца было установлено, что Ответчик имеет задолженность перед Истцом в размере 4 210 192 руб. 92 коп., возникшую на основании следующего.

Между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВИНДМАСТЕР» и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ»  был заключен Договор подряда №ПЦ-08 от 20 ноября 2015 г. на выполнение подрядных работ по изготовлению и монтажу оконных и дверных конструкций на объекте «Перинатальный центр в г.Наро-Фоминск по адресу: М.О, 

<

...>».

Пунктом 1 ст. 702 ГК РФ установлено, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Предельная стоимость работ составила 28 588 801 руб. 00 коп.

К указанному Договору позже были заключены Дополнительные соглашения № 1 от 11.05.2016 г., №2 от 10.06.2016 г., №3 ОТ 10.06.2016 г., №4 от 28.07.2016 г., № 5 от 05.11.2016 г.,  где стороны согласовали дополнительные работы по поставке и монтажу внутренних витражей на объекте.

Указанные в договоре работы выполнены в полном объёме, о чём стороны подписали Акт о приёмке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 23.12.2015 г. на сумму 28 588 801,00 руб.

Согласованные Дополнительным соглашением № 1 работы были выполнены в объёмах, подтверждёнными формами КС-2, КС-3 от 31.10.2016 г. на сумму 4231 647, руб., 07 коп., и от 30.12.2016 г. на сумму 360 508 руб.,81 коп.,  

В соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 10.06.2016 г. к Договору выполнил работы на общую сумму 3 416 695 руб., 00 коп., что подтверждается актами от 31.10.2016 г. на сумму 2 840 988 руб., 10 коп. и от 30.12.2016 г. на сумму 575 706 руб., 90 коп.

Стоимость выполненных работ, согласованных Дополнительным соглашением № 3 от 10.06.2016 г., составила: Акт о приёмке выполненных работ КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 31.10.2016 г. - 2 630 424 руб., 62 коп. Акт о приёмке выполненных работ КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 30.12.2016 г - 608 827 руб., 18 коп. 

Дополнительным соглашением № 4 от 28.07.2016 г. предусмотрено выполнение работ на сумму 407 887 руб., 22 коп. В подтверждение выполненных работ Сторонами подписаны Акт о приёмке выполненных работ КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 30.12.2016 г. 

Актом о приёмке выполненных работ КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 30.12.2016 г. подтверждается выполнение работ по Дополнительному соглашению № 5 от 05.11.2016 г. на сумму 450 859,44 руб..

На момент подачи иска согласно Справке о стоимости выполненных работ задолженность АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» составила 4 210 192 руб. 92 коп.

Выполнение работ по указанному Договору подтверждается подписанными сторонами Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

"09" июля 2019 г. конкурсный управляющий направил ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВИНДМАСТЕР» претензию с просьбой погасить задолженность, однако данная претензия была оставлена без ответа и удовлетворения.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Между тем, как установлено судом, в материалы дела ответчиком представлены документы о прекращении соглашения на сумму 2 069 582 руб., 22 коп., что подтверждается актами об оказании услуг, о возмещении затрат и актами взаимозачета:

Акт о возмещении затрат от 31.10.2016 № 123/1 на сумму 22 800,00 руб. и Акт взаимозачета от 31.10.2016 № 489;

Акт об оказании услуг от 31.12.2016 № 501 на сумму 18 025,44 руб. и Акт взаимозачета от 31.12.2016 № 601;

Акт об оказании услуг от 31.12.2016 № 502 на сумму 28 785,35 руб. и Акт взаимозачета от 31.12.2016 № 601;

Акт об оказании услуг от 31.12.2016 № 503 на сумму 30 441,39 руб. и Акт взаимозачета от 31.12.2016 № 601;

Акт об оказании услуг от 31.12.2016 № 504 на сумму 20 394,36 руб. и Акт взаимозачета от 31.12.2016 № 601;

Акт об оказании услуг от 31.12.2016 № 505 на сумму 22 542,97 руб. и Акт взаимозачета от 31.12.2016 № 601.

 Кроме того, зачет обязательств по оплате выполненных работ и возврату гарантийного резерва на общую сумму 2 400 000 руб., а именно Соглашение от 26.12.2016 (далее - Соглашение), заключенное между Истцом и Ответчиком, в соответствии с которым АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» были выявлены недостатки работ, выполненных ООО «ГК «Виндмастер» по Договору от 20.11.2015 № ПЦ-08, и что ООО «ГК «Виндмастер» согласилось с этими недостатками, величина расходов на устранение которых составила 2 400 000 руб. 

В соответствии с п.2 Соглашения ООО «ГК «Виндамастер» обязалось предоставить Акт об устранении недостатков (далее - Акт об устранении недостатков) до 30.04.2017.

В соответствии с п. 3 Соглашения ЗАО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» вправе не оплачивать те работы, выполненные ООО «ГК «Виндмастер» по Договору подряда от 20.11.2015 № ПЦ-08, которые остаются неоплаченными по состоянию на 30.11.2016, на период времени до 30.04.2017

В соответствии с п.4, п.4.1, п.4.2, п.4.3 Соглашения, в случае, если ООО «ГК «Виндмастер» не предоставит Акт об устранении недостатков до 30.04.2017, то:

с 01.05.2017 ООО «ГК «Виндмастер» не вправе устранять недостатки;

01.05.2017 задолженность ЗАО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» перед ООО «ГК «Виндмастер», которая указана в пункте 3 настоящего Соглашения, автоматически полностью засчитывается в возмещение расходов на устранение Недостатков, которые указаны в пункте 1 Соглашения. При этом не требуется составления каких-либо документов между Сторонами для того, чтобы этот зачет считался состоявшимся;

01.05.2017 обязанность ЗАО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» перед ООО «ГК «Виндмастер» по возвращению гарантийного резерва автоматически частично засчитывается (на разницу между расходами на устранение недостатков, которые указаны в пункте 1 настоящего Соглашения, и засчетом, который указывается в пункте 4.2. настоящего Соглашения), в возмещение расходов на устранение Недостатков, которые указаны в пункте 1 настоящего Соглашения. 

По состоянию на 30.04.2017 ЗАО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» по Договору от 20.11.2015 № ПЦ-08 произведена оплата в размере 34 777 874,87 руб. 

По состоянию на 30.04.2017 (в соответствии с пунктом 3 Соглашения) долг по оплате выполненных работ ЗАО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» перед ООО "ГК "Виндмастер" по Договору от 20.11.2015 №ПЦ-08 составлял 1 813 410,40 руб., обязательство ЗАО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» по возврату гарантийного резерва ООО «ГК«Виндмастер» по Договору от 20.11.2015 № ПЦ-08 составляло 2 034 782,52 руб.

Согласно п.4.2 Соглашения обязательство ЗАО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» перед ООО «ГК «Виндмастер» по оплате долга за выполненные работы, имеющийся по состоянию на 30.04.2017 в размере, 1813 410,40 руб., прекращено зачетом в возмещение расходов на устранение недостатков. В итоге разница между расходами на устранение недостатков в размере 2 400 000 руб. (п.1 Соглашения) и зачетом долга по оплате выполненных работ, имеющегося по состоянию ЗАО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» перед ООО «ГК «Виндмастер» на 30.04.2017, в размере, равном 1 813 410,40 руб., составила 568 589,60 руб. 

Согласно п. 4.3. Соглашения обязанность ЗАО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» перед ООО «ГК «Виндмастер» по возвращению гарантийного резерва в размере, равном 2 034 782,55 руб. автоматически частично засчитана на разницу между расходами на устранение недостатков, который указан в п.1. Соглашения и зачетом, состоявшимся в соответствии с п.4.2 Соглашения в размере, равном 568 589,60 руб. В итоге по состоянию на 01.05.2017 после состоявшегося зачета, предусмотренного п. 4.2 и п. 4.3. Соглашения, оставшаяся часть обязательства по возвращению ООО «ГК «Виндмастер» гарантийного резерва составила 1448 192,95 руб. (2 034 782,52 руб. (обязательство по возврату гарантийного резерва) - 568 589,60 руб. (разница между расходами на устранение недостатков и зачетом долга, предусмотренного п.4.2. Соглашения) = 1 448 192,95 руб.)

По состоянию на 17.02.2020 с учетом совершения после 01.05.2017 Ответчиком по Договору от 20.11.2015 №ПЦ-08 платежей в виде оплаты в размере 959 000,00 руб., долг Ответчика перед Истцом составляет 489 192,92 руб.

Таким образом, учитывая имеющееся в деле доказательства, подтверждающие факт взаимозачёта на основании актов об оказании услуг, о возмещении затрат и актов взаимозачёта на сумму 2 069 582 руб., 55 коп., а так же факт зачета долга ответчика перед истцом по оплате выполненных работ и факт зачета обязательства по возвращению гарантийного резерва на основании соглашения от 26.12.2016 г. на общую сумму 2 400 000 руб., 00 коп., исковые требования подлежат удовлетворению в части 489 192 руб. 92 коп.

В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы по госпошлине.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 65, 110, 167 - 171, 176, 180 - 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВИНДМАСТЕР» задолженность в размере 489 192 руб. 92 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 784 руб.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья:

В.И. Крикунова