АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-16604/2023

г. Ярославль

04 июля 2024 года

Резолютивная часть решения оглашена  04 июня 2024 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Шадриновой Л.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Светловой Е.О., 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Акваэнергострой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 204557.72 руб.,

 

при участии

от истца (онлайн)- ФИО1, по доверенности от 28.07.2023, диплому

от ответчика – не явились 

 

установил:

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" обратилось в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью "Акваэнергострой"  с исковым заявлением о взыскании с учетом уточнения неустойку в размере 204 557,72 руб.

В судебном заседании представитель истца требования поддержала в полном объеме, указала, что возражения ответчика сводится к правоотношениям по другому договору, требования по которому в рамках настоящего дела истцом не заявлены.

Ответчик в судебное заседание представителя не направил, возражений к начислению неустойки по договору № 003271-2202/Дог19 от 23.12.2019, на основании которого заявлен иск, не представил.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Между публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания» (далее - ПАО «ТГК-2», истец, заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Акваэнергострой» (далее - ООО «АЭС», ответчик, исполнитель) заключен договор № 003271-2202/Дог19 от 23.12.2019 года на выполнение проектных работ по объектам «Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей для Северодвинских городских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» (далее - договор).

В соответствии с пунктом 3.1 и 3.2 договора проектные работы должны быть выполнены до 30.04.2020 года в соответствии с календарным планом работ, который является приложением к договору и его неотъемлемой частью.

В установленные сроки исполнитель не выполнил проектные работы, что послужило основанием начисления неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.05.2020 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 16.11.2022 в размере 204 557, 72 руб.

Оставление требования об оплате неустойки без удовлетворения послужило основанием обращения с настоящим иском в суд.

Согласно пункту 6.4 договора в случае нарушения срока начала, окончания работ Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку, рассчитанную в порядке, установленном статьей 395 Гражданского кодекса РФ, от стоимости (цены) работ за каждый день просрочки.

Нарушение сроков выполнения работ подтверждается представленными в дело доказательствами, расчет неустойки в связи с нарушением сроков судом признается обоснованным (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правовых оснований для применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и уменьшении размера пени у суда отсутствуют.

Расходы по оплате государственной пошлины судом распределены в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Акваэнергострой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 204 557 руб. 72 коп. неустойки, 7 091 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Возвратить публичному акционерному обществу "Территориальная генерирующая компания №2" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 1 909 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежным поручениям от 07.09.2023 № 257, № 258, № 259, № 260, № 261, № 262, № 263, № 264, № 265. Исполнение судебного акта в части возврата государственной пошлины производится по ходатайству плательщика государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

Л.А. Шадринова