Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-153333/2018

02 марта 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  02 марта 2021 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеевой О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга» (адрес:  Россия 196650, г. Колпино, 

<

...> ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Титан Демонтаж Строй» (адрес:  Россия 195252, 

<

...>/литер А, ОГРН:  

<

***>);

об обязании, 

при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 02.11.2020), 

- от ответчика: ФИО3 (доверенность от 27.01.2020),  

 

установил:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Титан Демонтаж Строй» и после уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) просит обязать ответчика устранить в срок до 01.06.2021 с момента вступления в законную силу решения в порядке гарантийных обязательств замечания, допущенные при выполнении работ по государственному контракту №92/3 от 06.10.2017, а именно: 

- устранить частичные отслоения асфальтового покрытия от бортовых камней на внутридворовых проездах по адресам 

<

...> в  количестве 24 пог. м.; Тверская ул. Д. 20 22 мог. м.; Тверская ул. д. 26 8 пог. м., Тверская ул. д. 30 7 пог. м.;

- устранить частичные отслоения битумных проливок в местах примыканий смежных полос асфальтобетонов по адресам Тверская ул. 

<

...> кв. м., Тверская ул. 

<

...> кв. м., Тверская ул. д.30 – 32 9,2 кв. м.; 

- устранить частичные разрушения бортовых камней по адресам Тверская ул. д. 14 14 шт., д. 20 24 шт., д. 26 21 шт., д. 30 8 шт., д. 4 6 шт., д. 10А 39 шт., д.8 7 шт., ул. ФИО4 д. 20 14 шт., д. 24 7 шт.;

- устранить частичный наклон бортовых камней, выкрашивание цементного раствора на стыках по адресам Тверская ул. д. 8 – д. 6 23 пог. м.. ул. ФИО4 д. 24 27 пог. м.;

- устранить выкрашивание, трещины, провалы в асфальтобетонных покрытиях на участках подходы к парадным по адресам Тверская ул. д. 2 (1-3 парадные) 60 кв. м., д. 24 27 кв. м.; 

- устранить выкрашивание, трещины, провалы в асфальтобетонных покрытиях на участках внутридворовых проездов по адресам Тверская ул. д. 10А 20,3 кв. м., д. 26 26 кв. м., 

<

...>., наб. Комсомольского канала д. 17 7 пог. м. (трещина);

- устранить скопление дождевых вод на участках входов в парадные по адресам Тверская ул. д. 8 3,2 кв.м., д. 24 6 кв.м. 

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве. 

Ответчиком заявлено ходатайство о проведении строительно-технической экспертизы. Ходатайство удовлетворено судом. В период с 09.01.2020 по 22.10.2020 производство по делу было приостановлено в связи с проведением строительно-технической экспертизы. 

Судом установлено, что между Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга» (далее – Учреждение, Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Титан Демонтаж Строй» (далее – Обществом, Подрядчик) заключен государственный контракт от 06.10.2017 № 92/3 (далее – Контракт). 

В соответствии с условиями Контракта общество приняло на себя обязательство по выполнению работ по комплексному благоустройству дворов, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, по адресам: Санкт-Петербург, 

<

...> очередь).

Согласно пункту 3.1 Контракта начало выполнение работ: с момента получения Подрядчиком от Заказчика ордера ГАТИ. Срок окончания выполнения работ по Контракту не позднее 01.12.2017. 

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан сторонами 25.12.2017. Оплата выполненных работ произведена заказчиком 28.12.2017 в размере 10 241 855 руб. 42 коп. 

Гарантийный срок, согласно пункту 7.1. Контракта в редакции дополнительного соглашения от 22.12.2017 № 1, составляет не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (УФ КС-2), а в отношении работ по устройству асфальтобетонного покрытия не менее 10 лет с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. 

Пунктом 7.2. Контракта установлено, что если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям технической документации или СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодными для нормальной эксплуатации, Заказчик обязан письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 

Колпинским РЖА 18.04.2018 было подготовлено и направлено в адрес ответчика письмо № 2301 о направлении 04.05.2018 ответственных представителей ООО «Титан Демонтаж Строй» для осмотра объектов, расположенных в квартале 2, ограниченном улицами наб. Комсомольского канала, Октябрьская, Тверская, ФИО4, и составления акта о выявленных в период гарантийного срока в выполненной работе по комплексному благоустройству внутридворовых территорий, не входящих в состав общего имущества гирных домов.

В ходе эксплуатации в период течения гарантийного срока Колпинским РЖА были выявлены следующие недостатки работ:

- частичные отслоения асфальтового покрытия от бортовых камней на внутридворовых проездах; 

- частичные отслоения битумных проливок в местах примыканий смежных полос асфальтобетонов;

- частичные разрешения бортовых камней;

- частичный наклон бортовых камней (с выраженным искривлением) на участках: Тверская 6; Тверская ул., 

<

...>;

- выкрашивания цементного раствора на стыках бортовых камней;

 - выкрашивания, трещины, провалы в асфальтобетонных покрытиях на участках подходы к парадным по адресам: Тверская ул., д. 4 (1,2 пар.), Тверская ул., д. 14, Тверская ул., д. 24 (2,3 пар.); 

- выкрашивания, трещины, провалы в асфальтобетонных покрытиях на участках внутридворовых проездов по адресам: Тверская ул., 

<

...>, 

<

...>; 

- провал в плиточном мощении на пешеходном тротуаре по адресу: Тверская ул., д. 10А;

 - скопление дождевых вод на участках входов в парадные по адресам: Тверская ул., 

<

...>, д. 24. 

Недостатки были отражены в акте осмотра технического состояния объекта от 04.05.2018. Заказчиком установлен срок для устранения недостатков – до 01.06.2018. В установленный актом срок выявленные недостатки Подрядчиком устранены не были. 

Истец направил в адрес ответчика претензию от 06.06.2018 с требованием устранить выявленные недостатки до 29.06.2018. Оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

В случае, когда договором подряда предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (статья 722 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Согласно пункту 3 статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы,  заказчик вправе, потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок (пункт 1 статьи 723 ГК РФ). 

Согласно заключению эксперта ООО «Центр судебной экспертизы» от 07.10.2020 № 32/16 указанные истцом в исковом заявлении недостатки находятся в причинной связи с ненадлежащим выполнением работ ответчиком. Причиной образования недостатков является нарушение технологии производства работ ответчиком. 

Представленное ответчиком техническое заключение ООО «Строительная экспертиза» не может быть принято судом во внимание, так как оно не отвечает требованиям статей 64, 68, 71 АПК РФ, поскольку в нем не указаны сведения о лице, его составившем, отсутствует его подпись, неизвестен уровень образования и квалификация специалиста. Кроме того, представитель истца не участвовал в при проведении обследования выполненных ответчиком работ. 

Оценив с соблюдением требований статей 67, 68, 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд считает требование истца об обязании ответчика устранить выявленные недостатки подлежащим удовлетворению, поскольку недостатки обнаружены в пределах гарантийного срока, установленного Контрактом, и являются следствием некачественного выполнения работ Подрядчиком. 

На основании изложенного требования истца подлежат удовлетворению с отнесением на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ расходов по уплате государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Титан Демонтаж Строй» в срок до 01.06.2021 с момента вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства по государственному контракту от 06.10.2017 № 92/3, а именно: 

- устранить частичные отслоения асфальтового покрытия от бортовых камней на внутридворовых проездах по адресам 

<

...> в  количестве 24 пог. м.; Тверская ул. Д. 20 -  22 пог. м.; Тверская ул. д. 26 -  8 пог. м., Тверская ул. д. 30 -  7 пог. м.;

- устранить частичные отслоения битумных проливок в местах примыканий смежных полос асфальтобетонов по адресам Тверская ул. д. 2-4 -  3,1 кв. м., Тверская ул. д. 10А -  11 кв. м., Тверская ул. д. 14 -  5,2 кв. м., ФИО4 ул. 20 - 2,1 кв. м., Тверская ул. д.30 – д.32 -  9,2 кв. м.; 

- устранить частичные разрушения бортовых камней по адресам Тверская ул. д. 14 -  14 шт., д. 20 -  24 шт., д. 26 -  21 шт., д. 30 -  8 шт., д. 4 -  6 шт., д. 10А -  39 шт., д.8 -  7 шт., ул. ФИО4 д. 20 -  14 шт., д. 24 - 7 шт.;

- устранить частичный наклон бортовых камней, выкрашивание цементного раствора на стыках по адресам Тверская ул. д. 8 – д. 6 -  23 пог. м.. ул. ФИО4 д. 24 -  27 пог. м.;

- устранить выкрашивание, трещины, провалы в асфальтобетонных покрытиях на участках подходы к парадным по адресам Тверская ул. д. 2 (1-3 парадные) 60 кв. м., д. 24 -  27 кв. м.; 

- устранить выкрашивание, трещины, провалы в асфальтобетонных покрытиях на участках внутридворовых проездов по адресам Тверская ул. д. 10А -  20,3 кв. м., д. 26 -   26 кв. м., д. 30-32 -  41 кв. м., ул. ФИО4 д. 20 -  16 кв.м., наб. Комсомольского канала д. 17 -  7 пог. м. (трещина);

- устранить скопление дождевых вод на участках входов в парадные по адресам Тверская ул. д. 8 -  3,2 кв.м., д. 24 -  6 кв.м. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Титан Демонтаж Строй» в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга» 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.