АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-13413/2019

город Тюмень

29 октября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 24.10.2019 г.

Решение в полном объеме изготовлено 29.10.2019 г.

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Крюковой Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Горячкиной Д.А., рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению АО «Тюменьэнерго» 

к ООО «Строительно-производственная компания» 

о взыскании 102 576, 35 руб.

при участии: 

от истца: ФИО1, представитель (доверенность от 23.10.2018 г. № ТРС-121, диплом),

от ответчика: не явился, 

 

установил:

АО «Тюменьэнерго» (ОГРН:1028600587399, ИНН:8602060185) (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к ООО «Строительно-производственная компания» (ОГРН:1127232011972, ИНН:7204179165) (далее - ответчик) о взыскании 102 576, 35 руб. в возмещение убытков. 

В обоснование заявленных требований истец ссылается на договор от 23.04.2015 г.             № Т13/15/0030-ДТП.

Определением от 02.08.2019 г. исковое заявление принято к производству арбитражного суда, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, требования истца не оспорил.

Определением от 20.09.2019 г. суд перешел к рассмотрению спора по общим правилам искового производства.

Протокольным определением от 24.10.2019 г. суд завершил подготовку по делу и перешел к рассмотрению спора по существу в судебном заседании.

В судебном заседании 24.10.2019 г. представитель истца поддержал заявленные требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о дате и месте судебного разбирательства в соответствии с ч. 6 ст. 121, ч. 1 ст. 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее- АПК РФ), в судебное заседание 24.10.2019 г. не явился (л.д. 4, 5, 96).

Суд в соответствии со ст. 123, 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть исковые требования по существу в данном судебном заседании, в отсутствие надлежащим образом извещенного ответчика.

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Данный договор является публичным.

В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ) договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Пунктом 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила № 861), предусмотрено, что договор технологического присоединения считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

Судом установлено, что между сторонами 23.04.2015 г. заключен договор об осуществлении технологического присоединения № Т13/15/00303-ДТП (далее - договор от 23.04.2015 г. № Т13/15/00303-ДТП), согласно которому истец принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (ответчика), а именно: КЛ-0,4 кВ с ВРУ-0,4 кВ цеха по переработке леса, расположенного по адресу: 

<

...>, земельный участок с кадастровым номером 72:09:0501001:0015, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 250 кВт, категория надежности 3 (третья), класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 25 кВт, а ответчик обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (л.д. 10).

Пунктом 7 Правил № 861 предусмотрено, что технологическое присоединение – это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения.

По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленном действующими правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему энергопринимающие устройства к электрической сети сетевой организации, а абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению и соблюдать его технические условия.

Согласно с п. 11.1 Технических условий, являющихся Приложением к договору от 23.04.2015 г. № Т13/15/00303-ДТП (далее - Технические условия), заявитель (ответчик) обязан:

11.1. разработать проект электроснабжения цеха по переработке леса по адресу: Тюменская область, Исетский район, п. Кировский на земельном участке с кадастровым номером 72:09:0501001:0015. Проектом предусмотреть:

- строительство КЛ-0,4 кВ от опоры вновь сооружаемой ВЛИ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ цеха по переработке леса. Марку и сечение кабеля определить проектом;

-  условия и объем работ по подключению к опоре вновь сооружаемой ВЛИ-0,4 кВ в ходе проектирования согласовать с Тюменским территориальным производственным отделением филиала ОАО «Тюменьэнерго» - Тюменские распределительные сети;

- ввод выполнить согласно типовому проекту серии 5.407-155.94 «Вводы линий электропередачи до 1 кВ в производственные, административные, бытовые и жилые помещения в сельской местности»;

- на вводе установить распределительный щит с коммутационным аппаратом для защиты от короткого замыкания и перегрузок с возможностью опломбирования. Вводный автомат применить трехфазный в соответствии с заявленной мощностью. Установить ограничитель импульсных перенапряжений согласно п. 7.1.22 ПЭУ. Выполнить контур заземления электроустановки;

- расчетный учет электроэнергии во ВРУ-0,4 кВ с применением приборов учета класса точности 1,0 и выше. Рекомендуем к применению счетчики типа Меркурий-230 АRТ-03 PQRSIDGN или другого с аналогичными функциями. Объемы работ по организации учета электроэнергии в ходе проектирования согласовать с Тюменским территориальным производственным отделением филиала ОАО «Тюменьэнерго» - Тюменские распределительные сети;

- выполнить требования ГОСТ 32144-2013 к качеству электрической энергии; 

-выполнение требований ПЭУ по обеспечению третьей категории надежности электроснабжения электроприемников;

11.2. согласовать проект электроснабжения цеха по переработке леса с Тюменским территориальным производственным отделением филиала ОАО «Тюменьэнерго» - Тюменские распределительные сети;

11.3. произвести строительно-монтажные и пусконаладочные  работы, определенные согласованным проектом по п. 11.1 технических условий (л.д. 15-16).

Доказательств выполнения ответчиком мероприятий, указанных в Технических условиях, в материалы судебного дела не представлено.

 В соответствии с п. 5 договора от 23.04.2015 г. №  Т13/15/00303-ДТП срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора (л.д. 11).

В силу п. 13 Технических условий и п. 4 договора от 23.04.2015 г. №  Т13/15/00303-ДТП срок действия технических условий составляет 2 года  (л.д. 10, 16).

Таким образом, на момент обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срок действия технических условий истек.

Как следует из п. 19 Правил № 861 технологическое присоединение как обязательство по достижению определенного результата прекращается фактическим присоединением объекта потребителя к электрической сети.

Пунктом 5 Правил № 861 предусмотрено, что при присоединении энергопринимающих устройств к распределительным устройствам электростанции последняя выполняет функции сетевой организации в части определения технической возможности технологического присоединения, согласования технических условий с субъектами оперативно-диспетчерского управления и смежными сетевыми организациями, а также выполнения необходимых условий договора.

Таким образом, выдача технических условий и их последующее выполнение  является неотъемлемым этапом технологического присоединения.

При этом истечение срока действия технических условий и отсутствие обращения ответчика к истцу за их продлением свидетельствует об утрате ответчиком интереса в осуществлении мероприятий по технологическому присоединению и приводит к невозможности исполнения договора.

Истец направил в адрес ответчика уведомление о выполнении мероприятий по строительству ВЛИ -0,4 кВ до границ земельного участка ответчика, а также о готовности осуществить фактические действия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ответчика к распределительной сети истца (л.д. 17). 

Сопроводительным письмом от 03.04.2019 г. № Т13/01/4482 истец направил в адрес ответчика соглашение от 02.04.2019 г. № Т13/15/0030-ДТП-1 о расторжении договора, установив 30- дневный срок для его подписания (л.д. 18-20).

Письмом от 29.04.2019 г. № 29 ответчик просит считать расторгнутым договор от 23.04.2015 г. №  Т13/15/00303-ДТП с 29.04.2019 г. При этом соглашение о расторжении договора от 23.04.2015 г. №  Т13/15/00303-ДТП подписано быть не может, поскольку содержит пункты 3 и 4 о возмещении убытков (л.д. 21).

Поскольку ответчик требования истца в части возмещения убытков оставил без рассмотрения, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Истец просит суд взыскать с ответчика убытки в размере 102 576, 35 руб., составляющие в соответствии с договором от 23.04.2015 г. №  Т13/15/00303-ДТП стоимость мероприятий по договору (л.д. 7).

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (п. 4 ст. 23.1, п. 2 ст. 23.2, п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пп. "е" п. 16, п.п. 16(2), 16(4), 17, 18 Правил № 861).

Согласно п. 10 договора от 23.04.2015 г. №  Т13/15/00303-ДТП размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением РЭК Тюменской области, ХМАО, ЯНАО «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Тюменьэнерго» энергопринимающих устройств заявителей на 2015 год» № 134-тп от 19 декабря 2014 года и составляет 102 576, 35 руб., в том числе НДС (л.д. 12).

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке (п. 11 договора):

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; 

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора; 

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении (л.д. 12).

Ответчиком авансовые платежи не внесены. Доказательств иного в материалы судебного дела не представлено.

Как следует из п. 19 Правил № 861 при окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с п. 3 ст. 380 ГК РФ всякая предварительно уплаченная сумма признаётся авансом, если по поводу этой суммы в письменном соглашении не имеется прямого указания о том, что таковая является задатком. Аванс составляет часть суммы, подлежащей платежу, то есть денежной суммой, уплачиваемой обязанной к денежному платежу стороной договора в счёт данного платежа до фактического исполнения предмета договора.

Согласно п. 11 договора от 23.04.2015 г. №  Т13/15/00303-ДТП внесение заявителем платежей не поставлено в зависимость от выполнения сетевой организацией условий технологического присоединения к своим электрическим сетям полностью или частично.

В силу п. 1 ст. 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Из системного толкования вышеуказанных норм следует, что истец, не получивший от ответчика в установленные сроки авансовые платежи, предусмотренные п. 11 договора от 23.04.2015 г. №  Т13/15/00303-ДТП, имеет право отказаться от исполнения обязательства и потребовать возмещения убытков.

Из характера обязательств сетевой организации и заявителя следует, что к правоотношениям по технологическому присоединению применимы как нормы главы 39 ГК РФ, так общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

В соответствии с п. 1, 2 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 ГК РФ.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Как указано в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков. Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности.

Таким образом, основания возникновения обязательства по возмещению убытков включают в себя факт неправомерного действия одного лица, наличия вреда у другого лица как следствия неправомерного действия, причинную связь между неправомерными действиями и вредными последствиями, а также вину причинителя вреда. Кроме того, лицо, предъявляющее к взысканию убытки согласно ст. 15 ГК РФ должно доказать размер данных убытков.

На основании статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» плата за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок. Размер платы за технологическое присоединение и (или) размер стандартизированных тарифных ставок определяются исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства может устанавливаться либо в соответствии с указанными принципами и порядком определения платы за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, либо посредством установления размера платы федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение.

Состав расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определяется федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Согласно п. 87 Постановления Правительства Российской Федерации  от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» размер платы за технологическое присоединение, в том числе величина стандартизированных тарифных ставок, и состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение, определяются в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой (далее - методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям).

В п. 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11.09.2012 г. № 209-э/1 для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям учитываются расходы на выполнение сетевой организацией следующих обязательных мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

г) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий;

д) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с Правилами технологического присоединения согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в п. 12 Правил технологического присоединения, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, а также для лиц, указанных в п. 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения, осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя, включая вводные распределительные устройства, должен осуществляться с участием сетевой организации и Заявителя), с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств Заявителя;

е) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

В приложении № 3 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1, действующим на момент заключения договора от 23.04.2015 г. №  Т13/15/00303-ДТП, в форме таблицы приведен перечень расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению.

Из указанной таблицы следует, что в эти расходы включаются: вспомогательные материалы; энергия на хозяйственные нужды; оплата труда ППП; отчисления на страховые взносы; работы и услуги производственного характера; налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций; услуги связи; расходы на охрану и пожарную безопасность; расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению; плата за аренду имущества; другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией; расходы на услуги банков; проценты за пользование кредитом; прочие обоснованные расходы; денежные выплаты социального характера (по коллективному договору).

Стандартизированные ставки платы за технологическое присоединение рассчитываются на основании средних величин экономически обоснованных расходов, определенных регулирующим органом на одно присоединение. Они устанавливаются едиными для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, в частности с использованием метода сравнения аналогов (абз. третий п. 2 ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», п. 2 разъяснения Президиума Федеральной антимонопольной службы от 13.09.2017 г. № 12 «О применении положений антимонопольного законодательства в отношении владельцев объектов электроэнергетики, в том числе не соответствующих критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», утвержденного протоколом от 13.09.2017 г. № 19).

Ставка тарифа не может отражать в полном объеме фактические издержки сетевой компании по оказанию соответствующей услуги конкретному лицу, так как она рассчитана из плановых величин расходов на технологическое присоединение, что неравнозначно фактическим затратам (определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2017 г. № 304-ЭС16-16246).

Уполномоченный тарифный орган при установлении тарифа на соответствующий вид услуги исходит из экономически обоснованных величин, поэтому расходы, подлежащие возмещению сетевой компании, по общему правилу не должны превышать стоимость услуг, рассчитанную с применением ставки тарифа.

Таким образом, действительные расходы сетевой организации на технологическое присоединение могут не покрываться установленной регулирующим органом для этих целей ставкой. Доказательства, обосновывающие размер фактически произведенных расходов, обязана представить в суд сетевая компания (ст. 65 АПК РФ). Размер подобных убытков не может быть больше стоимости технологического присоединения, рассчитанной с применением ставки тарифа (либо его части, соответствующей определенной услуге).

В соответствии с п. 7 Технических условий мощность энергопринимающих устройств ответчика - 250 кВт (с учетом ранее разрешенной мощности в размере 25 кВт) (л.д. 15).

Как следует из договора от 23.04.2015 г. №  Т13/15/00303-ДТП, на момент заключения договора стоимость технологического присоединения определялась на основании распоряжения Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Тюменьэнерго» энергопринимающих устройств заявителей на 2015 год» от 19.12.2014 г. № 134-тп, которым была утверждена калькуляция работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении к электрическим сетям истца, согласно приложениям 1, 2, 3.

В приложении № 1 к указанному распоряжению утверждена калькуляция работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении к электрическим сетям истца на уровне напряжения 0,4 кВ, согласно которой оплате подлежали следующие мероприятия: подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ (при уровне напряжения свыше 150 кВт) - 33, 48 руб./кВт, проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ – 45, 74 руб./кВт, фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети на уровне напряжения 0,4 кВ – 70,77 руб./кВт, ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи  (ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 до 22 кв. мм магистраль + 16 кв. мм ответвления) - 267 922 руб./км (все суммы указаны без НДС) (л.д. 54-55).

Согласно с п. 10 Технических условий, являющихся Приложением к договору от 23.04.2015 г. № Т13/15/00303-ДТП (далее - Технические условия), исполнитель (истец) обязан:

- осуществить строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0, 05 км от РУ-0,4 кВ ТП-400/10/0,4 уВ № 5 до границы земельного участка заявителя;

- осуществить проверку выполнения технических условий заявителем;

- осуществить фактические действия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетяс ОАО «Тюменьэнерго».

Из представленных истцом в материалы дела документов усматривается, что истец для осуществления строительства ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0, 05 км от РУ-0,4 кВ ТП-400/10/0,4 уВ № 5 заключил договор подряда от 14.09.2015 г. № 16/263 (л.д. 65).

Согласно Техническому заданию к договору подряда от 14.09.2015 г. № 16/263 работы по строительству осуществляются по адресу: Тюменская область, Исетский район, п. Кировский на земельном участке с кадастровым номером 72:09:0501001:0015 (л.д. 49).

Работы по строительству ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0, 05 км от РУ-0,4 кВ ТП-400/10/0,4 уВ № осуществлены в полном объеме и приняты истцом по акту.

Истец оплатил выполненные в рамках договора подряда от 14.09.2015 г. № 16/263 работы по строительству РС-0,4-10 кВ для технологического присоединения объекта ответчика в размере 138 861, 36 руб. (л.д. 88, 98-107).

Таким образом, фактические расходы на технологическое присоединение объекта ответчика, понесенные истцом в рамках договора от 23.04.2015 г. №  Т13/15/00303-ДТП, составили  148 737, 96 руб. ((33,48*250 + НДС) + 138 861, 36 руб.)  

Ввиду того, что убытки возникли в связи с существенным нарушением ответчиком условий договора и неисполнением последним своих обязательств по оплате оказанных услуг, именно ответчик в силу требований ст.ст. 393, 453 ГК РФ обязан компенсировать истцу фактически понесенные расходы, но не более размера платы за технологическое присоединение, установленное в договоре от 23.04.2015 г. №  Т13/15/00303-ДТП.

Таким образом, суд взыскивает в ответчика в пользу истца понесенные последним убытки в размере 102 576, 35 руб.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной пошлины подлежит взысканию с ответчика как с лица, не в пользу которого принят судебный акт.

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд             

 

Р Е Ш И Л:

Заявленные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО «Строительно-производственная компания» в пользу АО «Тюменьэнерго» 102 576, 35 руб. в возмещение убытков и 4 077 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, а всего 106 653, 35 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в арбитражный суд Тюменской области.

 

Судья

 

Крюкова Л.А.