Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

Курашова, д. 28, кв. бокс 8, Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-3667/2017

19 октября 2017 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 12.10.2017

Решение изготовлено в полном объеме 19.10.2017

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "МагнумТраст" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 71 135,79 руб. неустойки,

при участии в заседании:

от истца: ФИО2 – по доверенности от 06.06.2017 №2-16.2/595,

от ответчика: не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратился в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МагнумТраст" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 63 005,68 руб. неустойки.

18.09.2017 от истца поступило заявление об уточнении исковых требований и увеличении исковых требований до 71 135,79 руб. за период с 02.09.2015 по 11.12.2015.

Уточнение судом принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен.

Определение суда от 19.09.2017, направленное ответчику по адресу: 

<

...>, возвращено суду с отметкой органа связи «истек срок хранения».

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Информация о времени и месте судебного заседания размещена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://yakutsk.arbitr.ru).

При изложенных обстоятельствах, принимая во внимание, что ответчик не обеспечил получение почтовой корреспонденции по адресу своей регистрации, суд считает ответчик надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного заседания.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд определил рассмотреть дело без участия представителя ответчика.

Судом установлены обстоятельства дела.

20.11.2014 между истцом (Государственный заказчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен государственный контракт №стройка-СУ35/14 на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 02.11.2014 №0116200007914008278-2, согласования №2630-14 от 11.11.2014, по условиям которого Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами Российской Федерации, утвержденной Государственным заказчиком проектной и рабочей документацией, ведомостью объемов работ, содержанием технического задания выполнить работы, передать результат работ государственному заказчику, а также сдать объект приемочной комиссии, а Государственный заказчик обязуется принять результат выполненный Подрядчиком работ и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

В соответствии с пунктом 3.1. Контракта срок начала работ по контракту предусмотрен с момента заключения контракта.

Срок окончания работ по контракту устанавливается 01.09.2015 (пункт 3.2. Контракта).

Согласно пункту 3.4. Контракта  работы по настоящему контракту выполняются поэтапно. Сроки начала и окончания работ (этапов работ), Контракта устанавливаются Графиком производства работ (этапов работ) выполнения работ.

В силу пункта 3.5. Контракта Подрядчик несет ответственность, установленную разделом 10 Контракта, за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков (сроков завершения отдельных этапов) выполнения работ.

Стороны установили, что начальные и промежуточные сроки выполнения работ по Контракту являются существенными условиями и любое их нарушение более чем на 5 календарных дней влечет невозможность своевременного окончания работ по Контракту (пункт 3.7. Контракта).

В соответствии с пунктом 4.2. Контракта стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, составляет 9 863 186,25 руб.

Объем выполнения работ:

до 31.12.2014 – 2 363 142,50 руб.;

до 01.09.2015 – 7 500 043,75 руб. 

Истец, считая, что ответчиком допущены нарушения сроков выполнения работ по указанному контракту, обратился в его адрес с претензией от 21.12.2015 №216.2/1553 с требованием в срок до 22.01.2015 уплатить пени в размере 63 005,68 руб. Претензия получена ответчиком 18.12.2017.

Ответчик на претензию не ответил, уплату неустойки не произвел, что явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Рассмотрев и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием возникновения гражданских прав и обязанностей являются, в том числе и договоры.

Анализ материалов дела показывает, что между сторонами сложились правоотношения, вытекающие из договора подряда, регулируемого главой 37 Гражданского кодекса  Российской Федерации. 

Правоотношения сторон вытекают из государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд, правовое регулирование которого предусмотрено главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии со статьей 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации  в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Основанием для начисления пени (неустойки) является неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства, в частности просрочка его исполнения.

Согласно пункту 3.2. Контракта срок окончания работ по контракту устанавливается 01.09.2015.

Между тем, согласно актам выполненных работ (КС-2) от 07.09.2015 №5, №6, от 15.09.2015 №14, №13, №12, №11, №10, №9, от 25.09.2015 №7. №8, от 11.12.2015 №15, №16, справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 07.09.2015 №2 на сумму 3 902 481,62 руб., от 15.09.2015 №4 на сумму 1 691 380,72 руб., от 25.09.2015 №3 на сумму 1 473 583,96 руб., от 11.12.2015 №5 на сумму 36 912,02 руб. работы Подрядчиком выполнены с нарушением срока (07.09.2015, 15.09.2015, 25.09.2015 и 11.12.2015).

Согласно части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть 8 статьи 34 Закона о контрактной системе). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (далее - Правила N 1063). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечение установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком. (Определяется по формуле, указанной пп. 6, 7, 8 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063).

В соответствии с пунктом 7 статьи 34 Закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Данный порядок предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - постановление N 1063).

Согласно формуле по Постановлению № 1063: П = (Ц - В) х С, где:

П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: С = Сцб х ДП,

где:

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: ,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При  К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Истец просит взыскать неустойку в размере 71 135,79 руб. исходя из следующего расчета:

(0,01*0,0825)*6 дней = 0,00495, 3 902 485,20 руб.*0,00495 = 19 317,3 руб.

(0,01*0,0825)*24 дня = 0,0198, 1 473 580,35*0,0198 = 29 176,89 руб.;

(0,01*0,0825)*14 дней = 0,01155, 1 691 380,72*0,01155 = 19 535,45 руб.;

(0,01*0,0825)*102 дня = 0,08415, 36 912,02*0,0815 = 3 106,15 руб.

Проверив расчет неустойки, суд признает его неверным.

В силу пункта 4.2. Контракта стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, составляет 9 863 186,25 руб., при этом объем выполнения работ определяется двумя этапами:

до 31.12.2014 – 2 363 142,50 руб.;

до 01.09.2015 – 7 500 043,75 руб. 

Истец, заявляя о взыскании неустойки, исходит из суммы 7 500 043,75 руб., предусмотренного вторым этапом и сроком исполнения до 01.09.2015.

Между тем, пунктом 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и постановлением №1063 установлено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

С учетом изложенного, неустойка подлежит исчислению исходя из следующего расчета: 

9 863 186,25 – 2 363 142,50 руб. (0,01*0,0825)*6 дней = 0,00495, 7 500 043,75 руб.*0,00495 = 37 125,22 руб.

9 863 186,25 – 6 265 627,70 руб. (0,01*0,0825)*14 дней = 0,01155, 3 597 558,55*0,01155 = 41 551,80 руб.;

9 863 186,25 – 7 957 008,42 руб. (0,01*0,0825)*24 дня = 0,0198, 1 906 177,83*0,0198 = 37 742,32 руб.;

9 863 186,25 – 9 430 588,77 (0,01*0,0825)*102 дня = 0,08415, 432 597,48*0,0815 = 36 403,07 руб.

Всего 152 822,41 руб.

Вместе с тем, суд, не выходя за пределы исковых требований, считает необходимым удовлетворить требование истца о взыскании с ответчика неустойки по государственному контракту №стройка-СУ35/14 от 20.11.2014 в заявленном размере  - 71 135,79 руб.

На основании изложенного, иск подлежит удовлетворению в заявленном размере.

На основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по делу подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в размере 2 845 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МагнумТраст» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по государственному контракту № стройка-СУ35/14 от 20.11.2014 в размере 71 135,79 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МагнумТраст» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 845 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

 

Судья

                            В.С.Терских