Арбитражный суд Чеченской Республики

364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шейха Али Митаева, 22 «Б»

www.chechnya.arbitr.ru

e-mail: info@chechnya.arbitr.ru

тел: (8712) 22-26-32

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А77-127/2023

03 июня 2024 года

г.Грозный

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 мая 2024 года. 

Полный текст решения изготовлен 03 июня 2024 года.

 

Арбитражный суд  Чеченской Республики в составе: судьи Межидова Л.С.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Алиевым Д.Р.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «ПГС-85» (ИНН 

<

***> / ОГРН 

<

***> / адрес: 364020, 

<

...>)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» (ИНН 

<

***> / ОГРН 

<

***> / адрес: 353691, 

<

...>),

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (ИНН 

<

***> / ОГРН 

<

***> / адрес: 353691, 

<

...>),

третьи лица: 

- Управление Жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации муниципального образования Ейский район, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 353680, 

<

...>, 

- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Ейский район, "Отдел капитального строительства", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 353684, 

<

...>,

о взыскании задолженности, при участии:

от ООО «ПГС-85» - ФИО1 руководитель, личность установлена,

в отсутствие иных надлежаще извещенных лиц, участвующих в деле, в том числе посредством размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ПГС-85» обратилось в Арбитражный суд Чеченской Республики с заявлением к ответчикам обществу с ограниченной ответственностью «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» и обществу с ограниченной ответственностью «Стройснаб» с исковым заявлением о взыскании с ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» задолженности в сумме 11 883 017 руб. по договору № 01-21 сп от 07.11.2021 и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 129 410 руб., 94 копейки, взыскании с ООО «Стройснаб» сумму неосновательного обогащения в размере 2 975 446 руб. 74 коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 19 118 руб. 03 коп, а также взыскании с ответчиком расходы по уплате государственной пошлины.

Определением арбитражного суда от 16.08.2023 дела А77-984/2023 по заявлению ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» к ООО «ПГС-85» о взыскании задолженности в размере 18 908 412,61 руб. и А77-127/2023 объединены в одно производство. Объединенному делу присвоен №А77-127/2023.

В адрес суда от представителя ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие ответчика.

13.05.2024 ООО «ПГС-85», в порядке ст.49 АПК РФ, уточнило требование и просило взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПГС-85» задолженность в размере 12 038 792,57 по договору № 01-21 сп от 07.11.2021, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 854 798,62 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 92 468 руб. В удовлетворении встречного искового требования Общества с ограниченной ответственностью «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» отказать.

Уточненные требования не нарушают права и обязанности третьих лиц и  приняты судом к рассмотрению по существу.

Из встреченного искового заявления ООО «Ейскжелезо-бетон» следует, что Истец 21.02.2023 года, направил досудебную претензию, которая до настоящего времени оставлена ответчиком без рассмотрения, что и послужило основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением. 

07 ноября 2021 года между ООО «ПГС-85» (генеральный подрядчик) и ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» (субподрядчик) был заключен Договор №01- 21 сп., в соответствии с п. 1.1. которым, Субподрядчик обязуется в установленный графиком исполнения Договора срок, выполнить строительно-монтажные работы по капитальному строительству в соответствии с проектной и рабочей документацией, которое является Приложением №3 к Договору и Сметой Договора, которая является Приложением №1 к Договору, локальными сметными расчетами, проектной и рабочей документацией, и сдать Генеральному подрядчику результаты исполнения Договора, а Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, осуществлять приемку выполненных работ и оплачивать работы по договору в пределах, доведенных до Генерального подрядчика лимитов бюджетных обязательств в объеме выполненных работ в соответствии с условиями Договора (далее также - Договор). 

В соответствии с п. 3.1. Договора все платежи по Договору осуществляются Генеральным подрядчиком за счет средств краевого и местного бюджетов в доведенных до Генерального подрядчика лимитов бюджетных обязательств в объеме выполненных работ в соответствии с условиями Договора, в российских рублях. 

Согласно п. 3.5. Договора Генеральный подрядчик производит расчеты по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика. 

В соответствии с п. 6.3.2. Договора Генеральный подрядчик обязан обеспечивать финансирование строительства Объекта в соответствии с условиями Договора. В соответствии с п. 6.3.8. Договора Генеральный подрядчик обязан произвести приемку выполненных работ, в том числе проверить стоимость, качество работ, выполненных Субподрядчиком. 

Согласно п. 6.3.9. Договора, генподрядчик обязан принять от Субподрядчика выполненные работы. На основании п. 6.3.10 Договора, генподрядчик обязан произвести оплату выполненных работ. 

Ответчику неоднократно отправлялись почтой Формы КС-2 и КС-3, которые он отказался подписывать, какие-либо письменные требования по объему выполненных работ, стоимости выполненных работ, а также по качеству выполненных работ генеральный подрядчик не предъявлял. Последний раз, формы КС-2 и КС-3 направлялись ответчику 23.01.2023 года, что подтверждается кассовым чеком, от 23.01.2023 года. 

Указанные формы получены ответчиком, что подтверждается, подписью директора ООО "ПГС - 85", на бланке почтового уведомления о вручении. 

Согласно указанным формам, истцом оказано дополнительных услуг на сумму 7 195 761,72 р., указанную сумму ответчик получил в полном объеме, что подтверждается расчетом новой цены контракта, утвержденного главой МО Ейский район, Постановлением администрации МО Ейский район №1158 от 23.12.2022 года, счетом - фактурой №22 от 23.12.2022 года, сметой контракта (приложение №3 к дополнительному соглашению №7 от 23.12.2022 года и приложение №7 к муниципальному контракту №0818500000821005361 от 19.10.2021 года). 

До обращения истца с требованиями об оплате выполненных работ генподрядчик в соответствии со ст. 723, 753 ГК РФ, требований субподрядчику не предъявлял, что можно расценивать как их отсутствие, оплату выполненных работ не произвел, а только после предъявленных требований истцом, ответчик обратился в суд, согласно принципа "лучшая защита-это нападение".           

В судебном заседании представитель ООО «ПГС-85» уточненные требования поддержал, просил удовлетворить, в удовлетворении встречного искового заявления ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» к ООО «ПГС-85» о взыскании задолженности просил отказать.

Представители ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» и ООО «Стройснаб», уведомленные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства не явились, дело рассмотрено  с учетом требований ст.123,156 АПК РФ, в отсутствии не явившихся лиц.

Изучив представленные сторонами в дело доказательства в их совокупности, выслушав в судебном заседании представителя ООО «ПГС-85», суд считает, что встречные исковые требования ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» необоснованы, а требования с учетом уточнений от 13.05.2024, подлежат удовлетворению в полном объеме, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 07 ноября 2021 года между ООО «ПГС-85» (генеральный подрядчик) и ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» (субподрядчик) был заключен Договор №01-21сп в соответствии с п.1.1, которого, Субподрядчик обязуется в установленный Графиком исполнения Договора срок (Приложение №2 к Договору) выполнить строительно-монтажные работы по капитальному строительству в соответствии с проектной и рабочей документацией, которое является Приложением №3 к Договору и Сметой Договора, которая является Приложением №1 к Договору, Локальными сметными расчетами, проектной и рабочей документацией, и сдать Генеральному подрядчику результаты исполнения Договора, а Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, осуществлять приемку выполненных работ и оплачивать работы по договору в пределах, доведенных до Генерального подрядчика лимитов бюджетных обязательств в объеме выполненных работ в соответствии с условиями Договора (далее также - Договор).

Согласно разделу Договора «Термины и определения» объект - строительство объекта «Спортивный зал по ул. ФИО2, 96 ст. Должанской Ейского района».

В соответствии с п. 1.3. Договора настоящий договор заключается Генеральным подрядчиком в целях исполнения его обязательств перед Управлением жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район (Заказчик) по муниципальному контракту №08185000005361 от 19.10.2021 года.

В соответствии с п. 2.1. Договора, согласно сметы Договора (Приложение №1 к Договору) цена Договора составляет 34 853 434 рубля 34 копейки, в том числе НДС 5 808 905 рублей 72 копейки, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора.

Согласно п. 2.2. Договора: «В цену Договора включены все расходы Субподрядчика, связанные с выполнением всех обязательств по Договору ...».

В соответствии с п. 3.1. Договора все платежи по Договору осуществляются Генеральным подрядчиком за счет средств краевого и местного бюджетов в доведенных до Генерального подрядчика лимитов бюджетных обязательств в объеме выполненных работ в соответствии с условиями Договора, в российских рублях.

Согласно п. 3.5. Договора Генеральный подрядчик производит расчеты по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

В соответствии с п. 5.1. Договора - договор исполняется в соответствии с Графиком исполнения Договора (Приложение №2).

Согласно п. 6.1.2. Договора Субподрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, в том числе приложениями к нему, и сдать результат работ Генеральному подрядчику в установленный договором срок.

Согласно п. 6.1.3. Договора Субподрядчик обязан обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с условиями Договора, в том числе с Приложениями №1, №2 к Договору, проектной и рабочей документацией;

 - соответствие качества выполнения всех работ требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и строительных норм и правил;

 - своевременное устранение недостатков и дефектов, выполненных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- производство работ в сроки, установленные приложением №2 и другими положениями к Договору;

- производство работ в полном соответствии с рабочей документацией и строительными нормами и правилами;

 - качество выполнения работ всех работ в соответствии с рабочей документацией, действующими нормами и правилами;

 - в ходе выполнения работ обеспечить регулярный вывоз строительного мусора, не допуская накопления строительного мусора в месте выполнения работ.

В соответствии с п. 6.3.2. Договора Генеральный подрядчик обязан обеспечивать финансирование строительства Объекта в соответствии с условиями Договора.

Согласно п. 6.3.10. Договора Генеральный подрядчик обязан произвести оплату выполненных и принятых по Договору работ в установленные сроки.

Согласно п. 6.4.7. Договора Генеральный подрядчик имеет право в случае отсутствия исполнительной документации в полном объеме, отказать Субподрядчику в приемке работ.

В соответствии с п. 7.2. Договора в рамках исполнения Договора Субподрядчик обязан выполнять работы и сдавать их Генеральному подрядчику по частям - по завершении каждого отчетного месяца в сроки, установленные п. 5.2. Договора.

Согласно п. 7.3. Договора Субподрядчик в течение 3-трех календарных дней с даты завершения каждого отчетного месяца предоставляет Генеральному подрядчику подписанные со своей стороны следующие документы:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 5-и экземплярах;

 - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 5-и экземплярах;

 - исполнительную документацию на выполненный объем работ в соответствии с представленными формами КС-2, КС-3 объем работ;

- счет на фактически выполненный объем работ в соответствующем отчетном месяце;

- счет-фактуру на фактически выполненный объем работ в соответствующем отчетном месяце.

В соответствии с п. 7.6. договора приемка результатов по каждому отчетному месяцу (за исключением последнего отчетного месяца), осуществляется в течение 5-ти календарных дней с даты предоставления Субподрядчиком документов, указанных в п. 7.3. Договора, если иное не установлено настоящим разделом Договора.

Согласно пункта 16.5 Договора, в случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Грозный.

В декабре 2021 года ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» приступило к выполнению строительно-монтажных работ по строительству объекта - Спортивного зала по ул. ФИО2, 96 ст. Должанской Ейского района.

ООО «ПГС-85», начиная с декабря 2021 года, стало финансировать строительство объекта и оплачивало все выставленные ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» счета на выполненный объем работ в соответствии с условиями Договора 01-21сп.

Однако, в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором, ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» выполнило строительно-монтажные работы только частично, строительство объекта Субподрядчиком не окончено, работы в полном объеме не выполнены, результат работ ООО «ПГС-85» ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» не сдан, работы ООО «ПГС-85» в полном объеме не приняты.

В рамках выполнения договорных отношений ООО «ПГС-85» оплачены и приняты строительно-монтажные работы, выполненные ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон», по следующим отчетным документам.

1.   Этап строительства «Выполнение №1»:

-    ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» выставило ООО «ПГС-85» счет №27 от 20 декабря 2021г. на сумму 453 100,31 руб., наименование товара «Общестроительные работы спортивный зал по ул. ФИО2 96 в ст. Должанской Ейского района»;

-    письмом за №2 от 22 декабря 2021 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» в счет взаимных расчетов оплату по счету 27 от 20.12.2021 г. в сумме 453 100,31 руб. перечислить на расчетный счет ИП ФИО3 с указанием его банковских реквизитов;

-   платежным поручением №69 от 29 декабря 2021 г. ООО «ПГС-85» оплатило ИП ФИО3 сумму 453 100,31 руб. назначение: «Оплата за общестроительные работы по договору №01-21сп от 07.11.2021».

Работы приняты по:

-    акту о приемке выполненных работ №1 от 20.12.2021 (форма КС-2) наименование «Конструктивные решения», всего по акту выполнено работ на сумму 453 100,31 руб., акт подписан должностными лицами ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» и ООО «ПГС-85».

Таким образом, этап строительства «Выполнение №1» выполнен ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» в полном объеме, ООО «ПГС-85» оплачен также в полном объеме.

2.                        Этап строительства «Выполнение №2»:

-   ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» выставило ООО «ПГС-85» счет №28 от 27 декабря 2021г. на сумму 2 662 847,90 руб., наименование товара «Общестроительные работы спортивный зал по ул. ФИО2 96 в ст. Должанской Ейского района»;

-   письмом за №3 от 29 декабря 2021 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» в счет взаимных расчетов оплату по счету №28 от 27.12.2021 г. в сумме 2 662 847,90 руб. перечислить на расчетный счет ООО «Стройснаб» с указанием его банковских реквизитов;

-   платежным поручением №68 от 29 декабря 2021 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «Стройснаб» сумму 2 546 899,69 руб. назначение: «Оплата за общестроительные работы по договору №01-21сп от 07.11.2021 по счету №28 от 27.12.2021»;

-   платежным поручением №70 от 30 декабря 2021 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «Стройснаб» сумму 115 948, 21 руб. назначение: «Оплата за общестроительные работы по договору №01-21сп от 07.11.2021 по счету №28 от 27.12.2021», а всего было оплачено 2 662 847,90 руб..

Работы приняты по:

-   акту о приемке выполненных работ №1, дата составления 27.12.2021, отчетный период с 21.12.2021г. по 27.12.2021 г. (форма КС-2) наименование «Резервуар на 200 м3», всего по акту выполнено работ на сумму 51 131,06 руб., акт подписан должностными лицами ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» и ООО «ПГС-85»;

-   акту о приемке выполненных работ №2, дата составления 27.12.2021, отчетный период с 21.12.2021г. по 27.12.2021 г. (форма КС-2) наименование «Конструктивные решения», всего по акту выполнено работ на сумму 2 611 187,65 руб., акт подписан должностными лицами ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» и ООО «ПГС-85», а всего работы были выполнены на сумму 2 662 318,71 руб.

Таким образом, этап строительства «Выполнение №2» выполнен ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» частично на общую сумму 2 662 318,71  руб. При этом ООО «ПГС-85» оплачены работы в сумме 2 662 847,90 руб.

В связи с чем, по этапу строительства «Выполнение №2» в пользу ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» существует излишняя уплата в сумме 529,19 руб., работы выполнены не в полном объеме.

3.                        Этап строительства «Выполнение №3»:

-   ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» выставило ООО «ПГС-85» счет №1 от 22 февраля 2022г. на сумму 4 689 066,96 руб., наименование товара «Общестроительные работы спортивный зал по ул. ФИО2 96 в ст. Должанской Ейского района»;

-   письмом за №2 от 22 февраля 2022 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» в счет взаимных расчетов оплату по счету №1 от 22.02.2022 г. в сумме 4 689 066,96 руб. перечислить на расчетный счет ООО «Стройснаб» с указанием его банковских реквизитов;

-   платежным поручением №72 от 01 марта 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «Стройснаб» сумму 3 000 000,00 руб. назначение: «Оплата за строительно-монтажные работы по счету №1 от 22.02.2022»;

-   платежным поручением №75 от 02 марта 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «Стройснаб» сумму 1 689 066,96 руб. назначение: «Оплата за строительно-монтажные работы по счету №1 от 22.02.2022», а всего было оплачено 4 689 066,96 руб.

Работы приняты по:

-   акту о приемке выполненных работ №1, дата составления 22.02.2022, отчетный период с 28.12.2021г. по 22.02.2022 г. (форма КС-2) в редакции Генерального подрядчика, наименование «Архитектурные решения», всего по акту выполнено работ на сумму 2 517 380,21 руб., акт подписан генеральным директором ООО «ПГС-85»;

Таким образом, этап строительства «Выполнение №3» выполнен ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» частично на общую сумму 2 517 380,21 руб. При этом ООО «ПГС-85» оплачены работы в сумме 4 689 066,96 руб.

В связи с чем, по этапу строительства «Выполнение №3» в пользу ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» существует излишняя уплата в сумме 2 171 686,75 руб., работы выполнены не в полном объеме.

4.                        Этап строительства «Выполнение №4»:

-   ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» выставило в пользу ООО «ПГС-85» счет №2 от 03 марта 2022г. на сумму 4 217 266,97 руб., наименование товара «Общестроительные работы спортивный зал по ул. ФИО2 96 в ст. Должанской Ейского района»;

-   письмом за №3 от 05 марта 2022 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» в счет взаимных расчетов оплату по счету №2 от 03.03.2022 г. в сумме 4 217 266,97 руб. перечислить на расчетный счет ООО «Стройснаб» с указанием его банковских реквизитов;

-   платежным поручением №78 от 09 марта 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «Стройснаб» сумму 2 900 000,00 руб. назначение: «Оплата за общестроительные работы по договору №01 -21сп»;

-   платежным поручением №79 от 09 марта 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «Стройснаб» сумму 1 317 266,97 руб. назначение: «Оплата за общестроительные работы по договору №01-21сп», а всего было оплачено 4 217 266,97руб.

-   Работы приняты по:

- акту о приемке выполненных работ №3, дата составления 03.03.2022, отчетный период с 23.02.2022г. по 03.03.2022 г. (форма КС-2), наименование « Конструктивные решения», всего по акту выполнено работ на сумму 2 401 456,15 руб., акт подписан должностными лицами подписан должностными лицами ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» и ООО «ПГС-85»;

-   акту о приемке выполненных работ №2, дата составления 03.03.2022, отчетный период с 01.03.2022г. по 03.03.2022 г. (форма КС-2) в редакции Генерального подрядчика, наименование «Архитектурные решения (1)», всего по акту выполнено работ на сумму 779 343, 31 руб., акт подписан генеральным директором ООО «ПГС-85»;

-   акту о приемке выполненных работ №1, дата составления 03.03.2022, отчетный период с 23.02.2022г. по 03.03.2022 г. (форма КС-2), наименование «Непредвиденные расходы», всего по акту выполнено работ на сумму 914 353,88 руб., акт подписан должностными лицами подписан должностными лицами ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» и ООО «ПГС-85»;

Таким образом, этап строительства «Выполнение №4» выполнен ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» частично на общую сумму 4 095 153, 34 руб. При этом ООО «ПГС-85» оплачены работы в сумме 4 217 266, 97руб.

В связи с чем, по этапу строительства «Выполнение №4» в пользу ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» существует излишняя уплата в сумме 122 113,63 руб., работы выполнены не в полном объеме.

5.                        Этап строительства «Выполнение №5»:

-   ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» выставило ООО «ПГС-85» счет №3 от 04 апреля 2022г. на сумму 893 573,74 руб., наименование товара «Общестроительные работы спортивный зал по ул. ФИО2 96 в ст. Должанской Ейского района»;

-   письмом за №7 от 04 апреля 2021 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» в счет взаимных расчетов оплату по счету 3 от 04.04.2022 г. в сумме 893 573,74 руб. перечислить на расчетный счет ООО «Стройснаб» с указанием его банковских реквизитов;

-   платежным поручением №82 от 05 апреля 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «Стройснаб» сумму 893 573,74 руб. назначение: «Оплата за общестроительные работы по договору №01-21сп от 07.11.2021».

Работы приняты по:

-   акту о приемке выполненных работ №4, дата составления 29.03.2022, отчетный период с 04.03.2022г. по 29.03.2022 г. (форма КС-2), наименование «Конструктивные решения», всего по акту выполнено работ на сумму 184 808,90 руб., акт подписан должностными лицами подписан должностными лицами ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» и ООО «ПГС-85»;

-   акту о приемке выполненных работ №1, дата составления 27.12.2021, отчетный период с 21.12.2021г. по 27.12.2021 г. (форма КС-2), наименование «Благоустройство», всего по акту выполнено работ на сумму 708 764,48 руб., акт подписан должностными лицами подписан должностными лицами ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» и ООО «ПГС-85», а всего работы были выполнены на сумму 893 573,39 руб.

Таким образом, этап строительства «Выполнение №5» выполнен ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» в полном объеме, ООО «ПГС-85» оплачен также в полном объеме.

6.                         Этап строительства «Выполнение №6»:

-    ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» выставило ООО «ПГС-85» счет №4 от 14 апреля 2022г. на сумму 2 167 981,55 руб., наименование товара «Общестроительные работы спортивный зал по ул. ФИО2 96 в ст. Должанской Ейского района»;

-    письмом за №8 от 11 апреля 2022 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» в счет взаимных расчетов оплату по счету №4 от 12.04.2022 г. в сумме 2 167 981,55 руб. перечислить на расчетный счет ООО «Стройснаб» с указанием его банковских реквизитов;

-    платежным поручением №90 от 14 апреля 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «Стройснаб» сумму 2 167 981,55 руб. назначение: «Оплата за общестроительные работы по договору №01-21сп от 07.11.2021».

Работы приняты по:

-    акту о приемке выполненных работ №5, дата составления 03.03.2022, отчетный период с 23.02.2022г. по 03.03.2022 г. (форма КС-2), наименование «Конструктивные решения», всего по акту выполнено работ на сумму 387 825,95 руб., акт подписан должностными лицами ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» и ООО «ПГС-85»;

-   акту о приемке выполненных работ №3, дата составления 05.04.2022, отчетный период с 30.03.2022г. по 05.04.2022 г. (форма КС-2) в редакции Генерального подрядчика, наименование «Архитектурные решения (1)», всего по акту выполнено работ на сумму 1 250 677,52 руб., акт подписан генеральным директором ООО «ПГС-85».

Таким образом, этап строительства «Выполнение №6» выполнен ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» частично на общую сумму 1 638 503,47 руб. При этом ООО «ПГС-85» оплачены работы в сумме 2 167 981,55 руб.

В связи с чем, по этапу строительства «Выполнение №6» в пользу ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» существует излишняя уплата в сумме 529 478,08 руб., работы выполнены не в полном объеме.

7.                         Этап строительства «Выполнение №7»:

-    ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» выставило ООО «ПГС-85» счет №5 от 18 апреля 2022г. на сумму 2 056 511,98 руб., наименование товара «Общестроительные работы спортивный зал по ул. ФИО2 96 в ст. Должанской Ейского района»;

-    письмом за №9 от 26 апреля 2022 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» в счет взаимных расчетов оплату по счету №5 от 26.04.2022 г. в сумме 2 056 511,98 руб. перечислить на расчетный счет ООО «Стройснаб» с указанием его банковских реквизитов;

-    платежным поручением №96 от 29 апреля 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «Стройснаб» сумму 2 056 511,98 руб. назначение: «Оплата за общестроительные работы по договору №01-21сп от 07.11.2021 и счету №5 от 26.04.2022г.»;

ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» в полном объеме не выполнялись строительно-монтажные работы по этапу строительства «Выполнение №7».

Таким образом, этап строительства «Выполнение №7» ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» не выполнен. При этом ООО «ПГС-85» оплачены работы в сумме, 2 056 511,98 руб.

В связи с чем, по этапу строительства «Выполнение №7» в пользу ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» существует излишняя уплата в сумме 2 056 511,98 руб.

8.                       Этап строительства «Выполнение №8»:

-   ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» выставило ООО «ПГС-85» счет №8 от 19 мая 2022г. на сумму 3 560 824,37 руб., наименование товара «Общестроительные работы спортивный зал по ул. ФИО2 96 в ст. Должанской Ейского района»;

-   письмом за №45 от 19 мая 2022 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» в счет взаимных расчетов оплату по счету №8 от 19.05.2022 г. в сумме 3 560 824,37 руб. перечислить на расчетный счет ООО «Стройснаб» с указанием его банковских реквизитов;

-   платежным поручением №117 от 25 мая 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «Стройснаб» сумму 2 950 000,00 руб. назначение: «Оплата за общестроительные работы по договору №01 -21сп от 07.11.2021»;

-   платежным поручением №118 от 26 мая 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «Стройснаб» сумму 610 824,37 руб. назначение: «Оплата за общестроительные работы по договору №01-21сп от 07.11.2021», а всего было оплачено 3 560 824,37 руб.

Работы приняты по:

-   акту о приемке выполненных работ №2, дата составления 19.05.2022, отчетный период с 23.04.2022г. по 19.05.2022 г. (форма КС-2), наименование «Благоустройство», всего по акту выполнено работ на сумму 915 982,26 руб., акт подписан должностными лицами ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон»  и ООО «ПГС-85»;

-   акту о приемке выполненных работ №2, дата составления 19.05.2022, отчетный период с 23.04.2022г. по 19.05.2022 г. (форма КС-2) в редакции Генерального подрядчика, наименование «Резервуар на 200 м3», всего по акту выполнено работ на сумму 1 180 197,15 руб., акт подписан генеральным директором ООО «ПГС-85».

Таким образом, этап строительства «Выполнение №8» выполнен ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» частично на общую сумму 2 096 179,41 руб. При этом ООО «ПГС-85» оплачены работы в сумме 3 560 824,37 руб.

В связи с чем, по этапу строительства «Выполнение №6» в пользу ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» существует излишняя уплата в сумме 1 464 644,96 руб., работы выполнены не в полном объеме.

9.                       Этап строительства «Выполнение №9»:

-   письмом за №б/н от 10 июня 2022 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» произвести оплату по сч. 775/а от 10.06.2022 г. за аренду опалубки ООО «ДАЙЯ ГРУПП» в сумме 405 033,90 руб. за ООО «Стройснаб» в счет взаимных расчетов по реквизитам указанным в письме (ООО «ДАЙЯ ГРУПП»).

-   платежным поручением №132 от 10 июня 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «ДАЙЯ ГРУПП» сумму 405 033,90 руб.;

-   письмом за №58 от 10 июня 2022 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» произвести оплату по счету №238 от 10.06.2022 за бетон ООО «БИЛ» , а по счету №192 от 08.06.2022 за сетку ИП ФИО4 в счет взаимных расчетов;

-   платежным поручением №134 от 11 июня 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «БИЛ» сумму 150 000,00 руб. назначение: «Оплата за бетон товарный по счету № 238 от 10.06.2022г.»;

-   платежным поручением №133 от 11 июня 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ИП ФИО4 сумму 29 340,00 руб. назначение: «Оплата за сетку по счету №192 от 08.06.2022»;

- платежным поручением №131 от 10 июня 2022 г. оплатил ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» сумму 15 984,80 руб., назначение: «Оплата за электроэнергию по счету №23050101736/7863 от 30.04.2022г.»

- платежным поручением №135 от 12 июня 2022 г. оплатил ООО «Стройснаб» сумму 2 404 454,48 руб., назначение: «Оплата за строительно-монтажные работы по договору №01-21сп от 07.11.2021», а всего было оплачено 3 004 813,18 руб.

Работы приняты по:

-   акту о приемке выполненных работ №6, дата составления отчетный период с 20.05.2022г. по 08.06.2022 г. (форма КС-2) в редакции Генерального подрядчика, наименование «Архитектурные решения (1)», всего по акту выполнено работ на сумму 1 244 427,12 руб., акт подписан генеральным директором ООО «ПГС-85».

Таким образом, этап строительства «Выполнение №9» выполнен ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» частично на общую сумму 1 237 427,12 руб. При этом ООО «ПГС-85» оплачены работы в сумме 3 004 813,18 руб.

В связи с чем, по этапу строительства «Выполнение №9» в пользу ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» существует излишняя уплата в сумме 1 760 386,06 руб., работы выполнены не в полном объеме.

10.    Этап строительства «Выполнение № 10»:

- ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» выставило в пользу ООО «ПГС-85» счет №12 от 22 июня 2022г. на сумму 2 111 884,50 руб., наименование товара «Общестроительные работы спортивный зал по ул. ФИО2 96 в ст. Должанской Ейского района»;

- письмом за №б/н от 20 июня 2022 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» произвести оплату по счету №214 от 20.06.2022 за материалы ИП ФИО4 в сумме 87 872,00 в счет взаимных расчетов по указанным реквизитам;

- платежным поручением №142 от 21 июня 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ИП ФИО4 сумму 87 282,00 руб. назначение: «Оплата за сетку по счету №214 от 20.06.2022»;

- письмом за №б/н от 21 июня 2022 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» произвести оплату по счету С23-00000000216 от 21.06.2022 за профиль ИП ФИО5 в сумме 77 070,00 руб. за ООО «Стройснаб» в счет взаимных расчетов по указанным реквизитам;

- платежным поручением №143 от 21 июня 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ИП ФИО5 сумму 77 070,00 руб. назначение: «Оплата за профили по счету С23-00000000216»;

- письмом за №б/н от 21 июня 2022 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» произвести оплату по счету №27 от 21.06.2022 за бетон М-200 ООО «КАМСТРОЙ» в сумме 50 000,00 руб. в счет взаимных расчетов по указанным реквизитам;

 - платежным поручением №144 от 21 июня 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «КАМСТРОЙ» сумму 50 000,00 руб. назначение: «Оплата за бетон по счету №27 от 21.06.2022»;

- платежным поручением №147 от 23 июня 2022 г. оплатило ООО «Стройснаб» сумму 1 897 523,50 руб., назначение: «Оплата за строительно-монтажные работы по договору №01-21сп от 07.11.2021», а всего было оплачено 2 111 884,50 руб.

Работы приняты по:

- акту о приемке выполненных работ №7 дата составления отчетный период с 09.06.2022г. по 20.06.2022 г. (форма КС-2) в редакции Генерального подрядчика, наименование «Архитектурные решения (1)», всего по акту выполнено работ на сумму 66 647,91 руб., акт подписан генеральным директором ООО «ПГС-85».

 - акту о приемке выполненных работ №1 дата составления 20.06.2022 отчетный период с 09.06.2022г. по 20.06.2022 г. (форма КС-2) в редакции Генерального подрядчика, наименование «Отопление», всего по акту выполнено работ на сумму 562 519,63 руб., акт подписан генеральным директором ООО «ПГС-85».

- акту о приемке выполненных работ №1 дата составления 20.06.2022 отчетный период с 09.06.2022г. по 20.06.2022 г. (форма КС-2) в редакции Генерального подрядчика, наименование «Внутренние сети водопровода», всего по акту выполнено работ на сумму 63 583,17 руб., акт подписан генеральным директором ООО «ПГС-85».

Таким образом, этап строительства «Выполнение №10» выполнен ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» частично на общую сумму 692 750,71 руб. При этом ООО «ПГС-85» оплачены работы в сумме 2 111 884,50 руб.

В связи с чем, по этапу строительства «Выполнение №6» в пользу ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» существует излишняя уплата в сумме 1 419 133,79 руб., работы выполнены не в полном объеме.

11.    Этап строительства «Выполнение №11»:

- ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» выставило ООО «ПГС-85» №13 от 22 июня 2022г. на сумму 1 995 998,46 руб., наименование товара «Общестроительные работы спортивный зал по ул. ФИО2 96 в ст. Должанской Ейского района»;

- письмом за №б/н от 27 июня 2022 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» произвести оплату по счету от 27.06.2022 за плитку тактильную ООО «БИЛ» в сумме 99 850,00 в счет взаимных расчетов по указанным реквизитам;

- платежным поручением №155 от 28 июня 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «БИЛ» сумму 99 850,00 руб. назначение: «Оплата за плитку тактильную по счету №275 от 27.06.2022»;

 - письмом за №б/н от 28 июня 2022 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» произвести оплату по счету №12 от 29.06.2022 и №11 от 28.06.2022 за щебень ИП ФИО3 в сумме 200 000 руб. за ООО «Стройснаб» в счет взаимных расчетов по указанным реквизитам.

 - платежным поручением №157 от 29 июня 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ИП ФИО3 сумму 100 000,00 руб. назначение: «Оплата за щебень по счету №11 от 28.06.2022»;

- платежным поручением №159 от 29 июня 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ИП ФИО3 сумму 100 000,00 руб. назначение: «Оплата за щебень по счету №11 от 28.06.2022»;

- платежным поручением №158 от 29 июня 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ИП ФИО6 сумму 213 650,00 руб., назначение: «Авансовый платеж за электротовары».

- платежным поручением №160 от 30 июня 2022 г. оплатил ООО «Стройснаб» сумму 1 298 491,46 руб., назначение: «Оплата за строительно-монтажные работы по договору №01-21сп от 07.11.2021», а всего было оплачено 1 995 998,46 руб.

Работы приняты по:

- акту о приемке выполненных работ №8 дата составления отчетный период с 21.06.2022г. по 29.06.2022 г. (форма КС-2) в редакции Генерального подрядчика, наименование «Архитектурные решения (1)», всего по акту выполнено работ на сумму 437 131,54 руб., акт подписан генеральным директором ООО «ПГС-85».

- акту о приемке выполненных работ №3 дата составления 29.06.2022 отчетный период с 21.06.2022г. по 29.06.2022 г. (форма КС-2) в редакции Генерального подрядчика, наименование «Благоустройство», всего по акту выполнено работ на сумму 332 961,15 руб., акт подписан генеральным директором ООО «ПГС-85».

 - акту о приемке выполненных работ №1 дата составления 29.06.2022 отчетный период с 21.06.2022г. по 29.06.2022 г. (форма КС-2), наименование «Тепловые сети», всего по акту выполнено работ на сумму 132 671,58 руб., акт подписан должностными лицами ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» и ООО «ПГС-85»;

Таким образом, этап строительства «Выполнение №11» выполнен ООО «ПГС-85» частично на общую сумму 902 764,27 руб. При этом ООО «ПГС-85» оплачены работы в сумме 1 995 998,46 руб.

В связи с чем, по этапу строительства «Выполнение №11» в пользу ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» существует излишняя уплата в сумме 1 093 234,19 руб., работы выполнены не в полном объеме.

12.    Этап строительства «Выполнение №12»:

- ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» выставило ООО «ПГС-85» счет №15 от 08 июля 2022г. на сумму 3 011 712,82 руб., наименование товара «Общестроительные работы спортивный зал по ул. ФИО2 96 в ст. Должанской Ейского района»;

- письмом за №75 от 08 июля 2022 г. ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» поручило ООО «ПГС-85» в счет взаимных расчетов оплату по счету №15 от 08.07.2022 г. в сумме 3 011 712,82 руб. перечислить на расчетный счет ООО «Стройснаб» с указанием его банковских реквизитов;

- платежным поручением №168 от 11 июля 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «Стройснаб» сумму 2 900 000 руб. назначение: «Оплата за общестроительные работы по договору №01-21сп от 07.11.2021 по счету №28 от 27.12.2021»;

- платежным поручением №170 от 12 июля 2022 г. ООО «ПГС-85» оплатило ООО «Стройснаб» сумму 111 712,82 руб. назначение: «Оплата за общестроительные работы по договору №01-21сп от 07.11.2021», а всего было оплачено 3 011 712,82 руб.

Работы приняты по:

- акту о приемке выполненных работ №9, дата составления 07.07.2022, отчетный период с 30.06.2022г. по 07.07.2022 г. (форма КС-2) в редакции Генерального подрядчика, наименование «Архитектурные решения (1)», всего по акту выполнено работ на сумму 290 112,48 руб., акт подписан генеральным директором ООО «ПГС-85»;

- акту о приемке выполненных работ №1, дата составления 07.07.2022, отчетный период с 30.06.2022г. по 07.07.2022 г. (форма КС-2) в редакции Генерального подрядчика, наименование «Вентиляция», всего по акту выполнено работ на сумму 281 316,84 руб., акт подписан генеральным директором ООО «ПГС-85»;

- акту о приемке выполненных работ №1, дата составления 07.07.2022, отчетный период с 30.06.2022г. по 07.07.2022 г. (форма КС-2) в редакции Генерального подрядчика, наименование «Электромонтажные работы», всего по акту выполнено работ на сумму 880 565,48 руб., акт подписан генеральным директором ООО «ПГС-85»;

- акту о приемке выполненных работ №1, дата составления 07.07.2022, отчетный период с 30.06.2022г. по 07.07.2022 г. (форма КС-2) в редакции Генерального подрядчика, наименование «Наружное освещение», всего по акту выполнено работ на сумму 138 644,08 руб., акт подписан генеральным директором ООО «ПГС-85».

Таким образом, этап строительства «Выполнение №12» выполнен ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон»  частично на общую сумму 1 590 638,88 руб. При этом ООО «ПГС-85» оплачены работы в сумме 3 011 712,82 руб.

В связи с чем, по этапу строительства «Выполнение №12» в пользу ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» существует излишняя уплата в сумме 1 421 073,94 руб., работы выполнены не в полном объеме.

Показательным примером является то, что ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон», по КС-2 №1 «Ливневая канализация» от 07.07.2022 были оплачены работы по устройству ливневой канализации, которая по решению Заказчика в лице МУП ЖКХ Ейского района не была выполнена в ходе окончательной приемки была снята с оплаты ООО «ПГС-85» в связи с тем, что по решению Заказчика работы по устройству ливневой канализации не выполнялись .

Также в материалах арбитражного дела представлен документы об оплатах ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» за выполнение строительно-монтажных работы по поставке и монтажу алюминиевых витражей, оконных и дверных блоков на общую сумму 3 701 887 (три миллиона семьсот одна тысяча восемьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек на объекте «Строительство спортивного зала по ул.ФИО2,96 в ст. Должанской Ейского района».

Однако строительно-монтажные работы ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» не были выполнены. По отдельному договору данные работы были порчены и выполнены ООО «Фасадстрой97».

Представленные ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» документы на закупку сендвич- панелей также свидетельствует о том, что ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон», не поставило на объект и не смонтировало в полном объеме стеновые и кровельные сендвич-панели.

Согласно представленной в арбитражный суд ООО «ПГС-85» систематизированной таблицы по поставке на объект сендвич-панелей ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» (согласно представленных ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» во встречном исковом заявлении закупочных документов) на объект поставлены сендвич-панели в следующем объеме:

Наименование

конструкции

Количество по смете

Оплачено ООО «Ейскжелезо- бетон»

 

Количество по документам ООО «Ейскжелезо- бетон»

Разница по документам ООО «Ейскжелезо- бетон»

Сендвич-панели стеновые толщиной 150мм

1400,015м2

1400,015м2

1116,03м2

283,985м2

Сендвич-панели стеновые толщиной 120мм

184,35м2

184,35м2

367,83м2

183.48м2

Сендвич-панели

кровельные

1188,37м2

1497,35м2

277,20м2

911,17м2

 

Сендвич-панели стеновые толщиной 120мм предусмотрены проектной документацией только в объеме 184,35м2, в то время как ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» представляет документы на 367,83м2. Куда смонтированы 183,48м2 - не понятно!

Между тем, ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» после представленных и оплаченных актов приемки работ в рамках этапа «Выполнение №12» от 07.07.2022, в рамках встречного искового заявления предоставило акты на дополнительные работы, которые датируются 26.09.2022 и 26.10.2022 и  составлены ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» в одностороннем порядке и не соответствуют нескольким требованиям Договора:

 - согласно данных страницы 2 встречного искового заявления стоимость выполненных дополнительных работ составляет 7 195 761,72 руб., а стоимость согласно представленных актов (приложения №16,17,19 к встречному исковому ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон») заявлению составляет 9 080 379,72 рублей;

 - составлены через два с половиной месяца после последнего представления актов от 07.07.2022: в соответствии с п. 7.2. Договора в рамках исполнения Договора Субподрядчик обязан выполнять работы и сдавать их Генеральному подрядчику по частям - по завершении каждого отчетного месяца в сроки, установленные п. 5.2. Договора;

- в нарушение п. 7.3 Договора не имеют в составе исполнительную документацию на выполненный в соответствии с представленными формами КС-2, КС-3 объем работ;

 - не подписаны представителем строительного контроля (технического надзора) Заказчика в нарушение п. 7.4. Договору №01 -21сп от 07.11.2021;

При этом, согласно п. 6.1.3. Договора Субподрядчик обязан обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с условиями Договора, в том числе с Приложениями №1, №2 к Договору, проектной и рабочей документацией.

Достоверность и достаточность объемов работ, включенных в проектную документацию, подтверждается:

 - положительным заключением проектной документации и результатов инженерных изысканий №23-1-1-3-038699-2019 от 29.12.2019 Государственного автономного учреждения Краснодарского края «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий», ИНН 

<

***>;

- положительным заключением о проверке достоверности сметной документации №23- 1-0140-20 от 21,01.2020 Государственного автономного учреждения Краснодарского края «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий», ИНН 

<

***>.

Представленные объемы работ выходят за рамки проектной документации.

Данные факты свидетельствуют, о том что, предъявляемые финансовые требования относительно дополнительных работ, является необоснованными, не соответствуют условиям Договора, проектной документации, заключениям государственной экспертизы.

Таким образом, во исполнение условий договора, производило оплату строительно-монтажных работ в пользу ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» с целью финансирования строительства, при этом ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» (Субподрядчик) работы в полном объеме не выполнило.

В период с 20 декабря 2021 года по 12 июля 2022 года с целью исполнения Договора ООО «ПГС-85» оплатил ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» денежные средства в общей сумме 30 825 582,74 руб.

По договору ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» выполнило строительно-монтажные работы на сумму 18 786 790,17 руб.

Сумма излишне уплаченных денежных средств ООО «ПГС-85» в пользу ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» составляет 12 038 792,57 руб.

Расчет приводится отдельным файлом «Расчет исковых требований ООО «ПГС-85» к ООО «Ейскжелезо-бетон» по арбитражному делу №А77-127/2023».

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и        требований    -  в       соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 1. ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно    ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно          п.         1 ст.     746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В то же время статья 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает возможность составления одностороннего акта сдачи-приемки результата работ, и защищает, таким образом, интересы подрядчика, если заказчик необоснованно уклоняется от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» не выполнило надлежащим образом обязательства, предусмотренные Договором, строительно-монтажные работы были выполнены только частично, строительство объекта Субподрядчиком окончено не было, результат работ ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» не сдан, работы ООО «ПГС-85» не приняты. При этом обязательства по оплате работ ООО «ПГС-85» выполнил в полном объеме.

В связи с чем, у ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» по Договору №01-21сп от 07 ноября 2021 перед Генеральным подрядчиком ООО «ПГС-85» образовалась задолженность в сумме 12 038 792,57 руб., которая подлежит взысканию в пользу ООО «ПГС-85».

В соответствии с ч. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

ООО «ПГС-85» произведён расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ за период с «05» декабря 2022 года по «21» мая 2024 года, размер процентов за пользование денежными средствами составляет 1 854 798,62 руб.

Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ.

 

Задолженность,

руб.

Период просрочки

Процентная

ставка

Дней

в году

Проценты,

руб.

с

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1] х [4] х [5]/[6]

12 038 792,57

05.12.2022

23.07.2023

231

7,50%

365

571 430,36

12 038 792,57

24.07.2023

14.08.2023

22

8,50%

365

61 678,20

12 038 792,57

15.08.2023

17.09.2023

34

12,0%

365

134 570,61

12 038 792,57

18.09.2023

30.10.2023

42

13,0%

365

180 087,14

12 038 792,57

31.10.2023

17.12.2023

18

15,0%

365

89 054,08

12 038 792,57

18.12.2023

21.05.2024

155

16,0%

365

817 978,23

Итого:

502

12,0%

 

1 854 798,62

На основании вышеизложенного, ООО «ПГС-85» считает, что с ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» в пользу ООО «ПГС-85» подлежит взысканию сумма долга в размере 12 038 792 (двенадцать миллионов тридцать восемь тысяч семьсот девяносто два) рубля 57 копеек по Договору №01-21сп от 07 ноября 2021 года, в связи с выполнением ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» строительно-монтажных работ не в полном объеме.

Также с ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» в пользу ООО «ПГС-85» подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 854 978,62 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто восемь) рублей 62 копейки.

Таким образом, обязательства по Договору №01-21сп от 07.11.2021 г. были исполнены ООО «Ейскжелезо-бетон» частично и с отклонениями от требований проектной документации и нормативно-технических требований.

ООО «ПГС-85» неоднократно обращался к ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» с просьбой провести контрольные обмеры фактически выполненных ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон», ООО «ПГС-85» просило добровольно вернуть денежные средства излишне уплаченные по Договору № 01-21сп от 07.11.2021 г.. Однако ООО «Ейскжелезо-бетон» полностью игнорировало обращения.

Письмом исх. №72 от 19.11.2022 ООО «ПГС-85» попросило ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» добровольно вернуть в пользу ООО «ПГС- 85» задолженность перед компанией ООО «ПГС- 85», однако ООО «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» претензию получать отказался, денежные средства так ООО «ПГС-85» возвращены не были.

На основании проведенного исследования на предмет соответствия встречных исковых требований ООО «Ейскжелезо-бетон» о взыскании с ООО «ПГС-85» задолженности в сумме 18 905 541,61 руб. по Договору №01-21сп от 07.11.2021 действующим нормативным требованиям в строительстве, ценообразовании, сметного дела и договорных отношений в строительстве экспертом ООО «Грозненский экспертный центр» ФИО7 установлено, что финансовые требования ООО «Ейскжелезо-бетон» формируется из следующих составляющих:

 - стоимость фактических затрат по договору подряда: 10 709 650,89 руб.;

-  не оплаченные работы за укладку асфальта: 1 000 000,00 руб.;

 - стоимость дополнительных работ: 7 195 761,72 руб.

Требования по п. 1 в свою очередь формируются из следующих составляющих:

-   эксплуатация машин и механизмов;

-   закупка материалов, расходных элементов, в том числе и ГСМ для техники.

Сумма требований по данной части составляют: 9 157 670,90 руб.

Также по требованиям по п. 1 в объем финансовых требований включены:

-   аренда опалубки: стоимость использования опалубки учтена соответствующими сметными расценками на устройство железобетонных изделий.

Согласно п. 2.2. Договора №01-21сп от 07.11.2021 в цену Договора включены все расходы Субподрядчика, связанные с выполнением всех обязательств по Договору, в том числе:

-   стоимость всех работ согласно Локальному сметному расчёту (Приложение №1 к Договору), стоимость конструкций, материалов, инженерного, технологического оборудования помещений и рабочих мест, включая их доставку на Объект, монтаж, поверку, пуско-наладочные работы, предусмотренные проектом для выполнения работ на Объекте, а также обучение персонала, где это необходимо;

-   затраты, связанные с обеспечением выполнения работ по Объекту рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;

-   транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Субподрядчиком;

-   затраты на подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям в пределах средств, предусмотренных на эти цели Локальным сметным расчетом;

-   затраты на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм;

-   затраты на оплату (возмещение) коммунальных услуг при строительстве Объекта;

-   затраты на непредвиденные работы в пределах средств, предусмотренных на эти цели Локальным сметным расчетом (непредвиденные затраты);

-   затраты на использование строительной техники, затраты на строительство временных зданий и сооружений, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов, сборов и других обязательных платежей и непредвиденные затраты;

-   на страхование предусмотренных Договором рисков; - накладные расходы, сметная прибыль.

-   монтаж системы видеонаблюдения. Монтаж систем часофикации, оповещения и видеонаблюдения в объеме 100% предусмотренных проектной документацией выполнены ИП ФИО8 (ИНН 

<

***>) по Договору №43/20 от 20.09.2022 и оплачены генеральной подрядной организацией ООО «ПГС-85».

Между тем проектно-сметная документация выполнена специализированной проектной организацией, прошла государственную экспертизу и учитывает расход материалов, эксплуатацию машин и механизмов на физические объемы работ, предусмотренных проектной документацией. По результатам прохождения Государственной экспертизы имеются:

-   положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий №23-1-1-3-038699-2019 от 29.12.2019 Государственного автономного учреждения

Краснодарского края «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий», ИНН 

<

***>;

-   положительное заключение о проверке достоверности сметной документации №23-1- 0140-20 от 21.01.2020 Государственного автономного учреждения Краснодарского края «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий», ИНН 

<

***>;

Относительно требований по п. 2 на сумму 1 000 000,00 руб.: не представлен КС-2 на выполнение данного вида работ, подписанный представителями строительного контроля (технического надзора) согласно п. 7.4. Договору №01-21сп от 07.11.2021.

Требования по п. 3 на сумму 7 195 761,72 руб. предъявляются исключительно на основании актов  составленных в октябре 2022 года, когда уже ООО «Ейскжелезо-бетон» не выполняло никаких работ на объекте и подписанные только со стороны ООО «Ейскжелезо-бетон».

Между тем, согласно п. 7.4. Договору №01-21сп от 07.11.2021 акты должны быть подписаны представителями строительного контроля (технического надзора) Заказчика.

Также отмечаем, что на почтовое уведомление, в котором были данные акты не представлено описи почтового отправления с отметкой работника почтового отделения, подтверждающего, что в конверте были именно акты, представленные в материалах искового заявления.

На основании изучения и систематизации прилагаемых документов к актам на определение стоимости фактических затрат ООО «Ейскжелезо-бетон» экспертом сделаны следующие выводы:

1.      Нумерация актов не соответствует нумераций актов приемки выполненных работ.

 2. Прилагаемые к актам документы в хронологическом отношении, в основном, не соответствуют периоду выполнения работ.

 3. Весь лимит по непредвиденным затратам предусмотренный ПСД, в том числе и по работам не входящим в Договор Субподряда №01-21сп были оплачены Субподрядчику по акт КС-2 (непредвиденные работы) от 03.03.2021 в размере 914 353,88 рублей.

 4. Некоторые документы между ООО «Стройснаб» (является аффилированным лицом ООО «Ейскжелезо-бетон») и ООО «Ейскжелезо-бетон» подписаны ФИО9

 5. Согласно прилагаемым документам ООО «Ейскжелезо-бетон» и ООО «Стройснаб» провели финансовые операции на сумму 4624682,95 рублей, именно:

-   счет-фактура №10 от 04.05.2022 на сумму 626086,53 руб.;

-   счет-фактура №37 19.03.2022 на сумму 2208210,00 руб.;

-   счет-фактура №68 03.10.2022 на сумму 926185,00 руб.;

-   счет-фактура №( на скане не усматривается) 12.05.2022 на сумму 831201,42 руб.;

-   товарная накладная №( на скане не усматривается) 24.06.2022 на сумму 33000,00 руб.

В некоторых из данных документов перечень материалов не соответствует выполняемым за данный период видам работ, в частности, в счет-фактуре №37 от 19.03.2022 на сумму 2 208 210,00 присутствуют в, основном, материалы для выполнения сантехнических работ, например Трап ПП гориз. ДУ1 Юс нержавеющей решеткой 150x150 и гидрозатвором). В данный период времени выполнялись работы по возведению строительных конструкций здания.

Данные документы приложены по нескольку раз.

-   в прилагаемых документах за период до заключения Договора №01-21сп от 07.11.2021, а именно:

-   товарный чек №40 от 02.12.2019 г. на сумму 1541,95 руб.: покупатель не установлен, прикреплен товарный чек на сумму 330 руб., прилагается 4 (четыре) раза;

-   счет-фактура №68 03.10.2022 на сумму 926185,00 руб.;

В прилагаемых документах есть документы, где покупателем выступает ООО «Стройснаб:

-   накладная №338 от 01.02.2022 на сумму 97000,00 руб., в накладной нет подписи и печати продавца, прикреплено 5 (пять) раз.

Согласно прилагаемой справке ООО «Ейскжелезо-бетон» оборотов по счету у организации не было.

Расчёты ООО «ПГС-85» судом проверены и признаются верными, ООО «Ейскжелезо-бетон» ходатайство о снижение неустойки суду не заявило. 

Принимая во внимание выше изложенное, суд считает, что требования ООО «ПГС-85»  о взыскании ООО «Ейскжелезо-бетон» задолженности по договору №01 -21 сп от 07.11.2021 в размере 12 038 792,57 и процентов в размере 1 854 798,62 руб. подлежат удовлетворению, встречные требования ООО «Ейскжелезо-бетон» судом признаются необоснованными. 

В части первоначальных  требований  к ООО «Стройснаб», с учетом позиции  представителя ООО «ПГС-85» подлежат оставлению без рассмотрения.

Поскольку требования ООО «ПГС-85» удовлетворены а во встречном иске ООО «Ейскжелезо-бетон» отказано, то в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине подлежат распределению между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

        Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Уточненные требования Общества с ограниченной ответственностью «ПГС-85» от 13.05.2024 принять к рассмотрению по существу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» (ИНН 

<

***> / ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПГС-85» (ИНН 

<

***> / ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 12 038 792,57 руб. по договору № 01-21 сп от 07.11.2021, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 854 798,62 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 92 468 руб.

В удовлетворении встречного искового требования Общества с ограниченной ответственностью «ЕЙСКЖЕЛЕЗО-бетон» отказать.

В остальной части исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «ПГС-85» оставить без рассмотрения. 

Возвратить на основании данного судебного акта Обществу с ограниченной ответственностью «ПГС-85» (ИНН 

<

***> / ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 567 руб., уплаченных по платежному поручению от 26.01.2023 № 529.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через Арбитражный суд Чеченской Республики.

 

Судья                                                                                                                              Л.С. Межидов