8/2017-9701(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-12201/2016

г. Астрахань

21 февраля 2017 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Внести изменения в следующие пункты контракта № 0325100012516000009_83088 на  выполнение в 2016 году мероприятий рыбохозяйственной мелиорации «Расчистка  Обжорского и впадающего в него Старо-Иголкинского каналов-рыбоходов Володарского  района Астраханской области (II этап) от 09 августа 2016 года, изложив их в следующей  редакции: п. 3.1. «Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по настоящему  контракту не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания контракта.  Выполнить работы и представить их результата Заказчику не позднее 23 апреля 2017 года и  сдать результата выполненных работ Заказчику не позднее 28 апреля 2017 года, с правом  досрочного выполнения работ. Работы должны выполняться Подрядчиком в сроки,  установленные Календарным планом (приложение № 3 к настоящему Контракту)»; п. 20.6.  «Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 23 мая 2017 года, а в  части исполнения гарантийных обязательств – до истечения срока таковых».  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья Н.В. Смирнова  

21 февраля 2017 года