АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

22 марта 2021 года                                                                                      Дело № А74-11041/2020

Резолютивная часть решения объявлена 15 марта 2021 года. 

Полный текст решения изготовлен 22 марта 2021 года.

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.А. Федулкиной,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Хакасия»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о понуждении представить исполнительную и эксплуатационную документацию по государственному контракту от 10.09.2019 № 76/19,

при участии в  деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора  Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Хакасия  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

при участии представителей:

истца – ФИО2, на основании доверенности № Д-12/21 от 11.01.2021;

третьего лица – ФИО3, на основании доверенности от 29.01.2021 № Д-10/21.

Федеральное государственное казенное учреждение «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Хакасия»  (далее истец, ФГКУ «ОВОНГ РФ по РХ») обратилось с иском в суд к обществу с ограниченной ответственностью «Капитал-инвест» (далее ответчик, ООО «Капитал-инвест») об обязании представить исполнительную и эксплуатационную документацию по контракту.

До рассмотрения иска по существу, истец уточнил исковые требования и просил суд обязать ООО «Капитал-инвест» предоставить ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» следующую исполнительскую и эксплуатационную документацию по государственному контракту от 10.09.2019 №76/19: 

журнал учета выполненных работ, акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж дверных коробов и полотен), акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж оконных переплетов и коробок, снятие подоконных досок), акт освидетельствования скрытых работ (разборка простильных полов, лаг из досок, покрытий полов из линолеума и плиток уложенных на раствор), акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж стяжки, бетонных покрытий полов), акт освидетельствования скрытых работ (разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса) акт освидетельствования скрытых работ (Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков), акт освидетельствования скрытых работ (разборка плинтусов деревянных и их пластмассовых материалов полов), акт освидетельствования скрытых работ (разборка облицовки из гипсокартонных листов, пласт откосов, МДФ, шкафов встроенных: стен и перегородок), акт освидетельствования скрытых работ (отбивка штукатурки, плитки), акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж электропроводки, выключателей, розеток, светильников), акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж радиаторов отопления), акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж унитаза, умывальника), акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж трубопроводов отопления, водоснабжения, водоотведения), паспорта и сертификаты соответствия на установленные блоки дверные (в компл.),  паспорта и сертификаты соответствия на установленные блоки стальной наружный и стальные внутренние, паспорта и сертификаты соответствия на установленные блоки оконные пластиковые, паспорта и сертификаты соответствия на установленные доски подоконные ПВХ, уголки, панелей пластиковых, используемый клей жидкий, паспорт и сертификат соответствия на установленные ворота секционные, привод для ворот, выключатель (кнопка), акт освидетельствования скрытых работ (устройство стяжек цементных), сертификат соответствия и паспорт на раствор готовый кладочный или используемые материалы, акт освидетельствования скрытых работ (армирование подстилающих слоев пола), сертификат соответствия и паспорт на сетку сварную из арматурной проволоки 4,0 мм., акт освидетельствования скрытых работ (устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистирола), сертификат соответствия и паспорт на пенополистирол, акт освидетельствования скрытых работ (устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой), сертификат соответствия и паспорт на гравий керамзитовый фракция 5-10 мм, марка 250, сертификат соответствия и паспорт плитка керамогранитная 600*600*10, сертификат соответствия и паспорт грунтовки акриловой, сертификат соответствия и паспорт клея для облицовочных работ, сертификат соответствия и паспорт затирки, сертификат соответствия и паспорт ленты полимерной (фторопластовой для сварки линолеума), сертификат соответствия и паспорт линолеум коммерческий толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РШ, Д2, Т2, сертификат соответствия и паспорт плитки поливинилхлоридные для полов толщина 2 мм., акт освидетельствования скрытых работ (устройство ленточных фундаментов бетонных), сертификат соответствия и паспорт на бетон мелкозернистый, сертификат соответствия и паспорт на плинтус для полов, акт освидетельствования скрытых работ (из выравнивающей смеси типа «Бетонит» 5000) Паспорт и сертификат на используемые смеси типа «Бетонит» 5000), акт освидетельствования скрытых работ (Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и облдицовка стен), сертификат соответствия и паспорт профилей стоечных, направляющих, гипсоволокнистых листов),сертификат соответствия и паспорт плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен сан. узла, сертификат соответствия и паспорт стеклообои елочка, сертификат соответствия и паспорт Краска водоэмульсионная окраска стен оклеенных обоями, сертификат соответствия панель мдф 7 мм (отбойная доска стен), акт освидетельствования скрытых работ (Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен), сертификат соответствия профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (стены гараж, ворота, фасад), акт освидетельствования скрытых работ (Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, клипс крепежа гофры, затягивание провода в проложенные трубы), сертификат соответствия и паспорт труб гофрированных из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 16 мм., сертификат соответствия и паспорт кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2., сертификат соответствия и паспорт Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2., сертификат соответствия и паспорт Светильник светодиодный HBO-36w 595*595*19 6500К 2900Лм призма IP40, сертификат соответствия и паспорт Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44, сертификат соответствия и паспорт Светильник светодиодный ДВО/ДПО- 36 офисный встраиваемый/накладной 1195x180x19мм 2550Лм IP40 ВТ 4000К,сертификат соответствия и паспорт на выключатель скрытой проводки одно/двухклавишный, сертификат соответствия и паспорт розетка скрытой проводки двухгнездовая, сертификат соответствия и паспорт коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки, сертификат соответствия и паспорт коробка распаечная HP 70, сертификат соответствия и паспорт дюбель пропиленовый размер 8x40 мм., сертификат соответствия и паспорт кронштейны для крепления радиаторов длина 131 мм.; сертификат соответствия и паспорт Радиатор биметаллиеский STI колиество секций 8 и секций 10, сертификат соответствия и паспорт кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм со сгоном, сертификат соответствия и паспорт краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм.,сертификат соответствия и паспорт унитаз, сертификат соответствия и паспорт умывальник с краном, сифоном бутылочным, сертификат соответствия и паспорт  пьедестал для умывальника, сертификат соответствия и паспорт трубы стальные водопроводные диаметром 50 мм., сертификат соответствия и паспорт трубы стальные водопроводные диаметром 20 мм., сертификат соответствия и паспорт тепловычислитель 7КТ-444 «Абакан», сертификат соответствия и паспорт комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град, сертификат соответствия и паспорт расходомер электромагнитный, марка: ПРЭМ диаметр 32 мм, с монтажным комплектом, сертификат соответствия и паспорт грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка: 45 мм, корпуса 219 мм., сертификат соответствия и паспорт Грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка: 34,42 мм, корпуса 108 мм., сертификат соответствия и паспорт фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-40, сертификат соответствия и паспорт фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см ) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 40 мм., сертификат соответствия и паспорт кран шаровый «МАРШАЛ» Hc67nAN40PN40, сертификат соответствия и паспорт регулятор температуры РТЕ-21М, сертификат соответствия и паспорт элеваторы 40сЮбк водоструйные: № 1, сертификат соответствия и паспорт термометр стеклянный ртутный электроконтактный типа ТПК (ножка 80-250 мм) до 300 град С, сертификат соответствия и паспорт соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 40x32 мм., сертификат соответствия и паспорт фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ), размером: ½, сертификат соответствия и паспорт счетчик воды универсальный, марка: СВК-15-3-2, сертификат соответствия и паспорт манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-ЗУ диаметром корпуса 100 мм., сертификат соответствия и паспорт кран трехходовый без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ) диаметром 15 мм., сертификат соответствия и паспорт кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром: 20 мм., сертификат соответствия и паспорт щит с монтажной панелью: ЩМП-2, размером 500x400x220 мм, степень защиты IP30, сертификат соответствия и паспорт антена GSM TELEOFIS mini 5db sma, сертификат соответствия и паспорт модем Teleofis RX100-RU COM GPRS 233, акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж наружной облицовки поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу): металлосайдингом без пароизоляционного слоя), акт освидетельствования скрытых работ (Подъем рубленых стен домкратом), акт освидетельствования скрытых работ (Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200x200 мм), акт освидетельствования скрытых работ (Наружная облицовка поверхности стен устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя), сертификат соответствия и паспорт профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6,сертификат соответствия и паспорт ИЗОСПАН:А (фасад, крыша), сертификат соответствия и паспорт фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер», сертификат соответствия и паспорт плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород «Изолайт» (плотность 50), акт освидетельствования скрытых работ (Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов), акт освидетельствования скрытых работ (Демонтаж покрытий: из шлака), акт освидетельствования скрытых работ (Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами), акт освидетельствования скрытых работ (Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок), сертификат соответствия доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта, сертификат соответствия бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, сертификат соответствия доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта., сертификат соответствия и паспорт маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-11-2-7000-1200-50, акт освидетельствования скрытых работ (укладка маты теплоизоляционные), сертификат соответствия и паспорт ИЗОСПАН:В (крыша), сертификат соответствия и паспорт дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, сертификат соответствия профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7, акт освидетельствования скрытых работ (Подшивка карнизов: досками обшивки), сертификат соответствия доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта, акт на испытания системы отопления и теплоснабжения, акт о проведении продувки (промывки) трубопроводов, исполнительный чертеж на ремонт кровли (до капитального ремонта схема стропильной системы с устройством мауэрлата, после капитального ремонта схема стропильной системы с устройством мауэрлата, схема плана кровли до и после капитального ремонта), исполнительный чертеж устройство фасада здания всех сторон (до капитального ремонта, после капитального ремонта), исполнительный чертеж фундамента, исполнительный чертеж Устройство стяжки, исполнительный чертеж устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистирола, исполнительный чертеж устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой), исполнительный чертеж Укладка керамогранита, исполнительный чертеж Укладка, линолеума, исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации, исполнительный чертеж сетей отопления, исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения, исполнительный чертеж системы подвесных потолков.

Суд, в порядке статьи 49 АПК РФ принял уточненные требования истца к рассмотрению.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме, пояснил, что  при подписании акта приемки работ  данная документация не передавалась, что препятствует надлежащей эксплуатации объекта. 

Ответчик, надлежащим образом извещённый о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился. Согласно ранее направленным ответчиком  в материалы дела пояснениям, исполнительная документация по государственному контракту №76/19 от 10.09.2019 передается в момент приемки-сдачи выполненных работ и непосредственно перед оплатой выполненных работ. Окончательная оплата госконтракта  была произведена ФГКУ ОВО ВНГ по РХ 30.12.2019, куратором данного объекта являлся начальник КЭС и ОС при Управлении Росгвардии по РХ капитан ФИО4, он же принимал все документы на оплату,  также исполнительную документацию. Идентичный комплект исполнительной  документации был передан в Федеральную службу безопасности по Республике Хакасия по элементам коррупционной направленности, касающихся данного госконтракта, после чего Военным следственным комитетом было возбуждено уголовное дело в отношении капитана ФИО4, а также военной прокуратурой на данный момент проводится комплексная проверка с фиксацией всех нарушений для последующих предписаний всем членам приемочной комиссии.

Представитель третьего лица в судебном заседании поддержал позицию истца, пояснил, что исполнительная документации в отделе материального обеспечения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Хакасия отсутствует. С капитаном ФИО4  ввиду применения к нему меры пресечения, связи нет.

Учитывая положения пункта 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд считает ответчика извещённым о времени и месте судебного заседания надлежащим образом и на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя общества.

Выслушав доводы истца, и третьего лица,  изучив отзыв ответчика, суд установил следующие обстоятельства:

Между ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» (государственный заказчик, Истец) и ООО «Капитал-Инвест» (подрядчик) по результатам проведенного электронного аукциона заключен государственный контракт от 10.09.2019 №76/19 на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания, по адресу: 

<

...>.

В соответствии с пунктом 5.1.3. контракта, государственный заказчик вправе требовать от подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной документации.

Цена контракта в соответствии с пунктом 3.1 составила 3 350 906 руб. 45 коп. 

Согласно пункту 6.1.38. контракта к моменту приемки объекта, подрядчик обязан передать государственному заказчику по акту приема-передачи полный пакет исполнительной и эксплуатационной документации и иных документов, необходимых для эксплуатации объекта, в том числе оригиналы: исполнительных чертежей наружных коммуникаций, согласованных с соответствующими специализированными организациями, актов скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, актов рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию, технических паспортов на все технологическое оборудование, изделий, материалов и конструкций, изготавливаемых по отдельным заказам, а также 3-и экземпляра копий, заверенных Подрядчиком, сертификатов качества на материалы, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов и иных документов, подтверждающих качество строительной продукции.

Подрядчик обязан разработать и передать государственному заказчику до передачи объекта в эксплуатацию инструкции по эксплуатации инженерных систем и технологического оборудования и иной инженерной инфраструктуры смонтированного или установленного на объекте (п. 6.1.39.).

 30.12.2019    сторонами подписан акт приемки выполненных работ  на сумму 3 350 906 руб. 45 коп. и справка о стоимости выполненных работ на  аналогичную сумму.

Письмом от 30.09.2020 истец уведомил ответчика о необходимости в срок до 09.10.2020 представить в адрес истца исполнительную и эксплуатационную документацию.

Письмом от 16.10.2020 истец уведомил ответчика о необходимости дать ответ на письмо от 30.09.2020.

Учитывая пояснения общества о том, что  вся исполнительная и эксплуатационная документация была передана в Федеральную службу безопасности по Республике Хакасия и в Военный следственный комитет, истец направил в указанные организации запросы о наличии исполнительной и эксплуатационной документации по государственному контракту от 10.09.2019 №76/19.

Ответом Федеральной службы безопасности по Республике Хакасия, представленным в материалы дела, истец был уведомлен о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица УФСВНГ России по Республике Хакасия, а также проинформирован о том, что документы, изъятые в ходе ОРМ в отношении ООО «Капитал-инвест»  переданы в военный следственный отдел по Абаканскому гарнизону. 

Ответом из военного следственного отела СК России по Абаканскому гарнизону ЦВО истец уведомлен о том, что указанные в запросе документы военным следственным отделом СК России по Абаканскому гарнизону в ООО «Капитал-инвест» не изымались. 

Учитывая изложенное, истец обратился с иском в суд.

Исследовав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, и представленные доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришёл к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  К договорам  на проведение капитального ремонта применяются нормы о строительном подряде. 

В соответствии со статьей 726 Гражданского кодекса РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

В силу пункта 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать ведение исполнительной документации. Названным законом презюмируется ведение исполнительной документации подрядчиком (ответчиком), что предполагает ее нахождение у последнего.

Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства изложены в приказе Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 (в ред. от 09.11.2017) «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и Порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», в части требования о передаче журналов ведения работ - Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007)».

Согласно требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденным Приказом от 26.12.2006 №1128 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, зарегистрированным в Минюсте РФ 06.03.07 №9050, исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство.

В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы. Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора, заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение.

Стороны при заключении договора  возложили на ответчика обязательства по передаче государственному заказчику по акту приема-передачи полного пакета исполнительной и эксплуатационной документации и иных документов, необходимых для эксплуатации объекта, в том числе оригиналов исполнительных чертежей наружных коммуникаций, согласованных с соответствующими специализированными организациями, актов скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, актов рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию, технических паспортов на все технологическое оборудование, изделий, материалов и конструкций, изготавливаемых по отдельным заказам, а также 3-и экземпляра копий, заверенных подрядчиком, сертификатов качества на материалы, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов и иных документов, подтверждающих качество строительной продукции.

Общество не представило доказательств исполнения обязанностей, предусмотренных договором в части предоставления исполнительной документации, между тем обязанность по доказыванию обстоятельств, обосновывающих возражения, возложена на него  в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Доказательств того, что вместе с результатом работ ответчик передал истцу указанную документацию, материалы дела не содержат.

Факт принятия истцом результатов работ на основании актов формы  КС-2 и КС-3 не может быть признан свидетельствующим о передаче вместе с результатом работ информации, касающейся эксплуатации или иного использования предмета договора. 

Исполнительная документация, оформленная соответствующим образом, является документом построенного сооружения, облегчающим процесс эксплуатации, отражающим техническое состояние выполненных работ.

Доводы ответчика о том, что куратор объекта в рамках государственного контракта от 04.09.2019 №74/19, начальник КЭС и ОС при Управлении Росгвардии по РХ капитан ФИО4 принимал исполнительную документацию  не подтвержден материалами дела, как и полномочия ФИО4 на принятие этой документации от имени   заказчика работ.   Доказательств того, что капитану ФИО4 Федеральным государственным казенным учреждением «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Хакасия»  были переданы полномочия на получение исполнительной и эксплуатационной документации, материалы дела не содержат.

Таким образом, условиями контракта, нормами Градостроительного кодекса, СниПами, требованиями, утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному надзору от 26.12.2006 №1128. РД-11-02-2006, предусмотрено наличие запрашиваемого у ответчика пакета документов и  обязанность их передачи заказчику.

При указанных обстоятельствах,  суд приходит к выводу о правомерности требований истца , вследствие чего иск подлежит удовлетворению.

Государственная пошлина по делу по иску составила 6 000 рублей, в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на ответчика и подлежит взысканию с него в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 169-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

1) Удовлетворить иск: обязать общество с ограниченной ответственностью «Капитал-инвест» в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения в силу передать федеральному государственному казённому учреждению «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Хакасия»  исполнительную, эксплуатационную документацию по  государственному контракту от   10.09.2019 № 76/19 согласно следующему перечню:

1.   Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а).

2.   Акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж дверных коробов и полотен).

3.  Акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж оконных переплетов и коробок, снятие подоконных досок).

4.   Акт освидетельствования скрытых работ (разборка простильных полов, лаг из досок, покрытий полов из линолеума и плиток уложенных на раствор).

5.  Акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж стяжки, бетонных покрытий полов).

6.    Акт освидетельствования скрытых работ (разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса).

7.   Акт освидетельствования скрытых работ (Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков).

8.  Акт освидетельствования скрытых работ (разборка плинтусов деревянных и их пластмассовых материалов полов).

9.   Акт освидетельствования скрытых работ (разборка облицовки из гипсокартонных листов, пласт откосов, МДФ, шкафов встроеных: стен и перегородок).

10. Акт освидетельствования скрытых работ (отбивка штукатурки, плитки).

11.  Акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж электропроводки, выключателей, розеток, светильников).

12. Акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж радиаторов отопления).

13. Акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж унитаза, умывальника).

14. Акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж трубопроводов отопления, водоснабжения, водоотведения).

15. Паспорта и сертификаты соответствия на установленные блоки дверные (в компл.).

16. Паспорта и сертификаты соответствия на установленные блоки стальной наружный и стальные внутренние.

17. Паспорта и сертификаты соответствия на установленные блоки оконные пластиковые.

18. Паспорта и сертификаты соответствия на установленные доски подоконные ПВХ, уголки, панелей пластиковых, используемый клей жидкий.

19. Паспорт и сертификат соответствия на установленные ворота секционные, привод для ворот, выключатель (кнопка).

20.  Акт освидетельствования скрытых работ (устройство стяжек цементных).

21. Сертификат соответствия и паспорт на раствор готовый кладочный или используемые материалы.

22. Акт освидетельствования скрытых работ (армирование подстилающих слоев пола).

23. Сертификат соответствия и паспорт на сетку сварную из арматурной проволоки 4,0 мм.

24. Акт освидетельствования скрытых работ (устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистирола).

25. Сертификат соответствия и паспорт на пенополистирол.

26. Акт освидетельствования скрытых работ (устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой).

27. Сертификат соответствия и паспорт на гравий керамзитовый фракция 5-10 мм, марка 250.

28. Сертификат соответствия и паспорт плитка керамогранитная 600*600*10.

29. Сертификат соответствия и паспорт грунтовки акриловой.

30. Сертификат соответствия и паспорт клея для облицовочных работ.

31. Сертификат соответствия и паспорт затирки.

32. Сертификат соответствия и паспорт ленты полимерной (фторопластовой для сварки линолеума).

33. Сертификат соответствия и паспорт линолеум коммерческий толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2.

34. Сертификат соответствия и паспорт плитки поливинилхлоридные для полов толщина 2 мм.

35. Акт освидетельствования скрытых работ (устройство ленточных фундаментов бетонных).

36. Сертификат соответствия и паспорт на бетон мелкозернистый.

37. Сертификат соответствия и паспорт на плинтус для полов.

38. Акт освидетельствования скрытых работ (из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000) Паспорт и сертификат на используемые смеси типа «Ветонит» 5000).

39. Акт освидетельствования скрытых работ (Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и облицовка стен). Сертификат соответствия и паспорт профилей стоечных, направляющих, гипсоволокнистых листов).

40. Сертификат соответствия и паспорт плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен сан. узла.

41. Сертификат соответствия и паспорт стеклообои елочка.

42.  Сертификат соответствия и паспорт Краска водоэмульсионная окраска стен оклеенных обоями.

43. Сертификат соответствия панель мдф 7 мм (отбойная доска стен).

44.  Акт освидетельствования скрытых работ (Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен).

45. Сертификат соответствия профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (стены гараж, ворота, фасад).

46. Акт освидетельствования скрытых работ (Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, клипс крепежа гофры, затягивание провода в проложенные трубы).

47. Сертификат соответствия и паспорт труб гофрированных из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 16 мм.

48. Сертификат соответствия и паспорт кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм .

49. Сертификат соответствия и паспорт Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм .

50. Сертификат соответствия и паспорт Светильник светодиодный ДВО-36\у 595*595*19 6500К 2900Лм призма IP40.

51. Сертификат соответствия и паспорт Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44.

52. Сертификат соответствия и паспорт Светильник светодиодный ДВО/ДПО- 36 офисный встраиваемый/накладной 1195x180x19мм 2550Лм IP40 ВТ 4000К.

53. Сертификат соответствия и паспорт на выключатель скрытой проводки одно/двухклавишный.

54. Сертификат соответствия и паспорт розетка скрытой проводки двухгнездовая.

55. Сертификат соответствия и паспорт коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки.

56. Сертификат соответствия и паспорт коробка распаечная HP 70.

57. Сертификат соответствия и паспорт дюбель пропиленовый размер 8x40 мм.

58. Сертификат соответствия и паспорт кронштейны для крепления радиаторов длина 131 мм.

59. Сертификат соответствия и паспорт Радиатор биметаллиеский STI колиество секций 8 и секций 10.

60. Сертификат соответствия и паспорт кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм со сгоном.

61. Сертификат соответствия и паспорт краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм.

62. Сертификат соответствия и паспорт унитаз.

63. Сертификат соответствия и паспорт умывальник с краном, сифоном бутылочным.

64. Сертификат соответствия и паспорт   пьедестал для умывальника.

65. Сертификат соответствия и паспорт трубы стальные водопроводные диаметром 50 мм.

66. Сертификат соответствия и паспорт         трубы стальные водопроводные диаметром 20 мм.

67. Сертификат соответствия и паспорт тепловычислитель 7КТ-444 «Абакан».

68. Сертификат         соответствия         и         паспорт         комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01 -08) (2 шт.) от -0 до +200 град.

69. Сертификат соответствия и паспорт расходомер электромагнитный, марка: ПРЭМ диаметр 32 мм, с монтажным комплектом.

70. Сертификат соответствия и паспорт грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка: 45 мм, корпуса 219 мм.

71. Сертификат соответствия и паспорт Грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка: 34,42 мм, корпуса 108 мм.

72. Сертификат соответствия и паспорт фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-40.

73. Сертификат соответствия и паспорт фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 40 мм.

74. Сертификат соответствия и паспорт кран шаровый «МАРШАЛ» 11с67пДЫ40РЫ40.

75. Сертификат соответствия и паспорт регулятор температуры РТЕ-21М.

76. Сертификат соответствия и паспорт элеваторы 40сЮбк водоструйные: № 1.

77. Сертификат соответствия и паспорт термометр стеклянный ртутный электроконтактный типа ТГЖ (ножка 80-250 мм) до 300 град С.

78. Сертификат соответствия и паспорт соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 40x32 мм.

79. Сертификат соответствия и паспорт фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ), размером: 1/2.

80. Сертификат соответствия и паспорт       счетчик воды универсальный, марка: СВК-15-3-2.

81. Сертификат соответствия и паспорт          манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-ЗУ диаметром корпуса 100 мм.

82. Сертификат соответствия и паспорт кран трехходовый без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ) диаметром 15 мм.

83. Сертификат соответствия и паспорт кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром: 20 мм.

84. Сертификат соответствия и паспорт щит с монтажной панелью: ЩМП-2, размером 500x400x220 мм, степень защиты IP30.

85. Сертификат соответствия и паспорт антена GSM TELEOFIS mini 5db sma.

86. Сертификат соответствия и паспорт модем Teleofis RX100-RU COM GPRS 233.

87. Акт освидетельствования скрытых работ (демонтаж наружной облицовки поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу): металлосайдингом без пароизоляционного слоя).

88. Акт освидетельствования скрытых работ (Подъем рубленых стен домкратом).

89. Акт освидетельствования скрытых работ (Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200x200 мм).

90. Акт освидетельствования скрытых работ (Наружная облицовка поверхности стен устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя).

91. Сертификат соответствия и паспорт профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6.

92.  Сертификат соответствия и паспорт ИЗОСПАН:А (фасад, крыша).

93. Сертификат соответствия и паспорт фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер».

94. Сертификат соответствия и паспорт плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород «Изолайт» (плотность 50).

95. Акт освидетельствования скрытых работ (Разборка покрытий кровель: из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов).

96. Акт освидетельствования скрытых работ (Демонтаж покрытий: из шлака).

97. Акт освидетельствования скрытых работ (Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами).

98. Акт освидетельствования скрытых работ (Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок).

99.  Сертификат соответствия доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта.

100.  Сертификат соответствия бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта.

101.  Сертификат соответствия доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта.

102. Сертификат соответствия и паспорт маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-11-2-7000-1200-50.

103. Акт освидетельствования скрытых работ (укладка маты теплоизоляционные).

104.  Сертификат соответствия и паспорт ИЗОСПАН:В (крыша).

105. Сертификат соответствия и паспорт дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием.

106. Сертификат соответствия профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7.

107. Акт освидетельствования скрытых работ (Подшивка карнизов: досками обшивки).

108.  Сертификат соответствия доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта.

109. Акт на испытания системы отопления и теплоснабжения.

110. Акт о проведении продувки (промывки) трубопроводов.

111. Исполнительный чертеж на ремонт кровли (до капитального ремонта схема стропильной системы с устройством мауэрлата, после капитального ремонта схема стропильной системы с устройством мауэрлата, схема плана кровли до и после капитального ремонта).

112. Исполнительный чертеж устройство фасада здания всех сторон (до капитального ремонта, после капитального ремонта).

113. Исполнительный чертеж фундамента.

114. Исполнительный чертеж Устройство стяжки.

115. Исполнительный чертеж устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистирола.

116. Исполнительный чертеж устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой).

117. Исполнительный чертеж Укладка керамогранита.

118. Исполнительный чертеж Укладка. линолеума.

119. Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.

120. Исполнительный чертеж сетей отопления.

121. Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.

122. Исполнительный чертеж системы подвесных потолков.

2)Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капитал-инвест» в доход федерального бюджета 6 000  (шесть тысяч) рублей государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.

Жалоба  подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья  А.А. Федулкина