АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-18129/22-64-133

г. Москва

21 октября 2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: Судьи Чекмаревой Н.А. при ведении протокола секретарем судебного заседания Горничевой Т.Ю., 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Департамента городского  имущества города Москвы (123112, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 08.02.2003, ИНН: 

<

***>)  

к федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению  высшего образования "Российский государственный социальный университет" (129226,  

<

...>, СТР.1, ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 16.08.2002, ИНН: 

<

***>);  

третьи лица: 

1) Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости  города Москвы (7701679961);  

2) Территориальное управление Федерального агентства по управлению  государственным имуществом по городу Москве (ИНН: 

<

***>);  

3) Минобрнауки РФ (ИНН: 

<

***>), 4) ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 5) ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ - об устранении угрозы жизни и здоровья граждан, при участии: от истца – ФИО1 по дов. от 25.12.2024 от ответчика – ФИО2 по дов. от 22.12.2023 от третьих лиц – не явились, извещены 

РЕШИЛ:

Обязать Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования "Российский государственный социальный университет" (129226,  

<

...>, СТР.1, ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 16.08.2002, ИНН: 

<

***>) устранить угрозу жизни и  здоровья неопределённого круга лиц путем осуществления восстановительных работ с  даты вступления решения в законную силу согласно дорожной карте.  

 №  п/п  

Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители  

Срок 

исполне 

ния 

1 

2 

3 

4 

 № п/п 

Наименование мероприятия  

Срок исполнения 

Ответствен

ные лица  

1 

Согласование увеличения ТЭП  в целях реконструкции и/или  нового строительства  

01.09.2025  

ФГБОУ  

ВО 

«РГСУ»  

2 

Проведение мероприятий по  оформлению земельно-правовых отношений  

01.12.2025  

ФГБОУ ВО  

«РГСУ»,  

ДГИ г.  

Москвы  

 3 

Разработка проектно-сметной документации и получение разрешения на строительство 

(реконструкцию) 

 01.05.2026 

ФГБОУ ВО  

«РГСУ»,  

ДГИ г.  

Москвы  

 4 

Проведение работ на Объектах  по сносу в целях  

нового строительства или  реконструкция Объектов  

01.11.2026 

ФГБОУ ВО  

«РГСУ»,  

ДГИ г.  

Москвы  

 5 

Контроль проведения работ  

Государств 

енная  

инспекция  

по 

контролю  

за 

использова 

нием  объектов  

недвижимо сти города  

Москвы  

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования "Российский государственный социальный  университет" (129226, 

<

...>, СТР.1,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.08.2002, ИНН: 

<

***>) в пользу  Департамента городского имущества города Москвы (123112, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.02.2003, ИНН: 

<

***>) судебные  расходы за проведение дополнительной экспертизы в размере 280 000 (двести  восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  

Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня изготовления в полном  объеме.  

 Судья Н.А. Чекмарева