1228/2019-118138(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А28-11343/2019

г. Киров

12 сентября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 сентября 2019 года В полном объеме решение изготовлено 12 сентября 2019 года 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «КУБ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>, место нахождения: 610046, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Зилант» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>, место нахождения: 610046, 

<

...>)  

о взыскании 10 469 738 рублей 43 копеек, 

при участии в судебном заседании: истца-Чирковой Е.С., по доверенности от 22.03.2019, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «КУБ» (далее – истец)  обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Кировской области к  обществу с ограниченной ответственностью «Зилант» (далее – ответчик) о  взыскании 10 469 738 рублей 43 копеек задолженности по договорам от 04.12.2017   № 011/17, от 13.02.2018 № 013/18, от 27.04.2018 № 015/18, от 21.05.2018 № 17/18, от  30.05.2018 «018/18, от 07.06.2018 № 19/18, от 25.06.2018 № 020/18, от 27.06.2018   № 021/18, от 30.08.2018 № 022/18, от 28.09.2018 № 023/18.  

Исковые требования основаны на положениях статей 309, 310, 740, 746, 753  Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неисполнением  ответчиком обязательств по оплате выполненных работ.  

В судебном заседании представитель истца заявленные исковые требования  поддерживает в полном объеме.  

Ответчик в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении  дела по существу в свое отсутствие, представил заявление от 06.09.2019, в котором  признал исковые требования в полном объеме.  

Поскольку истец считает дело подготовленным к рассмотрению по  существу, а ответчик не заявил возражений по разрешению дела в его отсутствие,  суд, руководствуясь частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, завершил предварительное судебное заседание и  продолжил рассмотрение дела в судебном заседании суда первой инстанции.  

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке, предусмотренном  статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Суд, заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела,  установил следующее  

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) подписан договор  на выполнение строительно-монтажных работ от 04.12.2017 № 011/17 (далее  договор), по условиям которого субподрядчик обязался по заданию подрядчика  выполнить работы согласованные сторонами в пункте 1.3 договора, в  установленный договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и  оплатить обусловленную договором цену (пункт 1.1 договора).  

Работы, указанные в пункте 1.3 договора, выполняются по адресу: 

<

...> объект: «Склад 18*42*9м пристроя 18*12*9м. (пункт  1.2 договора).  

Подрядчик по заданию заказчика осуществляет следующие строительно- монтажные работы: устройство буронабивных свай, устройство ростверков  (пункты 1.3-1.3.2 договора).  

Цена работ составляет 1 700 000 рублей 00 копеек (пункт 2.1 договора).  

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) подписан договор  на выполнение строительно-монтажных работ от 27.04.2018 № 15/18 (далее  договор), по условиям которого субподрядчик обязался по заданию подрядчика  выполнить работы согласованные сторонами в пункте 1.3 договора, в  установленный договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и  оплатить обусловленную договором цену (пункт 1.1 договора).  

Работы, указанные в пункте 1.3 договора, выполняются по адресу: 

<

...>, здание 14х102 м. (пункт 1.2 договора).  

Подрядчик по заданию заказчика осуществляет следующие работы:  устройство элементов усилия, устройство цоколя, устройство пола, монтаж  каркаса, стеновое и кровельное покрытие с доставкой (пункты 1.3-1.3.5 договора).  

Цена работ составляет 5 440 000 рублей 00 копеек (пункт 2.1 договора).  

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) подписан договор  на выполнение строительно-монтажных работ от 20.05.2018 № 16/18 (далее  договор), по условиям которого субподрядчик обязался по заданию подрядчика  выполнить работы согласованные сторонами в пункте 1.3 договора, в  установленный договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и  оплатить обусловленную договором цену (пункт 1.1 договора).  

Работы, указанные в пункте 1.3 договора, выполняются по адресу: 

<

...>, объект «Склад товарно-материальных  ценностей» (пункт 1.2 договора).  

Подрядчик по заданию заказчика осуществляет следующие работы по  устройству фундаментов: устройство ростверков, устройство монолитной балки,  устройство пола, монтаж каркаса, стеновое и кровельное покрытие с доставкой,  устройство водосточной системы (пункты 1.3-1.3.6 договора).  

Цена работ составляет 2 625 428 рублей 00 копеек (пункт 2.1 договора).  

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) подписан договор  на выполнение подрядных работ от 13.02.2018 № 013/18 (далее договор), по  условиям которого субподрядчик обязался по заданию подрядчика выполнить  работы согласованные сторонами в пункте 1.3 договора, в установленный  договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить  обусловленную договором цену (пункт 1.1 договора).  

Работы, указанные в пункте 1.3 договора, выполняются по адресу:  

<

...> километр (склад заводского  металлопроката) (пункт 1.2 договора).  

Подрядчик по заданию заказчика осуществляет следующие работы:  устройство буронабивных свай и ростверков, устройство монолитной балки  (пункты 1.3-1.3.2 договора).  

Цена работ составляет 1 400 000 рублей 00 копеек (пункт 2.1 договора).  

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) подписан договор  на выполнение подрядных работ от 21.05.2018 № 17/18 (далее договор), по  условиям которого субподрядчик обязался по заданию подрядчика выполнить  работы согласованные сторонами в пункте 1.3 договора, в установленный  договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить  обусловленную договором цену (пункт 1.1 договора).  

Работы, указанные в пункте 1.3 договора, выполняются по адресу: Курская  область, город Курск, Хомутовский район, село Переступлено (пункт 1.2 договора).  

Подрядчик по заданию заказчика осуществляет следующие работы:  устройство фундаментов, устройство бетонных полов, изготовление  металлоконструкций, монтаж металлоконструкций, ограждающее покрытие  (пункты 1.3-1.3.5 договора).  

Цена работ составляет 5 400 000 рублей 00 копеек (пункт 2.1 договора).  

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) подписан договор  на выполнение подрядных работ от 30.05.2018 № 018/18 (далее договор), по  условиям которого субподрядчик обязался по заданию подрядчика выполнить  работы согласованные сторонами в пункте 1.3 договора, в установленный  договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить  обусловленную договором цену (пункт 1.1 договора).  

Работы, указанные в пункте 1.3 договора, выполняются по адресу:  

<

...> километр (склад заводского  металлопроката) (пункт 1.2 договора).  

Подрядчик по заданию заказчика осуществляет следующие работы: монтаж  каркаса, стеновое и кровельное покрытие с доставкой (пункты 1.3-1.3.5 договора).  

Цена работ составляет 750 000 рублей 00 копеек (пункт 2.1 договора). 

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) подписан договор  на выполнение подрядных работ от 25.06.2018 № 020/18 (далее договор), по  условиям которого субподрядчик обязался по заданию подрядчика выполнить  работы согласованные сторонами в пункте 1.3 договора, в установленный  договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить  обусловленную договором цену (пункт 1.1 договора).  

Работы, указанные в пункте 1.3 договора, выполняются на объекте  «Тепличный комплекс Сосногорский площадью 11 га для выращивания овощной  продукции защищенного грунта на территории МР» Сосногорск» Республика Коми  (пункт 1.2 договора).  

Подрядчик по заданию заказчика осуществляет следующие работы: монтаж  каркаса, монтаж: стеновое и кровельное покрытие (пункты 1.3-1.3.5 договора).  

Цена работ составляет 4 940 000 рублей 00 копеек (пункт 2.1 договора).  

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) подписан договор  на выполнение подрядных работ от 27.06.2018 № 021/18 (далее договор), по  условиям которого субподрядчик обязался по заданию подрядчика выполнить  работы согласованные сторонами в пункте 1.3 договора, в установленный  договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить  обусловленную договором цену (пункт 1.1 договора).  

Работы, указанные в пункте 1.3 договора, выполняются по адресу:  Московская область, Ногинский район, пос. им. Воровского (реконструкция здания  30х132 м) (пункт 1.2 договора).  

Подрядчик по заданию заказчика осуществляет следующие работы:  устройство фундаментов, монтаж каркаса, покраска металлоконструкций, монтаж  коньков здания, монтаж стенового ограждения (пункты 1.3-1.3.5 договора).  

Цена работ составляет 5 200 000 рублей 00 копеек (пункт 2.1 договора).  

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) подписан договор  на выполнение подрядных работ от 28.09.2018 № 023/18 (далее договор), по  условиям которого субподрядчик обязался по заданию подрядчика выполнить  работы согласованные сторонами в пункте 1.3 договора, в установленный  договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить  обусловленную договором цену (пункт 1.1 договора).  

Работы, указанные в пункте 1.3 договора, выполняются по адресу: 

<

...>, кадастровый номер участка:  59:26:0610504:579 (пункт 1.2 договора).  

Подрядчик по заданию заказчика осуществляет следующие работы:  устройство свайных фундаментов, устройство ростверков (пункты 1.3-1.3.2  договора).  

Цена работ составляет 720 000 рублей 00 копеек (пункт 2.1 договора).  

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) подписан договор  на выполнение монтажа металлоконструкций от 07.06.2018 № 19/18 (далее  договор), по условиям которого субподрядчик обязался по заданию подрядчика  выполнить работы согласованные сторонами в пункте 1.3 договора, в  установленный договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и  оплатить обусловленную договором цену (пункт 1.1 договора).  

Работы, указанные в пункте 1.3 договора, выполняются по адресу: ХМАО, г.  Пыть-Ях, промзона «Западная № , № участка 86 15 0101 020 1506; здание 20х66х7 м  (пункт 1.2 договора).  

Подрядчик по заданию заказчика осуществляет монтаж  металлоконструкций, включая крановое оборудование (пункт 1.3 договора).  

Цена работ составляет 2 100 000 рублей 00 копеек (пункт 2.1 договора).  

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) подписан договор  на выполнение монтажа металлоконструкций и устройства пола от 30.08.2018   № 022/18 (далее договор), по условиям которого субподрядчик обязался по заданию  подрядчика выполнить работы согласованные сторонами в пункте 1.3 договора, в  установленный договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и  оплатить обусловленную договором цену (пункт 1.1 договора).  

Работы, указанные в пункте 1.3 договора, выполняются по адресу: ХМАО, г.  Пыть-Ях, промзона «Западная № , № участка 86 15 0101 020 1506; здание 6х5 м  (пункт 1.2 договора).  

Подрядчик по заданию заказчика осуществляет следующие виды работ:  монтаж металлоконструкций, устройство пола (пункт 1.3 договора).  

Цена работ составляет 274 072 рубля 00 копеек (пункт 2.1 договора). 

В рамках вышеуказанных договоров по актам приемки-сдачи выполненных  работ (услуг) выполнено работ: от 31.10.2018 на сумму 1 700 000 рублей 00 копеек,  от 10.12.2018 на сумму 5 440 000 рублей 00 копеек, от 01.12.2018 на сумму  2 625 428 рублей 00 копеек, от 31.10.2018 на сумму 1 400 000 рублей 00 копеек, от  01.12.2018 на сумму 5 400 000 рублей 00 копеек, от 31.10.2018 на сумму 750 000  рублей 00 копеек, от 01.11.2018 на сумму 4 940 000 рублей 00 копеек, от 25.12.2018  на сумму 5 200 000 рублей 00 копеек, от 17.12.2018 на сумму 720 000 рублей 00  копеек, от 01.10.2018 на сумму 2 100 000 рублей 00 копеек, от 30.08.2018 на сумму  274 072 рубля 00 копеек.  

Ответчик произвел частичную оплату выполненных работ по договорам, с  учетом чего истец числит за ответчиком задолженности в размере 10 469 738  рублей 43 копеек.  

В силу части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной  части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и  принятие его судом.  

Учитывая, что признание иска ответчиком не противоречит требованиям  закона, последствия принятия судом признания иска, предусмотренные статьями  49, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчику  известны, исковые требования подтверждены всеми представленными в  материалы дела доказательствами, признание иска не нарушает прав других лиц, у  суда имеются основания для его принятия и вынесения решения в судебном  заседании первой инстанции согласно части 4 статьи 137 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации с удовлетворением заявленных  исковых требований по взысканию задолженности по договорам в сумме 10 469  738 рублей 43 копеек.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации виду предоставления истцу отсрочки по уплате  госпошлины при подаче иска в суд, госпошлина в сумме 75 349 рублей 00 копеек  подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Зилант» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «КУБ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  задолженность в сумме 10 469 738,43 (десять миллионов четыреста шестьдесят  девять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 43 копейки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Зилант» (ИНН:  4324002397, ОГРН: 1084313000881) в доход федерального бюджета госпошлину в  сумме 75 349 (семьдесят пять тысяч триста сорок девять) рублей.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской  области.  

Судья Е.Ю.Прозорова. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.05.2019 8:46:39

 Кому выдана Прозорова Елена Юрьевна