1939/2019-81559(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Ул.Ново-Песочная, д.40, г. Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Казань Дело А65-11923/2018 

 10 апреля 2019 года  

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Камалиева Р.А., при  ведении аудиозаписи и составления протокола судебного заседания помощником  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью "Управляющая компания Вахитовского района", г.Казань,  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  "Сайяр", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании ООО «Саяр»  восстановить отделочный слой фасада( плитку) дома № 61 по ул. Вишневского г.  Казани, об обязании ООО «Саяр» в течение 60 календарных дней с момента вступления  решения в законную силу устранить недостатки, допущенные в ходе проведения  капитального ремонта кровли дома № 61 по ул. Вишневского г. Казани : удалить ковровое  покрытие крыши, восстановить грунтовочный слой (праймер), оштукатурить вертикальные  поверхности стен парапетов по всему периметру крыши согласно проекту "Кровля" 104-12- АС капитального ремонта жилого дома № 61 по ул.Вишневского г.Казани, выполнить  работы по устройству защитного зонтика на парапете по всему периметру крыши согласно  проекту "Кровля" 104-12-АС капитального ремонта жилого дома № 61 по ул.Вишневского  г.Казани, уложить наплавляемый рулонный материал согласно проекту "Кровля" 104-12- АС капитального ремонта жилого дома № 61 по ул.Вишневского г.Казани и ГОСТ 30547-97  в два слоя (основной водоизоляционный ковер должен состоять из двух слоев  наплавляемого материала на основе стеклоткани с гибкостью на брусе радиусом 10 мм при  температуре не менее -25 °С, теплостойкостью не ниже +100°С, толщиной верхнего слоя  не меньше 4 мм и нижнего слоя 3 мм, массой 4,5 кг/м² и 3,5кг/м² соответственно, сроком  службы не менее 25 лет), при креплении парапетного фартука расстояние между точками  крепления принять 500 мм, и о присуждении в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Управляющая компания Вахитовского района", г.Казань с обществу с  ограниченной ответственностью "Сайяр", г.Казань судебную неустойку в размере 3 000  рублей за каждый день неисполнения судебного акта с момента просрочки исполнения  решения суда до его фактического исполнения, с участием третьего лица Государственного  казенного учреждения "Главное инвестиционно- строительное управление Республики  Татарстан", ФИО2  

с участием: от истца – ФИО3, по доверенности № 168 от 26.03.2019 от ответчика – ФИО4, по доверенности от 23.08.2018 от третих лиц – не явились, извещены 

руководствуясь статьями 110, 167–169, Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Принять отказ истца от иска в части иска об обязании ответчика в течение 60  календарных дней с момента вступления решения в законную силу устранить недостатки,  допущенные в ходе проведения капитального ремонта фасада дома № 61 по ул.  Вишневского г. Казани и восстановлении отделочной слои фасада дома № 61 по  ул.Вишневского г.Казани.  

Производство в указанной части прекратить. В остальной части исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Сайяр", г.Казань, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 60 календарных дней с момента вступления  решения в законную силу устранить недостатки, допущенные в ходе проведения  капитального ремонта кровли дома № 61 по ул. Вишневского г. Казани : удалить ковровое  покрытие крыши, восстановить грунтовочный слой (праймер), оштукатурить вертикальные  поверхности стен парапетов по всему периметру крыши согласно проекту "Кровля" 104-12- АС капитального ремонта жилого дома № 61 по ул.Вишневского г.Казани, выполнить  работы по устройству защитного зонтика на парапете по всему периметру крыши согласно  проекту "Кровля" 104-12-АС капитального ремонта жилого дома № 61 по ул.Вишневского  г.Казани, уложить наплавляемый рулонный материал согласно проекту "Кровля" 104-12- АС капитального ремонта жилого дома № 61 по ул.Вишневского г.Казани и ГОСТ 30547-97  в два слоя (основной водоизоляционный ковер должен состоять из двух слоев  наплавляемого материала на основе стеклоткани с гибкостью на брусе радиусом 10 мм при  температуре не менее -25 °С, теплостойкостью не ниже +100°С, толщиной верхнего слоя  не меньше 4 мм и нижнего слоя 3 мм, массой 4,5 кг/м² и 3,5кг/м² соответственно, сроком  службы не менее 25 лет), при креплении парапетного фартука расстояние между точками  крепления принять 500 мм  

Расходы по повторной судебной экспертизе отнести на ответчика. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сайяр", г.Казань, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Управляющая компания Вахитовского района", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) расходы по судебной экспертизе в размере 65 000 руб.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан  денежные средства в размере 65 000 руб., подлежащие выплате за проведенную экспертизу  по поручению Арбитражного суда Республики Татарстан, согласно определениям  Арбитражного суда РТ от 27.07.2018 г. и 30.11.2018 от уплаченные по платежному  поручению № 904 от 22.11.2018 г. на расчетный счет экспертного учреждения общества с  ограниченной ответственностью "Центр Оценки и Экспертиз" "МАРИ" гор. Казань по  реквизитам указанным в счете № 28-12/18 от 28.12.2018 г.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  Вахитовского района", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с депозитного  счета Арбитражного суда РТ денежные средства в сумме 75 000 руб., перечисленные по  платежному поручению № 544 от 05.07.2018 г. и по платежному поручению № 904 от  22.11.2018 г.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сайяр", г.Казань, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Управляющая компания Вахитовского района", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) расходы по госпошлине в размере 6000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сайяр", г.Казань, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Управляющая компания Вахитовского района", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) судебную неустойку размере 3 000 рублей за каждый день неисполнения  

судебного акта с момента просрочки исполнения решения суда до его  фактического исполнения  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный  суд гор. Самара в месячный срок.  

 Судья Р.А. Камалиев