105/2022-212106(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-15568/2022

г. Владивосток

13 октября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 октября 2022 года .  Полный текст решения изготовлен 13 октября 2022 года.  

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Овчинникова В.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, после  перерыва: секретарем ФИО2,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  Г. АРТЕМА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ СИТИ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить при участии 

от истца: представитель ФИО3, доверенность, паспорт, диплом,  ответчика представитель не явился, извещение надлежащее,  

установил:

муниципальное казенное учреждение "Управление строительства и  капитального ремонта г. Артема" (истец) обратилось в Арбитражный суд Приморского  края к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙ СИТИ" (ответчик)  безвозмездно, в 30-дневный срок, с момента вступления в силу решения Арбитражного  суда Приморского края, устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному  контракту 10А/19 от 22.07.2019 г., осуществив в соответствии с требованиями СНиП,  ГОСТ и иной нормативно-технической документацией (в том числе: СП 82.13330.2016  Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75, СП  48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-012004, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие  требования, ГОСТ 12.2.011-2012. Межгосударственный стандарт. Система стандартов  безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие  требования безопасности, ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда  (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и  правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы  испытаний (с Поправками, с Изменением № 1)) .  

Ответчик в заседание суда не явился, отзыв на иск не представил, требования не  оспорил, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом. В  Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями  судей по делу № А51-15568/2022 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных  дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

 Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал государственных услуг (ЕСИА). 

соответствии со статьей 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации предварительное судебное заседание проводится в отсутствие ответчика.  

Представитель истца в судебном заседании заявленные требования поддержал. 

В порядке статьи 136 АПК РФ в судебном заседании 06.10.2022 суд объявил  перерыв до 09 часов 40 минут 11.10.2022, о чем вынесено определение и на  официальном сайте Арбитражного суда Приморского края (www.primkray.arbitr.ru.)  размещено объявление.  

В предварительном судебном заседании, признав дело подготовленным,  учитывая, что лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного  заседания и ими не были заявлены возражения относительно перехода в судебное  заседание, судом на основании статьи 137 АПК РФ завершено предварительное  судебное заседание и открыто судебное заседание в первой инстанции.  

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил  следующее.  

Между муниципальным казенным учреждением «Управление строительства и  капитального ремонта г. Артема» (Муниципальный заказчик) в интересах  муниципального образования, в целях обеспечения муниципальных нужд, и обществом  с ограниченной ответственностью «СТРОЙ СИТИ» (Подрядчик) 22.07.2019 заключен  муниципальный контракт № 10А/19, в соответствии с которым Подрядчик принял на  себя обязательство выполнить работы по проведению ремонта дворовых территорий  (благоустройство в целях реализации мероприятий Федерального проекта  «Формирование комфортной городской среды») и сдать их результат Муниципальному  заказчику, а Муниципальный заказчик обязался принять результат выполненной работы  и оплатить его.  

Цена контракта установлена в п. 2.1. и составляет 32 962 016,72 (тридцать два  миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи шестнадцать рублей 72 копейки), в том  числе НДС 5 493 669 рублей 45 копеек.  

Мотивируя исковые требования истец указал, что работы были выполнены  ответчиком в полном объеме и приняты истцом 15.11.2019, что подтверждается актом   № 1 о приемке выполненных работ (форма КС-2).  

В соответствие с пунктом 9.2. контракта Подрядчик гарантировал качество  выполненных работ в течение 5 лет со дня подписания сторонами акта о приемке  выполненных работ обеими сторонами.  

Согласно пункту 9.5. контракта если в период гарантийной эксплуатации  обнаружены дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то  подрядчик обязан их устранить за свой счет в срок, согласованный сторонами.  

В связи с поступлением обращений жителей благоустроенных территорий о  наличии дефектов на придомовых территориях, МКУ «УСКР» был организован выезд  на Объект в целях обследования на предмет обнаружения недостатков выполненных  работ и составления соответствующего акта.  

05.05.2022 состоялся осмотр объектов, в результате которого были выявлены  дефекты выполненных работ, о чем составлен соответствующий акт осмотра.  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...> Рабочая, 60, были выявлены  следующие дефекты: трещина асфальтобетонного покрытия длиной 4 м.п, шириной  раскрытия до 15 мм, с левого торца дома; трещина асфальтобетонного покрытия длиной  0,7 м.п., шириной раскрытия до 10 мм, на дороге заезда дворовой территории с торца  дома,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, были  выявлены следующие дефекты: трещина асфальтобетонного покрытия длиной 1 м.п,  шириной раскрытия до 3 мм, в районе 4 подъезда; трещина асфальтобетонного  

покрытия длиной 2 м.п, шириной раскрытия до 5 мм, в районе 5 подъезда; просадка  асфальтобетонного покрытия площадью Зм2 в районе колодца между 2 и 3 подъездами;  наблюдается размыв грунта на откосе площадью 20 м2, между 5 и 6 подъездами в  районе ТП; трещина асфальтобетонного покрытия длиной 1,5 мп, шириной  раскрытия до 5 мм, в районе автостоянки с права торца дома; наблюдается разрушение  бортовых камней длиной 4 м2 на заезде дворовой территории,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, были  выявлены следующие дефекты: трещина асфальтобетонного покрытия длиной 1 м.п,  шириной раскрытия до 3 мм, в районе в районе 2 подъезда,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, были выявлены  следующие дефекты: размыв грунта на обойме бортовых камней на площадках входов в  подъезды № 3 и № 5; трещина в асфальте от колодца на тротуаре справа от торца дома  длиной 1 м.п.  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, были выявлены  следующие дефекты: трещина асфальтобетонного покрытия длиной 3 и 6 м.п, шириной  раскрытия до 20 мм, с левого торца дома; трещина асфальтобетонного покрытия длиной  4 м.п, шириной раскрытия до 8 мм, в районе колодца на стоянке в районе левого торца  дома,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, были  выявлены следующие дефекты: скол бортового камня (1 шт.) на заезде на  автомобильную стоянку; трещина асфальтобетонного покрытия длиной 1 м.п, шириной  раскрытия до 3 мм, в районе в районе 2 подъезда; трещина асфальтобетонного покрытия  длиной 3 м.п, шириной раскрытия до 5 мм, с левого торца дома,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, были выявлены  следующие дефекты: трещина асфальтобетонного покрытия длиной 6 м.п, шириной  раскрытия до 5 мм, в районе заезда на территорию детского сада; сколы бортовых  камней (3 шт.) в районе заезда к детскому саду и в районе заезда на дворовую  территорию; трещина а/б покрытия длиной 1 м.п, шириной раскрытия до 3 мм, между 1  и 2 подъездами; трещина а/б покрытия длиной 4 м.п, шириной раскрытия до 20 мм,  между домами Фрунзе, 10 и Севастопольская, 11; разрушение бортовых камей (2 м) в  районе 1 подъезда,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, были выявлены  следующие дефекты: наблюдается застой воды в районе 3 подъезда, площадью 3 м2,  глубиной до 20 мм.  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, были выявлены  следующие дефекты: наблюдается разрушение асфальтобетонного покрытия длиной 6  м.п, шириной до 30 см вдоль ливневого лотка на заезде к дворовой территории;  трещина асфальтобетонного покрытия длиной 2 м.п, шириной раскрытия до 5 мм, на  заезде к дворовой территории в 5 м от ливневого лотка; трещина асфальтобетонного  покрытия длиной 2 м.п, шириной раскрытия до 10 мм, на дороге левого торца дома;  трещина асфальтобетонного покрытия длиной 1,5 м.п, шириной раскрытия до 5 мм, на  заезде к автомобильной стоянке; отсутствует отсыпка обоймы бортовых камней на  участке 10 м.п на тротуаре между домами № 26 и № 28; трещина асфальтобетонного  покрытия длиной 3 м.п, шириной раскрытия до 10 мм напротив 2 подъезда,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, были  выявлены следующие дефекты: трещина асфальтобетонного покрытия длиной 3 м.п,  шириной раскрытия до 15 мм, напротив 1 подъезда; трещина асфальтобетонного  покрытия длиной 2 м.п, шириной раскрытия до 5 мм, напротив 2 подъезда; трещина  асфальтобетонного покрытия длиной 3 м.п, шириной раскрытия до 5 мм, в районе  колодца между 3 и 4 подъездами; трещина а/б покрытия длиной 4 м.п, шириной  раскрытия до 8 мм, напротив 5 подъезда,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, были  выявлены следующие дефекты: наблюдается сетка из трещин с разрушением  асфальтобетонного покрытия площадью 6м2 на въезде дороги к дворовой территории;  трещина асфальтобетонного покрытия длиной 3 м.п, шириной раскрытия до 10 мм, на  дороге в районе контейнерной площадки; наблюдается разрушение бортового камня (1  шт) на заезде к контейнерной площадке; трещина асфальтобетонного покрытия длиной  7 м.п, шириной раскрытия до 3 мм, в районе левого торца дома; трещина  асфальтобетонного покрытия длиной 4 м.п, шириной раскрытия до 7 мм, на въезде к  автостоянке; трещина асфальтобетонного покрытия длиной 4 м.п, шириной раскрытия  до 5 мм, в районе 2 подъезда; трещина а/б покрытия длиной 4 м.п, шириной раскрытия  до 8 мм, в районе 3 подъезда; трещина а/б покрытия длиной 4 м.п, шириной раскрытия  до 8 мм, между 5 и 6 подъездами,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, были  выявлены следующие дефекты: трещина асфальтобетонного покрытия длиной 2 м.п,  шириной раскрытия до 15 мм, с правого торца дома; просадка асфальтобетонного  покрытия площадью 0,5 м2, в районе колодца напротив 4 подъезда; просадка  асфальтобетонного покрытия площадью 1,5 м2, в районе колодца напротив 3 подъезда;  просадка асфальтобетонного покрытия площадью 1 м2, в районе ливневого колодца с  левой стороны на заезде на дворовую территорию; трещина асфальтобетонного  покрытия вдоль бортового камня шириной раскрытия до 20 мм, между 2 и 3  подъездами,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, были выявлены  следующие дефекты: трещина асфальтобетонного покрытия длиной 2 м.п, шириной  раскрытия до 8 мм, напротив 4 подъезда; трещина а/б покрытия длиной 4 м.п, шириной  раскрытия до 5 мм, напротив 3 подъезда.  

По факту выявленных замечаний в адрес ответчика направлена претензия от  11.05.2022 № 470 с требованием устранить дефекты в рамках гарантийного  обслуживания в срок до 30.08.2022.  

В установленный претензией срок дефекты выполненных работ Подрядчиком  устранены не были, гарантийные обязательства не исполнены, о чем составлен  соответствующий акт осмотра от 31.08.2022.  

Неисполнение ответчиком гарантийных обязательств по контракту послужило  основанием для обращения в суд с настоящим иском.  

Согласно статьям 307, 309 ГК РФ в силу обязательства должник обязан  совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право  требовать от должника исполнения его обязанности; обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.  Статья 310 ГК РФ предусматривает недопустимость одностороннего отказа от  исполнения обязательства.  

В силу статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные  строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758),  предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд,  осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на  выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.  

Согласно пункту 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по  государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для  государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  

муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или  обеспечить их оплату.  

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям  договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям,  обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено  законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы  должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или  определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока  быть пригодным для установленного договором использования, а если такое  использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата  работы такого рода (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).  

В силу пункта 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым  актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата  работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока  соответствовать условиям договора о качестве, который начинает течь с момента, когда  результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком  (пункт 5 статьи 724 ГК РФ).  

Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы предусмотрена в  статье 723 ГК РФ. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от  договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые  делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при  отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного  использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по  своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в  разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения  своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их  предусмотрено в договоре подряда.  

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления  от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для  сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в  технической документации показателей объекта строительства (статья 754 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность  за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не  докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей,  неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации,  разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами,  ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или  привлеченными им третьими лицами.  

Содержание гарантийного обязательства включает право заказчика требовать от  подрядчика обеспечения надлежащего качества результата выполненных работ и  корреспондирующую ему обязанность подрядчика обеспечивать его с момента приемки  и до окончания действия гарантийного срока.  

Распространяя свое действие на период после приемки выполненных работ,  гарантийное обязательство превращает отношения сторон по договору подряда в  длящиеся. Презюмируется, что при обычной надлежащей эксплуатации предмета,  явившегося результатом работ, недостаток, появившийся в течение гарантийного срока,  возникает ввиду ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по  выполнению работ.  

По спору о ненадлежащем исполнении подрядчиком гарантийных обязательств  бремя предоставления доказательств отсутствия вины подрядчика в возникновении  недостатков, в том числе посредством доказывания причин образования спорных  

дефектов (отсутствия причинно-следственной связи), относится на подрядчика как  лицо, принявшее на себя обязательство обеспечить соответствие результата  выполненных работ требованиям качества (статьи 721, 722, 724, 755 ГК РФ).  

В пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за  недостатки (дефекты) выполненных работ и на него в соответствии со статьей 65 АПК  РФ возлагается обязанность доказать, что работы им выполнены качественно, а  возникшие в период гарантийного срока недостатки (дефекты) не являются следствием  выполненных подрядчиком работ.  

В силу пункта 2 статьи 401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом,  нарушившим обязательство.  

Таким образом, именно ответчик должен представить доказательства отсутствия  своей вины в недостатках работ.  

Между тем таких доказательств суду не представлено. 

Судом из материалов дела установлено, что требование заказчика об устранении  недостатков заявлено в пределах гарантийного срока.  

Факт ненадлежащего исполнения работ подтверждается материалами дела, в том  числе актом обследования от 05.05.2022.  

Поскольку контрактом предусмотрена гарантия на выполненные работы, то в  силу пункта 2 статьи 755 ГК РФ ответчик должен нести ответственность за недостатки  работ, обнаруженные в пределах этого срока.  

Таким образом, заявленное требование истца суд признает правомерными и  обоснованными.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебные расходы относятся на стороны пропорционально  удовлетворенным требованиям.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ СИТИ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 11.01.2008 г.) безвозмездно, в 30- дневный срок, с момента вступления в силу решения Арбитражного суда Приморского  края, устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту 10А/19  от 22.07.2019 г., осуществив в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и иной  нормативно-технической документацией (в том числе: СП 82.13330.2016  Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75, СП  48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-012004, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие  требования, ГОСТ 12.2.011-2012. Межгосударственный стандарт. Система стандартов  безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие  требования безопасности, ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда  (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и  правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы  испытаний (с Поправками, с Изменением № 1)) следующие ремонтные работы:  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...> Рабочая, 60: - устранить  трещину асфальтобетонного покрытия длиной 4 м.п, шириной раскрытия до 15 мм, с  левого торца дома; - устранить трещину асфальтобетонного покрытия длиной 0,7 м.п.,  шириной раскрытия до 10 мм, на дороге заезда дворовой территории с торца дома,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>: - устранить  трещину асфальтобетонного покрытия длиной 1 м.п, шириной раскрытия до 3 мм, в  районе 4 подъезда; - устранить трещину асфальтобетонного покрытия длиной 2 м.п,  шириной раскрытия до 5 мм, в районе 5 подъезда; - устранить просадку  

асфальтобетонного покрытия площадью Зм2 в районе колодца между 2 и 3 подъездами;  - устранить размыв грунта на откосе площадью 20 м2, между 5 и 6 подъездами в районе  ТП; - устранить трещину асфальтобетонного покрытия длиной 1,5 мп, шириной  раскрытия до 5 мм, в районе автостоянки с права торца дома; - заменить разрушенные  бортовые камни длиной 4 м2 на заезде дворовой территории,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>: - устранить  трещину асфальтобетонного покрытия длиной 1 м.п, шириной раскрытия до 3 мм, в  районе в районе 2 подъезда,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>: - устранить  размыв грунта на обойме бортовых камней на площадках входов в подъезды № 3 и № 5;  - устранить трещину в асфальте от колодца на тротуаре справа от торца дома длиной 1  м.п. На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>: - устранить трещину  асфальтобетонного покрытия длиной 3 и 6 м.п, шириной раскрытия до 20 мм, с левого  торца дома; - устранить трещину асфальтобетонного покрытия длиной 4 м.п, шириной  раскрытия до 8 мм, в районе колодца на стоянке в районе левого торца дома,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>: - заменить  бортовой камень со сколом (1 шт.) на заезде на автомобильную стоянку; - устранить  трещину асфальтобетонного покрытия длиной 1 м.п, шириной раскрытия до 3 мм, в  районе в районе 2 подъезда; - устранить трещину асфальтобетонного покрытия длиной  3 м.п, шириной раскрытия до 5 мм, с левого торца дома,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>: - устранить  трещину асфальтобетонного покрытия длиной 6 м.п, шириной раскрытия до 5 мм, в  районе заезда на территорию детского сада; - заменить бортовые камни со сколами (3  шт.) в районе заезда к детскому саду и в районе заезда на дворовую территорию; -  устранить трещину асфальтобетонного покрытия длиной 1 м.п, шириной раскрытия до  3 мм, между 1 и 2 подъездами; - устранить трещину асфальтобетонного покрытия  длиной 4 м.п, шириной раскрытия до 20 мм, между домами Фрунзе, 10 и  Севастопольская, 11; - заменить разрушенные бортовые камни (2 м) в районе 1  подъезда. На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>: - устранить  застой воды в районе 3 подъезда, площадью 3 м2, глубиной до 20 мм.  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>: - восстановить  разрушенное асфальтобетонное покрытие длиной 6 м.п, шириной до 30 см вдоль  ливневого лотка на заезде к дворовой территории; - устранить трещину  асфальтобетонного покрытия длиной 2 м.п, шириной раскрытия до 5 мм, на заезде к  дворовой территории в 5 м от ливневого лотка; - устранить трещину асфальтобетонного  покрытия длиной 2 м.п, шириной раскрытия до 10 мм, на дороге левого торца дома; -  устранить трещину асфальтобетонного покрытия длиной 1,5 м.п, шириной раскрытия  до 5 мм, на заезде к автомобильной стоянке; - восстановить отсыпку обоймы бортовых  камней на участке 10 м.п на тротуаре между домами № 26 и № 28; - устранить трещину  асфальтобетонного покрытия длиной 3 м.п, шириной раскрытия до 10 мм напротив 2  подъезда, На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>: -  устранить трещину асфальтобетонного покрытия длиной 3 м.п, шириной раскрытия до  15 мм, напротив 1 подъезда; - устранить трещину асфальтобетонного покрытия длиной  2 м.п, шириной раскрытия до 5 мм, напротив 2 подъезда; - устранить трещину  асфальтобетонного покрытия длиной 3 м.п, шириной раскрытия до 5 мм, в районе  колодца между 3 и 4 подъездами; - устранить трещину асфальтобетонного покрытия  длиной 4 м.п, шириной раскрытия до 8 мм, напротив 5 подъезда,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>: -  восстановить разрушенное асфальтобетонное покрытие площадью 6м2 на въезде дороги  к дворовой территории; - устранить трещину асфальтобетонного покрытия длиной 3  м.п, шириной раскрытия до 10 мм, на дороге в районе контейнерной площадки; -  

заменить разрушенный бортовой камень (1 шт) на заезде к контейнерной площадке; -  устранить трещину асфальтобетонного покрытия длиной 7 м.п, шириной раскрытия до  3 мм, в районе левого торца дома; - устранить трещину асфальтобетонного покрытия  длиной 4 м.п, шириной раскрытия до 7 мм, на въезде к автостоянке; - устранить  трещину асфальтобетонного покрытия длиной 4 м.п, шириной раскрытия до 5 мм, в  районе 2 подъезда; - устранить трещину асфальтобетонного покрытия длиной 4 м.п,  шириной раскрытия до 8 мм, в районе 3 подъезда; - устранить трещину  асфальтобетонного покрытия длиной 4 м.п, шириной раскрытия до 8 мм, между 5 и 6  подъездами.  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>: - устранить  трещину асфальтобетонного покрытия длиной 2 м.п, шириной раскрытия до 15 мм, с  правого торца дома; - устранить просадку асфальтобетонного покрытия площадью 0,5  м2, в районе колодца напротив 4 подъезда; - устранить просадку асфальтобетонного  покрытия площадью 1,5 м2, в районе колодца напротив 3 подъезда; - устранить  просадку асфальтобетонного покрытия площадью 1 м2, в районе ливневого колодца с  левой стороны на заезде на дворовую территорию; - устранить трещину  асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня шириной раскрытия до 20 мм,  между 2 и 3 подъездами,  

На объекте, расположенном по адресу: 

<

...>: - устранить  трещину асфальтобетонного покрытия длиной 2 м.п, шириной раскрытия до 8 мм,  напротив 4 подъезда; - устранить трещину асфальтобетонного покрытия длиной 4 м.п,  шириной раскрытия до 5 мм, напротив 3 подъезда.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СТРОЙ СИТИ" в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной  пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения апелляционной инстанции.  

Судья Овчинников В.В.