АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ул. Ленина, д. 60, г. Сыктывкар, 167000

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru   

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А29-8297/2020

13 апреля 2021 года

г. Сыктывкар

Резолютивная часть решения объявлена 07 апреля 2021 года, полный текст решения изготовлен 13 апреля 2021 года.

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи  Воронецкой С.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску государственного казенного учреждения Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Промресурс-М» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

об обязании устранить недостатки работ по гарантии,  

при участии:

от истца: ФИО2 – по доверенности № 64 от 17.07.2020 (до перерыва),

установил:

государственное казенное учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» (далее – ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми», истец) обратилось в арбитражный суд с иском об обязании общества с ограниченной ответственностью «Промресурс-М» (далее – ООО «Промресурс-М», ответчик) устранить недостатки работ в рамках гарантийного срока по контракту на выполнение работ по организации строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сосногорске Республики Коми» № 0107200002716001954-0032180-02 (90/16) от 28.12.2016.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 03.02.2021 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Стиль» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

Определением от 09.03.2021 судебное разбирательство по делу № А29-8297/2020 отложено на 01.04.2021.

Заявлениями № 02-28/129 от 09.03.2021, № 02-28/157 от 31.03.2021 ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнило исковые требования, указав перечень мероприятий, необходимых к проведению для устранения выявленных нарушений

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Уточнение исковых требований не противоречит закону и не нарушает прав должника, в связи с чем принимается судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) в судебном заседании, назначенном на 01 апреля 2021 года, объявлялся перерыв до 11 час. 30 мин. 07 апреля 2021 года. Информация о перерыве размещалась на информационном стенде в помещении суда и на официальном сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации в Картотеке арбитражных дел. После окончания перерыва судебное заседание возобновлено. 

Истец на требованиях (с учетом уточнения) настаивает.

Ответчик, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, мотивированные отзывы по существу заявленных требований не представили, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. 

Дело рассматривается в отсутствие представителей ответчика, третьего лица в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся в деле доказательствам. 

Изучив материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующее.

28 декабря 2016 года между ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» (заказчик) и ООО «Промресурс-М» (генподрядчик) заключен контракт на выполнение работ по организации строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сосногорске Республики Коми» № 0107200002716001954-0032180-02 (90/16), предметом которого является выполнение генподрядчиком по поручению заказчика работ по организации строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сосногорске Республики Коми» в соответствии с частями 1 и 2 технического задания, являющегося приложением № 1 к контракту, и проектно-сметной документацией. Место выполнения работы – земельный участок, отведенный для строительства объекта; адрес объекта: 

<

...> Победы (пункты 1.1, 1.3 контракта).

Согласно разделу 10 контракта гарантийный срок на выполненную работу устанавливается 5 лет с даты подписания заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, форма КС-14).

Если в период гарантийного срока обнаружится, что материалы, оборудование, комплектующие изделия, системы, работы будут иметь недостатки или дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется генподрядчиком за свой счет в течение срока, установленного заказчиком.

Акт приемки законченного комплекса работ по объекту по форме КС-11 подписан сторонами 05.10.2018.

Вместе с тем, как указал истец в иске, в процессе эксплуатации объекта выявлены недостатки выполненных работ, сведения о которых отражены в акте освидетельствования объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сосногорске Республики Коми» от 18.09.2019 (далее – Акт), а именно: 

1. на внутренней поверхности наружных стен лестничных клеток выпадает конденсат и образуется наледь; в результате чего при повышении температуры наружного воздуха поверхность стен намокает, приводя к потере результатов отделочных работ (пункт 3 по Акту);

2. загрязнения наружной поверхности стеклопакетов оконных блоков ОК-3 в помещениях мужской и женской раздевалок строительными смесями и растворами на площади 8,33 кв. м. (пункт 5 по Акту);

3. не восстановлены поврежденные участки отделки колон в фойе, подсобном помещении буфета, в помещениях раздевалок тренажерного зала на площади 45,4 кв. м. (пункт 8 по Акту);

4. не выполнена настройка устройств автоматической регулировки и поддержания, предусмотренного проектом и техническими условиями теплового режима работы внутренних сетей, систем отопления объекта, систем теплоснабжения приточных установок (пункт 11 по Акту);

5. при срабатывании системы пожарной сигнализации происходит отключение автоматических выключателей «ПД-4», «ПД-6» в шкафу ВРУ-АВР (причина не выявлена); не демонтированы самодельные зонты на стаканах дымоудаления в уровне кровли (пункт 13 по Акту); 

6. появление шума и нагревание при работе циркуляционного насоса системы отопления теплых полов в осях 6/Б-В на отм. +3,600 в помещении чаши бассейна (пункт 19 по Акту);

7. течь в узлах примыкания кровли к шахтам дымоудаления и подпора воздуха в осях 3-4/В-Г, 4-5/Е-Ж в помещениях тренажерного зала и чаши бассейна (пункт 20 по Акту);

8. трещины стяжки пола в осях 5-6/А-Б на отметке -1,000 (пом. 152) на площади 12 кв. м. (пункт 21 по Акту);

9. осыпание грунта в месте ввода в здание питающей кабельной линии в помещении электрощитовой в осях 1-1/1/А на отметке ниже 0,000 (пункт 22 по Акту);

10.  разрушение финишного покрытия пола в помещении 149 в осях 1-2/Б-В на отм. +0,000 на площади 18,52 кв. м. (пункт 23 по акту);

11. осевое смещение вентилятора ВО 30-160-071 системы подпора воздуха ПД-4 относительно примыкающего вентканала вдоль уклона кровельного покрытия (пункт 24 по Акту);

12. отслоение огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций основания перекрытия второго этажа в осях Д-Ж/1-6, отм. +3,400 на площади 8,5 кв. м. (пункт 25 по Акту);

13. циркуляционные насосы Wilo RS25/6-3 (2 шт.) системы напольного отопления не запускаются (пункт 26 по Акту);

14. пожарный гидрант (Гидрант 2000) смонтирован с осевым смещением относительно люка колодца ПГ1, эксплуатация невозможна, требуется переврезка фланцевых соединений (пункт 27 по Акту);

15. в колодце ПГ2 смонтирован не проектный пожарный гидрант (Гидрант 1500), эксплуатация невозможна, требуется замена (пункт 28 по Акту);

16. стеклопакет ОК-4 в помещении 231 (зал бассейна) в осях А/5-6, отм. +5,950 имеет продольную вертикальную трещину внешнего стекла длиной 1,05 м.п. (пункт 29 по Акту);

17. крышный вентилятор системы ПДЗ в осях А-Б/1-2, отм. +10,955 имеет осевое смещение вследствие разрушения конструктива крепления к плоскости кровли, подводящий воздуховод разрушен на площади 1,26 кв. м. (пункт 30 по Акту);

18. в помещении 231 (зал бассейна) имеются следы намокания финишного покрытия стен в осях А/4-5, А-В/1, отм. +9,900 на площади 2,5 кв. м. (пункт 31 по Акту);

19. воздуховоды систем ГЦ, ПЗ, П4, П5, в помещении 301 (венткамера), отм. +7,600 негерметичны вследствие отсутствия (разрушения) уплотнительных элементов в местах сопряжения сборных элементов конструкции воздуховодов, требуется ревизия и восстановление уплотнительных элементов (пункт 32 по Акту);

20. в помещениях 151, 152 (водоподготовка, техническое помещение) по периметру стен в осях А-В/1, А/1-6, А-В/6 в узлах сопряжения цокольной стены и стеновых сэндвич-панелей (узел 1, альбом 066-232/11-АР) имеются следы протекания ливневых вод, присутствует влагонасыщение и частичное разрушение финишного покрытия цокольной стены (штукатурка) на площади 12,4 кв. м. (пункт 33 по Акту).

В претензии № 07-01-9016/288 от 26.05.2020 заказчик сообщил подрядчику о необходимости устранения дефектов работ, зафиксированных актом от 18.09.2019.

Названная претензия ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» № 07-01-9016/288 от 26.05.2020 оставлена ООО «Промресурс-М» без ответа и без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Пунктом 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, когда для результата работы предусмотрен гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

В силу статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

По смыслу названных правовых норм в пределах гарантийного срока устанавливается презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленных в пределах гарантийного срока, и безвозмездное устранение недостатков при выполнении подрядчиком работ с отступлениями от договора подряда.

Взяв на себя гарантийные обязательства по качеству выполненной работы в течение 5 лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ (пункт 10.1 контракта), подрядчик в силу пункта 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые ссылается в качестве основания своих требований или возражений.

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Факт выявления недостатков выполненных работ, предъявления ООО «Промресурс-М» требования об их устранении в пределах гарантийного срока подтверждается представленной в материалы дела претензией ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми», а также актом освидетельствования от 18.09.2019.

Ответчик уклонился от участия в судебном разбирательстве, в том числе посредством представления письменного отзыва на иск в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, чем принял на себя согласно статье 41 названного Кодекса риск неблагоприятных последствий отсутствия возможности дачи непосредственных объяснений по отдельным документам в судебном заседании и предоставления дополнительных документов до принятия решения по делу.

Доказательства устранения выявленных недостатков работ по гарантии по состоянию на дату судебного заседания в материалах дела отсутствуют.

На основании изложенного, исковые требования ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьями 102, 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 174, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Промресурс-М» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить в соответствии с проектной документацией по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сосногорске Республики Коми» недостатки результатов работ, выполненных по контракту № 0107200002716001954-0032180-02 (90/16) от 28.12.2016, а именно:

1. выполнить демонтаж финишного покрытия полов, стен и потолков в местах примыкания к оконным и дверным проемам, произвести утепления узла примыкания светопрозрачных конструкций (окна, двери) к ограждающим конструкциям здания, выполнить восстановление демонтированных покрытий; выполнить замену финишного покрытия полов, стен и потолков в местах выпадения конденсата и образования наледи на внутренней поверхности наружных стен лестничных клеток; представить исполнительную документацию по выполненным работам (пункт 3 по Акту);

2. выполнить комплексную очистку наружной поверхности стеклопакетов оконных блоков ОК-3 в помещениях мужской и женской раздевалок строительными смесями и растворами на площади 8,33 кв. м.; представить акты освидетельствования выполненных работ (пункт 5 по Акту);

3. выполнить раскрытие поврежденных участков отделки в фойе, подсобном помещении буфета и в помещениях раздевалок тренажерного зала, произвести грунтование, шпаклевание и нанесение финишного покрытия отделки в фойе, подсобном помещении буфета, в помещениях раздевалок тренажерного зала, поврежденные потолочные плиты «Амстронг» заменить (пункт 8 по Акту);

4. выполнить настройку устройств автоматической регулировки и поддержания, предусмотренного проектом и техническими условиями теплового режима работы внутренних сетей, систем отопления объекта, систем теплоснабжения приточных установок в соответствии с требованиями проектной документации и паспортов на инженерное оборудование; предоставить отчет о проведении пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий, Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 «Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения» (пункт 11 по Акту);

5. произвести комплексные замеры сопротивления изоляции электропроводки систем вентиляции ПД-4, ПД-6, в том числе: фаза-фаза и фаза-ноль, предоставить отчёт о проведенных испытаниях; по результатам проведенных испытаний выполнить диагностику и замену неисправных электропринимающих приборов систем ПД-4, ПД-6 (пункт 13 по Акту).

6. выполнить демонтаж и диагностику циркуляционного насоса системы отопления теплых полов в осях 6/Б-В на отм. +3,600 в помещении чаши бассейна, предоставить заключение сертифицированного диагностического центра; по результатам диагностирования выполнить капитальный ремонт или замену циркуляционного насоса, предоставить исполнительную документации на отремонтированный (замененный) насос, паспорта и руководство по эксплуатации (пункт 19 по Акту);

7. выполнить герметизацию узлов примыкания кровли к шахтам дымоудаления и подпора воздуха в осях 3-4/В-Г, 4-5/Е-Ж в помещениях тренажерного зала и чаши бассейна (пункт 20 по Акту);

8. выполнить демонтаж существующей стяжки; выполнить работы по устройству стяжки пола в осях 5-6/А-Б на отметке -1,000 (пом. 152) на площади 12 кв. м. в соответствии с требованиями СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция» (пункт 21 по Акту);

9. выполнить защитный экран в месте Осыпание грунта в месте ввода в здание питающей кабельной линии в помещении электрощитовой в осях 1-1/1/А на отметке ниже 0,000; предоставить акты освидетельствования выполненных работ (пункт 22 по Акту);

10. выполнить демонтаж финишного покрытия пола, выполнить работы по устройству финишного покрытия пола в помещении 149 в осях 1-2/Б-В на отм. +0,000 на площади 18,52 кв. м. в соответствии с требованиями СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88; представить исполнительную документацию на выполненные работы (пункт 23 по Акту);

11. выполнить монтаж вентилятора ВО 30-160-071 системы подпора воздуха ПД-4 относительно примыкающего вентканала в соответствии с требованиями ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования; предоставить исполнительную документацию по выполненным работам (пункт 24 по Акту);

12. выполнить демонтаж огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций основания перекрытия второго этажа в осях Д-Ж/1-6, отм. +3,400 на площади 8,5 кв. м., выполнить работы по устройству огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций основания перекрытия второго этажа в осях Д-Ж/1-6, отм. +3,400 на площади 8,5 м2 согласно СП 433.1325800.2019. Свод правил. Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ; предоставить исполнительную документацию по выполненным работам с приложением с приложением актов (протоколов) проверки огнезащитного покрытия (пункт 25 по Акту);

13.  выполнить демонтаж и диагностику циркуляционных насосов Wilo RS25/6-3 (2 шт.) системы напольного отопления в сертифицированной диагностической организации, по результатам диагностирования выполнить капитальный ремонт или замену циркуляционных насосов; предоставить исполнительную документацию по выполненным работам (пункт 26 по Акту);

14.  выполнить демонтаж пожарного гидранта (Гидрант 2000) колодца ПГ1, выполнить переврезку обратных фланцев противопожарного водопровода входящего и уходящего наружного трубопровода с учетом выполнения обязательных требований по соосности указанных обратных фланцев и встречных фланцев пожарного гидранта по отношению к друг другу и вертикали, выполнить монтаж пожарного гидранта (Гидрант 2000) колодца ПГ1; предоставить исполнительную документацию по выполненным работам (пункт 27 по Акту);

15.  выполнить демонтаж пожарного гидранта (Гидрант 1500) и произвести монтаж гидранта (Гидрант 2500), затем произвести испытания смонтированного оборудования и предоставить отчет о проведенных испытаниях (пункт 28 по Акту);

16.  произвести замену стеклопакета ОК-4 в помещении 231 (зал бассейна) в осях А/5-6, отм. +5,950, предоставить акты освидетельствования на монтаж стеклопакета (пункт 29 по Акту);

17.  выполнить повторный монтаж крышного вентилятора системы ПДЗ в осях А-Б/1-2, отм. +10,955 в соответствии с требованиями паспорта на вентиляторы осевые ВО 30-160-071; предоставить исполнительную документацию по монтажу вентилятора (пункт 30 по Акту);

18.  выполнить герметизацию участков протекания и восстановить финишное покрытие стен в осях А/4-5, А-В/1, отм. +9,900 на площади 2,5 кв. м. (пункт 31 по Акту);

19.  произвести герметизацию воздуховодов систем П1, ПЗ, П4, П5 в помещении 301 (венткамера) отм. +7,600 путем монтажа уплотнительных элементов заводского изготовления в соответствии с требованиями ГОСТом Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования»; выполнить испытания воздуховодов систем П1, ПЗ, П4, П5 на герметичность и представить протоколы испытаний воздуховодов систем П1, ПЗ, П4, П5 на герметичность (пункт 32 по Акту);

20.  выполнить герметизацию узлов сопряжения цокольной стены и стеновых сэндвич-панелей (узел 1, альбом 066-232/11-АР) в осях А-В/1, А/1-6, А-В/6, выполнить ремонт и восстановления финишного покрытия цокольной стены (штукатурки) на площади 12.4 кв. м. в помещениях 151, 152 (водоподготовка, техническое помещение); представить исполнительную документацию выполненных работ (пункт 33 по Акту).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промресурс-М» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после  вступления решения в законную силу.

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья                              С.И. Воронецкая