36/2018-11860(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-25513/2017

г. Владивосток

29 января 2018 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Буров А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Центр лицензионно-разрешительной  работы Управления Министерства внутренних дел России по Приморскому краю,  УМВД России по ПК (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Общество с ограниченной ответственностью "Дальстройбизнес II" (ИНН  

<

***>; 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 

<

***>)  

р е ш и л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Дальстройбизнес II"  исполнить гарантийные обязательства по государственному контракту от 03.06.2015  года № 28-2015 по выполнению работ по капитальному ремонту кровли здания УМВД  России по Приморскому краю, а именно выполнить следующие строительно- монтажные работы:  

- Установить фасонные элементы в местах примыканий кровельного покрытия к  вертикальным элементам крыши (вент. колодцы, парапеты) в осях 2/В, А/5, Б/5, 6, 7,  обеспечив перехлест не менее 150 мм и уклоны для стока воды. Герметизировать швы  примыканий. Объем работ - 9,5 м.п.  

На отдельных участках примыканий кровли к вертикальным конструкциям  фасонные элементы, обеспечив нахлест на вертикальные не менее 250 мм. Объем  работ-12,5 м.п.  

Установить дополнительные фасонные элементы для обеспечения минимального  перехлеста кровельных листов 150 мм, в объеме 2 м.п.  

Установить дополнительные шурупы с герметизирующими прокладками для  надежного крепления листов друг к другу. Объем работ - 127 м.п.  

Повсеместные участки неплотного примыкания кровельных листов к обрешетке с  образованием волн между фальцевыми замками.  

Устранение дефекта неплотного примыкания кровельных листов к обрешетке.  закрепить края при помощи шурупов с герметизирующими прокладками к обрешетке.  По всей поверхности кровельного покрытия.  

- Установить водоприемную воронку ниже карниза. На кровле устроить желоб для  сбора воды в воронку. Объем работ - 1 шт.  

- Установить шурупы с герметизирующими прокладками для закрепления  фасонных элементов к кирпичным стенам. Объем работ - 200 шт.  

- Установить анкера для обеспечения надежного крепления фартуков к стенам, в  объеме- 100 шт.  

- Устранить следы протечек кровельного покрытия: 

а. В помещении лестничной клетки на 4-м этаже заменить потолочную плитку  «Армстронг» в объеме - 4 шт.  

b. В помещении актового зала заменить потолочную плитку «Армстронг» в  объеме - 5 шт.  

с. В помещении № 327 выполнить антигрибковую обработку поверхностей стен  исконных откосов, восстановить отделочные слои. Объем работ - 15 кв.м. заменить  плитку «Армстронг» в количестве 1 шт.  

d. В помещении № 408 выполнить антигрибковую обработку поверхностей стен.  восстановить отделочные слои. Объем работ - 10 кв.м. заменить плитку «Армстронг» в  количестве 1 шт.  

е. В помещении № 310 выполнить антигрибковую обработку поверхностей стен.  восстановить отделочные слои. Объем работ -10 кв.м. заменить плитку «Армстронг» в  количестве 2 шт.  

f. В помещении № 208 выполнить антигрибковую обработку стен и потолка,  восстановить отделочные слои. Объем работ - 45 кв.м.  

g. В помещении № 417 выполнить антигрибковую обработку стен, восстановить  отделочные слои. Объем работ - 15 кв.м. заменить плитку «Армстронг» в количестве 3  шт.  

h. В помещении № 402/1 выполнить антигрибковую обработку поверхностей стен,  восстановить отделочные слои. Объем работ - 5 кв.м. Заменить потолочную плитку  «Армстронг» в объеме 1 шт.  

I. В помещении № 412 выполнить антигрибковую обработку поверхностей стен,  восстановить отделочные слои. Объем работ - 5 кв.м. Заменить потолочную плитку  «Армстронг» в объеме 2 шт.  

j. В помещении № 413 выполнить антигрибковую обработку поверхностей стен,  восстановить отделочные слои. Объем работ - Зкв.м. Заменить потолочную плитку  «Армстронг» в объеме 1 шт.  

k. В помещении № 414 выполнить антигрибковую обработку поверхностей стен,  восстановить отделочные слои. Объем работ - 3кв.м. Заменить потолочную плитку  «Армстронг» в объеме 2 шт.  

l. В помещении № 415 выполнить антигрибковую обработку поверхностей стен,  восстановить отделочные слои. Объем работ - 9кв.м. Заменить потолочную плитку  «Армстронг» в объеме 3 шт.  

взыскать с Общество с ограниченной ответственностью "Дальстройбизнес II" в  доход федерального бюджета 6000 рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения апелляционной инстанции.  

 Судья Буров А.В.