АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-5617/2024

г. Ставрополь

18 июня 2024 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Репиной А.Н., рассмотрев в  судебном заседании исковое заявление  

 общества с ограниченной ответственностью строительной компании  «Проектмастер», Ростов-на-Дону, ОГРН 1126194001691, ИНН 6168058001,  

 к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального  строительства», г. Пятигорск, ОГРН 1142651004660, ИНН 2632811007,  

о внесении следующих изменений в муниципальный контракт   № 0121300035323000312 от 22.12.2023 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания городского культурно- досугово центра по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1»:  

пункт 6.2 муниципального контракта изложить в следующей редакции: 

 «6.2. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней по окончании разработки  проектной документации, но не позднее 20.12.2024 г. направляет Заказчику акт приема-передачи проектной документации с приложением комплекса разработанной проектной  документации, оформленной в соответствии с требованиями задания на проектирование  объекта капитального строительства (приложение № 1)»;  

пункт 10.1 муниципального контракта изложить в следующей редакции: «10.1.  Сроки выполнения работ, предусмотренные Контрактом: Начало работ: с момента  заключения контракта; окончание работ по контракту: не позднее 20.12.2024 г.;  Предоставление проектно-сметной документации для прохождения государственной  экспертизы – не позднее 30.09.2024 г.»;  

пункт 13.2. муниципального контракта изложить в следующей редакции: «13.2.  Срок действия контракта – по 29.12.2024 г., в части взаиморасчетов – до полного  исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту».  

Приложение № 2 к Контракту № 0121300035323000312 от «22» декабря 2023 г.  календарный график работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:  «Реконструкция здания городского культурно-досугового центра по адресу: г. Пятигорск,  ул. Козлова, 1» изложить в следующей редакции:  

Наименование работ  

Срок 

Выдача проектно-сметной документации и  результатов инженерных изысканий для  организации проведения государственной  экспертизы, в том числе проверки  достоверности определения сметной  стоимости строительства.  

 выполнения 

С момента заключения 

контракта - до 30.09.2024 

Выдача проектно-сметной документации и  результатов инженерных изысканий по  положительному заключению  государственной экспертизы.  

Не позднее 

20.12.2024 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

 Внести следующие изменения в муниципальный контракт   № 0121300035323000312 от 22.12.2023 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания городского культурно- досугово центра по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1»:  

пункт 6.2 муниципального контракта изложить в следующей редакции: 

«6.2. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней по окончании разработки  проектной документации, но не позднее 20.12.2024 г. направляет Заказчику акт приема-передачи проектной документации с приложением комплекса разработанной проектной  документации, оформленной в соответствии с требованиями задания на проектирование  объекта капитального строительства (приложение № 1)»;  

пункт 10.1 муниципального контракта изложить в следующей редакции: «10.1.  Сроки выполнения работ, предусмотренные Контрактом: Начало работ: с момента  заключения контракта; окончание работ по контракту: не позднее 20.12.2024 г.;  Предоставление проектно-сметной документации для прохождения государственной  экспертизы – не позднее 30.09.2024 г.»;  

пункт 13.2. муниципального контракта изложить в следующей редакции: «13.2.  Срок действия контракта – по 29.12.2024 г., в части взаиморасчетов – до полного  исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту».  

Приложение № 2 к Контракту № 0121300035323000312 от «22» декабря 2023 г.  календарный график работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:  «Реконструкция здания городского культурно-досугового центра по адресу: г. Пятигорск,  ул. Козлова, 1» изложить в следующей редакции:  

Наименование работ 

Срок 

Выдача проектно-сметной документации и  результатов инженерных изысканий для  организации проведения государственной  экспертизы, в том числе проверки  достоверности определения сметной  стоимости строительства.  

 выполнения 

С момента заключения 

контракта - до 30.09.2024 

Выдача проектно-сметной документации и  результатов инженерных изысканий по  положительному заключению  государственной экспертизы.  

Не позднее 

20.12.2024 

 Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального  

строительства», г. Пятигорск, ОГРН 1142651004660, ИНН 2632811007, в пользу общества  с ограниченной ответственностью строительной компании «Проектмастер», Ростов-на- Дону, ОГРН 1126194001691, ИНН 6168058001, в возмещение судебных расходов по  уплате государственной пошлины 6 000 руб.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина