59/2017-282916(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

22 декабря 2017 года Дело № А55-25636/2017  

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Балькиной Л.С. при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании 22 декабря 2017 года дело по иску, заявлению  

Департамента градостроительства городского округа Самара  к Обществу с ограниченной ответственностью "Проектстройиновации"  

третье лицо – МП Городского округа Самара «Самарская набережная»  

об обязании устранить недостатки,  при участии в заседании  

от истца – ФИО2, представитель от ответчика – не участвовали, 

от третьего лица – не участвовали,  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Р Е Ш И Л: 

 Исковые требования удовлетворить.  

 Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Проектстройиновации" в  течение 45 дней с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу  устранить за свой счет недостатки в работах, выявленные при эксплуатации объекта  

«Пандусы и подъемные устройства для инвалидов и маломобильных граждан на  

территории набережной реки Волга 2-ая очередь. 1-й пусковой комплекс. Спуск по ул.  Первомайской» в период течения гарантийного срока по муниципальному контракту   № 67641 от 05.04.2012, а именно:  

 1.Пандус № 1: 

- устранить отставание керамогранитной плитки t=10 мм (113,1 кв.м) путем  демонтажа плитки, демонтажа отслоившегося раствора и бетона, устройства набетонки по  сетке, укладки плитки по сетке;  

- устранить коррозию металлического ограждения (111 п.м) путем демонтажа  проржавевшего ограждения, монтажа нержавеющих поручней.  

2. Пандус № 2: 

- устранить отставание керамогранитной плитки t=10 мм (81,7 кв.м) путем  демонтажа плитки, демонтажа отслоившегося раствора и бетона, устройства набетонки по  сетке, укладки плитки по сетке;  

- устранить коррозию металлического ограждения (77,3 п.м) путем демонтажа  проржавевшего ограждения, монтажа нержавеющих поручней;  

- устранить проседание асфальтового покрытия (20 кв.м) путем демонтажа  провалившегося асфальтового покрытия, устройства щебеночного основания с  уплотнением, восстановления асфальтового покрытия.  

3. Пандус № 5: 

- устранить коррозию металлического пандуса (107,83 кв.м) путем очистки  поверхности от ржавчины, окраски в 2 слоя. \  

4. Пандус № 7: 

- устранить отставание керамогранитной плитки t=10 мм (35,75 кв.м) путем  демонтажа плитки, демонтажа отслоившегося раствора и бетона, устройства набетонки по  сетке, укладки плитки по сетке;  

- устранить коррозию металлического ограждения (39 кв.м) путем демонтажа  проржавевшего ограждения, монтажа нержавеющих поручней.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Проектстройиновации" с  доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Л.С. Балькина