ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001 E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А52-5889/2024

г. Вологда

20 марта 2025 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 19 марта 2025 года. В полном объёме постановление изготовлено 20 марта 2025 года.  

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Холминова А.А., судей Тарасовой О.А. и Фадеевой А.А., при ведении протокола секретарём судебного заседания Зеленцовой Ю.А.,  

при участии от общества с ограниченной ответственностью «Живопись по номерам» директора ФИО1, от публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» ФИО2 по доверенности от 10.07.2024 № 117-24,  

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» на решение Арбитражного суда Псковской области от 09 декабря 2024 года по делу № А52-5889/2024,  

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Живопись по номерам» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 182108, 

<

...>; далее – ООО «Живопись по номерам») обратилось в суд с иском, уточнённым в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16н; далее – ПАО «Россети С-З») о возложении обязанности в течение 30 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда осуществить технологическое присоединение объекта, о взыскании 161 868,33 руб. неустойки за период с 14.06.2023 по 22.11.2024, а также судебной неустойки в размере 6 000 руб. в случае неисполнения решения суда в части технологического присоединения за каждый день просрочки.  

Решением Арбитражного суда Псковской области от 09.12.2024 иск удовлетворён частично, судом постановлено:  

– обязать ПАО «Россети С-З» в течение двух месяцев с даты вступления решения по настоящему делу в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям административного/офисного здания, расположенного по адресу: 182108, 

<

...>, земельный участок с кадастровым номером 60:25:0060314:37;  

– взыскать с ПАО «Россети С-З» в пользу ООО «Живопись по номерам» 161 868,33 руб. неустойки за период с 14.06.2023 по 22.11.2024;  

– в случае неисполнения решения суда в части технологического присоединения к электрическим сетям взыскать с ПАО «Россети С-З» в пользу в пользу ООО «Живопись по номерам» судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения;  

– в удовлетворении остальной части требования о взыскании судебной неустойки отказать.  

ПАО «Россети С-З» с этим решением суда не согласилось, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить. В обоснование жалобы ссылается на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.  

В судебном заседании представитель ПАО «Россети С-З» апелляционную жалобу поддержал по изложенным в ней основаниям.  

ООО «Живопись по номерам» в отзыве и его представитель в судебном заседании просят решение суда оставить без изменений.  

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, апелляционный суд отказывает в удовлетворении апелляционной жалобы.  

Как следует из материалов дела, ООО «Живопись по номерам» 27.04.2022 обратилось к ПАО «Россети С-З» с заявкой на присоединение энергопринимающих устройств, а именно административного/офисного здания, расположенного по адресу: 182108, 

<

...>, земельный участок с кадастровым номером 60:25:0060314:37, максимальной мощностью до 40.0 кВт при напряжении 0,4 кВ (лист дела 26).  

В ответ на данное обращение ПАО «Россети С-З» разместило в личном кабинете ООО «Живопись по номерам» Типовые условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Типовые условия; лист дела 14), Технические условия от 26.05.2022 № ПСК-02124-Э-Ю/22-001 (далее – Технические условия; лист дела 28), счёт от 26.05.2022 № ПСК-02124- Э-Ю/22-001 (далее – Счёт; лист дела 18, оборот).  

Согласно пункту 1 Типовых условий (лист дела 14) ПАО «Россети С-З» (сетевая организация) принимает на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства/объектов по производству электрической энергии; далее – электроустановки) заявителя (ООО «Живопись по номерам»), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к  

присоединению электроустановок, регулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение.  

Согласно пункту 2 Типовых условий наименование и местонахождение электроустановок заявителя, технические характеристики осуществляемого технологического присоединения, срок действия технических условий, перечень мероприятий по технологическому присоединению, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению указываются в Технических условиях.  

Согласно пункту 3 Типовых условий Технические условия, размещаются сетевой организацией одновременно с размещением настоящих Типовых условий договора и счёта на оплату технологического присоединения в личном кабинете заявителя.  

Согласно пункту 4 Типовых условий сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящим типовым условиям договора, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения электроустановок заявителя к электрическим сетям; по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий в соответствии с техническими условиями не позднее срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, указанного в технических условиях, составить и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении технологического присоединения.  

Согласно пункту 6 Типовых условий заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в размере и в сроки, указанные в счёте на оплату услуг по технологическому присоединению.  

Согласно пункту 8 Типовых условий размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и подлежит указанию в счете на оплату технологического присоединения.  

Согласно пункту 19 Типовых условий договор об осуществлении технологического присоединения электроустановок заявителя к электрическим сетям сетевой организации считается заключённым со дня оплаты заявителем счёта, выставленного в личном кабинете заявителя.  

ПАО «Россети С-З» выставило заявителю (ООО «Живопись по номерам») Счёт и график оплаты услуг по технологическому присоединению (лист дела 18, оборот, лист дела 19), согласно которым размер платы за технологическое присоединение составляет 122 627,52 руб.  

ООО «Живопись по номерам» оплатило данный счёт за технологическое присоединение платёжными поручениями от 30.12.2022 № 437, от 30.12.2022 № 436, от 14.11.2022 № 386, от 06.07.2022 № 266, от 10.06.2022 № 232.  

Таким образом, согласно пункту 19 Типовых условий, графику оплаты услуг по технологическому присоединению, учитывая названную выше дату внесения первого платежа по счёту (10.06.2022), сторонами заключён договор № ПСК-02124-Э-Ю/22-002 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и выданы Технические условия.  

Согласно пункту 12 Технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.  

Однако, по истечении 12 месяцев со дня заключения договора, то есть до 13.06.2023, ПАО «Россети С-З» обязательства по договору не исполнило, при этом оно продлило в одностороннем порядке срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срок действия Технических условий до 30.06.2024, уведомив об этом заявителя (ООО «Живопись по номерам») письмом от 26.06.2023 № ПСК-02124-Э-Ю/22-001.  

В этом письме ПАО «Россети С-З» также сообщило, что в целях осуществления технологического присоединения объекта заявителя необходимо осуществить строительство КВЛ-0,4 кВ (0,3 км + 0,062 км) от РУ-0,4 кВ ЗТП-225 ф.70-10 с монтажом КР-0,4 кВ (1 шт). Также указало на то, что выполнение мероприятий по технологическому присоединению по заключённым договорам ведётся в порядке очерёдности в соответствии с датой заключения договора. Исполнение обязательств по договору осложнено значительным увеличением количества заявок на технологическое присоединение и объёмов работ по ранее заключённым договорам об осуществлении технологического присоединения.  

Ссылаясь на данные обстоятельства, ООО «Живопись по номерам» обратилось в суд с настоящим иском.  

Суд первой инстанции правомерно удовлетворил данный иск частично, руководствуясь статьями 309, 310, 330, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон «Об электроэнергетике»), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861).  

Суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о нарушении ответчиком (ПАО «Россети С-З») срока осуществления технологического присоединения.  

Так, согласно пункту 19 Типовых условий договор об осуществлении технологического присоединения электроустановок заявителя к электрическим сетям сетевой организации считается заключённым со дня оплаты заявителем счёта, выставленного в личном кабинете заявителя.  

ООО «Живопись по номерам» оплатило счёт за технологическое присоединение платёжными поручениями от 30.12.2022 № 437, от 30.12.2022 № 436, от 14.11.2022 № 386, от 06.07.2022 № 266, от 10.06.2022 № 232.  

Согласно пункту 12 Технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.  

Истец (ООО «Живопись по номерам») договорные обязательства исполнил полностью, он полностью уплатил ответчику (ПАО «Россети С-З») оплату технологического присоединения в сумме 122 627,52 руб., что подтверждается названными выше платёжными поручениями.  

Ответчиком (ПАО «Россети С-З») как в уставленный договором срок, так и за его пределами, в том числе на дату вынесения судом решения по настоящему делу, обязательства по технологическому присоединению не исполнены.  

В апелляционной жалобе ПАО «Россети С-З» ссылается на то, что для строительства и размещения объектов электросетевого хозяйства требуется проведение мероприятий, несущих не только значительную финансовую нагрузку, но и существенные временные затраты.  

Данные доводы являются необоснованными. 

Ответчик (ПАО «Россети С-З») не представил доказательств, подтверждающих надлежащее исполнение им обязательства по выполнению работ в сроки, согласованные в договоре.  

Тяжёлое материальное положение не освобождает от ответственности за просрочку исполнения обязательства.  

Согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ лицо признаётся невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.  

В соответствии с пунктом 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 7) не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.  

Согласно статье 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.  

В рассматриваемом случае ответчиком не представлено надлежащих доказательств отсутствия его вины в просрочке исполнения обязательства либо действия непреодолимой силы.  

Возможность освобождения ответчика от ответственности в связи с отсутствием финансирования не предусмотрена.  

Приведённые ответчиком (ПАО «Россети С-З») обстоятельства согласно статье 401 ГК РФ не являются основанием для снятия с него предусмотренных договором обязанностей выполнить свою часть работ по технологическому присоединению.  

На основании изложенного суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу об отсутствии обстоятельств, препятствующих ответчику (ПАО «Россети С-З») в выполнении обязательств по договору, и о наличии оснований для понуждения ответчика к выполнению обязательства.  

Судом первой инстанции согласно статье 174 АПК РФ обоснованно установлен срок, в течение которого ПАО «Россети С-З» обязано выполнить предусмотренные договором мероприятия, а именно двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу. При этом судом приняты во внимание конкретные обстоятельства настоящего дела, объём подлежащих выполнению работ, их специфика.  

В связи с нарушением ответчиком срока осуществления технологического присоединения являются обоснованными исковые требования о взыскании неустойки согласно статье 330 ГК РФ и пункту 14 рассматриваемых Типовых условий в сумме 161 868,33 руб. за период с 14.06.2023 по 22.11.2024.  

Также суд первой инстанции, руководствуясь пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ и пунктами 28, 31 и 32 Постановления Пленума ВС РФ № 7, правомерно взыскал с ПАО «Россети С-З» в пользу ООО «Живопись по номерам» неустойку на случай несвоевременного исполнения решения суда в размере по 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.  

Отклоняются доводы апелляционной жалобы о необходимости уменьшения размера данных неустоек.  

Статья 333 ГК РФ предусматривает право суда уменьшить неустойку в случае её явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.  

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О указано, что законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной её несоразмерности последствиям нарушения обязательств.  

В рассматриваемом случае апелляционный суд, оценив обстоятельства дела с учётом позиций, изложенных в Постановлении Пленума ВС РФ № 7 и Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», пришёл к выводу об отсутствии оснований для уменьшения неустоек, поскольку ответчиком не  

представлены доказательства их несоразмерности последствиям нарушения обязательства.  

Взысканные неустойки соразмерны допущенному ответчиком нарушению с учётом объёма обязательств, периода просрочки, обстоятельств настоящего дела, а также требований разумности и справедливости.  

На основании изложенного суд первой инстанции правомерно удовлетворил иск частично. Выводы суда соответствуют материалам дела, нормы права применены судом правильно, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения суда нет.  

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд  

п о с т а н о в и л:

решение Арбитражного суда Псковской области от 09 декабря 2024 года по делу № А52-5889/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» – без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.  

Председательствующий А.А. Холминов 

Судьи О.А. Тарасова  

А.А. Фадеева