Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40- 1279/2023-3-2

г. Москва

13 марта  2023  г.

Резолютивная часть решения объявлена 03 марта   2023   г. 

Решение в полном объеме изготовлено 13  марта  2023 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А., 

при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ" (676470, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЦИОЛКОВСКИЙ ГОРОД, ДОМ ТЕР ВОЕННЫЙ ГОРОДОК №10, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.01.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 282301001) к обществу с ограниченной ответственностью "СВЯЗЬ МОНТАЖ СТРОЙ" (111402, 

<

...> КОМНАТА 4, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.06.2005, ИНН: 

<

***>, КПП: 772001001) о взыскании 5 050 454, 31 руб., 

При участии: 

От истца: ФИО2 дов. от 05.12.2022г. диплом 

От ответчика: ФИО3 дов. от 01.02.2023г. диплом

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное унитарное предприятие "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СВЯЗЬ МОНТАЖ СТРОЙ" о взыскании неосновательного   обогащения в размере 2 367 169 руб. 31 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 29.11.2022 г. по 26.12.2022 г. в размере 13 619 руб. 33  коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.12.2022 г. по день фактической оплаты суммы неосновательного обогащения, неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с 31.05.2021 г. по 15.11.2022 г. в размере 1 498 155 руб. 16 коп., процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса за период с 17.11.2020 г. по 15.11.2022 г. в размере 1 171 510  руб. 51 коп.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика возразил против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, проверив обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, между ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (Генподрядчик) и ООО «Связь Монтаж Строй» (Субподрядчик) заключён Контракт от 24.12.2020 №2009-18-СМР(СУБ) на капитальный ремонт железнодорожного переезда №6 на ПК 9+3.24 м подъездного пути необщего пользования войсковой части 14272, посёлок Первомайское, Знаменский район, Тамбовская область (шифр объекта Т-12/20-111) (далее соответственно – Объект, Контракт). 

Контракт заключён в целях реализации Государственного контракта от 31.08.2020 №257/6/КР/7746, заключенного между Генподрядчиком и Минобороны России, в целях выполнения государственного оборонного заказа (п. 2.5 Контракта).

По условиям заключенного Контракта Субподрядчик выполняет обмерные работы и обследования для подготовки Технической документации (Проектной документации), выполняет разработку Технической документации (Проектной документации), работы по капитальному ремонту Объекта и все иные работы, необходимые для приведения Объекта до состояния полной готовности к эксплуатации, в соответствии с условиями Контракта, в том числе раздела 23 Контракта, ведение авторского надзора (Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «под ключ») (далее – Работы).

Цена Контракта составляет 2 805 534,00 руб. (п. 3.1. Контракта).

В соответствии с разделом 5 Контракта, Субподрядчик обязан окончить выполнение этапов работ в следующие сроки: выполнение проектных работ – 25.02.2021; работы по капитальному ремонту – 30.05.2021.

Порядок сдачи-приёмки выполненных Работ согласован в разделе 13 Контракта.

В соответствии с положениями пунктов 13.2.1 – 13.2.3 Контракта, сдача-приёмка выполненных строительно-монтажных работ за текущий (отчётный) период осуществляется по журналу учёта выполненных работ (форма КС-6а), акту о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), надлежащим образом оформленной исполнительной документации, первичной учётной документации.

Исполнение всех обязательств по Контракту, за исключением гарантийных, подтверждается подписанием итогового акта приёмки выполненных работ (п. 13.12 Контракта).

Однако, в силу нарушения обязательств касательно сдачи работ в установленные контрактом сроки настоящий контракт расторгнут в одностороннем внесудебном порядке на основании пунктов 20.5.1, 20.6 Контракта и п. 1 ст. 450.1, п. 2 ст. 715 ГК РФ (уведомление-претензия от 10.11.2022 №38/8962-дсп (РПО 11902174053225). 

Согласно отслеживанию почтовых отправлений, уведомление-претензия от 10.11.2022 №38/8962-дсп получена Субподрядчиком 23.11.2022.

В период действия Контракта Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс в сумме 2 367 169,31 руб. (платёжные поручения от 13.11.2020 №11112 (списано банком 16.11.2020) и от 19.07.2021 №7277 (списано банком 22.07.2021).

В обоснование исковых требований истец указывает, что Субподрядчиком Работы по Контракту в установленном порядке не сдавались и Генподрядчиком не принимались, результат работ отсутствует, итоговый акт приёмки выполненных работ сторонами не подписан, перечисленный аванс Субподрядчиком не отработан.

Просрочка исполнения Субподрядчиком обязательств по Контракту составляет 534 календарных дня.

В целях досудебного урегулирования спора, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием возвратить сумму неотработанного аванса.  

Претензионные требования ответчиком оставлены без рассмотрения, в связи с чем, истец обратился с настоящим иском в суд. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик), обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить ее.

Исходя из ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В силу ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 ГК РФ. 

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 715 ГК РФ).

В силу ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В соответствии со ст. 450.1 ГК РФ, предоставленное названным кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора), при этом договор прекращается с момента получения данного уведомления.

Как следует из разъяснений, данных в п. 14 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.11.2016г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны ( п. 3 ст. 307, п. 4 ст. 450.1 ГК РФ).

Исходя из представленных доказательств, а также обстоятельств дела, судом усматривается, что настоящий договор расторгнут истцом в одностороннем порядке.

При этом, возражая относительно суммы неотработанного аванса, ответчик ссылается на нарушение встречных договорных обязательств, а именно непредоставление строительной площадки и объекта по акту приема передачи строительной площадки.

Кроме того, ответчик указывает, что объект строительства сдан, что подтверждается подписанным между сторонами актом приемки законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией от 22.09.2022 г. 

Однако, суд не находит обоснованности изложенных доводов, поскольку факт наличия неотработанного аванса подтвержден документальными доказательствами. 

В силу ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Согласно ст. 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Пунктом 1 статьи 719 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

В соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. 

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.03.2011 N 14344/10, пунктом 3 статьи 405 ГК РФ должник освобожден от ответственности перед кредитором за нарушение срока исполнения обязательства только в случае, если должник по зависящим не от него, а от кредитора причинам не может исполнить обязательство в срок.

Исходя из представленных доказательств, ответчик не заявлял о приостановлении выполнения работ по контракту. 

Согласно Определению Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30.07.2015 N 305-ЭС15-3990 по делу N А40-46471/2014 следует, что поскольку заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, следовательно, обязанность по приемке выполненных работ возложена на заказчика. Риски неисполнения обязанности по организации и осуществлению приемки результата выполненных работ несет заказчик, поэтому уклонение от принятия работ не должно освобождать заказчика от их оплаты.

Акты выполненных работ хотя и являются наиболее распространенными в гражданском обороте документами, фиксирующими выполнение подрядчиком работ, в то же время не являются единственным средством доказывания соответствующих обстоятельств. Законом не предусмотрено, что факт выполнения работ подрядчиком может доказываться только актами выполненных работ (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Так, в определенных случаях в качестве доказательства выполнения работ может быть признан акт законченного строительством объекта

Между тем, в рамках настоящего дела, суд усматривает, что фактически ответчик не представил относимых, допустимых документальных доказательств сдачи выполненных работ.

Кроме этого, доказательств вызова заказчика для осмотра и сдачи выполненных работ в материалы дела не представлено.

Так, контракт заключён в порядке, определённом Закон №223-ФЗ, на основании осуществления закупки путём проведения запроса котировок, что следует из преамбулы Контракта.

Согласно котировочной заявке Ответчика от 14.09.2020 №б/н на участие в закупке на право заключить Контракт и приложенному к ней техническому приложению, Субподрядчик был ознакомлен с технической документацией и условиями Контракта, в связи с чем принял участие в проведении закупки на право заключить Контракт на изложенных в заявке условиях, в том числе относительно цены и сроков. 

Контракт заключён с Ответчиком как победителем конкурентной процедуры закупки на предложенных им в заявке условиях, в том числе относительно сроков окончания работ. По условиям Контракта, Ответчик обязался осуществить сбор исходных данных, которые не вошли в состав данных, представленных Генподрядчиком (п. 8.2.4 Контракта), и в указанных целях при необходимости вправе запросить у Генподрядчика доверенность на представление интересов в соответствующих организациях и органах (п. 8.1.3 Контракта).

Как указывалось выше, согласно котировочной заявке Ответчика от 14.09.2020 №б/н на участие в закупке на право заключить Контракт и приложенному к ней техническому приложению, Субподрядчик был ознакомлен с технической документацией и условиями Контракта, в связи с чем принял участие в проведении закупки на право заключить Контракт на изложенных в заявке условиях, в том числе относительно цены и сроков. 

Более того, Контрактом предусмотрено выполнение полного комплекса работ, т.е. Ответчик самостоятельно обязан был разработать проектную и рабочую документации, и на их основании выполнить работы по капитальному ремонту.

Вместе с тем, в период действия договора Ответчик запросов на выдачу доверенности не направлял и уведомлений об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ и не зависящих от самого Ответчика, работы не приостанавливал, уведомлений в порядке ст.ст. 716, 719 ГК РФ в адрес Истца не направлял. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

В соответствии с положениями Контракта, при расторжении Контракта до завершения работ Субподрядчик обязан передать Генподрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования выполненные до расторжения Контракта Работы (п. 20.8 Контракта).

Учитывая дату получения Ответчиком уведомления-претензии от 10.11.2022 №38/8962-дсп (23.11.2022), Работы, выполненные до расторжения Контракта и ранее не предъявленные для приёмки, при наличие таковых, подлежали сдаче в порядке, установленном разделом 13 Контракта, в срок не позднее 29.11.2022.

В соответствии с положениями п.п. 13.1.9-13.1.10 Контракта, сдача-приёмка выполненных строительно-монтажных работ за текущий (отчётный) месяц осуществляется по Журналу учёта выполненных работ (форма КС-6а), Акту о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Субподрядчик предоставляет Генподрядчику первичные учётные документы, а также исполнительную документацию на выполненные работы, оформленные должным образом, с сопроводительным письмом в срок не позднее 23 числа текущего (отчётного месяца).

В силу п. 13.1.11 Контракта, Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Субподрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний, и сроков их устранения. Субподрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний. При отсутствии замечаний Генподрядчик производит оплату выполненных работ за текущий (отчетный) месяц.

Исполнение всех обязательств Субподрядчика по Контракту (за исключением гарантийных) подтверждается подписанием сторонами итогового акта приёмки выполненных работ (п. 13.9 Контракта).

Согласно п. 1.1.12 Контракта, исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, выполненные в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства объектов капитального строительства и реконструкции по мере завершения определённых в проектной документации работ.

Обязанность Субподрядчика по ведению и предоставлению надлежащим образом оформленной исполнительной документации также предусмотрена п.п. 8.2.27, 8.2.35, 8.2.47, подп. 3 п. 23.2 Контракта.

Стоимость оформления исполнительной документации в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 включена в стоимость работ. 

Генподрядчик вправе отказаться от приёмки работ в случае не предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной документации (п.7.1.10 Контракта).

Из представленных доказательств следует, что 20.09.2022 года состоялся комиссионный осмотр выполненных на Объекте работ по Государственному контракту, результаты осмотра зафиксированы в акте осмотра от 20.09.2022.

Комиссией в составе Технического заказчика, Генподрядчика, органов военного управления и иных заинтересованных лиц установлено, что на момент осмотра выполнена часть работ, которые имеют существенные недостатки, а именно: межрельсовая часть резинокордового настила смещена на 4 см относительно остальных элементов покрытия, продольные стяжки крепления резинокордового настила не затянуты с каждой стороны; одна рельсовая накладка не затянута стыковыми болтами; расстояние между осями шпал 546 мм не соблюдено (фактическое расстояние менее 546 мм).

Учитывая, что Субподрядчик в нарушение положений Контракта к моменту проведения осмотра не обеспечил нахождение на строительной площадке уполномоченных лиц, комиссией в целях безусловного исполнения государственного оборонного заказа было принято решение о возложении обязанности исправить выявленные существенные недостатки и завершить выполнение работ силами ФГУП «ГВСУ по специальным объектам», после чего провести повторный осмотр.

По результатам выполненных Истцом работ, была проведена комиссионная приёмка, по результатам которой результат работ принят приёмочной комиссией по акту по форме КС-14, утверждённому 04.12.2022.

Учитывая, что в период выполнения работ, указанный в акте по форме КС-14 (01.09.2021-05.11.2022), между Истцом и Ответчиком имелись правоотношения по спорному Контракту, который расторгнут на основании уведомления-претензии от 10.11.2022 338/8962-дсп, во избежание разногласий, Субподрядчик был вызван для принятия участия в комиссионной приёмке работ, в связи с чем Ответчик достоверно знал, о том, что работы выполнены им некачественно и не в полном объёме, ни в период действия Контракта, доказательств Работы к приёмке не предъявлял, доказательств, подтверждающих качество и объём выполненных Работ в материалы дела не представил. 

В связи с изложенным, факт наличия неотработанного аванса подтверждается документальными доказательствами, ответчиком не оспорен.

При указанных обстоятельствах, после отказа от исполнения Договора, взаимные обязательства участвовавших в его исполнении сторон прекращаются и, соответственно, у ответчика отсутствуют законные основания для удержания денежных средств, перечисленных истцом в качестве аванса.

Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ, в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В силу ст. 1102 ГК РФ лицо,  которое  без  установленных  законом,  иными правовыми актами  или   сделкой   оснований  приобрело  или  сберегло  имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить  последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество  (неосновательное обогащение).

В соответствии с п. 2 ст. 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств. 

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными. 

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ. 

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными). 

В результате исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд пришел к выводу о необоснованности и документальной неподтвержденности доводов ответчика. 

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание тот факт, что доказательств сдачи выполненных работ со стороны ответчика в порядке, предусмотренным договором не представлено, суд приходит к выводу, что исковые требования о взыскании суммы неотработанного аванса в размере 2 367 169,31 руб. являются правомерными и подлежат удовлетворению.

Согласно п. 18.4 Контракта, в случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ/промежуточных сроков этапов Работ, установленных  в пункте 5.2. Контракта, Субподрядчик выплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ, не выполненных в надлежащий срок, за каждый день просрочки до даты фактического завершения Работ.

За нарушение срока сдачи работ, истец начислил ответчику сумму неустойки за период с 31.05.2021 г. по 15.11.2022 г. в размере 1 498 155 руб. 16 коп.,  расчет которого проверен судом и признан обоснованным. 

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, предусмотренной законом или договором неустойкой.

Стороны, вступая в гражданско-правовые отношения, самостоятельно определяют меры ответственности за неисполнение обязательств.

По смыслу статьи 330 ГК РФ по основаниям возникновения неустойка подразделяется на законную (нормативную) и договорную (добровольную).

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Из смысла приведенных выше нормативных положений следует, что договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон и, соответственно, ее размер, порядок исчисления, условия применения и т.п. определяются исключительно по их усмотрению. При этом Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает требования к форме соглашения сторон о неустойке (статья 331 ГК РФ): соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (часть 1 статьи 331 ГК РФ); несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Довод ответчика об отсутствии оснований во взыскании неустойки  отклоняется судом по следующим основаниям. 

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" постановлено:

1.Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

2.Положения пункта 1 настоящего постановления не применяются в отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Постановление вступило в силу с 01.04.2022.

Согласно п.3 ч.3 ст. 9.1 Федерального закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ  "О несостоятельности (банкротстве)" на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона.

Согласно абзацу десятому пункта 1 статьи 63 указанного  Федерального закона не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Учитывая вышеизложенное, поскольку истцом начислена неустойка за нарушение обязательства по неимущественному требованию, а именно за нарушение срока сдачи работ, суд,  в данном случае, не усматривает правомерных оснований для применения положений Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Отказывая в удовлетворении ходатайства о применении ст. 333 ГК РФ, суд исходит из нижеследующего.

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 14.10.2004 N 293-О гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Согласно п. 70 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 марта 2016 г. N 7 «О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» по смыслу статей 332, 333 ГК РФ, установление в договоре максимального или минимального размера (верхнего или нижнего предела) неустойки не являются препятствием для снижения ее судом.

Пунктом 73 разъяснено, что бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

Также в п. 77 указанного постановления Верховный суд Российской Федерации указал, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств, ответчиком не представлено и судом не установлено.

Размер неустойки соразмерен значительно превышающему ее основному долгу и определен судом с соблюдением принципов разумности, справедливости и с учетом баланса интересов обеих сторон.

Установленный договором размер неустойки не превышает в той значительной и недопустимой степени действующую на момент начала просрочки оплаты ставку рефинансирования Банка России, приравненной к ключевой ставке Банка России, согласно Указанию ЦБ РФ от 11 декабря 2015 г. № 3894-У «О СТАВКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ И КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ БАНКА РОССИИ».

Таким образом, принимая во внимание представленные в материалы дела доказательства, факт нарушения денежного обязательства подтвержден истцом, ответчиком не опровергнут, начисление неустойки произведено обоснованно, в связи с чем, требование истца о взыскании неустойки за период с 31.05.2021 г. по 15.11.2022 г. в размере 1 498 155 руб. 16 коп.,  подлежит удовлетворению, а сумма неустойки  в размере 1 498 155 руб. 16 коп. взысканию с ответчика.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании суммы процентов за период с 29.11.2022 г. по 26.12.2022 г. в размере 13 619 руб. 33  коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.12.2022 г. по день фактической оплаты суммы неосновательного обогащения.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Как следует из п. 39 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. N 7 «О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 августа 2016 года, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки исполнения денежного обязательства, имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно, если иной размер процентов не был установлен законом или договором, определяется в соответствии с существовавшими в месте жительства кредитора - физического лица или в месте нахождения кредитора - юридического лица опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Если иной размер процентов не установлен законом или договором, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки, имевшие место после 31 июля 2016 года, определяется на основании ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (пункт 1 статьи 395 ГК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года N 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Довод ответчика об отсутствии оснований во взыскании процентов  отклоняется судом поскольку обязательства по возврату суммы неосновательного обогащения возникли после расторжения настоящего контракта в ноябре 2022 года, то есть после принятия Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Таким образом, поскольку доказательств возврата суммы неосновательного обогащения  не представлено, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 29.11.2022 г. по 26.12.2022 г. в размере 13 619 руб. 33  коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 27.12.2022 г. по день фактической оплаты суммы неосновательного обогащения также подлежат взысканию.

Также истцом заявлены требования о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса с 17.11.2020 г. по 15.11.2022 г. в размере 1 171 510 руб. 51 коп.

Согласно п. 4.24 Контракта, в случае неисполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в срок, установленный пунктом 5.2. Контракта, Субподрядчик лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) средней ставки банковского процента по коммерческим кредитам, установленной Центральным банком Российской Федерации, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.

Из буквального толкования пункта 4.24 спорного Контракта следует, что стороны были намерены установить отношения по коммерческому кредиту, согласовав как право использования коммерческого кредита, так и условие об уплате за его использование процентов. Данное условие не противоречит положениям ст. 809, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации и соответствует п. 4 ст. 421 названного Кодекса.

В соответствии со ст. 823 ГК РФ договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит). К коммерческому кредиту применяются правила главы 42 ГК РФ.

В силу п. 1 ст. 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 12, 14 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» № 13/14 от 08.10.98г. (далее - Постановление № 13/14), согласно статье 823 ГК РФ к коммерческому кредиту относятся гражданско-правовые обязательства, предусматривающие отсрочку или рассрочку оплаты товаров, работ или услуг, а также предоставление денежных средств в виде аванса или предварительной оплаты. Если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства, к коммерческому кредиту применяются нормы о договоре займа (пункт 2 статьи 823 Кодекса).

Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом (в том числе суммами аванса, предварительной оплаты), являются платой за пользование денежными средствами. Проценты за пользование коммерческим кредитом подлежат уплате с момента, определенного законом или договором. Если законом или договором этот момент не определен, следует исходить из того, что такая обязанность возникает с момента получения товаров, работ или услуг (при отсрочке платежа) или с момента предоставления денежных средств (при авансе или предварительной оплате) и прекращается при исполнении стороной, получившей кредит, своих обязательств либо при возврате полученного в качестве коммерческого кредита, если иное не предусмотрено законом или договором. Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня передачи товара продавцом (пункт 4 статьи 488 Кодекса). Указанные проценты, начисляемые (если иное не установлено договором) до дня, когда оплата товара была произведена, являются платой за коммерческий кредит (статья 823 Кодекса).

Поскольку неустойка (пени) за нарушение сроков выполнения работ и проценты, за пользование коммерческим кредитом по своей правовой природе отличаются друг от друга, не являются двойной мерой ответственности за одно и тоже правонарушение, а являются самостоятельными обязательствами и не противоречат главе 25 ГК РФ, законодательство РФ допускает одновременного применения указанных мер, с учетом существа настоящего спора.

При взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом не подлежат применению положения ст. 333 ГК РФ, поскольку они предусматривают возможность снижения меры ответственности за нарушение обязательства, тогда как предоставление коммерческого кредита не является мерой ответственности, а представляет собой плату за пользование денежными средствами.

В период действия моратория на банкротство проценты за пользование деньгами по коммерческому кредиту не являются финансовыми санкциями и по общему правилу продолжают начисляться.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 4 Постановления N 13/14, следует, что проценты за пользование коммерческим кредитом по своей природе отличаются от процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, и не являются мерой гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательства, а являются платой за пользование денежными средствами, срок уплаты которых наступил, а должник продолжает пользоваться денежными средствами, причитающимися кредитору.

Таким образом, суд учитывает, что проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса за период с 17.11.2020 г. по 15.11.2022 г. в размере 1 171 510 руб. 51 коп. также подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по оплате госпошлине в размере 48 252  руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании ст. ст. 8-12, 309, 310, 330, 702, 711 ГК РФ, руководствуясь ст. ст.  64, 65, 67, 71, 110, 167-171, 176, 180 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СВЯЗЬ МОНТАЖ СТРОЙ" (111402, 

<

...> КОМНАТА 4, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.06.2005, ИНН: 

<

***>, КПП: 772001001) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ" (676470, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЦИОЛКОВСКИЙ ГОРОД, ДОМ ТЕР ВОЕННЫЙ ГОРОДОК №10, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.01.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 282301001) неосновательное обогащение в размере 2 367 169 (Два миллиона триста шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят девять) руб. 31 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами  за период с 29.11.2022 г. по 26.12.2022 г. в размере 13 619 (Тринадцать тысяч шестьсот девятнадцать) руб. 33  коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 27.12.2022 г. по день фактической оплаты суммы неосновательного обогащения, неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с 31.05.2021 г. по 15.11.2022 г. в размере 1 498 155 (Один миллион четыреста девяносто восемь тысяч сто пятьдесят пять) руб. 16 коп., проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса за период с 17.11.2020 г. по 15.11.2022 г. в размере 1 171 510 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча пятьсот десять) руб. 51 коп., расходы по оплате госпошлины  в размере 48 252 (Сорок восемь тысяч двести пятьдесят два) руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его  изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

                  Судья                                                                 А. А. Федоточкин