Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

дело № А42-574/2025

город Мурманск

16 июля 2025 года

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

иск НКО «ФКР МО» (ИНН 

<

***>) и администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (ИНН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать ООО «УНР-398» (ИНН 

<

***>) в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки (дефекты) капитального ремонта крыши и фасада многоквартирных домов, в рамках гарантийных обязательств по договору от 20.08.2019 № РТС251А190183, а именно:  

по крыше МКД № 13 по пр. Ленина устранить недостатки по устройству системы противообледенения, выполнив работы по креплению труб к поверхности кровельного покрытия в соответствии с требованием пункта 7.2 свода правил СП 17.13330.2017 и отраженному конструктивному решению на листе 11 чертежа «Телевизионная стойка» графической части раздела КР проектной документацией шифр 512-2018-КР с использованием саморезов с ЭПДМ-прокладкой (демонтаж кабеля 497 м; прокладка провода по перфорированным профилям, сечением до 6 мм 2497 м; нагревательный кабель 33НТР2-ВТ 497 м), провести пуско-наладочные работы, обеспечить работоспособность системы;  

по крыше МКД № 13 по пр. Ленина выполнить замену всего дефектного утеплителя чердачного перекрытия на площади 977 м2, объемом 100,63 м3 с демонтажем и последующим монтажом (с сохранением) верхней гидроизоляционной мембраны;  

по фасаду МКД № 13 по пр. Ленина выполнить полную расчистку отделки дефектных участков стен рустованных фасадов на площади до 1257,5 м2 с последующей грунтовкой, шпаклевкой, окраской;  

по фасаду МКД № 13 по пр. Ленина выполнить полную расчистку дефектных участков стен и откосов гладких фасадов на площади до 1419 м2 (площадь оплаченных работ 1422-3 м2 = 1419 м2), с последующей грунтовкой, шпаклевкой, окраской;  

по фасаду МКД № 13 по пр. Ленина выполнить полную расчистку дефектных участков нижних поверхностей козырьков на площади до 50 м2 со стороны дворового фасада с последующей грунтовкой и окраской;  

по крыше МКД № 15 по пр. Ленина выполнить комплекс работ по приведению в работоспособное состояние системы противообледенения и проведению пусконаладочных работ;  

по крыше МКД № 15 по пр. Ленина выполнить замену всего дефектного утеплителя чердачного перекрытия на площади 1162,76 м2 объемом 135,79 м3 с демонтажем и последующим монтажом (с сохранением) верхней гидроизоляционной мембраны;  

по крыше МКД № 15 по пр. Ленина заменить поврежденные элементы кровельного  

ограждения в объеме 156 м.п.; 

по крыше МКД № 15 по пр. Ленина выполнить герметизацию мастикой швов  

горизонтальных в местах примыкания кровельного покрытия к парапету в объеме 19 м.п.; по крыше МКД № 15 по пр. Ленина выполнить монтаж открытия парапета в районе  

подъезда № 1 на площади до 20 м2. 

Передать результат работ НКО «ФКР МО» и администрации муниципального округа  

город Кировск Мурманской области по акту приема-передачи. 

Взыскать с ООО «УНР-398» (ИНН 

<

***>) в пользу НКО «ФКР МО» (ИНН  

<

***>) 25000 рублей судебных расходов. 

Взыскать с ООО «УНР-398» (ИНН 

<

***>) в федеральный бюджет 25000  

рублей государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца после  

его принятия. 

Судья Р.С. Дубровкин