Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-11348/2018

04 сентября 2018 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 28 августа 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 04 сентября 2018 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Щепелина Ю.П., при ведении протокола заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, Пионерная промышленная зона, улица Нефтяников, дом 26, квартира 21) к обществу с ограниченной ответственностью "ПОДВОДТРУБОПРОВОДСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 140181, 

<

...>) о взыскании 571 726 рублей 08 копеек,

при участии представителей:

от истца - не явились,

от ответчика - ФИО2 по доверенности от 02.04.2018 № 0204/18-1,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ПОДВОДТРУБОПРОВОДСТРОЙ" (далее – ответчик) о взыскании 571 726 рублей 08 копеек – основная задолженность. В качестве основания для удовлетворения требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору субподряда от 20.01.2013 № 2-149п/01/2012-НЮ (далее – договор).

Представители истца для участия в судебное заседание не явился, извещен.

Возражения сторон относительно рассмотрения дела в отсутствие представителей в материалы дела не поступили.

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассмотрел дело по существу по имеющимся в деле доказательствам в отсутствие надлежаще извещенного истца.

Изучив материалы дела и доводы истца, суд установил нижеследующее.

20 января 2013 года между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор.

В соответствии с пунктами 2.1, 2.2, 2.3 договора Субподрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта: «Нефтегазосборные сети т. вр. 2 - т. вр. узел № 12 (ЛЫС Омбинская)» Омбинское месторождение, а Подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Субподрядчик обязуется выполнить все работы по строительству объектов, указанных в пункте 1.8 настоящего договора собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с техническим заданием, утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственннными строительными нормами (ВСН) и сдать их Подрядчику.

Субподрядчик обязуется завершить строительство и сдать законченный объект, готовый к эксплуатации, в установленные подрядчиком сроки, предусмотренные настоящим договором.

Стоимость договора определена в разделе 3 договора.

Пунктом 3.1 договора стоимость работ по настоящему Договору определяется (Приложение № 1) по фактически выполненным работам согласно проектно-сметной документации и является открытой (с возможностью корректировки по фактическим выполненным работам) и составляет 8 085 531 рубль 10 копеек, в том числе НДС 1 233 386 рублей 10 копеек и уточняется сторонами после утверждения и выдачи Заказчиком 100% проектно-сметной документации путем заключения Дополнительного соглашения, при этом индексы перевода в текущие цены остаются неизменными (Приложение №4).

Пунктом 4.1 договора установлено, что календарные сроки выполнения работ определяются Графиком производства работ, составленным по этапам строительства (Приложение № 2).

Начало производства работ по объекту - 26 апреля 2013 года;

Окончание производства работ по объекту и сдачи объекта Заказчику - 15 октября 2013 года.

В пункте 6.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 15.01.2014 № 1 Подрядчик в течение 90 банковских дней после получения целевых финансовых средств от Заказчика, но не позднее 120 дней (при условии представления Субподрядчиком документов, указанных в пункте 5.1.15), частично (90%) оплачивает Субподрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ (согласно Графика производства работ) в соответствии с положениями настоящего Раздела денежными средствами на основании подписанной формы КС-3, КС-2 и счета-фактуры, передаваемых Подрядчику в 3 экземплярах.

Подрядчик до окончания строительства объекта резервирует 10% от стоимости услуг. Оплата зарезервированной части Субподрядчику производится при наличии подписанного акта приемки законченного строительством объекта (Форма КС-11), при наличии положительных заключений государственных органов надзора и сдачи исполнительной документации Подрядчику, в соответствии с пунктом 11.6 настоящего договора (пункт 6.2 договора).

Окончательный расчет за выполненные работы производится Подрядчиком в течение 15 банковских дней после получения целевых финансовых средств от Заказчика, после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенного строительством объекта при условии поступления на расчетный счет Подрядчика денежных средств от Заказчика за выполненные Субподрядчиком работы и предоставления Субподрядчиком Гарантии исполнения договорных обязательств в соответствии с разделом 8 настоящего договора (пункт 6.3 договора).

Приемка законченного строительством объекта определена в разделе 14 договора:

- пункт 14.1.  Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора строительного подряда.

- пункт 14.2.  После окончания работ на объекте, входящих в объемы обязательств Субподрядчика по настоящему договору, производится сдача Субподрядчиком объекта Подрядчику. Подрядчик, получивший сообщение Субподрядчика о готовности к сдаче результата выполненных строительных работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

- пункт 14.3.  До приемки законченного строительством объекта Субподрядчик подписывает в инспектирующих органах Государственного надзора Заключения о соответствии предъявляемого объекта ПСД, ТУ и СНиП к Акту приемки законченного строительством объекта (Типовая межотраслевая форма № КС-11, утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99.г. № 100). Кроме того, Субподрядчик подписывает документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).

- пункт 14.4.  Субподрядчик передает Подрядчику за десять дней до начала приемки завершенного строительством объекта акты комплексного опробования оборудования, акты приемки оборудования в эксплуатацию, два экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (в формате PDF Adobe Acrobat). Исполнительная съемка построенного объекта должна быть представлена в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03.84 (геодезические работы в строительстве), и составлена в программе MAP-INFO.

- пункт 14.5.  Приемка осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами.

- пункт 14.6.  В случае если во время приёмки Объекта, Подрядчиком будут обнаружены недостатки, дефекты, упущения в выполненных работах или несоответствия их проектной документации, Субподрядчик устранит их за свой счёт в сроки, установленные с Подрядчиком. При невыполнении Субподрядчиком этой обязанности, а также на своё усмотрение, Подрядчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от Субподрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

- пункт 14.7.  При отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней подписать "Акт сдачи/приёмки законченного строительством Объекта".

Настоящий Договор вступает в силу с 20 января 2013 года и действует по 31 марта 2014 года (пункт 24.1 договора).

Рассматриваемые отношения сторон регламентируются соответствующими нормами раздела III и параграфа 3, 5 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По Договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам Договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, если иное не установлено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этих видах Контрактов (статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по Договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный Договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в Договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Согласно пункту 1 статьи 746 названного Кодекса оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьёй 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Из материалов дела следует, что во исполнение обязательств по договору истец выполнил работы на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат по  Форме № КС-3:

- от 20.12.2013 на 5 184 580 рублей 63 копейки (оплата по 21.04.2014, в соответствии со статьей 193 ГК РФ), 31.12.2013 зачет на 4 648 466 рублей 48 копеек, задолженность 4 666 122 рубля 56 копеек;

- от 20.11.2014  на 4 848 756 рублей 93 копейки (оплата по 18.02.2015), 30.11.2014 зачет на 2 376 976 рублей 12 копеек, 30.11.2014 зачет на 565 831 рубль 23 копейки, 30.11.2014 зачет на 187 361 рубль 88 копеек, 30.11.2014 зачет на 605 091 рубль 82 копейки, 31.12.2014 зачет на 74 190 рублей 59 копеек, 30.06.2015 зачет на 81 715 рублей, задолженность 4 363 881 рубль 24 копейки;

- от 31.08.2015 на 102 155 рублей 92 копейки (оплата по 29.12.2015), зачет на 6 065 рублей 97 копеек, задолженность 91 940 рублей 33 копейки.

Общая сумма резерва составила 1 013 549 рублей 26 копеек, отчет по форме КС-11 не представлен, задолженность составила 9 121 944 рубля 13 копеек, зачеты на 8 546 144 рубля 47 копеек, оплачено 1 017 622 рубля, следовательно с учетом взаимозачетов сумма составила 9 563 767 рублей 40 копеек.

Также ответчик заявил о пропуске срока исковой давности, предусмотренный статьей 196 ГК РФ. Срок исковой давности по справке по форме КС-3 от 20.12.2013 истек, следовательно 20.11.2014 срок пропущен.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (части 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Основываясь на материалах дела, доводах сторон по делу, суд счел исковое заявление не подлежащим удовлетворению.

Исходя из размера рассмотренных исковых требований, подлежащая уплате государственная пошлина в соответствии с пунктом 6 статьи 52, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составила 14 435 рублей.

Государственная пошлина истцом при подаче искового заявления не уплачена. Определением суда от 30.07.2018 истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

В соответствии со статьями 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд отнес судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 435 рублей на истца.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7" оставить без удовлетворения.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7" в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу уплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14 435 рублей.

В случае неисполнения решения суда в указанной части выдать исполнительный лист.

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                  Ю.П. Щепелин