АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-9975/2023

г. Владивосток

24 августа 2023 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Бурова А.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску фонда Приморского края "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Семь Футов" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 3 488,87 руб.,

установил:

фонд Приморского края "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Семь Футов"  о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором от 06.07.2021 № РТС225А210052(Д) в размере 3 488,87 рублей.

Истец, ответчик, о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства уведомлены надлежащим образом.

Решение по настоящему делу принято арбитражным судом 14.08.2023 согласно части 1 статьи 229 АПК РФ путем подписания резолютивной части решения, разместив ее на официальном сайте арбитражного суда в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

От истца поступила апелляционная жалоба, в связи с чем, в соответствии с пунктом 39 Постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 18.04.2017 №10 «О некоторых вопросах применения судами положений гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» судом изготовлено мотивированное решение.

Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком срока выполнения работ, в связи с чем истцом  начислены штрафные санкции, предусмотренные договором.

Ответчик требования оспорил, по доводам, изложенным в отзыве; заявил о применении ст. 333 ГКРФ.

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

Между Фондом Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Семь Футов» (Подрядчик) был заключен договор от 06.07.2021 № РТС225А210052(Д) на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества   многоквартирных    домов,    расположенных    на   территории Владивостокского городского округа и Уссурийского городского округа (далее - Договор), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту, в том числе, системы холодного водоснабжения многоквартирного дома № 3 по ул. Приморской в г. Владивостоке (далее - объект), а Заказчик принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену (пункт 1.1. договора).

В Приложении № 3 к Договору установлен срок выполнения работ по ремонту системы холодного водоснабжения многоквартирного дома № 3 по ул. Приморской в г. Владивостоке - до 01 ноября 2021 года.

Согласно пунктам 4.1, 4.4 Договора Подрядчик обязан выполнить работы в полном объеме согласно Техническому заданию и в сроки, указанные в пункте 1.2 Договора и сдать Заказчику выполненные работы по актам в порядке, установленном Договором.

В соответствии с пунктом 8.2 Договора работы считаются принятыми после подписания заказчиком форм КС-2 и КС-3, подписания членами приемочной комиссии и согласования в соответствии с требованиями Закона Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» акта приемки выполненных работ, подтвержденных исполнительной документацией и актами на скрытые работы.

Приемочной комиссией 25.02.2022 была проведена приемка выполненных работ, по итогам которой составлен Акт приемки выполненных работ (копия прилагается).

Поскольку работы были сданы с нарушением установленного срока (после 01.11.2021) Фондом 22.08.2022 в адрес ООО «Семь Футов» была направлена претензия № 06-исп/07609-пд о начислении неустойки в размере 3 488 (три тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей 87 копеек за нарушение срока выполнения работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения многоквартирного дома № 3 по ул. Приморской в г, Владивостоке.

Период просрочки исполнения обязательств составляет 116 дней – с 02.11.2021 по 25.02.2022.

В то же время, учитывая уведомление Подрядчика об окончании работ на объекте (входящий от 22.11.2021 № 15751-пд), Заказчик считает возможным сократить количество дней просрочки на 95 дней.

Таким образом, по расчету истца период просрочки выполнения работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения многоквартирного дома № 3 по ул. Приморской в г. Владивостоке составляет 21 день. Размер неустойки составляет 3 488 (три тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей 87 копеек (227 344,76x21 деньх9,50%х 1/130).

Поскольку претензионное требование об уплате штрафных санкций оставлено ответчиком без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Оценив доводы сторон и представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд отказал в удовлетворении требований на основании следующего.

Правоотношения сторон подлежат регулированию положениями главы 37 ГК РФ о подряде, а также общими нормами об исполнении обязательств.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (статья 329 ГК РФ).

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 13.3. спорного договора предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик имеет право предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В пункте 13.4 Договора установлено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер пени устанавливается в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены.

Из материалов дела судом установлено, что работы по договору от 06.07.2021 № РТС225А210052(Д) по объекту многоквартирный дом №3 ул. Приморской, г. Владивосток, были выполнены 29.10.2021. О завершении работ на объекте Заказчик был уведомлен письмом (б/н от 29.10.2021 года), о чем имеется штамп Заказчика о получении письма (вх. 14802-пд от 29.10.2021). Доказательств, что работы имели существенные недостатки на вышеуказанную дату суду не представлено.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства с учетом статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил, что обязательства по договору исполнены ответчиком  в установленный договором срок, в связи с чем суд не находит оснований для привлечения подрядчика к ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по договору; основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

В силу статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 АПК РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

В иске отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение 15 дней со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                          Буров А.В.