Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-1424/2022

«06»

мая

2022 года

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

рассмотрев в упрощенном порядке дело по иску ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "ЦЕНТР ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 325 899 рублей

установил.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙ" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ" о взыскании неустойки в сумме 325 899 рублей.

Дело рассмотрено в упрощенном порядке.

В связи с отпуском судьи полный текст решения изготовлен 06.05.2022 года.

Установлено.

Между сторонами был заключен договор подряда от 09.11.2018 года № ЭС-30/11/18.

По условиям договора ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (подрядчик) обязался выполнить внутренние электромонтажные работы на объекте «Торговый центр по улице Генерала Челнокова в г. Калининграде», а ООО "ЦЕНТР ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ"  (заказчик) обязалось работы принять и оплатить.

В соответствии с пунктами 4.1, 4.4 договора стоимость работ по смете составляет 10 000 0000 рублей, цена договора может быть скорректирована.

В соответствии с пунктом 4.3 договора предоплата по договору составляет 1 500 000 рублей.

В соответствии с пунктом 4.5 договора окончательный расчет за фактически выполненные работы производится в течение 5 банковских дней после подписания итогового акта сдачи-приемки работ.

В соответствии с пунктом 6.3 договора за просрочку расчетов заказчик выплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

В период с 10.12.2018 года по 30.05.2019 года подрядчик сдал работы на сумму 11 468 903 рублей.

В период с 16.11.2018 года по 07.11.2019 года заказчик оплатил работы в сумме 11 468 903 рублей.

В связи с нарушением срока оплаты выполненных работ подрядчиком за период с 07.06.2019 года по 07.11.2019 года по положениям пункта 6.3 договора произведен расчет неустойки в сумме 325 899,79 рублей.

Ответчик просил применить положения статьи 333 ГК РФ и снизить размер неустойки.

 Учитывая  авансирование заказчиком работ к дате их окончания на сумму 6 940 158 рублей, период просрочки оплаты, размер договорной процентной ставки, суд применяет положения статьи 333 ГК РФ и устанавливает размер ответственности за нарушение срока оплаты в размере 125 000 рублей.

Требования истца в части неустойки в сумме 125 000 рублей подлежат удовлетворению на основании положений статьи 330 ГК РФ, положений контракта. 

Руководствуясь статьями 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за нарушение срока оплаты работ по договору подряда от 09.11.2018 № ЭС-30/11/18 за период с 07.06.2019 по 07.11.2019 в сумме 125 000 рублей, расходы по госпошлине в сумме 9518 рублей.

Во взыскании остальной суммы отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия решения в полном объеме.

СудьяО.Н. Шкутко