АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

 

  Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А32-41054/2018

10 декабря 2018 года

г. Краснодар

 

Резолютивная часть решения объявлена 05 декабря 2018г. Полный текст решения изготовлен 10 декабря 2018г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Алферовской В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)________________________________________

к государственному унитарному предприятию Республики Крым «Феодосийский судомеханический завод», (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) _______________________________________________________

о взыскании 1 083 239 руб. 75 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2-доверенность от 04.12.2017г.,

от ответчика: не явился, 

 

установил:

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к государственному унитарному предприятию Республики Крым «Феодосийский судомеханический завод» о взыскании 972 417 руб. 46 коп. неотработанного аванса, 110 822 руб. 29 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.04.2017г. по 04.09.2018г.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на исковое заявление суду не представил, определение суда не исполнил. 

Ответчик, надлежащим образом уведомленный в порядке статьи 123 АПК РФ о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда, явку своих представителей не обеспечил, определение суда не выполнил.

Согласно части 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта. Информация о принятии искового заявления или заявления к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Документы, подтверждающие размещение арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанных сведений, включая дату их размещения, приобщаются к материалам дела.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 4 постановления от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» разъяснил, что при применении данного положения судам следует исходить из части 6 статьи 121, части 1 статьи 123 АПК РФ, в соответствии с которыми арбитражный суд к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия должен располагать сведениями о получении лицом, участвующим в деле, иным участником арбитражного процесса копии первого судебного акта по делу либо иными сведениями, указанными в части 4 статьи 123 АПК РФ. В силу статьи 123 АПК РФ, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, проведения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если: 1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован; 2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд; 3) копия судебного акта, направленная арбитражным судом по последнему известному суду месту нахождения организации, месту жительства гражданина, не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд. Первым судебным актом для лица, участвующего в деле, является определение о принятии искового заявления (заявления) к производству и возбуждении производства по делу (часть 6 статьи 121 АПК РФ).

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Согласно части 4 статьи 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Руководствуясь частью 4 статьи 137 АПК РФ, суд завершил предварительное заседание и открыл заседание арбитражного суда первой инстанции.  

В судебном заседании, проходившем 28 ноября 2018г., на основании части 1 статьи 163 АПК РФ, был объявлен перерыв до 17 час. 40 мин. 05 декабря  2018г.  Информация о перерыве была размещена на официальном сайте Арбитражного суда Краснодарского края. После перерыва заседание продолжено.

В соответствии с частью 2 статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, заслушав доводы и пояснения представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства, касающиеся существа спора.

Стороны подписали договор № 55/16 от 21 июня 2016г., по условиям которого ответчик принял на себя обязательство выполнить работы в соответствии с ведомостью исполнения работ.

Согласно пункту 1.2 договора содержание работ, стоимость  и сроки их окончания  в 2016 году определяются ведомостью исполнения работ и ограничиваются следующими отчетными датами:

-Начало работ: со дню заключения договора,

-окончание работ: 30 июля 2016г.,

Согласно пункту 3.1 договора цена договора составляет 1 944 834 руб. 91 коп., включая НДС, и является твердофиксированной.

Стороны подписали дополнительное соглашение № 2 от 29 августа 2016г.,  которым продлили сроки выполнения работ до 31 октября 2016г.

Стороны подписали дополнительное соглашение № 1619187304811442209010486/3  от 23.12.2016г. к договору № 55/16 от 21.06.2016г., по условиям которого заказчик в течение 10 рабочих дней с момента окончательной приемки результатов работ, выполненных исполнителем, и выставления счета, производит  полную оплату стоимости работ, в размере 1 944 834 руб. 91 коп. с расчетного счета акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», открытого для исполнения государственного контракта № 1619187304811442209010486 от 22 декабря 2016г., на отдельный расчетный счет ГУП РК «ФСМЗ», открытый во исполнение государственного контракта.

В соответствии с пунктом 6 дополнительного соглашения исполнитель обязан возвратить на течение 10 рабочих дней с момента получения оплаты от заказчика в соответствии  с пунктом 5 настоящего соглашения, аванс в размере 972 417 руб. 46 коп., полученного до подписания настоящего соглашения.

Согласно пункту 7 соглашения в случае нарушения исполнителем срока возврата аванса, заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты штрафа в размере 500 000 рублей и неустойки в размере 0,1 процента от не перечисленной суммы за каждый день просрочки  возврата аванса. 

Ответчик выполнил работы на сумму 1 228 360 руб. 14 коп., что подтверждается подписанным актом № 01 сдачи-приемки выполненных работ от 31.10.2016г.

Истец на расчетный счет ответчика перечислил денежные средства в размере 972 417 руб. 46 коп., что подтверждается платежным поручением № 97403 от 22.08.2016г. и 1 228 360 руб. 14 коп., что подтверждается платежным поручением № 97748 от 27.03.2017г.

Истец в адрес ответчика направил претензию № 877/1005 от 31.05.2017г., в которой предложил в добровольном порядке в течение 10 банковских дней перечислить денежные средства.

Ответчик на данную претензию не отреагировал, денежные средства не возвратил, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно нормам главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства возникают также из неосновательного обогащения. 

Согласно части 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Для возникновения обязательства из неосновательного обогащения необходимо наличие трех условий: имело место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение произведено за счет другого лица (потерпевшего); приобретение или сбережение имущества произошло в отсутствие сделки или иных оснований.

Перечисленные условия, а также размер неосновательного обогащения должен быть доказан потерпевшим, обратившимся в суд с соответствующим иском.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Материалами дела подтверждается перечисление истцом денежных средств ответчику в размере  972 417 руб.  46 коп. и ответчиком не оспаривается.

В соответствии со статьей 131 АПК РФ ответчик направляет в арбитражный суд отзыв на исковое заявление с приложением документов, которые подтверждают возражения относительно иска. 

Определениями суда ответчику предлагалось предоставить отзыв по существу заявленных требований и  дополнительные доказательства, а также были даны разъяснения последствия неисполнения ответчиком названных процессуальных действий. 

Между тем, до начала судебного разбирательства отзыв и доказательства выполнения работ в полном объеме ответчиком не были предоставлены, а обстоятельства иска им не оспорены.

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11, в соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Поскольку ответчик не представил суду доказательств погашения задолженности, исковые требования по существу и сумме задолженности не оспорил, требование истца о взыскании 972 417 руб. 46 коп. подлежит удовлетворению.

Также истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 110 822 руб. 29 коп. за период с 11.04.2017г. по 04.09.2018г.

Ответственность за неисполнение денежного обязательства предусмотрена в статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в редакции, вступившей в силу с 01.08.2016г., определяются ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Арифметическая правильность расчета процентов за пользование чужими денежными средствами ответчиком не оспорена (статьи 9, 65 АПК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции ФЗ от 08.03.2015 N 42-ФЗ) и разъяснениями пункта 84 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

Пунктом 7 дополнительного соглашения предусмотрено, что в случае нарушения исполнителем срока возврата аванса, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 процента от неперечисленной суммы за каждый день просрочки возврата аванса.

При этом, положения части 4 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 и в ответе на вопрос 2 раздела «Обязательственное право» Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 06.07.2016, не исключают возможности удовлетворения исковых требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, если законом или соглашением сторон на случай нарушения денежного обязательства предусмотрена соответствующая неустойка, при условии, что их размер не превышает сумму неустойки, подлежащую взысканию.

Поскольку заявленное истцом требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами не превышает сумму неустойки, предусмотренной договором, суд пришел к выводу о возможности удовлетворения требований истца о взыскании с ответчика процентов.

Также истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами с 05.09.2018г. по день фактической оплаты долга.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 48 постановления Пленума № 7, сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом, день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). С 01.08.2016 размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истец при подаче искового заявления оплатил государственную пошлину в размере 23 832 руб., что подтверждается платежными поручениями № 1059 от 12.09.2018г., № 353 от 18.04.2017г.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110-112,  137, 167-170, 176, 181 АПК РФ, арбитражный суд

 

                                                    Р Е Ш И Л :

 

1.  Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с государственного унитарного предприятия Республика Крым «Феодосийский судомеханический завод» в пользу акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» 972 417 руб. 46 коп. неосновательного обогащения, 110 822 руб. 29 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.04.2017г. по 04.09.2018г., а также 23 832 руб. расходов на оплату государственной пошлины.

3. Взыскать с государственного унитарного предприятия Республика Крым «Феодосийский судомеханический завод» в пользу акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации проценты за пользование денежными средствами, рассчитанными исходя из ключевых ставок, установленных Банком России и действующих в соответствующие периоды просрочки, начисленные на сумму 972 417 руб. 46 коп., начиная с 05.09.2018г. по день фактической оплаты.

4. Исполнительный лист выдать истцу после вступления решения суда в законную силу.

5. Настоящее решение может быть обжаловано в течение месячного срока со дня его принятия в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Краснодарского края.           

 

 СУДЬЯ                                                                                     В.В. Алферовская