1 9 

26/2023-112244(1) 

о к 

т 

 я б 

Арбитражный суд Рязанской области р 

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108; я 

http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru   

 2 

Именем Российской Федерации 0

 2

3 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 г

г. Рязань Дело № А54-6255/2023 о д 

19 октября 2023 года  

а  

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 19 октября 2023 года. 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Колбасовой Е.В.,  руководствуясь статьями 110, 167, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Факел" (ОГРН  

1037705031704; 115573, 

<

...>) в срок  

до 01 мая 2024 г. своими силами, средствами и за свой счет, устранить недостатки  

(дефекты) выполненных работ на основании договора № РТС262А170102(Д) от  

04.05.2017 по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>- 

рягина, д.16, зафиксированные в рекламационном акте от 21.04.2022 путем поэтапного выполнения работ, а именно:  

- • Демонтаж покрытия из наплавляемых материалов к фановым трубам - 1,5  

м2; • Демонтаж чугунных труб диаметром 100 мм в квартирах - 4 м/п; 

• Наращивание фановых труб трубами ПВХ диаметром 110 мм -7 м/п;  • Огрунтовка основания - 3 м2;  

• Устройства покрытия из наплавляемых материалов в два слоя -3 м2;  

• Устройство примыканий из наплавляемых материалов высотой до 600 мм с  

прижимной лентой и последующей промазкой битумной мастикой - 1,1 м/п; 

• Промазка швов рулонного ковра битумной мастикой - 12 м/п; • Погрузка мусора - т/факт; • Вывоз мусора - т/факт., а также рекламационном акте от 17.06.2022, а именно 

• Демонтаж кровельного покрытия из рулонных материалов - 5 м/п, 3 м2;  

• Огрунтовка под ковер - 4 м/п;  

• Устройства примыканий из наплавляемых материалов высотой до 600 мм с  

прижимной лентой и последующей промазкой битумной мастикой - 6 м/п; • Промазка швов рулонного ковра битумной мастикой - 10 м/п; • Погрузка мусора - т/факт; • Вывоз мусора - т/факт. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Факел" (ОГРН  

1037705031704; 115573, 

<

...>) в  

пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области  

(ОГРН 

<

***>; 390046, 

<

...>) судебные  

расходы по госпошлине в сумме 6000 руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.  

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная  жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.  

Судья Е.В. Колбасова