АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Дело № А27-6356/2024 

Р Е Ш Е Н И Е именем Российской Федерации резолютивная часть  

26 марта2025 г. г. Кемерово 

 Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Куликовой Т.Н, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Давтян А.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Агрик-Кровельные системы", г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>  

к обществу с ограниченной ответственностью "СДС - Строй", г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>  

о взыскании 2 511 239, 08 руб. долга по договору № 99920190000000000006/2034-20 от 30.10.2020, 2 328 368, 68 руб. неустойки с начислением до момента фактического исполнения обязательства  

и встречное исковое требование общества с ограниченной ответственностью "СДС - Строй"  

к обществу с ограниченной ответственностью "Агрик-Кровельные системы" 

о взыскании 8 292 105,34 руб. пени за нарушение сроков выполнения работ по договору № 99920190000000000006/2034-20 от 30.10.2020,  

третьи лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Фонд проектов социального и культурного назначения "НАЦИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОГНЕЩИТ" ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ УНИКАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ "АРЕНА" ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

акционерное общество "СТРОЙТРАНСГАЗ-СИБИРЬ" ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>  

Руководствуясь статьями 110, 167, 171, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

решил:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Филком", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> удовлетворить частично.  

Взыскать с обществу с ограниченной ответственностью "СДС - Строй", г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> в пользу общества с ограниченной ответственностью "Агрик-Кровельные системы", г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>: 2 125 738,98руб. долга, 489 908,98 руб. неустойки за нарушение сроков оплаты работ по состоянию на 26.03.2025, с начислением неустойки в размере 0,1% от суммы долга (2 125 738,98 руб.), начиная с 27.03.2025 по день оплаты задолженности (2 125 738,98 руб.), 385500,10 руб. гарантийного удержания, 107 058, 13 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 26.03.2025, с начислением процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Банка Российской Федерации от суммы гарантийного  

удержания (385500,10 руб.), начиная с 27.03.2025 по день фактического исполнения обязательства по взысканию суммы гарантийного удержания (385500,10 руб.), а также 30183, 29 руб. расходов на оплату судебной экспертизы, 15099,44 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части требований общества с ограниченной ответственностью "Агрик-Кровельные системы", г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СДС - Строй", г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> в доход федерального бюджета 15211 руб. государственной пошлины за рассмотрение первоначальных требований.  

 Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "СДС - Строй", г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Агрик-Кровельные системы", г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> в пользу общества с ограниченной ответственностью "СДС - Строй", г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>: 1 748 368, 10 руб. неустойки, а также 13951,64 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части требований общества с ограниченной ответственностью "СДС - Строй", г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> отказать.  

Произвести процессуальный зачет, в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СДС - Строй", г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> в пользу общества с ограниченной ответственностью "Агрик-Кровельные системы", г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>: 734 569,80 руб. долга, неустойки за нарушение сроков оплаты работ в размере 0,1% от суммы долга (734 569,80 руб.), начиная с 27.03.2025 по день оплаты задолженности (734 569,80 руб.), 385500,10 руб. гарантийного удержания, с начислением процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Банка Российской Федерации от суммы гарантийного удержания (385500,10 руб.), начиная с 27.03.2025 по день оплаты суммы гарантийного удержания (385500,10 руб.).  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.  

Судья Т.Н. Куликова