68/2019-3664(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-44758/2018

г. Новосибирск

14 января 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Печуриной Ю.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фединой Ю.А., 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л:

изменить Муниципальный контракт от 27 июля 2018 г. № 15/18 на  выполнение работ по реконструкции магистральной теплотрассы 2Ду600мм  от тепловой станции – ТК139-ЦТП на участке от ТК125а до ТК122, длинной  470 м в р.п. Кольцово, заключенный между Заказчиком - Администрацией  рабочего поселка Кольцово и Подрядчиком - обществом с ограниченной  ответственностью «Вилон», в части указания сроков выполнения работ и  изложить п. 3.3 Муниципального контракта от 27 июля 2018 г. № 15/18 в  следующей редакции: «Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в  полном объеме: начало работ с момента подписания Контракта, дата  окончания выполнения Работ на Объекте – «31» августа 2019 года».  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия  в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск).  

 Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Ю.А. Печурина