РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   28 октября 2024 года    

по делу № А33-23941/2024 Красноярск  

«28» октября 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в течение 30 календарных дней с момента вступления в законную силу  решения суда по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям № 20.0400.2117.20 от 20.01.2021,  заключенного между публичным акционерным обществом «Россети Сибирь» и публичным  акционерным обществом «Мобильные телесистемы» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) предусмотренные разделом 10 технических условий № 8000425012 к  указанному договору, а именно:   

- обеспечить возможность действиями заявителя осуществить фактическое  присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу)  напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя  электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской  Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии  (мощности) на розничном рынке.  

Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих  электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические  сети» для электроснабжения объектов заявителя:  

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов  проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением  Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными  организациями в соответствии с действующим законодательством;  

- построить ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до точки  присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы,  установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и  сечение провода определить проектом;  

- определить необходимость установки коммутационного аппарата 0,4 кВ в ТП-30-8-35,  в случае необходимости, тип и технические параметры определить проектом;  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков  электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №  442).  

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Мобильные  

телесистемы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 5 000 руб. судебной неустойки за  каждый день просрочки исполнения решения суда.  

В удовлетворении требования в остальной части отказать. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Мобильные  телесистемы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. судебных расходов по  оплате государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Н.А. Варыгина