АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

26 июля 2024 года

 

Дело № А33-3756/2023

Красноярск

 

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 18.07.2024.

В полном объёме решение изготовлено 26.07.2024.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Варыгиной Н.А., рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>, с. Ирбейское Ирбейского района Красноярского края)

о взыскании задолженности,

по встречному иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>, с. Ирбейское Ирбейского района Красноярского края)

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

об осуществлении технологического присоединения, взыскании судебной неустойки,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

- публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, г. Красноярск),

- общества с ограниченной ответственностью «Ромашка-2» (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>, с. Ирбейское Ирбейского района Красноярского края),

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Клевлиной Ю.Н., 

 

установил:

публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь», истец по первоначальному иску) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1  (далее – ИП ФИО1, ответчик по первоначальному иску) о взыскании 49 923,26 руб. задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения от 10.11.2021 № 20.3400.6371.21.

Определением от 14.02.2023 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

Определением от 03.04.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, назначены предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по делу.

Определениями от 20.07.2023 и от 04.12.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц судом привлечены публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (далее – ПАО «Красноярскэнергосбыт»), общество с ограниченной ответственностью «Ромашка-2» (далее – ООО «Ромашка-2»).

Определением от 26.07.2023 для рассмотрения совместно с первоначальным иском судом принято встречное исковое заявление ИП ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» об обязании  исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании судебной неустойки в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, для участия в судебное заседание не явились, представителей не направили. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проведено в отсутствие лиц, участвующих в деле, их представителей.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевой организацией) и ИП ФИО1 (заявителем) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.11.2021 № 20.2400.6371.21 (далее – договор), согласно пункту 1 которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

-    максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 100 кВт;

-    категория надежности третья;

-  класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункт 2 договора).

Согласно пункту 3 договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения «Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

...> в, кадастровый номер земельного участка 24:16:4201001:355.

В соответствии с пунктами 5, 6 договора технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

В силу пункта 11 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 29.12.2020 № 70-э с изменениями, внесенными приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 28.01.2021 № 3-э и составляет 90 769,57 руб., в том числе НДС 20% в сумме 15 128,26 руб.

Согласно пункту 13 договора, внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 15 % платы за технологическое присоединение в размере 13 615,44 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 2 269,24 руб. вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета сетевой организацией;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 27 230,87 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 4 538,48 руб. вносятся в течение 60 календарных дней со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения;

- 45 % платы за технологическое присоединение в размере 40 846,31 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 6 807,72 руб. вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения;

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 9 076,95 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 1 512,82 руб. вносятся в течение 15 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Приложением № 1 к договору являются технические условия № 8000474660 (далее также ТУ), которые являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.11.2021 № 20.2400.6371.21, в которых отражены мероприятия, осуществляемые сетевой организацией (пункт 10 технических условий) и заявителем (пункт 11 технических условий).

В соответствии с пунктом 10 технических условий № 8000474660, сетевая организация обязалась осуществить в том числе:

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (пункт 10.2);

- строительство ЛЭП-0.4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом (пункт 10.2.1);

- определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-0.4 кВ. (пункт 10.2.2);

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012                № 442, пункт 10.2.3).

Пунктами 11.а, 11.б технических условий № 8000474660 предусмотрено, что заявитель осуществляет:

- ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП;

- фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).

Кроме того, в соответствии пунктами 11.1 – 11.5 ТУ заявитель осуществляет:

- разработку проектной документации в границах земельного участка заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87;

- заземление в соответствии с требованиями ПУЭ;

- при разработке проектной документации согласно пункту 11.1 ТУ согласовывает ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством;

- после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявляет представителю сетевой организации для составления акт о выполнении ТУ, акт об осуществлении технологического присоединения, акт допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 12 технических условий).

В пункте 13 технических условий № 8000474660 стороны согласовали, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Ссылаясь на выполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.11.2021 № 20.2400.6371.21 и невнесение заявителем оставшейся платы в размере 49 923,26 руб., сетевая организация обратилась в суд с первоначальным иском о взыскании с ИП ФИО1 задолженности.

Оспаривая факт осуществления технологического присоединения спорного объекта, ИП ФИО1 обратилась в суд с встречным иском об обязании ПАО «Россети Сибирь» в течение 10 дней с момента вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.6371.21 от 10.11.2021, взыскании 5 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Одним из способов защиты нарушенных гражданских прав в соответствии со статьёй 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (статья 307 ГК РФ).

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Спорные отношения сторон основаны на договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.11.2021 № 20.2400.6371.21 и регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, нормами Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроснабжении».

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ  «Об электроснабжении» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861).

Правила № 861 регламентируют процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, предусматривают существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче индивидуальных технических условий для присоединения к электрическим сетям. Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение  своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения.

В соответствии с пунктом 18 Правил № 861 (действовавших в спорный период) технологическое присоединение включает в себя последовательность следующих действий:

- подготовка, выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями;

- разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

- разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

- проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил;

- выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем;

- выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности).

Завершает указанный процесс фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, под которым понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено») (подпункт «д» пункта 7 Правил                                № 861).

Согласно пункту 19 Правил № 861 акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения составляются по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны.

Статьёй 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», установлено, что подключение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям осуществляется при условии выполнения всех мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности технологического присоединения и недопущение ухудшения условий электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению регламентирован пунктом 16 Правил № 861, в действующей в спорный период редакции.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом (пункт 6 Правил № 861).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу частей 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно материалам дела, сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.11.2021 № 20.2400.6371.21.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению сторонами не продлевался, составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 6 договора, пункт 13 технических условий), т.е. до 10.05.2022.

Как следует из материалов дела, в соответствии с пунктом 13 договора, ИП ФИО1 внесено 45 % платы за технологическое присоединение в размере 40 846,31 руб.

Ссылаясь на выполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.11.2021 № 20.2400.6371.21 и невнесение заявителем оставшейся платы в размере 49 923,26 руб., сетевая организация обратилась в суд с первоначальным иском о взыскании с ИП ФИО1 задолженности в указанном размере.

В обоснование заявленного требования ПАО «Россети Сибирь» приложило к иску неподписанные заявителем акты о выполнении технических условий от 01.07.2022                                  № АТУ12000579646 и об осуществлении технологического присоединения от 01.07.2022                               № АТП 12000579642, в соответствии с которыми:

- мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям № 8000474660 от 10.11.2021;

- объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу: 

<

...> кадастровый номер земельного участка 24:16:4201001:355;

-  дата фактического присоединения 01.07.2022, акт об осуществлении технологического присоединения от 01.07.2022 № 12000579642.

Как установлено судом, в соответствии с пунктом 10.2.1 технических условий                                    № 8000474660, ПАО «Россети Сибирь» обязалось построить ЛЭП-0.4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя.

В соответствии с пунктом 7 ТУ, точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность 100 кВт.

Опора (0,4)                Проектируемая

Линия (0,4)                ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-02-6

Ячейка ТП                 Присоединение ВЛ 0,4 кВ Л1

ТП                              КТПН 35-02-6 ОУ

Линия (3/6/10)          ВЛ 10 кВ ф. 48-01

Ячейка ПС                Присоединение фидера ф.48-01

ПС                              ПС 110/35/10 кВ №48 «Нагорная».

Таким образом, в соответствии с условиями договора сетевая организация приняла на себя обязательства построить ЛЭП-0.4 кВ от КТПН 35-02-6 ОУ (пункты 10.2.1 и 7 ТУ).

Вместе с тем в представленных ПАО «Россети Сибирь» актах о выполнении технических условий и об осуществлении технологического присоединения от 01.07.2022 в качестве точки присоединения объекта, вместо: «КТПН 35-02-6», указано: «КТПН 35-02-4».

Согласно материалам дела и не оспаривается участвующими лицами, на земельном участке с кадастровым номером: 24:16:4201001:355 по адресу: 

<

...> располагается комплекс торговых объектов, присоединенных к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго», энергопринимающие устройства которых принадлежат ООО «Ромашка-2».

Оспаривая первоначальные исковые требования и настаивая на встречном иске, ИП ФИО1 ссылается на то, что представленные сетевой организацией в материалы дела документы подтверждают факт технологического присоединения иного объекта, расположенного по адресу: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 24:16:4201001:355, собственником которого является ООО «Ромашка-2», а не спорного объекта, возведенного на земельном участке и в отношении которого сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.11.2021 № 20.2400.6371.21.

С целью устранения имеющихся противоречий, определением от 24.01.2024 суд обязал сторон совместно, при участии третьих лиц, провести осмотр на объекте по адресу: 

<

...> (с фото-, видеофиксацией) на предмет фактического осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта торговли в соответствии с заявкой ИП ФИО1 от 05.10.2021 к электрической сети сетевой организации.

По результатам проведенного совместно осмотра в материалы дела представлены акты от 01.02.2024 № 124Э-785 и от 01.02.2024 № 124Э-786, согласно которым в ходе осмотра ТП 35-02-4 установлено подключение объекта ООО «Ромашка-2» от указанной ТП и отсутствие подключения спорного объекта ИП ФИО1 от ТП 35-02-6, с отражением об отсутствии строительства проектируемой линии (от 01.02.2024 № 124Э-786).

Таким образом, судом установлено, что на момент рассмотрения спора технологическое присоединение фактически не произведено.

При этом арбитражный суд учитывает, что по существу ПАО «Россети Сибирь» в ходе судебного разбирательства не оспаривало факт отсутствия технологического присоединения спорного объекта, ссылаясь на человеческий фактор, отсутствие кадров в филиале по месту расположения объекта. Кроме того, истец по встречному иску в ходе рассмотрения настоящего дела просил суд о предоставлении возможности урегулировать с предпринимателем данный спор, суд неоднократно предлагал сторонам урегулировать спор мирным путем. Вместе с тем, ПАО «Россети Сибирь» доказательства, подтверждающие принятие необходимых и достаточных мер по исполнению договора, либо свидетельствующие о наличии препятствий по исполнению договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.11.2021 № 20.2400.6371.21 и Правил № 861, в материалы дела не представлены.

Учитывая изложенное, арбитражный суд приходит к выводу, что требование ПАО «Россети Сибирь» о взыскании с ИП ФИО1 49 923,26 руб. оставшейся платы по договору, в отсутствие фактического присоединения объекта и не подписания акта об осуществлении технологического присоединения, является необоснованным и не подлежит удовлетворению; встречный иск ИП ФИО1 об обязании ПАО «Россети Сибирь» исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.6371.21 от 10.11.2021, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, является обоснованным.

Частью 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что при принятии решения, обязывающего совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

ИП ФИО1 просит обязать ПАО «Россети Сибирь» осуществить вышеуказанные действия в течение 10 дней с момента вступления в силу решения по настоящему делу.

Учитывая длительность неисполнения обязательств по договору, неблагоприятные последствия для ИП, а также особый статус сетевой организации, арбитражный суд считает указанный срок исполнения мероприятий обоснованным.

При этом арбитражный суд учитывает, что частью 1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, и предоставлении подтверждающих доказательств сетевая организация вправе обратиться в арбитражный суд с указанным заявлением.

Кроме того, ИП ФИО1 заявлено требование о взыскании судебной неустойки в размере по 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения должником обязательства суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Из разъяснений, изложенных в пунктах 28, 32 постановления Пленума ВС РФ № 7 от 24.03.2016, следует, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

По смыслу статей 308.3, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, судебная неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий. В данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент правового воздействия на участников гражданского оборота.

В пунктах 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Таким образом, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

Арбитражный суд, исходя из общих принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения и необходимости соблюдения баланса интересов сторон, а также конкретных обстоятельств дела, учитывая, что ПАО «Россети Сибирь» не представлено доказательств и материалами дела не подтверждается объективная затруднительность исполнения судебного акта, полагает возможным присудить судебную неустойку, подлежащую начислению за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения, в заявленном истцом размере 5 000 руб.

При этом арбитражный суд полагает, судебная неустойка в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения, соразмерна последствиям неисполнения судебного акта и будет стимулировать ПАО «Россети Сибирь» к исполнению судебного акта, не являясь при этом карательной мерой.

Статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворённых требований.

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, установлена государственная пошлина в размере 6 000 руб.

При подаче первоначального иска ПАО «Россети Сибирь» уплачено 2 000 руб. госпошлины по платежным поручениям от 30.01.2023 № 2257 и от 05.10.2022 № 42395.

ИП ФИО1 уплачено 6 000 руб. госпошлины по платежному поручению от 11.07.2023 № 28.

В связи с отказом в удовлетворении первоначального иска и удовлетворением встречного иска, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб. подлежат взысканию с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ИП ФИО1; судебные расходы по уплате госпошлины в сумме 2 000 руб. относятся на ПАО «Россети Сибирь» и распределению не подлежат.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

в удовлетворении иска публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) отказать.

 

Встречный иск удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 10 дней с момента вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.6371.21 от 10.11.2021, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – «Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее)», расположенный по адресу: 

<

...>, кадастровый № земельного участка 24:16:4201001:355, максимальная мощность присоединяемых устройств заявителя – 100 кВт, категория надежности – третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,40 кВ, 1 точка присоединения:  максимальная мощность 100 кВт, опора (0,4) проектируемая, линия (0,4) ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-02-6, ячейка ТП присоединение ВЛ 0,4 кВ Л1, ТП КТПН 35-02-6 ОУ, линия (3/6/10) ВЛ 10 кВ ф. 48-01, ячейка ПС присоединение фидера ф. 48-01, ПС 110/35/10 кВ № 48 «Нагорная», основной источник питания  ПС 110/35/10 кВ № 48 «Нагорная».

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. судебных расходов по уплате госпошлины, 5 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.

 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Н.А. Варыгина