Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

г. Москва.

27. 06. 2019 года.                                                            Дело № А4037815/19-43-336

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

АО "ЗЕЛЕНОГРАДПРОЕКТ" (ОГРН 

<

***>) к ОАО «ЗИНВЕСТ» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 398 937   руб.   35 коп. – долга, пени по договорам подряда №1460-14-а.н. от 10.11.2014 г. и №1642-16 от 08.11.2016 г.,

Изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 320 193 руб. 78 коп.– долга, 78743 руб. 57 коп. – пени, 10 979 руб. – госпошлины.

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены основания, предусмотренные статьей 227 АПК РФ, для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.02.2019 г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 АПК РФ.

Ответчик представил отзыв на иск.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.

07.06.2019 г. принята резолютивная часть решения в порядке, предусмотренном ст. 229 АПК РФ.

В суд поступило, в установленный ст. 229 АПК РФ срок, заявление ответчика о составлении мотивированного решения.

Суд, с учётом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела, документами, пришёл к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

 10 ноября 2014 г. между ОАО «Зинвест» (Заказчик) и АО «Зсленоградпроект» (Подрядчик) был заключен Договор подряда № 1460-14-а.н. на ведение авторского надзора за строительством объекта: «Расширение Перепечинского кладбища, 25 Га» по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, с.п. Лунево, д. Шемякино.

Согласно п. 4.1. Договора ведение авторского надзора Подрядчиком осуществляется в сроки: начало оказания услуг - «10» ноября 2014 года, окончание оказания услуг - дата окончания всех строительно-монтажных работ на Объекте, подлежащих обязательному освидетельствованию (приемке) авторским надзором и оформление в установленном порядке разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Услуги оказываются Подрядчиком с периодичностью 1 раз в неделю. В случае необходимости Заказчик заблаговременно, не менее чем за 1 (Один) рабочий день, лает письменное поручение Подрядчику для посещения Объекта дополнительно.

В рамках исполнения обязательств по Договору в период с 02 сентября 2015 по 14 декабря 2015 г. Подрядчиком, в лице представителя АО «Зеленоградпроект» ФИО1. оказывались услуги по ведению авторского надзора за строительством объекта: «Расширение Перепечинского кладбища, 25 Га» но адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, с.п. Лунево, д. Шемякино, что подтверждается записями в журнале авторского надзора о посещении объекта, за подписями представителя авторского надзора и ответственным за производство работ на объекте представителем Генподрядной организации ООО «Альтстрой» - начальником участка общестроительных работ ФИО2.

Подтверждением факта оказания услуг Истцом по ведению авторского надзора за вышеуказанный период также являются надлежащим образом оформленные Акты освидетельствования скрытых работ, подписанные всеми ответственными представителями Заказчика, Генподрядчика, Авторского надзора, Субподрядной организацией.

Также, между истцом и ответчиком 08 ноября 2016 года заклюй Договор подряда № 1642-16 на ведение авторского надзора. Согласно п.1 Договора Подрядчик обязуется оказать услуги по ведению авторского надзора за строительством объекта: «Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 829, мкр. 8 Зел. АО. Общая стоимость услуг установлена п. 2.1. Договора - 234 038,25 руб.

В соответствии с п. 2.2. Договора оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком в два этана согласно Календарного плана Приложения № 1 к Договору на основании Актов сдачи-приемки работ, подписанных сторонами в течение 5 рабочих дней.

Пунктом  3.4. договора установлена обязанность Подрядчика вести журнал авторского надзора. 

Пунктом 4.1. установлен срок осуществления авторского надзора - 08 ноября 2016 года до окончания всех строительно-монтажных работ на объекте и оформления Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Приложением № 1 к Договору (Календарный план) установлено 2 этапа работ и их стоимость: 1 этап с 08.11.2016 года до даты ввода объекта в эксплуатацию и стоимость этапа 100 000.00 руб., 2 этап с 01.12.2016 года по ввод объекта в эксплуатацию и стоимость 134 038,25 руб.

Из материалов дела установлено, что услуги по первому этапу были приняты и оплачены  Заказчиком, по 2 этапу 28.07.2017 года за исх. № 02-230 от ответчика поступил отказ от принятия работ по второму этапу, со ссылкой на отсутствие Акта комплексного благоустройства.

Суд находит, данный отказ от принятия работ незаконным, поскольку условиями договора на истца как па Подрядчика не возложена обязанность получать н предоставлять такой Акт.

Согласно условий Договора Авторский надзор осуществляется Подрядчиком в соответствии с «Положением об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений в г. Москве», утвержденным постановлением Правительства Москвы от 30.12.1997 г. № 938, и Сводом правил СН-11-110-99 «Авторский надзор за строительством, зданий и сооружений», утвержденным Постановлением Госстроя России № 44 от 10.06.1999 г. (п. 1.3. Договора).

В соответствии с п. 3.7. Постановления Правительства Москвы от 30.12.1997 № 938 «Об утверждении Положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений в г. Москве» Проектная организация, осуществляющая авторский надзор обязана:

Проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ проектным решениям, предусмотренным рабочей документацией и утвержденной сметой стоимости работ; соответствие выполняемых работ проекту организации строительства; качество производства строительно - монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования (п.п. 3.7.1.) .

Осуществлять авторский надзор за производством строительных изделий, конструкций, деталей, приборов и оборудования в случаях, когда строительные изделия, конструкции, детали и др. изготавливаются на объекте строительства (3.7.2.).

Своевременно решать возникшие в процессе строительства вопросы по проектной документации (п.п. 3.7.3.).

Вести журнал авторского надзора (см. п. 4.13 Положения), в котором фиксировать выявленные при строительстве отступления от проектной документации и нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно - монтажных работ, давать указания и рекомендации но их устранению, а также устанавливать сроки устранения отступлений и нарушений (п.п. 3.7.4.).

Следить за своевременным и качественным исполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора» Указания, записанные в журнал авторского надзора, обязательны для исполнения организациями заказчика и подрядчика. В случае несвоевременного или некачественного выполнения указаний но устранению выявленных отступлений и нарушений вносить в журнал авторского надзора повторную запись о необходимости их устранения, извещая об этом в письменной форме заказчика и руководителя генподрядной организации, для принятия ими оперативных мер  по отступлений и нарушений. В необходимых случаях об отступлениях и нарушениях информировать Инспекцию Государственного архитектурно - строительного надзора и Объединение административно - технических инспекций Правительства Москвы (п.п. 3.7.5).

Участвовать в приемке техническим надзором заказчика отдельных ответственных конструкций, а также в составлении актов освидетельствования основных работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, от качества выполнения которых зависят прочность и устойчивость объектов строительства (п.п. 3.7.6.)

Контролировать качество работ но отделке фасадов зданий, интерьеров, благоустройству и озеленению территории и др.( п.п. 3.7.7.).

Статьей 4 Постановления Правительства Москвы от 30.12.1997 № 938 «Об утверждении Положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений в г. Москве» определен порядок осуществления авторского надзора, где в п. 4.13 определено, что представители авторского надзора должны вести журнал авторского надзора за строительством согласно обязательному приложению I или раздел "Записи представителей авторского надзора" Общего журнала работ, разработанного Инспекцией Государственного архитектурно - строительного надзора г. Москвы, с учетом требований приложения I

Оформленный журнал авторского надзора передается заказчиком генеральному подрядчику для хранения до окончания строительства.

Журнал авторского надзора выдается генеральным подрядчиком по требованию представителей проектных организаций, осуществляющих авторский надзор (п. 4.14. Положения).

Производители работ строительно - монтажных организаций и представитель заказчика обязаны фиксировать в журнале авторского надзора исполнение указаний представителей проектных организаций, осуществляющих авторский надзор (п. 4.15. Положения). Представители проектных организаций, осуществляющие авторский надзор, участвуют в оформлении актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций (п. 4.20 Положения).

В соответствии с Приложением II к Положению «Указания о порядке ведения Журнала авторского надзора» специалисты, осуществляющие авторский надзор за объектом строительства обязаны:

1.1.Отражать в журнале свои действия в соответствии с требованиями пункта 3.7 Положения, руководствуясь также СНиП 3.01.01-87*: Организация строительного производства и Пособием к СНиП 3.01.01-85.

1.2.Фиксировать выявленные недостатки с указанием их местонахождения (несоответствие выполненных работ проектным решениям, некачественное выполнение работ, дефектные изделия, некачественные материалы и т.п.).

1.3.Давать рекомендации по устранению отмеченных недостатков и устанавливать сроки их выполнения.

Каждое посещение объекта строительства представителями авторского надзора должно быть отражено в журнале. Подпись ответственного представителя подрядчика (субподрядчика) в журнале обязательна (п. 3 Постановления).

Таким образом, действующим законодательством в области осуществления авторского надзора не предусмотрено обязательное наличие подписи Заказчика в журнале авторскою надзора.

В представленных копиях Журнала авторского надзора за строительством объекта требования о наличии подписей представителя авторского надзора и представителя подрядчика соблюдены.

Доводы ответчика, изложенные в письменных возражениях на иск, судом отклоняются ввиду вышеизложенного.

Таким образом, сумма задолженности ответчика  по договору № 1460-14-а.н. от 10.11.2014 г. составляет 186 155,53 руб.; по договору № 1642-16 от 08.11.2016 года 134 038,25 руб. общий размер задолженности Ответчика по двум договорам составляет: 186 155,53 руб. + 134 038.25 руб. = 320 193,78 руб.

 Ответчику были направлены претензии с требованием оплатить выполненные работы, однако ответчик денежные средства не оплатил, на претензии ответил отказом.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершать определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно части 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в договоре.

Требование истца о взыскании долга в сумме 320 193 руб. 78 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Согласно п. 5.3 Договора в случай просрочки выполнения своих обязательств, указанных в п.3 настоящего договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1%  по договору №1460-14-а.н. от 10.11.2014 г. и 0,5 % по и договору № 1642-16 от 08.11.2016 г. от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

Требование истца о взыскании пени в сумме 78 743 руб. 57 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, расчетом представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ.

На основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 316, 328, 329-332, 401, 420-425, 431-434, 779-783 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 48, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 226-229 АПК РФ, арбитражный суд

                                                         Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ОАО «ЗИНВЕСТ» (ОГРН 

<

***>) в пользу АО "ЗЕЛЕНОГРАДПРОЕКТ" (ОГРН 

<

***>) 398 937   руб. 35 коп., в том числе: 320 193 руб. 78 коп. - долга, 78 743 руб. 57 коп. – пени и расходы по уплате госпошлины в сумме 10 979  руб. 00 коп.

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

 

Судья                                             О.В. Романов