Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-2745/2022

21 июля 2022 года

город Якутск

 

Резолютивная часть решения объявлена 21.07.2022

Мотивированное решение изготовлено 21.07.2022

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёнова У. Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества "Якутскэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 12.08.2002, регистрирующий орган – Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677001, 

<

...>) от 30.03.2022 г. № 119/3260 к Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 14.03.2003, регистрирующий орган – Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677000, 

<

...>) о расторжении договора № 87-ТП-Н от 18.06.2020 и взыскании 129 881, 40 рублей убытков,

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности №И00008754 от 02.07.2021, паспорт, диплом; 

от ответчика: ФИО3 по доверенности №45 от 07.07.2020, удостоверение, диплом.

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Якутскэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением от 30.03.2022 г. № 119/3260 к Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о расторжении договора № 87-ТП-Н от 18.06.2020 и взыскании 129 881, 40 рублей убытков.

12.07.2022 в суд от истца поступило письменное пояснение

Представитель истца поддержал исковые требования.

Представитель ответчика исковые требования не признал.

Суд, посовещавшись на месте в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявил перерыв до 21.07.2022 11 час. 30 мин.

О перерыве сделано публичное извещение  в сети Интернет на сайте Арбитражного суда РС (Я) http:// yakutsk.arbitr.ru.

После перерыва судебное заседание продолжено 21.07.2022 11 час. 30 мин., в том же составе суда, при ведении протокола тем же секретарем судебного заседания, при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности №И00008754 от 02.07.2021, паспорт, диплом; 

от ответчика: ФИО3 по доверенности №45 от 07.07.2020, удостоверение, диплом.

Представители сторон дали пояснения.

Судом в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поступившие документы приобщены к материалам дела.

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.

18.06.2020 между ПАО «Якутскэнерго» (далее –Сетвая организация, Истец) и МВД по РС(Я) (далее –Заявитель, Ответчик) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №87/ТП-Н (далее - Договор).

Согласно пункту 1 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологическою присоединения энергопринимающих устройств Заявители (далее- технологическое присоединение): "Строительство здания ИВС на 50 мест для пристроя к зданию отдела МВД России по Нюрбнискому району г.Нюрба Республики Саха (Якутия)", в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая ИХ проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими липами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицамипринадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 107,42 кВт;

категория надежности: III; 

класс напряжения электрических сетей, и которым осуществляется технологическое присоединение  0,38 (кВ);

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимаюших устройств - кВт;

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: «Строительство здания ИВС на 50 мест для пристрой к зданию отдела МВД России но Нюрбннскому району г. Нюрба Республики Саха (Якутии)», PC (Я), 

<

...> д, 77 (пункт 2 договора).

Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границ участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты Заявителя (пункт 3 договора).

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в Приложении №1. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения настоящего договора (пункт 4 договора).

Срок выполнения мероприятий но технологическом) присоединению истекает 31.12.2022 (пункт 5 договора).

В соответствии с пунктом 6 договора Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заказчика мероприятий по технологическому присоединению согласно технических условий;

в течение 10-ти рабочих дней со дня   уведомления заявителем сетевой opганизации о выполнении им технических условий осуществить проверю выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить заявителю.

Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается (пункт 7 договора).

Согласно пункта 8 договора Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению согласно Приложению № 1 (технические условия), на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3-х рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий (пункт 9 договора).

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии сПостановлением Правления ГКЦ PC (Я) от 25.12.2019 № 232 "Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ПАО "Якутскэнерго" на 2020 г." и составляет 61 008,97, в том числе НДС 20 % 10 168,16 рублей, согласно Расчету стоимости технологического присоединения (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 10 договора).

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 18 302,69 рубля вносятся в течение 2021 года;

70 процентов платы за технологическое присоединение в размере 42 706,28 рублей  вносятся в течение 15 дней со дня подписания Сторонами акта об осуществлении технологического присоединения (пункт 11 договора).

Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или всудебном порядке (пункт 14 договора).

Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации  (пункт 15 договора).

Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор. Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда (пункт 16 договора).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 18 договора).

Истец 18.06.2020 выдал ответчику технические условия от 18.06.2020 №Т-20----НРЭС (далее –технические условия), приложение №1 к договору.

В соответствии с пунктом 10 технических условий Сетевая организация осуществляет: 

10.1 Проектирование и установку КТП-10/0,4кВ (далее по тексту ТПl) Тип, мощность трансформатора и место установки определить проектом.

10.2 Высоковольтное питание проектируемой вновь проектируемой ТП предусмотреть от опоры №47 ВЛ-10 кВ ф. "Нюрба"

10.3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы земельного участка объекта. Количество отходящих ЛЭП-0,4 кВ. трассу, тип опор, марку, сечение провода и способ прокладки определить проектом.

10.4. Фактическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Якутскэнерго".

Согласно пункту 11 договора Заявитель осуществляет:

11.1 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от элементов электрической сети вновь выстроенной ЛЭП -0,4 кВ (по п.10.4) до ЭПУ объекта.

10.2  -Монтаж электроустановок и приемосдаточных мероприятий в соответствии в ПУЭ и другими действующими ИТД.

В соответствии с приложением №2 к договору расчет платы за технологическое присоединение состоит из:

- 30 581,40 рубля за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ);

-20 251,41 рубля за проверку сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, итого плата за технологическое присоединение в рублях, без НДС -50 840,81 рублей, всего плата в рублях, с НДС -61 008,97 рублей. 

24.02.2022 истцом в адрес ответчика было направлено претензионное письмо №21/794 от 24.02.2022 с приложением соглашения о расторжении договора,  счета на оплату от 22.02.2022 №33000000286. Данная претензия была оставлена ответчиком письмом от 15.03.2022 №1/41-3902 без  удовлетворения, что явилось основанием для обращения истца с иском.

Ответчик с исковыми требованиями не согласен по доводам изложенным в отзыве.

В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

Из материалов дела усматривается, что претензия с приложением соглашения о расторжении договора направлена 02.03.2022.

Истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением 07.04.2022.

Таким образом, досудебный порядок урегулирования спора истцом соблюден.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона N 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил N 861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (определение Верховного Суда РФ от 19.01.2018 N 310-ЭС17-11570).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 15 договора).

В силу пунктов 3, 6, 16, 18 Правил, сетевая организация обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению в отношении любого обратившегося к ней лица в соответствии с заключенным договором.

В договоре устанавливаются, среди прочего, такие существенные условия, как перечень подлежащих выполнению мероприятий, определяемый в технических условиях, положения об ответственности сторон, размер платы за технологическое присоединение.

Пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен порядок расторжения договора: требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Согласно пункту 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Подпунктом 1 пункта 2 данной статьи установлено, что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Ответчик не произвел оплату в соответствии с условиями договора.

Ответчик признает невозможным исполнение договора на условиях указанных в договоре в связи с невозможностью оплаты и изменением технических условий, что является нарушением существенных условий договора.

Суд, оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая невозможность исполнения договора ответчиком, намерений истца, приходит к выводу об удовлетворении требований истца о расторжении договора.   

Истец указывает, что в связи с выполнением мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения, истцом были произведены расходы в размере 129 881,40 рубль. 

№

Наименование затрат

Документы, подтвержджающие затраты

Сумма затрат

11.

За подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)

П.1 Приложения №2 к договору от 18.06.2020 №87/ТП-Н

30 581,40 рублей

22.

 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству

Договор подряда от 30.07.2020 №21/11-2020, акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.2020 №292, платежное поручение от 30.11.2020 №64327.

99 300 рублей

                                                                                                              Всего:

129 881, 40 рублей

В силу пунктов 1 и 2 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства; убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ.

На основании пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Как установлено пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Из вышеприведенных норм следует, что основаниями для удовлетворения требования о взыскании убытков являются: установление факта нарушения стороной обязательств по договору; наличие причинной связи между понесенными убытками и ненадлежащим исполнением обязательств по договору; документально подтвержденный размер убытков, а также вина нарушившего обязательство, если вина в силу закона или договора является условием возложения ответственности за причинение убытков.

Согласно пункту 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее - ВС РФ) от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность по доказыванию совокупности перечисленных обстоятельств возлагается на лицо, требующее взыскания убытков. Отсутствие доказательств наличия хотя бы одного из перечисленных обстоятельств влечет недоказанность всего состава гражданско-правового института убытков и отказ в удовлетворении исковых требований.

Таким образом, рассматривая требования заявителей о взыскании убытков, суд устанавливает факт нарушения ответчиком срока выполнения своих обязательств по договору, наличие причинно-следственной связи между нарушением обязательств и возникшими у истца убытками, а также проверяет обоснованность размера заявленных требований.

Как следует из положений статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), реестр контрактов, заключенных заказчиками, входит (включен) в единую информационную систему в сфере закупок, которая создается и ведется в целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок (часть 1, пункт 6 части 3).

На основании части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе реестр контрактов, заключенных заказчиками, ведет Федеральное казначейство.

Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1084 (далее - Правила N 1084).

Ведение реестра контрактов осуществляется в электронном виде (пункт 7 Правил N 1084).

Частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе установлено, что в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта, заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информацию, например: наименование заказчика, дата заключения контракта, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 103 Закона о контрактной системе и пунктом 14 Правил N 1084 Федеральное казначейство проверяет наличие предусмотренных частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации и документов и их соответствие требованиям, установленным Правилами N 1084, и размещает в единой информационной системе информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты их получения. В случае несоответствия информации и документов указанным требованиям такие информация и документы не подлежат размещению в реестре контрактов.

Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) 17.07.2020 составило протокол выявленных несоответствий №197 по договору от 18.06.2020 №87/ТП-Н ( суд признает опечаткой в протоколе дату договора 15.07.2020).

Ответчик письмом от 24.07.2020 №1/41-11419 с приложением протокола от 17.07.2020 №197, известил истца о выявленных Управлением Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) нарушениях при регистрации договора от 18.06.2020 №87/ТП-Н в единой информационной системе реестра контрактов и просил подписать договор повторно с учетом выявленных замечаний.    

Письмом от 05.08.2020 №21/3698 истец отказался от подписания нового договора.

Ответчик письмом от 17.11.2021 №1/41-19318 предложить расторгнуть договор от 15.07.2020 №87/ТП-Н, просил не применять штрафные санкции и направить проект соглашения о намерениях заключить договор об осуществлении технологического присоединения. 

Истец письмом от 08.12.2021 21/6485 направил соглашение о расторжении договора от 18.06.2020 №87/ТП-Н, в котором указал, что затраты Сетевой компании не являются штрафными санкциями по расторгаемому договору, а несут гражданско-правовой характер.    

Из материалов дела следует, что договор от 18.06.2020 №87/ТП-Н не зарегистрирован в реестре контрактов в Федеральном казначействе, о чем истец был проинформирован ответчиком письмом 24.07.2020 №1/41-11419.

В силу части 8 статьи 103 Закона контрактной системе контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате.

Истец после получения письма ответчика от 20.07.2020 о невозможности оплаты по договору от 18.06.2020 №87/ТП-Н, то есть невозможности исполнить указанный договор ответчиком, заключает договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 30.07.2020 №21/11-2020, что является необоснованным. 

На основании изложенного, руководствуясь положениями статей 15, 353 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 103 Закона о контрактной системе, суд приходит к выводу, что требования истца в части взыскания 30 581,40 рублей платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий от 18.06.2020, являются обоснованными, а остальной части требования не подлежат удовлетворению, так как  отсутствуют совокупности обстоятельства, необходимые для привлечения ответчика, к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков, недоказанности того, что ответчик действовал неразумно и недобросовестно, поскольку ответчик письмом от 24.07.2020 известил о проблемах возникших при регистрации, предложил перезаключить договор, истец заключая договор на выполнение проектно-изыскательских работ от 30.07.2020 знал о невозможности исполнения ответчиком договора от 18.06.2020, так как договор от 18.06.2020 не был зарегистрирован в реестре контрактов. Действия ответчика оценены как соответствующие обычному поведению участников делового оборота.

Истец при подаче иска уплатил государственную пошлину в размере 10 896 рублей, что подтверждается платежными поручениями от 05.04.2022 №13384 (4 896 рублей за материальные требования), от 15.04.2022 №15407 (6 000 рублей за требование о расторжении договора).  

С учетом результатов рассмотрения дела с ответчика в пользу истца подлежат взысканию  расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 153,01 рубля.

Руководствуясь статьями 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Расторгнут договор от 18.06.2020 №87-ТП-Н об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскать с Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 14.03.2003, регистрирующий орган – Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677000, 

<

...>) в пользу  публичного акционерного общества "Якутскэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 12.08.2002, регистрирующий орган – Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677001, 

<

...>) 30 581,40 рубль платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий от 18.06.2020, а также 7 153,01 рубля расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу www.kad.arbitr.ru. 

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

СудьяСемёнова У. Н.