АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А74-3173/2024

10 октября 2024 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Чумаченко Т.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ю.В.Девяшиной рассмотрел  в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального  предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП  

<

***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании исполнить условия договоров №  20.1900.2821.23, № 20.1900.3399.23 об осуществлении технологического присоединения, об  обязании предоставить уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности  присоединения к электрическим сетям,  

взыскании 9576 руб. неустойки, в том числе 8 139 руб. 60 коп. неустойки по договору   № 20.1900.2821.23, 1 436 руб. 40 коп. по договору № 20.1900.3399.23, взыскании неустойки  до момента фактического исполнения обязательства, неосновательного обогащения не более  чем за год просрочки,  

взыскании судебной неустойки в размере 10 000 руб. по каждому договору, 

c участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора, ФИО2, ФИО3.  

Руководствуясь статьями 104, 110, 167 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить исковые требования. 

1. Обязать публичное акционерное общества «Россети Сибирь» в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить  условия договора № 20.1900.2821.23 об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям энергопринимаюших устройств по адресу: 

<

...> уч. 43, а именно:  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии;  

- выполнить строительство ЛЭП-10(6)кВ, до места установки новой ТП- 10(6)/0,4кВ;  

- выполнить установку новой ТП-10(6)/0,4кВ; - выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-10(6)/0,4 кВ, до точки присоединения энергопринимающих устройств. 

Обязать публичное акционерное общества «Россети Сибирь» в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить  условия договора № 20.1900.3399.23 об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям энергопринимаюших устройств по адресу: 

<

...> уч. 41, а именно:  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии;  

- выполнить строительство ЛЭП 0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих  устройств;  

- выполнить усиление существующей ТП 30-06-45 для присоединения планируемой  нагрузки индивидуального предпринимателя ФИО1;  

- выполнить усиление существующей ЛЭП-10 кВ для присоединения планируемой  нагрузки индивидуального предпринимателя ФИО1.  

2. Обязать ПАО «Россети Сибирь» после исполнения договоров № 20.1900.2821.23,   № 20.1900.3399.23 об осуществлении технологического присоединения предоставить  индивидуальному предпринимателю ФИО1 уведомления об  обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, в  форме электронного документа, подписанные усиленной квалифицированной электронной  подписью уполномоченного лица сетевой организации.  

3.Выскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО1 9576 руб. неустойки, в  том числе 8 139 руб. 60 коп. неустойки по договору № 20.1900.2821.23, 1 436 руб. 40 коп. по  договору № 20.1900.3399.23, а также 14 000 руб. расходов по уплате государственной  пошлины.  

Производить начисление неустойки исходя из расчёта 0,25% от размера платы за  технологическое присоединение по договору № 20.1900.2821.23, составляющей 63 840 руб.,  за каждый день просрочки, начиная с 17.04.2024 до момента фактического исполнения  обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, но не  более чем за 315 дней.  

Производить начисление неустойки исходя из расчёта 0,25% от размера платы за  технологическое присоединение по договору № 20.1900.3399.23, составляющей 63 840 руб.,  за каждый день просрочки, начиная с 17.04.2024 до момента фактического исполнения  обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, но не  более чем за 356 дней.  

4. В случае неисполнения настоящего решения в части осуществления  технологического присоединения по договорам № 20.1900.2821.23, № 20.1900.3399.23,  взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального  предпринимателя ФИО1 судебную неустойку в размере 3 000 руб.  по каждому договору за каждый календарный день неисполнения решения суда по  настоящему делу, по истечении двух месяцев с момента вступления решения в законную  силу по день его фактического исполнения.  

5. Возвратить ФИО1 из федерального бюджета 2000 руб.  государственной пошлины, уплаченной квитанцией ООО «Хакасский муниципальный банк»  от 10.04.2024 № 560764096.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд (г. Красноярск) в течение месяца с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья Чумаченко Т.В.