785/2023-267632(1) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № 09АП-56225/2023

Дело № А40-262652/22

г. Москва

28 сентября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 27 сентября 2023 года  Постановление изготовлено в полном объеме 28 сентября 2023 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи: Фриева А.Л., судей: Порывкина П.А., Титовой И.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Смик" на  Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.06.2023г. по делу № А40-262652/22 по  иску Местной религиозной организации Православный приход Храма Живоначальной  Троицы в Троицке гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви  Московский Патриархат (ИНН: 

<

***>) к ООО "Смик" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) о взыскании 2 900 024 руб. 70 коп.,  

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 23.01.2023, 

от ответчика: генеральный директор ФИО3 приказ № 3 от 18.08.2023, ФИО4 по доверенности от 26.09.2023, ФИО5 по доверенности от 25.09.2023,  

У С Т А Н О В И Л:

Местная религиозная организация Православный приход храма Живоначальной  Троицы в Троицке города Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви  (Московский Патриархат) обратилось с исковым заявлением к ООО «Смик» о  взыскании 2 900 024руб. 70коп. неосновательного обогащения по договору № 12/БВХ  от 22.12.2020.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.06.2023 исковые требования  удовлетворены.  

Ответчик, не согласившись с решением суда, обратился с апелляционной  жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный  акт.  

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии с главой 34  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, а также  исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что  

основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы от  21.06.2023 отсутствуют по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, 22.12.2020 между истцом и ответчиком  заключен договор № 12/БВХ, в соответствии с которым ответчик обязался выполнить  работы, а истец принимать и оплачивать их.  

Истец исполнил свои обязательства по перечислению аванса ответчику в  размере 2 900 024 руб. 70 коп., что подтверждается платежными поручениями № 1 от  04.01.2021, № 44 от 01.03.2021, № 290 от 23.12.2021 и № 291 от 24.12.2021.  

Согласно п. 3.2. договора ответчик обязан приступить к выполнению работ не  позднее 3 дней, следующих за датой перечисления аванса.  

В соответствии с п. 1.3. договора ответчик обязался выполнить работы в течение  2.5 месяцев с момента получения аванса.  

Письмом от 11.10.2022 истец уведомил ответчика об отказе от исполнения работ  в связи с тем, что работы не выполнены, а частично выполненные работы являются  некачественными, указав на то, что некачественно выполненные работы  подтверждаются техническим заключением.  

26.10.2022 в ответ на уведомление истца ответчик указал, что не согласен с  выводами истца о том, что работы выполнены некачественно.  

Суд первой инстанции в целях объективного и всестороннего рассмотрения  спора назначил проведение по делу судебной экспертизы.  

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при  рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд  назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц,  участвующих в деле. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена  экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе  представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при  проведении экспертизы. При этом суд исходит из того, что вопросы права и правовых  последствий оценки доказательств относятся к исключительной компетенции суда.  

Согласно ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость,  допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также  достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство  признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и  исследования выяснится, что оно соответствует действительности. Каждое  доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими  доказательствами.  

Хотя согласно данной статье никакие доказательства не имеют для  арбитражного суда заранее установленной силы, заключение эксперта занимает среди  них особое место при оценке его в ряде других доказательств, что объясняется тем, что  суд в этом случае исследует такие факты, сведения о которых могут быть получены  только в результате специального исследования - экспертизы, то есть эти факты могут  быть подтверждены (или опровергнуты) лишь специальными познаниями в области  науки, искусства, техники, строительства, информатизации и т.д. Поэтому экспертиза  является средством получения верного знания о факте (фактах).  

Суд, оценив заключение экспертизы в совокупности с представленными в  материалы дела доказательствами, в порядке статьи 71 АПК РФ по своему внутреннему  убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  исследовании доказательств, пришел к выводу о том, что представленное заключение  является достаточно ясным и полным, в котором содержатся ответы на поставленные  перед экспертом вопросы, со ссылкой на документы, которыми он руководствовался.  

Согласно заключению эксперта в ходе проведения обследования установлено,  что фактическое основание быстровозводимого храма состоит из монолитной  железобетонной плиты, сведений об изменениях условий договора в материалах  

арбитражного дела не имеется, таким образом, эксперт пришел к выводу, что  основанием быстровозводимого храма, выполненное из монолитной железобетонной  плиты, является нарушением условий договора № 12/БВХ от 22.12.2020. Из  экспертного заключения следует, что исходя из перечисленных недостатков в таблицах   № 2 и № 3, эксперт пришел к выводу, что качество выполненных работ по устройству  фундаментной железобетонной плиты и несущего металлического каркаса не  соответствует строительно-техническим требованиям, выявленные недостатки  значительно снижают несущую способность плиты и являются существенными и  неустранимыми без демонтажа данной конструкции.  

Таким образом, по результатам судебной экспертизы установлено, что работы  выполнены ответчиком некачественно, с нарушением условий договора,  следовательно, учитывая то, что договор между сторонами расторгнут истцом в связи с  нарушением ответчиком сроков выполнения работ, а фактически выполненные работы  являются некачественными, суд приходит к выводу об обоснованности доводов  искового заявления.  

Доводы заявителя относительно ненадлежащего проведения экспертизы  правомерно отклонены судом первой инстанции как необоснованные. Замечания не  опровергают содержания его выводов. Совокупность замечаний свидетельствует о  несогласии с выводами экспертного заключения, что само по себе не является  основанием для отклонения экспертного заключения в качестве доказательства по делу.  

В экспертном заключении соблюдены базовые принципы судебно-экспертной  деятельности, то есть принципы научной обоснованности, полноты, всесторонности и  объективности исследований, установленные статьей 8 Федерального закона «О  государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от  31.05.2001 № 73-ФЗ.  

Ввиду отсутствия сомнений в обоснованности заключения экспертизы, а также  отсутствия противоречий в выводах экспертов, суд признает указанное заключение  эксперта надлежащим доказательством, в связи с чем отклоняет ходатайство ответчика  о назначении по делу повторной судебной экспертизы.  

Более того, согласно части 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает дело повторно по  имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, при  этом представление дополнительных доказательств в суд апелляционной инстанции  ограничено частью 2 упомянутой статьи.  

В силу части 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации заключение эксперта является одним из доказательств по делу.  

У суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для удовлетворения  ходатайств о принятии новых доказательств, так как это нарушает требования части 3  статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о раскрытии  доказательств до начала рассмотрения спора, за исключением случая необоснованного  отклонения судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, в том числе  о назначении экспертизы.  

Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции полагает возможным  рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам. Кроме того, суд учитывает,  что заявляя данное ходатайство, ответчик не представил кандидатуры экспертов, а  также доказательства перечисления денежных средств, в размере достаточном для  оплаты услуг эксперта, на депозитный счет суда.  

Согласно пункту 3 статьи 450, пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса  Российской Федерации в случае одностороннего отказа от исполнения договора  полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением  сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. При  расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до  

расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей  их стороной не было предоставлено, и обязанность его предоставить отпала, являются  неосновательным обогащением получателя и подлежат возвращению другой стороне  (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 11.01.2000 № 49, пункт 5 постановления Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35).  

Таким образом, при прекращении договора требование заказчика о возврате  неизрасходованного аванса подлежит разрешению согласно нормам главы 60 ГК РФ,  при этом подрядчик имеет право на оплату фактически выполненных работ.  

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными  правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество  (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему  неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное  обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего  Кодекса.  

Статья 1107 ГК РФ определяет, что лицо, которое неосновательно получило или  сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы,  которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени,  когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.  

Поскольку ответчик факт получения суммы аванса не оспорил, доказательства  исполнения обязательства, а также возврата истцу спорной суммы денежных средств не  представил, суд первой инстанции правомерно и обосновано удовлетворил исковые  требования в части взыскания 2 900 024,70 руб. неосновательного обогащения.  

С учетом изложенного апелляционный суд соглашается с выводом суда первой  инстанции о том, что ответчик не выполнил взятые на себя обязательства, в связи с чем  полученные и неотработанные им денежные средства являются неосновательным  обогащением, подлежащим взысканию на основании ст. 1102 ГК РФ.  

Представленная ответчиком в суд рецензия на экспертное заключение,  составленная по инициативе ответчика, не может являться тем доказательством, на  основании которого экспертиза, о несогласии с которой ответчик заявляет, может быть  признана ненадлежащим доказательством.  

Рецензент не предупреждался об уголовной ответственности, исследование  произведено вне рамок судебного разбирательства. Кроме того, рецензия на  заключение судебной экспертизы не предусмотрена процессуальным  законодательством, как форма доказывания. Рецензия, составленная после получения  результатов судебной экспертизы, не обладает необходимой доказательственной силой  в подтверждение доводов ответчика.  

Процессуальное законодательство и законодательство об экспертной  деятельности не предусматривает рецензирование экспертных заключений. Рецензия  является субъективным мнением специалиста, составление одним экспертом  критической рецензии на заключение другого эксперта одинаковой с ним  специализации без наличия на то каких-либо процессуальных оснований, не может  расцениваться как доказательство, опровергающее выводы эксперта.  

С учетом изложенного решение суда первой инстанции является законным и  обоснованным.  

Судом первой инстанции исследованы обстоятельства, имеющие значение для  настоящего дела, и дана надлежащая оценка имеющимся в деле доказательствам.  

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика в соответствии со  статьями 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 269, 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый  арбитражный апелляционный суд  

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.06.2023 по делу № А40262652/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев  со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского  округа.  

Председательствующий судья: А.Л. Фриев  Судьи: П.А. Порывкин  

 И.А. Титова  

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.