АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  248000, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457;  

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-7759/2022

16 января 2023 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Жадан В.В., 

руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Липецк Дорога" в  течение 20 дней с даты вступления в силу решения суда исполнить обязательства  по устранению дефектов выявленных в период гарантийного срока по  муниципальному контракту № 0137300043319000001_310945 от 01.04.2019г., а  именно:  

Автомобильная дорога улице Зеленая в городе Калуге: 1.Пролить шов-стык с парковкой вдоль м-на «Пятерочка» 

2.Шов-стык с ул. Радищева (выполнить работы по устранению замечания в  соответствии с нормативной документацией (ОДМ 218.3.03.036-2013 Отраслевой  дорожный методический документ. Рекомендации по технологии санации трещин  и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

Автомобильная дорога по переулку Сельский в городе Калуге:  

1. Поперечные трещины в р-не ж/д переезда (мусорные баки) (выполнить  работы по устранению замечания в соответствии с нормативной  документацией (ОДМ 218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический  документ. Рекомендации по технологии санации трещин и швов в  эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

2. Разрушение шва-стыка с парковкой в р-не ООО «Холодильник»  (выполнить работы по устранению замечания в соответствии с нормативной  документацией (ОДМ 218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический  документ. Рекомендации по технологии санации трещин и швов в  эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

 Автомобильная дорога по переулку Ольговский в городе Калуге: 

1. Разрушение а/б на шве-стыке с ул. Тарутинская (выполнить работы по  устранению замечания в соответствии с нормативной документацией (ОДМ  218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации  по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

2. Разрушение а/б покрытия на шве-стыке с парковкой (выполнить  работы по устранению замечания в соответствии с нормативной  документацией (ОДМ 218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический  документ. Рекомендации по технологии санации трещин и швов в  эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

3. Просадка люка и разрушение а/б покрытия вокруг в р-не д. 10/5  (произвести разборку разрушенного асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см  вокруг колодца (площадью не менее, чем достаточная для монтажа и демонтажа  опорных плит) с последующей транспортировкой к месту складирования лома  асфальтобетона; демонтировать опорную плиту с последующими погрузо-разгрузочные работами и транспортировкой демонтированного материала к месту  складирования; произвести установку опорной плиты с регулировкой высотного  положения крышек колодцев;)  

4. Просадка люка и разрушение а/б покрытия вокруг в р-не д. 5  (произвести разборку разрушенного асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см  вокруг колодца (площадью не менее, чем достаточная для монтажа и демонтажа  опорных плит) с последующей транспортировкой к месту складирования лома  асфальтобетона; демонтировать опорную плиту с последующими погрузо-разгрузочные работами и транспортировкой демонтированного материала к месту  складирования; произвести установку опорной плиты с регулировкой высотного  положения крышек колодцев;)  

5. Просадка люка и разрушение а/б покрытия вокруг вдоль дет. Садика  (произвести разборку разрушенного асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см  вокруг колодца (площадью не менее, чем достаточная для монтажа и демонтажа  опорных плит) с последующей транспортировкой к месту складирования лома  асфальтобетона; демонтировать опорную плиту с последующими погрузо-разгрузочные работами и транспортировкой демонтированного материала к месту  складирования; произвести установку опорной плиты с регулировкой высотного  положения крышек колодцев;)  

6. Разрушение а/б на шве-стыке с ул. Дружбы(выполнить работы по  устранению замечания в соответствии с нормативной документацией (ОДМ  218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации  по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

 Автомобильная дорога по ул. Прончищева в городе Калуге:  

1. Множественные трещины в р-не д.3 по ул. Тарутинская (выполнить  работы по устранению замечания в соответствии с нормативной  документацией (ОДМ 218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический  документ. Рекомендации по технологии санации трещин и швов в  эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

2. Продольная трещина в р-не д.3 по ул. Тарутинская (выполнить работы  по устранению замечания в соответствии с нормативной документацией (ОДМ  218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации  по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

3. Трещины в р-не д. Кукарки (выполнить работы по устранению  замечания в соответствии с нормативной документацией (ОДМ 218.3.03.036-2013  Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по технологии  санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

4. Раскрытие поперечного шва-стыка в р-не д.Кукареки(выполнить  работы по устранению замечания в соответствии с нормативной  документацией (ОДМ 218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический  документ. Рекомендации по технологии санации трещин и швов в  эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

5. Трещины поперечные в р-не родника (выполнить работы по  устранению замечания в соответствии с нормативной документацией (ОДМ  218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации  по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

6. Разрушение продольного шва-стыка в р-не родника(выполнить работы  по устранению замечания в соответствии с нормативной документацией (ОДМ  218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации  по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

7. Продольная трещина в р-не д.45 по ул. Кукареки (выполнить работы  по устранению замечания в соответствии с нормативной документацией (ОДМ  218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации  по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

8. Продольная трещина в р-не д.1 по ул. Новосельская (выполнить  работы по устранению замечания в соответствии с нормативной  

документацией (ОДМ 218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический  документ. Рекомендации по технологии санации трещин и швов в  эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

9. Продольная трещина в р-не гаражей(выполнить работы по устранению  замечания в соответствии с нормативной документацией (ОДМ 218.3.03.036-2013  Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по технологии  санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

10. Продольная трещина в р-не Газораздатки (выполнить работы по  устранению замечания в соответствии с нормативной документацией (ОДМ  218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации  по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

11. Множественные трещины вдоль обочины («Пиломатериалы»)  (выполнить работы по устранению замечания в соответствии с нормативной  документацией (ОДМ 218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический  документ. Рекомендации по технологии санации трещин и швов в  эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

12. Множественные трещины в р-не поворота на кладбище д.25 по  ул.Прончищева(выполнить работы по устранению замечания в соответствии с  нормативной документацией (ОДМ 218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный  методический документ. Рекомендации по технологии санации трещин и швов в  эксплуатируемых дорожных покрытиях).  

Автомобильная дорога по ул. Ольговка в городе Калуге: 

1. Разрушение шва-стыка с ул.Прончищева (выполнить работы по  устранению замечания в соответствии с нормативной документацией (ОДМ  218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации  по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

2. Трещины в р-не д.20 по ул.Ольговка вдоль обочины (выполнить  работы по устранению замечания в соответствии с нормативной документацией  (ОДМ 218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический документ.  

Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых  дорожных покрытиях);  

3. Выкрашивание а/б покрытия в р-не д.30 и 36 по ул. Ольговка (залить  битумной эмульсией).  

Автомобильная дорога по 

<

...> в г. Калуге: 

1.Выкрашивание а/б покрытия (залить битумной эмульсией)  

Автомобильная дорога по ул. Тарутинская от ул. Радищева до Ястребовской  развязки в городе Калуге:  

1. Раскрытие швов-стыков с частичным разрушением а/б покрытия на  всех съездах и примыканиях. (выполнить работы по устранению замечания в  соответствии с нормативной документацией (ОДМ 218.3.03.036-2013 Отраслевой  дорожный методический документ. Рекомендации по технологии санации трещин  и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

2. Разрушение а/б покрытия на съезде на ул. Механизаторов (на  повороте) (произвести разборку разрушенного асфальтобетонного покрытия  толщиной слоя до 5 см., с последующей транспортировкой к месту складирования  лома асфальтобетона; осуществить розлив битумной эмульсии; произвести  устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА толщиной 5 см с  применением битумно-полимерной ленты для сопряжения полос  асфальтобетонных покрытий)  

3. Разрушение а/б покрытия на съезде на ул. Вагонная (произвести  разборку разрушенного асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 5 см., с  последующей транспортировкой к месту складирования лома асфальтобетона;  осуществить розлив битумной эмульсии; произвести устройство покрытия из  горячих асфальтобетонных смесей ЩМА толщиной 5 см с применением битумно-полимерной ленты для сопряжения полос асфальтобетонных покрытий)  

4. Разрушение а/б покрытия в р-не д.423 по ул. Ястребовская (произвести  разборку разрушенного асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 5 см., с  последующей транспортировкой к месту складирования лома асфальтобетона;  осуществить розлив битумной эмульсии; произвести устройство покрытия из  горячих асфальтобетонных смесей ЩМА толщиной 5 см с применением битумно-полимерной ленты для сопряжения полос асфальтобетонных покрытий)  

5. Просадка а/б покрытия в р-не остановки общественного транспорта  «Вишневый сад» (выполнить работы по фрезерованию ремонтируемого участка  толщиной слоя до 9 см., с последующей транспортировкой к месту складирования  лома асфальтобетона; осуществить розлив битумной эмульсии перед устройством  выравнивающего слоя; произвести устройство выравнивающего слоя толщиной до  4 см; осуществить розлив битумной эмульсии перед устройством верхнего слоя;  произвести устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА  толщиной 5 см с применением битумно-полимерной ленты для сопряжения полос  асфальтобетонных покрытий.)  

6. Множественные трещины на всем протяжении участка от д.423 по  ул.Ястребовская до ул.Грушовая (выполнить работы по устранению замечания в  соответствии с нормативной документацией (ОДМ 218.3.03.036-2013 Отраслевой  дорожный методический документ. Рекомендации по технологии санации трещин  и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

7. Застой воды в р-не д.231 к.9 по ул. Тарутинская (заезд)  8. Застой воды в р-не д.32 ул. Тарутинская  

9. Застой воды в р-не д.120 ул. Тарутинская 

10. Просадка а/б покрытия на всю ширину проезжей части в р-не д.139  ул. Тарутинская (выполнить работы по фрезерованию ремонтируемого участка  толщиной слоя до 9 см., с последующей транспортировкой к месту складирования  лома асфальтобетона; осуществить розлив битумной эмульсии перед устройством  выравнивающего слоя; произвести устройство выравнивающего слоя толщиной до  4 см; осуществить розлив битумной эмульсии перед устройством верхнего слоя;  произвести устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА  толщиной 5 см с применением битумно-полимерной ленты для сопряжения полос  асфальтобетонных покрытий.)  

11. Разрушение а/б покрытия в р-не пешеходного перехода д.184 по ул.  Тарутинская (произвести разборку разрушенного асфальтобетонного покрытия  толщиной слоя до 5 см., с последующей транспортировкой к месту складирования  лома асфальтобетона; осуществить розлив битумной эмульсии; произвести  устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА толщиной 5 см с  применением битумно-полимерной ленты для сопряжения полос  асфальтобетонных покрытий)  

12. Разрушение а/б на шве-стыке с ул.Шахтеров (выполнить работы по  устранению замечания в соответствии с нормативной документацией (ОДМ  218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации  по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

13. Разрушение а/б на шве-стыке в р-не д.35 по ул.Тарутинская  (выполнить работы по устранению замечания в соответствии с нормативной  документацией (ОДМ 218.3.03.036-2013 Отраслевой дорожный методический  документ. Рекомендации по технологии санации трещин и швов в  эксплуатируемых дорожных покрытиях);  

14. Не обустроен съезд в сторону ул. Врубовой 15. Не установлен б/камень в р-не д.111 по ул. Тарутинская 

16. Просадка люка с разрушением а/б покрытия в р-не съезда на  ул. Трифоновская (произвести разборку разрушенного асфальтобетонного  покрытия толщиной 10 см вокруг колодца (площадью не менее, чем достаточная  для монтажа и демонтажа опорных плит) с последующей транспортировкой к  месту складирования лома асфальтобетона; демонтировать опорную плиту с  последующими погрузо-разгрузочные работами и транспортировкой  демонтированного материала к месту складирования; произвести установку  опорной плиты с регулировкой высотного положения крышек колодцев.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Липецк Дорога" в  пользу муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского  хозяйства" штраф в сумме 100 000 руб., расходы по уплате госпошлины на сумму 6  000 руб.  

В случае неисполнения решения суда присудить к взысканию с общества с  ограниченной ответственностью "Липецк Дорога" в пользу муниципального  казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства" на основании  статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации судебную неустойку в  размере 1 000 рублей в день за каждый день просрочки до момента исполнения  ответчиком решения суда.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Липецк Дорога" в  доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 4 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через  Арбитражный суд Калужской области  

Судья В.В. Жадан