Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40- 238110/23-3-1855

г. Москва

26 января 2024 г.

Резолютивная часть объявлена 14 декабря 2023 г.

Дата изготовления решения в полном объеме 26 января 2024 г. 

Арбитражный суд Москвы в составе судьи Федоточкина А.А., 

при ведении протокола помощником судьи Ермоловой В. В.,  

рассмотрел в предварительном судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВПРОМСТРОЙ" (123100, 

<

...>, ПОМЕЩЕНИЕ II, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.09.2010, ИНН: 

<

***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АК-СИСТЕМА" (129344, 

<

...>, ПОМ 2 ОФ 41, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2013, ИНН: 

<

***>) о взыскании 26 037 309 руб. 59 коп., 

В судебное заседание явились: 

От истца: ФИО1 по дов. от 10.01.2023 г.

От ответчика: ФИО2 дов. от 10.01.2022 г., удостоверение адвоката,

У С Т А Н О В И Л :

Общество с ограниченной ответственностью " ГЛАВПРОМСТРОЙ" (далее – истец) обратилось в суд исковым  заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "АК-СИСТЕМА" (далее – ответчик) о взыскании неосвоенного аванса в размере 22 283 471 руб. 19 коп., неустойки в размере 3 449 974 руб. 65 коп., задолженности по оплате работы крана и электроэнергии в размере 303 863 руб. 75 коп.

Представитель истца требования поддержал в полном объёме, устно пояснил позицию по спору.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, представил отзыв на исковое заявление с приложением дополнительных документов.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, проверив обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам, заслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам.

Как установлено судом, 15.12.2020 г., между ООО «ГПС» (Генеральный подрядчик) и ООО «АК-система» (Подрядчик) заключен Договор строительного подряда № 054-ВЛН/ГПС-АКС/2020.

Пунктом 2.1 Договора, Стороны согласовали, что Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства: Выполнить комплекс строительно-монтажных работ по монтажу систем вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации на Объекте: Объект коммунального назначения, расположенного по адресу: 

<

...>, и сдать результат Работ Генеральному подрядчику.

Согласно пункту 4.1 Договора, Цена Работ по Договору является твердой, изменению не подлежит, если иное не установлено Договором и составляет 34 499 746 (Тридцать четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 49 копеек, в том числе НДС 20 % (далее по тексту - Цена Работ), при этом:

Любое изменение налогов, стоимости Материалов, эксплуатации машин, Оборудования, а также стоимости работ привлекаемых Субподрядчиков, произошедшее после подписания настоящего Договора не является основанием для изменения Цены Работ (за исключением случаев увеличения НДС), так как данные изменения (потенциальные расходы/инфляционные риски) включены в Цену Работ.

 Подрядчик выполняет работы по проектной документации выданной Генеральным подрядчиком со штампом «В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ». В случае изменения в проектной документации будет подписано Дополнительное соглашение, что может повлиять на стоимость Работ.

Цена Работ включает в себя вознаграждение Подрядчика и все затраты Подрядчика по выполнению порученных Работ на условиях Договора в том числе, но не ограничиваясь изложенным в указанном пункте.

В силу п. 5.1, За выполненные и принятые объемы Работ, оплата производится по выставленному Подрядчиком счету, согласно Актам о приемке выполненных работ по п. 2.1 (по форме Приложения № 4 к Договору) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Приложения № 7 к Договору), не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Генеральным подрядчиком указанных в настоящим пункте актов, предоставления Генеральному подрядчику счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере налогообложения и счета на оплату, а применительно к Работам, указанным в п. 2.10 Договора, предоставления дополнительно справок и необходимой Исполнительной документации.

Размер платежа определяется следующим образом: сумма, указанная в Акте о приемке выполненных работ по п. 2.1 (по форме Приложения № 4 к Договору), уменьшается на 5 % (пять процентов) в качестве суммы Гарантийного обеспечения, а также уменьшается на часть суммы ранее перечисленного аванса, приходящегося на объем выполненных Работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ по п. 2.1 (по форме Приложения № 4 к Договору), рассчитанного в порядке, предусмотренном п. Ошибка! Источник ссылки не найден, настоящего Договора.

Согласно п. 5.2, 5 % (пять процентов) от суммы, указанной в каждом Акте о приемке выполненных работ по п. 2.1., являются суммой Гарантийного обеспечения.

Общая сумма Гарантийного обеспечения по Договору составляет 5% (пять процентов) от Цены Работ.

Указанная сумма Гарантийного обеспечения в соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации является иным способом обеспечения надлежащего выполнения обязательств Подрядчика по Договору и/или в связи с ним, включая, но не ограничиваясь указанным, исполнение Подрядчиком любых своих обязательств по Договору, в том числе связанных с его заключением и/или исполнением и/или прекращением и/или расторжением и/или односторонним отказом от его исполнения.

Указанная сумма Гарантийного обеспечения выплачивается в следующем порядке: 

3% (три процента) от каждой суммы, указанной в Акте о приемке выполненных работ по п. 2.1 уплачивается Генеральным подрядчиком Подрядчику по истечении одного года с даты подписания Сторонами Акта окончательной сдачи-приемка работ по форме Приложения № 6 к Договору. Указанная в настоящем абзаце выплата производится в указанный в настоящем абзаце срок, при условии выставления Подрядчиком соответствующего счета Генеральному подрядчику, а также при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору;

2% (два процента) от каждой суммы, указанной в Акте о приемке выполненных работ по п. 2.1уплачивается Генеральным подрядчиком Подрядчику по истечении пяти лет с даты подписания Сторонами Акта окончательной сдачи-приемка работ по форме Приложения № 6 к Договору. Указанная в настоящем абзаце выплата второй (оставшейся) части Гарантийного обеспечения производится при условии полного и надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору на дату такой выплаты.

В случае расторжения Договора по любым основаниям и/или отказа любой из Сторон от его исполнения в одностороннем внесудебном порядке, Гарантийное обеспечение в любом из таких случаев выплачивается в срок, не ранее пяти лет с даты расторжения Договора, но в любом случае не ранее и при условии наступления следующих событий: получения Генеральным подрядчиком счета на оплату, передачи Подрядчиком Генеральному подрядчику результатов Работ, выполненных надлежащим образом и с надлежащим качеством, Исполнительной документации, Эксплуатационной документации и иной документации в рамках исполнения обязательств по Договору, осуществления Сторонами полной сверки взаиморасчетов без каких-либо разногласий, выполнения Подрядчиком всех законных требований Генерального подрядчика по Договору и/или в связи с его исполнением, и/или в связи с его расторжением.

 На Гарантийное обеспечение проценты в любом случае не начисляются. Подрядчик и Генеральный подрядчик соглашаются, что Генеральный подрядчик вправе в любое время зачесть сумму Гарантийного обеспечения и/или ее часть в счет оплаты суммы любой задолженности Подрядчика по Договору и/или любой ее части, и/или любых других платежей, включая неустойки и/или штрафы и/или, которые должны быть уплачены Подрядчиком Генеральному подрядчику, а также в счет оплаты Подрядчиком суммы по возмещению любого ущерба, причиненного Генеральному подрядчику, и сумм, которые Генеральный подрядчик потратит на устранение недостатков и/или дефектов и/или недоделок и расходов им сопутствующих. Генеральный подрядчик письменно уведомляет Подрядчика о таком зачете путем направления соответствующего уведомления. В случае отправки уведомления по почте оно будет считаться полученным Подрядчиком по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты его отправки Генеральные подрядчиком, подтвержденной почтовым штемпелем.

В соответствии с п. 5.3, Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Генеральному подрядчику Акты о приемке выполненных работ по п. 2.1 (по форме Приложения № 4 к Договору), составленные в соответствии со Структурой цены Работ по п. 2.1 Договора (Приложение № 3) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Приложения № 7 к Договору), счета -фактуры, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, отчеты, предусмотренные п. 8.47 Договора, а также Исполнительную документацию на предъявляемые к приемке Работы и необходимые для оплаты счета.

При оформлении Актов о приемке выполненных работ по п. 2.1 (по форме Приложения № 4), справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Приложения № 5), Подрядчик учитывает Классификацию объектов строительства, разработанную и утвержденную Генеральным подрядчиком, а также кодовые обозначения, присвоенные отдельным объектам строительства. По каждому отдельному виду Работ, указанных в первичных документах Подрядчиком, отражается цифровой/буквенный код, в соответствии с Классификацией. Информация для оформления первичных документов в соответствии с указанными требованиями, направляется Генеральным подрядчиком Подрядчику в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

Генеральный подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов рассматривает и оформляет представленные документы или направляет мотивированный отказ. Мотивированным основанием для отказа в оформлении данных документов, помимо прочего, является непредставление или неполнота представленного отчета, указанного в пункте 8.47 Договора, отступления в оформлении представленных документов от требований действующего законодательства в сфере бухгалтерского и налогового учета и/или Договора.

Генеральный подрядчик в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания им указанных выше документов производит соответствующую оплату по Договору.

В силу п. 5.4, Платежи производятся Генеральным подрядчиком на расчетный счет Подрядчика в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре. В случае изменения реквизитов, Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) календарных дней с даты изменения реквизитов письменно предупредить об этом Генерального подрядчика, в противном случае Подрядчик самостоятельно несет риск вызванный таким не предупреждением.

Генеральный подрядчик оплачивает авансовый платеж в размере 30 % от суммы договора, что составляет 10 349 923 (Десять миллионов триста сорок девять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 95 копеек, в т.ч. НДС 20%, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. При получении аванса Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней предоставить Генеральному подрядчику счет-фактуру на аванс и отразить ее в книге продаж. Дополнительные авансовые платежи производятся по соглашению сторон (в соответствии с поданной Подрядчиком заявкой и обоснованием его необходимости). Зачет аванса производится пропорционально объемам выполненных работ (п. 5.7 договора).

В случае расторжения настоящего Договора не отработанный аванс должен быть возвращен Генеральному подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней (п. 5.8 договора).

В силу п. 6.1, 6.2 и 6.3 договора, Дата начала Работ через 5 (пять) рабочих дней с даты получения аванса.

Дата окончания Работ через 60 (Шестьдесят) рабочих дней с даты начала выполнения работ.

Подрядчик обязуется выполнить все Работы, в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к Договору).

Из материалов дела усматривается, что во исполнение вышеуказанного условия Договора, ООО «ГПС» в адрес ООО «АК-Система» перечислил в размере 28 570 320 руб. 15 коп., что подтверждается следующими платежными поручениями: № 1067 от 16.12.2020 на сумму 1 008 616 руб., № 1131 от 25.12.2020 на сумму 1 829 701 руб. 98 коп., № 14 от 13.01.2021 на сумму 7 511 606 руб. 97 коп., № 674 от 17.05.2021 на сумму 3 500 000 руб., №760 от 27.05.2021 на сумму 985 582 руб. 17 коп., № 872 от 09.06.2021 на сумму 5 020 460 руб. 30 коп., № 11239 от 27.08.2021 на сумму 688 767 руб., № 11273 от 31.08.2021 на сумму 2 35 424 руб. 93 коп., № 11296 от 01.09.2021 на сумму 641 161 руб. 80 коп., № 11514 от 28.09.2021 на сумму 800 000 руб., № 12160 от 16.11.2021 на сумму 500 000 руб., № 12236 от 22.11.2021 на сумму 1 200 000 руб., № 12405 от 03.12.2021 на сумму 600 000 руб., № 12531 от 13.12.2021 на сумму 1 000 000 руб., № 12680 от 17.12.2021 на сумму 700 000 руб., № 377 от 22.12.2021 на сумму 130 000 руб.

Истец указывает, что ООО «АК-Система» в адрес ООО «ГПС» было сдано работ на общую сумму 6 286 848 руб., 96 коп., в подтверждение чего представил акты: КС-3 № 1 от 12.08.2021 на сумму 6 286 848 руб., 96 коп.

Истец указывает, что сумма неосвоенного аванса выглядит следующим образом: 28 570 320,15 - 6 286 848,96 = 22 283 471, 19 руб.

Пунктом 6.1 установлено, что Дата начала Работ - через 5 рабочих дней с даты получения аванса (т.е 20.01.2021).

Пунктом 6.2 установлено, что Дата окончания Работ - через 60 рабочих дней с даты начала выполнения работ (т.е 16.04.2021).

Между тем, истец указывает, что по состоянию на 14.08.2023 г.,   работы предусмотренные Договором не выполнены и не сданы.

17.08.2023 г., ООО «ГПС» в адрес ООО «АК-система» было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора № 054-ВЛН/ГПС-АКС/2020 от 15.12.2020 г., что подтверждается почтовой квитанцией и описью вложения (идентификатор 12503984220280, получено 24.08.2023, договор расторгнут с 24.08.2023).

Пунктом 8.4 Договора установлено, что Подрядчик обязан организовать охрану Материалов и Оборудования, обеспечить за свой счет содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей к ней территории, а так же чистоту выезжающего транспорта.

Согласно пункту 8.32 обеспечить за свой счет необходимый температурный режим в зоне производства Работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, набора прочности, в том числе при выполнении отделочных работ в зимний период и т.п.

Пунктом 8.33 установлено, обеспечить за свой счет необходимое для производства Работ с оформлением вертикальный транспорт, а так же получение других аналогичных услуг, выполнить временные подключения с установкой счетчиков потребления к источникам электроснабжения, водоснабжения и канализации к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для выполнения Работ, за свой счет оплачивать расходы за пользование теплом, электроэнергией, водой, канализацией, интернетом и телефонией на весь период производства Работ.

ООО «ГПС» в адрес ООО «АК-Система» были выставлены следующие счета на оплату на общую сумму 303 863 руб., 75 коп.: № 40 от 31.01.2021 г., на сумму 9 859 руб., 03 коп., (эл., энергия) № 53 от 28.02.2021 г., на сумму 20 966 руб., 70 коп., (эл., энергия) № 92 от 31.03.2021 г., на сумму 34 340 руб., 00 коп., (трансп., мусор) № 91 от 01.04.2021 г., на сумму 19 666 руб., 14 коп., (эл., энергия) № 129 от 01.04.2021 г., на сумму 1 218 руб., 32 коп., (раб., крана) № 143 от 30.04.2021 г., на сумму 89 065 руб., 16 коп., (раб., крана) № 148 от 30.04.2021 г., на сумму 8 593 руб., 56 коп., (эл., энергия) № 214 от 30.06.2021 г., на сумму 6 245 руб., 28 коп., (эл. энергия) № 248 от 01.07.2021 г., на сумму 6 862 руб., 86 коп., (эл. энергия) № 467 от 31.10.2021 г., на сумму 22 663 руб., 37 коп., (эл. энергия) № 468 от 30.11.2021 г., на сумму 39 279 руб., 46 коп., (эл. энергия) № 201 от 10.01.2022 г., на сумму 35 325 руб., 13 коп., (эл. энергия) № 207 от 31.01.2022 г., на сумму 9 598 руб., 74 коп., (эл. энергия).

Поскольку ООО «ГПС» отказалось от исполнения договора и договор расторгнут, истец указывает, что ООО «АК-Система» без правовых оснований удерживает сумму неосвоенного аванса в размере 22 283 471 руб., 19 коп., неустойку 3 449 974 руб., 65 коп., а так же 303 863 руб., 75 коп., за электроэнергию и работу крана.

В адрес ООО «АК-система» было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора с требованием вернуть неосвоенный аванс, уплатить неустойку, а так же уплатить возмещения за работу крана и электроэнергию, что подтверждается почтовой квитанцией и описью вложения (идентификатор 12503984220280, письмо получено 24.08.2023), претензия была оставлена без ответа и удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с требованиями в суд.

Удовлетворяя заявленные требования частично, суд учитывает следующее.

На основании ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии  со ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства ответчика по оплате выполненных работ является сдача ему результата работ (ст. ст. 711, 720, 746, 753 ГК РФ).

Согласно Информационному письму Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Ответчик не согласен с предъявленными требованиями исходя из следующего: ООО "ГПС" (Генеральный подрядчик) заключило с ООО «АК-Система» (Подрядчик) Договор № 054/ВЛН-ГПС/АКС-2020 от 15.12.2020 (далее - Договор) на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу систем вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации на объекте коммунального назначения по адресу: 

<

...>.

 Согласно п. 5.3 Договора Подрядчик представляет Генеральному подрядчику Акты приемки выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленные в соответствии со Структурой цены Работ (Приложение№3), исполнительную документацию, счет для оплаты, а Генеральный подрядчик в течение 10 рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы либо направляет мотивированный отказ.

Акт о приемке выполненных работ №2 от 24.11.2022 (КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 24.11.2022 (КС-3) на сумму 24 041 808,93 руб. направлены в адрес Генерального подрядчика почтой 28.11.2022 и получены адресатом 30.11.2022, мотивированного отказа на Акт приемке выполненных работ №2 от 24.11.2022 не поступало.

Исполнительная документация передана по актам представителю Генерального подрядчика, что подтверждается материалами дела. Выполнение работ подтверждается подписанными сторонами Актами освидетельствования скрытых работ, накладными, сертификатами на оборудование, исполнительными геодезическими схемами, актами испытаний оборудования.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

При отсутствии мотивированных возражений, по условиям п. 5.3 Договора, работы на сумму 24 041 808,93 руб. считаются принятыми без замечаний. Кроме того, Объект по адресу 

<

...> - паркинг ЖК «Семеновский парк» введен в эксплуатацию, информация об этом размещена на сайте застройщика ООО «РГ-Девелопмент» 14.03.2022 (https://rg-dev.ru/press/news/2022/775/). Претензий к качеству работ выполненных ООО «АК-Система» не предъявлялось, доказательств выполнения работ другими подрядчиками не представлено.

Таким образом, на момент направления 17.08.2023 Уведомления об отказе от договора и возврате аванса работы были выполнены, а сумма аванса 22 597 816,64 руб. полностью зачтена в счет оплаты выполненных работ, как указано в Справке о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 24.11.2022 (КС-3).

Согласно ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

В ответ на Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора и претензию в адрес ООО «ГПС» был направлен ответ с приложением повторно копий документов о сдаче работ, проекта акта окончательной сдачи-приемки результата работ, которые вручены истцу 18.09.2023.

Истец уклонялся от оформления двухсторонних документов о завершении работ без мотивированных возражений, хотя с момента ввода Объекта в эксплуатацию прошло более года.Проект Итогового Акта окончательной   сдачи-приемки результата работ от 25.11.2022 был направлен почтой в адрес Генерального подрядчика 06.02.2023 и вручен адресату по данным Почты России 09.02.2023, ответа не поступало.

Согласно ст. 717 ГК РФ заказчик в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

В соответствии с п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства. Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

С учетом объема выполненных работ требование о возврате аванса противоречит нормам ст. 453,717, 1102 ГК РФ.

Ответчик указывает, что при заключении Договора в Структуре цены работ (Приложение №3) сторонами была согласована цена оборудования, но не указана цена выполнения монтажных работ.

В связи с существенным подорожанием материалов и оборудования в 2021 году ООО «АК-Система» уведомило об этом ООО «ГПС» письмом исх. №397/07-21 от 13.07.2021 и предложило согласовать новую Структуру цены Работ по Договору, предложило расчет сметной стоимости работ. В дальнейшем Стороны пришли к соглашению, что часть оборудования для монтажа предоставлял заказчик и работы продолжались на этих условиях.

Предложение о подписании дополнительного соглашения о Структуре цены Работ (Приложение№3) по фактически сложившимся отношениям исходя из рыночных цен на соответствующие работы, Акт сверки объемов работ направлены в адрес истца 28.11.2022 (письмо исх. №25-11/22, вручено по данным Почты России 30.11.2022), но осталось без ответа.

Таким образом, между сторонами не согласована иная цена работ.

Согласно пункту 8.32 обеспечить за свой счет необходимый температурный режим в зоне производства Работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, набора прочности, в том числе при выполнении отделочных работ в зимний период и т.п.

Пунктом 8.33 установлено, обеспечить за свой счет необходимое для производства Работ с оформлением вертикальный транспорт, а так же получение других аналогичных услуг, выполнить временные подключения с установкой счетчиков потребления к источникам электроснабжения, водоснабжения и канализации к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для выполнения Работ, за свой счет оплачивать расходы за пользование теплом, электроэнергией, водой, канализацией, интернетом и телефонией на весь период производства Работ.

Материалами дела установлено, что ООО «ГПС» в адрес ООО «АК-Система» были выставлены следующие счета на оплату на общую сумму 303 863 руб., 75 коп.: № 40 от 31.01.2021 г., на сумму 9 859 руб., 03 коп., (эл., энергия) № 53 от 28.02.2021 г., на сумму 20 966 руб. 70 коп., (эл., энергия) № 92 от 31.03.2021 г., на сумму 34 340 руб., 00 коп., (трансп., мусор) № 91 от 01.04.2021 г., на сумму 19 666 руб., 14 коп., (эл., энергия) № 129 от 01.04.2021 г., на сумму 1 218 руб., 32 коп., (раб., крана) № 143 от 30.04.2021 г., на сумму 89 065 руб. 16 коп., (раб., крана) № 148 от 30.04.2021 г., на сумму 8 593 руб., 56 коп., (эл., энергия) № 214 от 30.06.2021 г., на сумму 6 245 руб. 28 коп., (эл. энергия) № 248 от 01.07.2021 г., на сумму 6 862 руб. 86 коп., (эл. энергия) № 467 от 31.10.2021 г., на сумму 22 663 руб. 37 коп., (эл. энергия) № 468 от 30.11.2021 г., на сумму 39 279 руб. 46 коп., (эл. энергия) № 201 от 10.01.2022 г., на сумму 35 325 руб. 13 коп., (эл. энергия) № 207 от 31.01.2022 г., на сумму 9 598 руб. 74 коп., (эл. энергия).

Между тем, УПД № 201 от 10.01.2022 г. на сумму 35 325 руб. 13 коп. и № 207 от 31.01.2022 г. на сумму 9 598 руб. 74 коп. не подписаны ответчиком, доказательств их направления в материалах дела не имеется.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Таким образом, доказательств предоставления услуг по электроэнергии по актам № 201 от 10.01.2022 г. на сумму 35 325 руб. 13 коп. и № 207 от 31.01.2022 г. на сумму 9 598 руб. 74 коп. не представлено.

Учитывая изложенное, у ответчика имеется задолженность в размере 258 939,88 руб.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ - доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы. 

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ - доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств. 

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными. 

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ. 

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что ответчиком работы были выполнены и сданы по актам приема-сдачи работ, мотивированных возражений не заявлено, ответчик не доказал оплату задолженности в размере 258 939,88 рублей, в связи с чем, суд приходит к выводу, что в соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, требования по взысканию суммы долга правомерны и подлежат удовлетворению в части 258 939,88 руб., в удовлетворении остальной части требований судом отказано.

Пунктом 14.6 Договора установлено, что в случае нарушения Подрядчиком срока производства всех Работ, указанного в пункте 6.2 Договора, Подрядчик, начиная с первого дня, следующего, за днем истечения установленного Договором срока исполнения, уплачивает Генеральному подрядчику за каждый день просрочки пени в размере 0,1% от цены работ, но не более 10% от Цены работ.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств в части срока выполнения работ, истец начислил ответчику неустойку в размере 3 449 974 руб. 65 коп. за период с 17.04.2021по 16.08.2023 с учетом ограничения, установленного п. 14.6 договора. Расчет судом проверен, признан верным. Ответчиком о применении ст. 333 ГК РФ не заявлено.

Суд отмечает, что ответчиком доказательств изменения цены договора не представлено.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др.

Учитывая отсутствие правовых обоснований и доказательств, свидетельствующих о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, связи с чем, суд приходит к выводу, что исковые требования в части взыскания неустойки подлежат удовлетворению в размере 3 449 974 руб. 65 коп.

В порядке ст. 110 АПК РФ, расходы по госпошлине в размере 21 820,90 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, пропорционально размеру удовлетворенных требований.

На основании ст. ст. 8-12, 309, 310, 330, 333, 1102, 1105 ГК РФ, руководствуясь ст. ст.  64, 65, 67, 71, 110, 167-171, 176, 180 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АК-СИСТЕМА" (129344, 

<

...>, ПОМ 2 ОФ 41, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2013, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВПРОМСТРОЙ" (123100, 

<

...>, ПОМЕЩЕНИЕ II, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.09.2010, ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 258 939 (Двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать девять) руб. 88 коп., пени в размере 3 449 974 (Три миллиона четыреста сорок девять тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб. 65 коп., расходы по оплате госпошлины  в размере 21 820 (Двадцать одна тысяча восемьсот двадцать) руб. 90 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья                                         А.А. Федоточкин