АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248600, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: arbitr@kaluga.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А23-1119/2019

12 июля 2019 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения объявлена 05 июля 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 12 июля 2019 года.

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Погонцева М.И.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в рассмотрев в открытом судебном заседании дело по общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург», 629306, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «СпецГазСтрой», 248017, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

о взыскании неустойки в размере 150 210 руб. 09 коп.,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург» обратилось в Арбитражный суд Калужской области к обществу с ограниченной ответственностью «СпецГазСтрой» о взыскании неустойки по договору на выполнение работ по капитальному ремонту объектов от 08.12.2017 № КР-68258-18 в размере 150 210 руб. 09 коп.

Ответчик в отзыве от 02.07.2019 просил на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать в удовлетворении требований в части штрафа за нарушение обязательств, предусмотренных п. 1.12. Приложения № 3 к договору.

 Представители лиц, участвующих в деле в судебное заседание не явились, с учетом положений ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считаются извещенными надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. Согласно ст. 156 указанного кодекса дело рассматривается в отсутствие представителей участвующих в деле лиц.

Изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Между ООО «Газпром добыча Ямбург» (Заказчик/истец) и ООО «СпецГазСтрой» (Подрядчик/ответчик) заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту объектов от 08.12.2017 № КР-68258-18.

В соответствии с п. 2.1. договора Подрядчик обязался выполнить собственными силами и средствами работы «Проведение работ по капитальному ремонту производственных баз, жилья инфраструктуры в п. Ямбург и г. Новый Уренгой  ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году» согласно квартальному заданию (Приложение № 2), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их в порядке, предусмотренном договором.

Стоимость работ по договору определена на основании протоколаподведенияитоговзапросапредложений № 1/0001/17/5.1/0068258/ ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/27.10.2017 от 15.11.2017 и в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение № 4) составила 50 070 032 руб. 19 коп.

Пунктом 6.2. договора Ответчик принял на себя обязательства выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами ремонт объектов в пределах стоимости работ по настоящему договору и сдать результат работ Истцу в сроки и на условиях, определенных договором, в состоянии, позволяющем немедленную эксплуатацию объектов.

На ответчика (Подрядчика) по условиям договора возложены следующие обязательства:

п. 6.6. Подрядчик обязался предоставить Заказчику в течение 15 календарных дней с даты заключения настоящего договора пообъектный график поставки основных материалов в количественном и стоимостном выражении, а также еженедельный отчет о комплектации объектов материалами поставки Подрядчика;

п. 1.5. Приложения № 3 к договору Подрядчик обязуется и обяжет всех привлекаемых Субподрядчиков открыть в Банке расчетный счет и установить систему электронных расчетов «Банк-Клиент» для проведения ЦППО и проинформировать об этом Заказчика в течение 10 дней с момента принятия одного из следующих решений об:

- оказании Заказчиком услуг подрядчику или Субподрядчику;

- авансировании Субподрядчиков по работам, выполняемым (оказываемым) по настоящему договору.

п. 1.12. Приложения № 3 к договору Подрядчик обязан и обяжет всех привлекаемых Субподрядчиков в течение пяти рабочих дней заключить договор с ООО «Газпром добыча Ямбург» на возмездное оказание медицинских услуг в случае необходимости оказания работникам Подрядчика/Субподрядчика на территории Ямбургского и/или Заполярного НГКМ медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, требующих экстренной и неотложной медицинской помощи;

При этом неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Истец вправе взыскать с Ответчика неустойку в размере 10 (десять) процентов от стоимости неисполненного и/или ненадлежащим образом исполненного обязательства, а за не исполнение обязательств, не имеющих стоимостной оценки - 0,1 % от стоимости работ по договору (п. 17.3. договора).

Ссылаясь на невыполнение ответчиком обязательств, предусмотренных п. 6.6. договора, п. 1.5., 1.12. Приложения № 3 к договору, истец обратился в суд с данным иском, в котором просит взыскать с ответчика  неустойку за указанные нарушения в размере 150 210 руб. 09 коп.

Суд, оценивая заявленные требования, исходит из следующего.

Согласно ч. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 15.1. договора Ответчик гарантировал выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности (п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за невыполненение обязательств, предусмотренных п. 6.6. договора, п. 1.5., 1.12. Приложения № 3 к договору договора, не имеющих стоимостной оценки в размере 

Кроме того, истец утверждает, что по состоянию на 17.04.2018 ответчиком не были, в частности:

п. 6.6 - Подрядчик обязался предоставить Заказчику в течение 15 календарных дней с даты заключения настоящего договора пообъектный график поставки основных материалов в количественном и стоимостном выражении, а также еженедельный отчет о комплектации объектов материалами поставки Подрядчика;

п. 1.5. Приложения № 3 к договору - Подрядчик обязуется и обяжет всех привлекаемых Субподрядчиков открыть в Банке расчетный счет и установить систему электронных расчетов «Банк-Клиент» для проведения ЦППО и проинформировать об этом Заказчика в течение 10 дней с момента принятия одного из следующих решений об:

- оказании Заказчиком услуг подрядчику или Субподрядчику;

- авансировании Субподрядчиков по работам, выполняемым (оказываемым) по настоящему договору.

п. 1.12. Приложения № 3 к договору - Подрядчик обязан и обяжет всех привлекаемых Субподрядчиков в течение пяти рабочих дней заключить договор с ООО «Газпром добыча Ямбург» на возмездное оказание медицинских услуг в случае необходимости оказания работникам Подрядчика/Субподрядчика на территории Ямбургского и/или Заполярного НГКМ медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, требующих экстренной и неотложной медицинской помощи;

Пунктом 17.3. договора установлено, что за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Истец вправе взыскать с Ответчика неустойку в размере 10 процентов от стоимости неисполненного и/или ненадлежащим образом исполненного обязательства, а за не исполнение обязательств, не имеющих стоимостной оценки - 0,1 % от стоимости работ по договору.

Истцом заявлено требование о взыскании штрафных санкций за неисполнение вышеуказанных условий договора в размере 150 210 руб. 09 коп.

Как было упомянуто ранее при неисполнении обязательств по договору, не имеющих стоимостной оценки, Истец вправе взыскать с Ответчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору (п. 17.3. договора).

Стоимость работ по договору определена на основании протоколаподведенияитоговзапросапредложений № 1/0001/17/5.1/0068258/ ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/27.10.2017 от 15.11.2017 и в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение № 4) составила 50 070 032 руб. 19 коп.

Исходя из перечисленных положений договора, сумма штрафных санкций рассчитана истцом в следующем порядке 50 070 032 руб. 19 коп.  * 0,1 % * 3 = 150 210 руб. 09 коп.

Суд, оценив указанные требования, приходит к выводу, что обоснованными являются требованиям о взыскании штрафных санкций за неисполнение обязательств по п. 6.6 договора, п. 1.5 Приложения № 3 к договору в размере 100 140 руб. 06 коп.  (50 070 032 руб. 19 коп. * 0,1% * 2 = 100 140 руб. 06 коп.).

Указанные условия договора являются для подрядчика исполнимыми и обычно применяемыми в гражданском обороте.

Оснований для взыскания штрафа за неисполнение п. 1.12. Приложения № 3 к договору суд не находит в связи со следующим.

Является недопустимым извлечение преимуществ из недобросовестного поведения в силу ст. 1, 10 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом заключения спорного контракта на итогам открытого запроса предложений с ответчиком, как слабой стороной контракта, не могущей повлиять на формулировку его условий, а именно условия п. 1.12. Приложения № 3 к договору - Подрядчик обязан и обяжет всех привлекаемых Субподрядчиков в течение пяти рабочих дней заключить договор с ООО «Газпром добыча Ямбург» на возмездное оказание медицинских услуг в случае необходимости оказания работникам Подрядчика/Субподрядчика на территории Ямбургского и/или Заполярного НГКМ медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, требующих экстренной и неотложной медицинской помощи.

Такое условие договора, по мнению суда, является неисполнимым, так как поставлено в зависимость от воли третьих лиц (привлекаемых субподрядчиков), противоречит положениям ст. 416 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По смыслу ст. 416 Гражданского кодекса Российской Федерации  невозможность исполнения обязательства наступает в случае, если действие, являющееся содержанием обязательства, объективно не может быть совершено ни одним лицом.

Следовательно, и применение штрафной санкции за нарушение такого условия является недопустимым.

Оснований для снижения размера предусмотренной договором неустойки за неисполнение обязательств, не имеющих стоимостной оценки суд не усматривает.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика согласно ст. 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально размеру удовлетворенных требований.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд                   

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО «СпецГазСтрой» в пользу ООО «Газпром добыча Ямбург» неустойку за неисполнение обязательств по п. 6.6 договора, п. 1.5 Приложения № 3 к договору на выполнение работ по капитальному ремонту объектов от 08.12.2017 № КР-68258-18 в размере 100 140 руб. 06 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 670 руб. 67 коп. 

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

 Судья                                               подпись                                          М.И. Погонцев