Арбитражный суд Липецкой области

пл. Петра Великого, д.7, г.Липецк, 398019

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А36-6262/2022

г. Липецк

31 января 2023 г.

Резолютивная часть решения вынесена 24 января 2023 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 31 января 2023 года. 

 

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Никоновой Н.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Старцевой  М.А., рассмотрев в судебном заседании  дело по исковому заявлению

индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 31848270064382, ИНН 

<

***>)

к публичному акционерному обществу «Россети Центра» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» 

         об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, согласно условиям договора № 41918406 (219/102274), взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб., 

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 по доверенности № 2 от 11.08.2022, диплом ВСВ 042 4076 от 14.07.2004,

от ответчика: ФИО3 по доверенности № Д-ЛП/60 от 27.07.2022, диплом  Н № 13738 от 18.06.2012,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Россети Центра» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, согласно условиям договора № 41918406 (219/102274), взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Определением от 25.07.2022 исковое заявление принято к производству.

15.08.2022 от истца поступило уточнение наименования ответчика во исполнение определения суда.

16.08.2022 от истца поступило ходатайство о приобщении копии паспорта.

В настоящем судебном заседании представитель истца поддержал заявленные исковые требования.

Представитель ответчика заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства.

Суд, исследовав материалы дела, считает исковые требования истца подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

         Между истцом и ответчиком был заключен договор № 41918406 (2019/102274) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По настоящему договору ответчик, как сетевая организация, взял на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца, а именно вводного устройства строящейся бани с электроприборами, расположенной по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с/п Сырский сельсовет, 

<

...> участок № 25, кадастровый номер земельного участка 48:13:1550501:383, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт;

       - категория надежности третья;

       - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, 0,4 кВ.

Точка(и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединенияэлектрическим сетям (далее - технические условия) и располагается(ются) на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего Договора.

         Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет6 (шесть) месяцев со дня заключения настоящего договора (п.п. 3 – 5 договора).

         На   указанном  договоре со  стороны ПАО «МРСК Центра» (с   учетом   изменения   наименования ПАО «Россети Центр») написана   дата  29.11.2019, со стороны                         ФИО1 -  30.01.2019.

         Согласно п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области № 55/7 от 25.12.2018 (приложение 2) и составляет  17 460, 00 руб., в том числе НДС (20%) 2 910, 00 руб. 

         ИП ФИО1 было оплачено  платежным  поручением №  83 от 20.12.2019 года  17 460, 00 руб. и выполнены требования технических условий от 28.11.2019 года.

         Как следует  из  п. 6 договора, сетевая организация (ответчик) в течение пяти рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий, обязана провести осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств и не позднее 12 рабочих дней со дня проведения осмотра, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям и составить соответствующий акт технологического присоединения.

          Поскольку ответчиком не исполнены обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, 18.03.2022 в адрес ответчика была направлена претензия с  требованием  выполнить  работы по технологическому присоединению.

          В  связи  с   тем,  что  обязательства  сетевой   организации  по  технологическому присоединению не   выполнены,  истец   обратился   с   настоящим  иском   в арбитражный  суд.

 В соответствии с пунктами 3, 30 и 30.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно части 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пункту 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (часть 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил № 861).

Договор о технологическом присоединении по своей природе является договором возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (часть 1 статьи 779 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Принимая во внимание регулирование спорных правоотношений специальными нормами законодательства об электроэнергетике, заключенный сторонами договор о технологичном присоединении предполагает взаимные обязательства сторон, помимо непосредственно обязанности истца осуществить технологическое присоединение и обязанности ответчика произвести оплату.

В соответствии со статьей 26 Закона № 35-ФЗ обязательным условием технологического присоединения потребителя к энергоустановкам является соблюдение установленного законодательством порядка присоединения и соответствующих технических условий.

Согласно пункту 4 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении.

         В силу п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или в любой момент в пределах такого периода.

Установленный   договором  шестимесячный   срок для   выполнения мероприятий по технологическому присоединению на   дату  обращения   в   суд  истек,  что  ответчиком   не   оспаривалось.

Со  стороны  ПАО «Россети Центр» об  отказе   от  договора   и   принятых  обязательств   не   заявлено.  

Из технических условий следует обязанность сетевой  организации (ответчика) совершить мероприятия, обеспечивающие технологическое присоединение, выполнение  которых  не  осуществлено.

         Как   пояснил представитель  ответчика, 24.01.2023 ПАО «Россети Центр» было  утверждено  техническое  задание  №  22-028 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов на объекте 10 кВ: «Технологическое присоединение ТП 10/0,4 кВ 630 кВА для электроснабжения строящегося склада с электроприборами, расположенных по адресу: Липецкая обл., Липецкий район, с/п Сырский сельсовет, 

<

...> участок 26, кадастровый (или условный) номер земельного участка: 48:13:1550501:384» и размещена  соответствующая  заявка.

Копии  технического  задания   и   заявки  представлены   в   материалы   дела.

         Ответчиком каких-либо возражений по существу заявленного иска не представлено,  каким   образом   выполнение  технического  задания №  22-028 будет  способствовать   технологическому присоединению объекта  истца не обосновано.

         В силу части 2 ст.9  АПК РФ, лица участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. 

         В данном случае ответчиком не предоставлено доказательств  технологического присоединения объекта  ИП ФИО1

         Удовлетворяя исковые требования, суд исходит из части 3 ¹ статьи 70 АПК РФ, предусматривающей, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

         Таким   образом,  суд полагает  возможным обязать ПАО «Россети Центра» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям согласно условиям договора   № 41918406 (219/102274).

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000 руб. (л.д. 4).

         Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковое  заявление   индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 31848270064382, ИНН 

<

***>) удовлетворить.

         Обязать публичное акционерное общество «Россети Центра» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям согласно условиям договора                  № 41918406 (219/102274).

         Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центра» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 31848270064382, ИНН 

<

***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Липецкой области. 

           Судья                                                                                      Никонова Н.В.